АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-684/2024

г. Салехард

20 июня 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Е.В. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем И.А. Севли,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального казенного учреждения «Управление коммунального заказа»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «ЛенАр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о понуждении к  надлежащему исполнению гарантийных обязательств по муниципальному контракту,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, доверенность от 28.02.2024 (диплом);  от ответчика – представитель не явился;  

руководствуясь требованиями статей 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса РФ,  

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление  коммунального заказа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛенАр»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) не позднее 15.07.2024 надлежащим образом  исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 17.06.2019   № 138-19/ЭА на выполнение работ по объекту капитального строительства: «Здание  ЗАГС г. Муравленко», безвозмездно устранив дефекты в рамках гарантийных  обязательств, а именно:  

 

- выполнить работы по устранению причин отложения растворимых солей на  поверхности облицовочных материалов при испарении воды на поверхности ступеней  главного входа (следы высолов);  

- выполнить работы по замене аккумуляторных батарей на гусеничном  подъемнике для лиц МГН;  

- выполнить работы по замене треснувшей плитки на ступенях входа в подвал в  осях Ж/6-7.  

Принять отказ муниципального казённого учреждения «Управление  коммунального заказа» от исковых требований к обществу с ограниченной  ответственностью «ЛенАр» в части понуждения ответчика надлежащим образом  исполнить гарантийные обязательства по договору от 17.06.2019 № 138-19/ЭА на  выполнение работ по объекту капитального строительства: «Здание ЗАГС  г. Муравленко», безвозмездно устранив дефекты, а именно:  

- выполнить работы по устранению дефекта на натяжном потолке в помещении   № 210 (в виде пореза);  

- выполнить работы по устранению трещин в стенах на лестничной клетке  (помещение № 106);  

- выполнить работы по ремонту межплиточного шва на напольной плитке перед  помещениями № 114,115;  

- выполнить работы по переукладке отслоившейся от основания напольной  плитки в коридоре 1 этажа, перед помещением № 114 (комната персонала);  

- выполнить работы по переукладке отслоившейся от основания напольной  плитки в коридоре 2 этажа, зона для фотосессий № 202-203;  

- выполнить работы по устранению трещин в перегородках в коридоре 2 этажа,  зона для фотосессий № 202-203. Производство по делу в указанной части прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛенАр»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Е.В. Антонова

Судья