Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-198441/17-14-1624

г. Москва

12 марта 2018 года

Резолютивная часть объявлена 15 февраля 2018 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 12 марта 2018 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:                                                      

председательствующего - судьи Лихачевой О.В.  

Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи 

рассмотрев дело по иску ООО «Партнер Групп» (ОГРН 

<

***>) 

к ответчику ОАО "Ямал СПГ" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 2 265 834,73 руб. 

 

в судебное заседание явились: 

от истца – ФИО2, по доверенности от 03.07.2017; 

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 26.10.2017; 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Партнер Групп» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОАО «Ямал СПГ» о взыскании суммы задолженности в размере 2 265 834,73 руб.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик требования истца не признал.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.04.2017 г. по делу № А81-20169/2016 в отношении ООО «Партнер Групп» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО4

Указывает, что в процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника конкурсным управляющим установлено, что ОАО «Ямал СПГ» имеет перед истцом непогашенную задолженность в сумме 2 265 834,73 руб.

На основании заключенного между сторонами договора подряда № 633/13-ЯСПГ на выполнение строительно-монтажных работ на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении от 22 ноября 2013 г. и дополнительных соглашений к нему № 1 от 27.01.2014 г., № 2 от 25.02.2014 г., № 3 от 15.04.2014 г. ООО «Партнер Групп» выполнило, а ОАО «Ямал СПГ» приняло без замечаний строительно-монтажные и пусконаладочные работы на общую сумму 115 251 447,40 руб., что подтверждается: Справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, Актами о приемке выполненных работ КС-2 и Реестрами выполненных работ (в материалах дела).

Ссылается, что обязательства ОАО «Ямал СПГ» по оплате выполненных работ исполнены частично на общую сумму 112 985 612,67 руб., в том числе платежными поручениями (в материалах дела).

Из данных денежных средств аванс в размере 91 092 912,41 руб. был зачтен в оплату стоимости работ по договору подряда № 633/13-ЯСПГ от 22 ноября 2013 г. частично на сумму 77 295 528,54 руб., оставшаяся сумма аванса в размере 13 797 383,88 руб. зачтена в погашение других обязательств ответчика перед истцом (оплаты ТМЦ по договору купли-продажи № 05/15-яспг от 13.01.2017 г.). Данный факт подтверждается Актом о погашении взаимных обязательств от 17.09.2015 г.

Таким образом, по мнению истца, задолженность ответчика составляет 2 265 834,73 руб.

31 июля 2017 г. в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о погашении задолженности.

Ответчиком данная претензия оставлена без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующих обстоятельств.

Как было указано выше, 22.11.2013 г. между ОАО «Ямал СПГ» (заказчик) и ООО «Партнер Групп» (подрядчик) заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажные работ на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении № 633/13-ЯСПГ.

Согласно п. 1.1 договора, подрядчик обязуется выполнить работы на Объектах, указанных в Приложении № 1, по заданию заказчика в соответствии с договором и Технической документацией, включая: выполнение строительно-монтажных работ по строительству с использованием материалов и оборудования в соответствии с условиями договора, иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ; пусконаладочные работы; сдачу Объекта в эксплуатацию совместно с заказчиком и выполнение обязательств в течение гарантийного срока, а, по окончании работ, вместе с полученным результатом, передать заказчику.

В соответствии с п. 1.2 договора, подрядчик в установленные в Приложении № 2 сроки и в пределах договорной стоимости выполнит своими силами и силами субподрядчиков все Работы в объеме, определенном договором и Рабочей документацией.

Статьей 4 договора определены сроки выполнения Работ, в том числе, по Плану-графику производства работ (Приложение № 2).

Согласно п. 3.1 договора, оплата за выполненные и принятые заказчиком работы производятся заказчиком с удержанием 5% от стоимости строительно-монтажных работ в обеспечение надлежащего исполнения подрядчиком обязательств по договору ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 60 календарных дней после предоставления подрядчиком заказчику следующих оригиналов: исполнительной документации в объеме, соответствующем объему предъявляемых к закрытию выполненных работ; пообъектного специфицированного счета подрядчика на оплату в 3 экз.; Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанного подрядчиком и заказчиком, в 5-ти экз., и составленного на основании сметной документации; Акта переработки строительных материалов (в соответствующих случаях) в 2-х экз.; Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной подрядчиком и заказчиком в 5-ти экз.; Специфицированного по единичным объектам счета-фактуры подрядчика на полную стоимость выполненных работ в 2 экз.; Отчета о движении оборудования и материалов заказчика с приложением следующих документов: Акты о приеме оборудования, Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж, Отчет о списании материалов; Журнал учета выполненных работ, в котором ведется накопительный помесячный учет работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и стоимости работ в соответствии с условиями договора, в разрезе объектов (подобъектов) по каждому конструктивному элементу или виду на электронном и бумажном носителях; подписанного реестра актов о приемке выполненных работ за отчетный месяц в одном экземпляре, который предоставляется подрядчиком в Управление капитального строительства заказчика.

В силу п. 3.2 договора, выплата удержанных заказчиком 5% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ по договору в целом, осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 и представления подрядчиком заказчику следующих документов: Акта сверки взаиморасчетов по выполненным Работам, подписанного заказчиком и подрядчиком в 2-х экз., и Акты использованных материалов в 2-х экз.; Пообъектного специфицированного счета подрядчика на подлежащие выплате удержанные суммы; Оригинала Акта приема-передачи от подрядчика заказчику одного подписанного комплекта Исполнительной документации, включая техническую документацию второго комплекта, который включает подписанные акты на скрытые работы; Оригинала подписанного Акта приема-передачи неиспользованных материалов (при наличии таковых); Другие документы, определенно не упомянутые в договоре, но необходимые для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если предоставление этих документов входит в обязанность подрядчика.

Пунктом 3.3 договора установлено, что заказчик вправе задержать платежи при ежемесячных расчетах и при выплате 5%, удерживаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств подрядчика по договору, в случае обнаружения дефектов в выполненных и представленных к оплате работ до их устранения в размере, не превышающем стоимость устранения дефектов, а также, при причинении ущерба заказчику по вине подрядчика в размере, не превышающем суммы ущерба.

Порядок сдачи и приемки работ согласован сторонами в статье 12. Согласно п. 12.1 договора, заказчик производит приемку выполненных работ (этапов Работ) ежемесячно.

В силу п. 12.7 договора, приемка законченного строительством объекта оформляется: Актом приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11; Актом приемки законченного строительством Приемочной комиссией по форме КС-14; Актом о приеме-передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружение) по форме ОС-1; Акт о приеме-передаче здания (сооружения) по форме ОС-1а.

В соответствии с п. 3.4 договора, непредставление подрядчиком заказчику документов, необходимых для исполнения настоящего договору, или предоставление неправильно оформленных документов освобождает заказчика от оплаты и не влечет применение мер ответственности к заказчику.

Условиями п. 6.28 договора, установлена обязанность подрядчика устранить в течение срока, согласованного с заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия договора, и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору.

Так, в адрес истца ответчиком неоднократно направлялись письма о нарушении условий договора, с требованием устранения допущенных истцом дефектов строительно-монтажных работ.

В письмах № 7739-Н/07 от 09.07.2014 г., № 8075-Н/07 от 15.07.2014 г., № 5438-Н/05 от 16.05.2014 г. заказчик обращал внимание подрядчика на наличие дефектов и недоделок, отступлений от проекта, на наличие фактов систематического непредставления заказчику исполнительной документации в срок, а также на иные несоответствия, предусмотренные условиями договора.

Письмом № 2620-Н/03 от 13.03.2015 г. ответчик снова обратился к истцу с требованием устранения дефектов и недостатков ранее выполненных работ по общежитию № 30 (поз. по ГП 1.1.1 «З»), так как в результате ненадлежащего качества выполненных работ по монтажу инженерных систем (водоснабжение и водоотведение) и гидроизоляционных работ, вода стала проникать в перекрытие цокольного этажа, выполненное из деревянных панелей (состав панелей: деревянный каркас обшитый плитами OSB, заполненный утеплителем). В результате проникновения влаги в тело перекрытия пришло в негодность напольное покрытие помещений 1-го этажа (отслоение напольной плитки), а также происходило отслоение плитки по стенам, ввиду некачественно выполненных гидроизоляционных работ. Кроме того, вышеуказанным письмом заказчик проинформировал подрядчика, что в случае, если работы по устранению дефектов не будут выполнены в указанные сроки, работы по устранению дефектов будут выполнены другой подрядной организацией. Срок для устранения замечаний был установлен более 2-х месяцев, то есть достаточный для качественного и своевременного устранения допущенных подрядчиком дефектов. Подрядчик дефекты не устранил, на требования заказчика должным образом не отреагировал.

Ответчик обратился в адрес истца с требованием устранения дефектов выполненных работ письмами № 39004-Н/03 от 23.03.2015 г., № 4796-Н/04 от 30.04.2015 г.

На вышеуказанные письма подрядчик также не отреагировал, уклонился от проведения работ по устранению дефектов.

В результате, для устранения дефектов некачественно выполненных работ ответчиком было проведено обследование и составлена дефектная ведомость, в которой отражен перечень работ и затрат, которые ответчик должен был понести для устранения указанных дефектов в работах истца. На основании проведенного обследования и дефектной ведомости ответчик был вынужден подписать соответствующее дополнительное соглашение к договору № 732/15-ЯСПГ от 08.10.2015 г., заключенному между ОАО «Ямал СПГ» и ООО «ВымпелСтрой». Ответчиком произведен расчет объема и стоимость затрат, необходимых для восстановления ранее выполненных ООО «Партнер Групп» работ, что составляет 2 843 309,28 руб.

Указанная сумма значительно превышает размер зарезервированной суммы, которая по своей сути является обеспечительной.

Согласно ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст. 746 Кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача по акту результата работ заказчику и принятие его последним (ст. 702, 711, 720, п. 4 ст. 753 Кодекса).

Согласно ст. 723 Кодекса, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Кодекса).

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах (ст. 754 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

При этом, в силу условий договора, обязательным условием наступления для заказчика момента исполнения обязательства по оплате выполненных работ является получение акта формы КС-11, который предназначен для оформления приемки законченного строительством объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов.

Установление данного порядка оплаты не противоречит требованиям п. 2 ст. 746 ГК РФ (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2013 г. № 4030/13).

В то же время, требования истца противоречат существу договоренностей, так как доказательств устранения недостатков, выявленных ответчиком, нет.

С учетом ст. 329, 421 ГК РФ, п. 3.1, 3.3, 3.4 договора, следует отметить, что возврат гарантийного удержания представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства, условием для наступления которого, является подписание заказчиком и подрядчиком акта окончательной приемки по форме КС-11; порядок оплаты работ сторонами в договоре определен, а условия окончательной оплаты работы не наступили.

Кроме того, сумма денежных средств, необходимая для устранения недостатков и дефектов выполненных истцом работ, превышает размер зарезервированной и удерживаемой ответчиком суммы, носящей в любом случае обеспечительный характер.

Таким образом, у заказчика отсутствует обязанность по оплате выполненных работ в полном объеме, в связи с тем, что сумма денежных средств, необходимая для устранения недостатков работ, выполненных подрядчиком в рамках договора, превышает размер зарезервированной и удерживаемой суммы, в любом случае носящей обеспечительный характер.

Ввиду изложенного выше, у суда не имеется правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Государственная пошлина распределяется по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с ООО «Партнер Групп» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ 34 329,17 руб. – государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его принятия. 

Судья: О.В.Лихачева