20/2023-208343(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-8158/2023

г. Астрахань

06 декабря 2023 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Баскаковой И.Ю.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 173, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Внести изменения в государственный контракт от 26.04.2022  

 № 03252000067220000220001, изложив пункт 3.1 контракта в следующей редакции: 

 «3.1. Сроки выполнения работ: С даты заключения контракта по 25 декабря 2023  

года». 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья И.Ю. Баскакова  

06 декабря 2023 года