АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440000, г. Пенза, ул. Кирова 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 56-11-93, 

http://www.penza.arbitr.ru/      

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Пенза                                                                                                 Дело № А49-3154/2024

 

«10» июня 2024 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  Н. Е. Гук,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ФИО1/ФИО2 ул., д. 1/2, Пенза г., 440000; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ОНС» (Московская ул., стр. 70, офис 5, Пенза г., 440000; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 70313 руб. 50 коп., 

 

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ООО «ОНС» о взыскании неустойки в сумме 70313 руб. 50 коп. за период с 26. 12. 2023 года по 06. 03. 2024 года, начисленной за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт)  №2240-009101 от 12. 01. 2023 года (в ред. дополнительного соглашения № 2 от 16. 10. 2023 года), с 07. 03. 2024 года неустойки по день фактического исполнения денежного обязательства. Требования заявлены на основании ст. ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса РФ.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 04. 04. 2024 года исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Пензенской области с указанием о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства (п. 1 ст. 227 АПК РФ). В определении также указаны данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде (код доступа).

Указанным судебным актом ответчику предложено в срок до 26. 04. 2024 года представить письменный мотивированный отзыв на иск с доказательствами, его обосновывающими. 

Для представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений  в обоснование своей позиции  сторонам предоставлен срок до 24. 05. 2024 года. 

Определение Арбитражного суда Пензенской области от 04. 04. 2024 года размещено на официальном сайте арбитражного суда Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.penza.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru) 05. 04. 2024 года.

О принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Пензенской области и возбуждении производства по делу в порядке упрощенного производства ответчик извещен своевременно и надлежащим образом в порядке, предусмотренном ст. 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ (л.д. 32).

Согласно п. 5 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело подлежит рассмотрению без вызова сторон на основании имеющихся доказательств.

По правилам ч. 1 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу. 

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня после дня ее принятия.

31. 05. 2024 года по делу №А49-3154/2024 принято решение, резолютивная часть которого размещена на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 01. 06. 2024 года.

Указанным судебным актом исковые требования ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» удовлетворены частично, с ООО «ОНС» в пользу ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» взысканы неустойка в сумме 36894 руб. 18 коп. за период с 26. 12. 2023 года по 06. 03. 2024 года, с 07. 03. 2024 года неустойка по день фактического исполнения денежного обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2813 руб. В остальной части иска отказано.

03. 06. 2024 года от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения по делу № А49-3154/2024.

Согласно ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обращение истца с заявлением о составлении мотивированного решения и подача данного заявления в установленный законом срок, являются основаниями для составления  мотивированного решения по настоящему делу.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом, 12. 01. 2023 года между ПАО «Россети Волга» (Сетевая организация) и ООО «ОНС» (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт) № 2240-00901, по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (технологическое присоединение) ВЛ-10кВ, питающей ТП-10/0,4 кВ № 5109 для энергоснабжения нежилых зданий (заявка № ПЭ000008978 от 14. 12. 2022 года), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 630 кВт; - категория надежности: 3; - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 75 кВт;  - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение: 10 кВт (л.д. 53-55).

В соответствии с п. 1.4 данного договора точкой присоединения является ВЛ-10кВ №10 «Алферовская» ПС 110/10кВ «Терновка», указанная в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (технические условия).

В силу п. 1.5 данного договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении № 1 к договору. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня  заключения договора (п. 1.6 договора). 

Согласно п. 2.1.1 - 2.1.4 данного договора Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.

В соответствии с п. 2.3.1 - 2.3.7 данного договора Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае, если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного акта от Сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение по договору составляет 325525 руб. 45 коп. без НДС, 390630 руб. 54 коп. с НДС (НДС-20%) (пункт 3.2 договора).

Дополнительным соглашением № 2 от 16. 10. 2023 года к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2240-009101 от 12. 01. 2023 года стороны согласовали, что мероприятия по технологическому присоединению должны быть осуществлены в срок до 25. 12. 2023 года (пункт 1.6 договора) (л.д. 20).

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, являющимся Приложением №1 к договору, Сетевая организация осуществляет: 1) создание технической возможности в существующей точке присоединения для технологического присоединения энергопринимающих устройств путем выполнения необходимых мероприятий до границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя; 2) расчет установок РЗА по яч. № 10 ПС 110/10 кВ «Терновка» на основании сведений, представленных заявителем в соответствии с п. 11.7; 3) проектирование и установку измерительного комплекса учета электроэнергии в соответствии с требованиями  раздела Х «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ № 442 от 04. 05. 2012 года; 4) фактическое присоединение энергопринимающих устройств к своим электрическим сетям в существующей точке присоединения, при этом включение мощности будет произведено Пензенским производственным отделением филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» после проведения сетевой организацией проверки выполнения технических условий и оформления акта о выполнении ТУ.

Заявитель осуществляет: 1) мероприятия по технологическому присоединению своих энергопринимающих устройств к существующей точке присоединения – ВЛ-10кВ № 10 «Алферовская» ПС 110/10кВ «Терновка»; 2) проверку существующего электросетевого хозяйства 0,38-10кВ, находящегося  на балансе Заявителя, требуемым параметрам технологического присоединения энергопринимающих устройств (п.п. 3, 4, 5 ТУ). При необходимости осуществляет замену: 3) проектирование электросетевого хозяйства 0,38-10 кВ, необходимого объема защиты и автоматики в соответствии с категорийностью, при этом содержание разделов проектной документации должно соответствовать требованиям норм действующего законодательства; 4) строительство и монтаж электросетевого хозяйства 0,38-10 кВ (в границах своего земельного участка, обеспечивающего технологическое присоединение энергопринимающих устройств в соответствии с требуемыми параметрами (п.п. 3,4,5 ТУ); 5) проектирование и установку в соответствии с проектом оборудования, обеспечивающего соблюдение максимального значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети в точке поставки в размере 0,4 согласно требований Приказа Министерства энергетики РФ от 23. 06. 2015 года № 380; 6) проектирование и установку на границе раздела балансовой принадлежности оборудования, обеспечивающего функционирование и реализацию управляющих воздействий устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики; 7) не позднее 10 рабочих дней до уведомления о выполнении технических условий представить Сетевой организации для расчета установок и настройки РЗА следующие сведения: протяженность ВЛ (КЛ), сечение и марку провода (кабеля), тип и мощность установленных трансформаторов; 8) проект электроснабжения согласовывает с филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» (в двух экземплярах с последующей передачей одного экземпляра с Пензенское производственное отделение) и иными заинтересованными организациями. В проекте предусматривает раздел «Качество электрической энергии», «Релейная защита» (л.д. 21).

Срок действия ТУ - 2 года со дня заключения договора об осуществлении, технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий).

27. 09. 2023 года истец направил в адрес ответчика извещение о готовности объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга» к присоединению жэнергопринимающих устройств объекта – ВЛ-10 кВ, питающей ТП-10/0,4кВ № 5109 для электроснабжения нежилых зданий, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:3009001:89 по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

...>, максимальная мощность 630 кВт, категория надежности III, класс напряжения 10 кВ к сетям ПАО «Россети Волга» (извещение № МР6/124/06/1113 от 25. 09. 2023 года) (л.д. 59, 60).

Извещение получено ответчиком 29. 09. 2023 года (л.д. 70).

Ссылаясь на то, что  ответчиком нарушены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2240-009101 от 12. 01. 2023 года, ПАО «Россети Волга» в лице филиала  «Пензаэнерго» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ОНС» о взыскании неустойки в сумме 70313 руб. 50 коп. за период с 26. 12. 2023 года по 06. 03. 2024 года. 

Ответчик факт нарушения сроков по уведомлению сетевой организации о выполнении им мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям не оспаривает. В письменном ходатайстве просит применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить неустойку до ? учетной ставки Банка России, ссылаясь на несоразмерность неустойки последствиям  нарушения обязательства.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27. 12. 2004 года № 861.

В соответствии с пунктами 3, 30, 30.1 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. 

В силу пункта 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в сроки, установленные Правилами. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике и пункты 16, 17 Правил № 861).

Согласно подпункту «в» пункта 16 Правил № 861 договор о технологическом присоединении должен содержать обязательные условия об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне неустойку по договору. 

В соответствии с пунктом 16(6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

По условиям п. 1.6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2240-009101 от 12. 01. 2023 года (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 16. 10. 2023 года) мероприятия по технологическому присоединению должны быть осуществлены в срок до 25. 12. 2023 года (пункт 1.6 договора) (л.д. 20).

За неисполнение ответчиком обязанности по уведомлению сетевой организации о выполнении им мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, предусмотренных техническими условиями, истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 26. 12. 2023 года по 06. 03. 2024 года.

В данном случае, требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению арбитражный суд признает обоснованными,  поскольку в силу ст. 330 ГК РФ в случае просрочки исполнения обязательств должник обязан уплатить кредитору определенную денежную сумму, в данном случае – неустойку, размер которой определен в п. 5.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2240-009101 от 12. 01. 2023 года и составляет 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Согласно представленному истцом расчету, ответчику начислена неустойка в сумме 70313 руб. 50 коп. за период с 26. 12. 2023 года по 06. 03. 2024 года, исходя из размера неустойки - 0,25% и общего размера платы за технологическое присоединение - 390630 руб. 54 коп.

Ответчик просит применить положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ и снизить размер неустойки до 35156 руб. 75 коп., ссылаясь на несоразмерность начисленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательств.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21. 12. 2000 года № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Согласно пункту 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Правила статьи 333 Гражданского кодекса РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Согласно п.75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Учитывая, что одним из критериев для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств является установление чрезмерно высокого процента неустойки, что в данном случае имеет место быть, так как 0,25% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки составляет 91,25% годовых в 2023 году и 91,5% в 2024 году, тогда как в 2023 году ставка рефинансирования составляла от 7,5% до 16% годовых, в 2024 году – 16% годовых, арбитражный суд приходит к выводу о том, что имеются основания для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ и снижения размера неустойки.

Согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 81 от 22.12.2011 года «О некоторых вопросах применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ» разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. 

Учитывая высокий процент начисленной неустойки, отсутствие каких-либо доказательств наступления негативных последствий у истца, незначительный срок неисполнения обязательства, арбитражный суд  признает возможным снизить размер неустойки до трехкратной ключевой ставки Банка России – 48% годовых (16 % х 3), что составляет 36894 руб. 18 коп.

В остальной части исковые требования о взыскании неустойки за период с 26. 12. 2023 года по 06. 03. 2024 года удовлетворению не подлежат.

Требования истца о взыскании с ответчика неустойки, начиная с 07. 03. 2024 года по день фактического исполнения денежного обязательства, арбитражный суд также признает обоснованными, поскольку как следует из разъяснений п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24. 03. 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ» если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам ст. 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Поскольку требование истца о взыскании суммы неустойки признано арбитражным судом обоснованным и частичное удовлетворение требований связано с применением ст. 333 Гражданского кодекса РФ, следовательно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в полном объеме, то есть в сумме 2813 руб.

Руководствуясь ст. ст. 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

 

Р Е  Ш И Л:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ОНС» (ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 36894 рубля 18 копеек за период с 26. 12. 2023 года по 06. 03. 2024 года, с 07. 03. 2024 года неустойку по день фактического исполнения денежного обязательства.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ОНС» (ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2813 рублей.  

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                                             Н. Е. Гук