ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-25966/2024

г. Новосибирск

25 сентября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А.  (до перерыва), ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому  Муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного  строительства" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

об исполнении гарантийных обязательств по муниципальному контракту от  08.04.2019 № 27/19 и от 25.02.2020 № 17/20,  

при участии представителей: истца – ФИО2 (доверенность от 02.05.2024, паспорт, диплом); 

ответчика – ФИО3 (доверенность от 15.07.2024, паспорт, диплом),  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ОГРН 

<

***>) об исполнении гарантийных обязательств по  муниципальному контракту от 08.04.2019 № 27/19 и от 25.02.2020 № 17/20  удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ОГРН  

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения в законную силу, при  наступлении климатических условий (в сухую погоду, весной и летом при температуре  

окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С), устранить следующие  недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту от  25.02.2020 № 17/20:  

на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по  улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (участок от ПК 2+70 до  ПК 15+55), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: ул.Большевистская №  119а-123/1:  

- выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10 шт. (четная  сторона в сторону Бугринского моста: пересечение с ул. Добролюбова; Большевистская,  26, 26а, 26в, 44; нечетная сторона: Большевистская, 143; после ООТ «Мелькомбинат» в  20 метрах правая полоса; Большевистская, 125/9 правая полоса; Большевистская, 123;  Большевистская,121);  

-выкрашивание продольного шва – 15 п.м (на примыкании между ул.  Большевистская, 127 и 125/1; на примыкании ул. Большевистская, 119а).  

по муниципальному контракту от 08.04.2019 № 27/19: 

на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по  улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска (участок от дома № 48 до  ул. Выборная (от ПК 15+55 до ПК 30+34,8)), в том числе ликвидация мест концентрации  ДТП: перекресток ул. Большевистская и ул. Днепрогэсовская; ул. Большевистская №  229»:  

-выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10шт. (четная  сторона: Болыпевистская,48; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 130в; перед  ООТ «Храм» над р.Плющиха; нечетная сторона: под надземным пешеходным  переходом Болыневистская,229; после ООТ «Храм» над р.Плющиха; на повороте на  ул.Днепрогэсовскую; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 175/6 напротив  стоматологии № 4; Большевистская, 151 напротив «Wildberris» правая полоса).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета расходы на оплату государственной  пошлины в размере 3 600 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  

апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со  дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья В.Г. Осипов