203/2019-99564(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 16 апреля 2019 года 

по делу А33-33314/2017 Красноярск 

16 апреля 2019 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Агродеталь» безвозмездно  устранить в трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу имеющиеся  недостатки строительных и отделочных работ и покрытий в доме по адресу: 

<

...> И, а именно:  

1. произвести ремонт примыкания оцинкованного козырька путем герметизации и  перемонтажа оцинкованного козырька в местах примыкания к вентилируемому фасаду -6,8  п.м., демонтаж/монтаж керамогранитных облицовочных плит фасада - 4.1м2.  

2. выполнить гидроизоляцию и утепление примыкания плиты балкона квартиры № 52 на  15 этаже со стеной согласно проектной документацией шифр № 424-24-12.1 -КМ и шифр   № 054-05-АР и изменению к проекту от 26.11.2014г.: - демонтаж/монтаж керамогранитных  облицовочных плит фасада - 1.4м2. демонтаж/монтаж утеплителя - 0,14 м3, подливку  цементно-песчаного раствора -1.1 м2, устройство гидроизоляционного ковра в два слоя - 1.4  м2, демонтаж/монтаж керамической плитки - 1.1м2 с устройством уклона в сторону улицы,  для обеспечения водоотведения с плиты.  

3. привести в соответствии с СП 30.13330.2012 системы канализации К1, а именно  магистральной трубы диаметром 100 и 150 мм в нормальное эксплуатационное состояние  при сохранении трубы, проложенной в соответствии с изменениями к проекту, путем  восстановление уклонов на участках №№ 2,3,9,12 (согласно нумерации по таблице № 1  заключения эксперта № 1296 Государственного предприятия Красноярского края  «Красноярский региональный центр энергетики и экспертизы» от 01.11.2018г.).  

В удовлетворении стальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агродеталь» (ИНН 

<

***>, 

ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания «РОЩА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины, 46 052 руб. судебных издержек.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья О.А. Антропова