ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-67983/2017

Дело № А40-86554/17

г. Москва

01 февраля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 01 февраля 2018 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Титовой И.А.,

Судей: Бодровой Е.В., Комарова А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «КФ «Алые Паруса»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2017 

по делу № А40-86554/17 

принятое судьей О.А. Акименко,

по иску ОАО «Кристина» (ИНН 

<

***>)

к ответчику ООО «КФ «Алые Паруса» (ИНН 

<

***>)

о взыскании общей суммы задолженности в размере 1 119 841,67 руб., по встречному иску,

о взыскании задолженности в размере 360 000 руб.,

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от  05.07.2017,

от ответчика: ФИО3; ФИО4 по доверенности от 25.10.2017; ФИО5.(гендиректор),

У С Т А Н О В И Л:

ОАО «Кристина» просит взыскать с ООО «КФ «Алые Паруса»  аванс в размере 1 040 000 руб., неустойку  в размере 79 841,67 руб., расторгнуть договор от 17.03.2016 № 17-03/16, заключенный между ОАО «Кристина» и ООО «КФ «Алые Паруса».

ООО «КФ «Алые Паруса» обратилось в суд со встречным иском к ОАО «Кристина» о признании обязательств ООО Кондитерская фабрика «Алые паруса» по договору изготовления, поставки и монтажа оборудования № 17-03/16 от 17 марта 2016 года выполненными, о взыскании 360 000 руб. задолженности.

Решением от 24.11.2017 с ООО «КФ «Алые Паруса»  в пользу ОАО «Кристина» взыскан аванс в размере 1 040 000 (один миллион  сорок тысяч) руб., неустойку  в размере 79 841 (семьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) руб. 67 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 24 189 (двадцать четыре тысячи сто восемьдесят девять) руб. В остальной части отказано. Встречные требования оставлены без удовлетворения.

ООО «КФ «Алые Паруса» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, удовлетворить встречный иск. 

Представитель ООО «КФ «Алые Паруса» доводы апелляционной жалобы поддержал, считает решение суда подлежащим отмене.

В судебном заседании представитель истца, возражала по доводам апелляционной жалобы, по мотивам, изложенным в отзыве, считает решение суда законным и обоснованным. 

Рассмотрев дело в порядке статей  266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции,  между ОАО «Кристина» (заказчик) и ООО «КФ «Алые Паруса» (исполнитель)   был заключен Договор № 17-03/16 от  17 марта 2016г.

В соответствии с п. 1.1. Договора, Исполнитель обязуется разработать, изготовить, поставить, смонтировать и сдать в эксплуатацию оборудование для производства кондитерских рулетов из выпечного пласта бисквита и передать в собственность Заказчику вышеуказанное оборудование согласно спецификации (Приложение к договору), а Покупатель обязался принять оборудование и оплатить его стоимость и работы по монтажу в размере 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч)  рублей.

Договор № 17-03/16 от  17 марта 2016г. по своей юридической природе является смешанным, который включает элементы договора подряда (генеральный подряд) (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации), договора возмездного оказания услуг (глава 39 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Как следует из материалов дела, ОАО «Кристина» произвела частичную оплату в размере 1 040 000 рублей,  что подтверждается платежными поручениями №№ 10746 от 18.10.2016, 11615 от 09.01.2017, 395 от 01.04.2016.

Согласно п. 2 ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что полученный товар не соответствует условию Договора о качестве товара. 

Оборудование до настоящего момента не введено в эксплуатацию. 

При работе трехвальцового сворачивателя плотность скручивания рулета не соответствует технологии производства рулета, при выходе из узла сворачивателя происходит непроизвольное разворачивание жгута, вращении шнеков скручивателя происходит со смещением из-за чего невозможно отрегулировать зазор между шнеком и рулетным пластом с нанесенным на нем начинкой в виде крема в следствии чего происходит замазывание скручивателей начинкой, гильотинная резка не соответствует техническим параметрам указанным в спецификации   к  договору №17-03/16, а   именно:   отсутствует   электронная система отслеживания скорости бисквитных жгутов, при работе гильотины размер отрезанных бисквитов отличается на 5мм, что недопустимо технологией. Узел продольного разделения пласта - отсутствует.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Согласно п. 1 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом,   иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного,   так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные в п. 2 ст. 405 Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Несмотря на то, что истец  исполнил свои обязательства в полном объеме, ответчик работы по договору не выполнил.

В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Частью 2, 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда, либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор, может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,  на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Таким образом, поскольку ответчик нарушил условия договора, истец, с учетом положений ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, в одностороннем порядке расторг Договор, направил ответчику уведомление претензию о расторжении договора и возврате денежных средств от 27 марта 2017 г., что подтверждается квитанцией об отправке почтового уведомления с опись вложения.

Таким образом, договор считается расторгнутым.

Требование истца по иску о расторжении договора не подлежит удовлетворению, так как договор был расторгнул истцом в одностороннем досудебном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Поскольку материалами дела подтверждается факт перечисления истцом ответчику аванса в размере 1 040 000 руб., а ответчиком работы по договору не выполнены в полном объеме, услуги не оказаны, товар надлежащего качества не поставлен, не представлено доказательств выполнения работ, либо оснований, препятствующих исполнению договора, то аванс в сумме 1 040 000 руб. подлежит возврату как неосновательное обогащение, в связи с признанием договора расторгнутым.

Согласно ч. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с положениями ст. 395 Кодекса истцом исчислена законная неустойка - сумма процентов в размере 79 841 руб. 67 коп., исходя из ставки банковского процента по вкладам физических лиц, существующей в месте нахождения истца, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды.

Расчет истца ответчиком по существу не оспорен, судом первой инстанции проверен,  и обоснованно признан арифметически и методологически выполненным верно. Учитывая изложенные положения законодательства, условия сделки, заключенной сторонами, а также установленные судом фактические обстоятельства дела, суд первой инстанции обоснованно нашел требования истца подлежащими удовлетворению.

Касательно встречных исковых требований, апелляционная коллегия пришла к следующим воводам.

Встречные исковые требования ООО «КФ «Алые Паруса» к ОАО «Кристина» о признании обязательств ООО Кондитерская фабрика «Алые паруса» по договору изготовления, поставки и монтажа оборудования № 17-03/16 от 17 марта 2016 года выполненными, о взыскании 360 000 руб. задолженности обоснованы следующим.

В обоснование исковых требований истец по встречному иску ссылается на то, что  согласно п. 5.1 Договора цена оборудования и услуг составляет - 1400000  руб.

В обоснование исковых требований истец по встречному иску ссылается на то, что  30 ноября 2016 года комиссией в составе представителей ООО «Невский кондитер Белинский» главного инженера ФИО6, зав. производством ФИО7, гл. технолога ФИО8, механика линии ФИО9 и представителя ООО Кондитерская фабрика «Алые паруса», в лице генерального директора ФИО5, составлен предварительный акт передачи оборудования о том, что в соответствии с договором был осуществлен запуск оборудования по скручиванию и резке бисквитных рулетов. Из акта следует, что оборудование запущено в работу не на полную мощность, требует дополнительных регулировок декоратора и закрутки рулетов, обучение механика и оператора линии. 

В заключении акта указано, что для непрерывной работы линии данного оборудования в течении недели (не менее 168 часов), обучения персонала будет составлен акт приемки.

Таким образом, оборудование по скручиванию и резке бисквитных рулетов было фактически готово к эксплуатации на дату - 30 ноября 2016 года, что подтверждается, в том числе фото и видеоматериалами и следующими документами:

В обоснование исковых требований истец по встречному иску ссылается на то, что  им был выставлен счёт 27 сентября 20016 г. на оплату 20 % за бисквитную линию, требование по оплате были дважды продублированы 7 октября 2016 года, где ООО Кондитерская фабрика «Алые паруса» письмом № 7-10/16 сообщило ОАО «Кристина» о том, что оборудование рулетной линии по Договору изготовлено и монтировано по месту ее дальнейшей эксплуатации, осуществлен тестовый запуск оборудования и получен образец готовой продукции (бисквитного рулета), а претензии от ОАО «Кристина», о несоответствии полученного образца товара условиям Договора о его качестве ООО Кондитерская фабрика «Алые паруса» не получило, а ОАО «Кристина» произвела 17 октября 2016 г. промежуточный платёж.

В обоснование исковых требований истец по встречному иску ссылается на то, что  ООО Кондитерская фабрика «Алые паруса» в адрес ОАО «Кристина» 18.12.2016 г. направило письмо с просьбой об окончательной оплате выполненных работ в сумме 560 000 рублей, однако оплата была осуществлена 09.01.2017 частично на сумму 200 000 рублей.

В связи с чем истец по встречному иску ссылается на то, что  ОАО «Кристина» не приняло все меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору: отказалось от подписания окончательного акта приема-передачи оборудования и принятия его в эксплуатацию, сотрудники ОАО «Кристина» противодействовали монтажу оборудования и создавали условия для его порчи, ОАО «Кристина» не оплатило задолженность в размере 360 000 рублей.

В обоснование исковых требований истец по встречному иску ссылается на то, что  поскольку согласно п. 9.1 Договора ООО Кондитерская фабрика «Алые паруса» фактически выполнило свои обязательства до 31 декабря 2016 года,  с ОАО «Кристина» подлежит взысканию задолженность в размере 360 000 руб.

Суд первой инстанции пришел к следующим обоснованным выводам.

В соответствии с п. 1.1 договора Поставщик обязуется разработать, изготовить, поставить, монтировать и сдать в эксплуатацию оборудование для производства кондитерских рулетов из выпечного пласта бисквита, а Покупатель — принять и оплатить работу и оборудование. В состав оборудования входит: Узел продольного разделения пласта,  Узел подхвата и принудительного трёх вальцового сворачивания с электромеханическими приводами,  Узел выравнивания,  Гильотинная резка с функцией отслеживания скорости транспортерной ленты и функцией смещения изделий,  Доставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы,  Обучения ответственного лица заказчика работе с оборудованием,  Дополнительные требования к оборудованию:  Оборудование оснащено электронными устройствами управления, защитными системами техники безопасности. Поверхности, контактирующие с продуктом, изготавливается из материалов, применяемых для пищевого производства. Производительность оборудования по готовому продукту составляет 1000 кг в час.

В соответствии с п. 3.1 договора Приёмка оборудования осуществляется подписанием сторонами Акта выполненных работ.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации следует обязанность подрядчика  сдать объем работ, сообщив заказчику о готовности их к сдаче.

В порядке ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом по встречному иску не представлено доказательств составлении, вручения или направления Акта выполненных работ в соответствии с условиями договора. Таким образом, истцом по встречному иску не доказан факт выполнения работ на заявленную сумму требования, не подтвержден факт сдачи работ в порядке ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд  правомерно установил, что истец по встречному иску не доказал факт выполнения условий договора до одностороннего расторжения договора со стороны ответчика по встречному иску, в связи с чем встречное исковое заявление признано судом первой инстанции необоснованным и не подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Судебные расходы по апелляционной жалобе возлагаются на заявителя жалобы.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2017 по делу № А40- 86554/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судья:  И.А. Титова 

Судьи:  Е.В. Бодрова 

 А.А. Комаров 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.