РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-145307/23-126-1142

г. Москва

16 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел помощник судьи Антоновский С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО" (ОГРН 

<

***>) 

к ООО "В-СТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) 

об обязании исполнить гарантийные обязательства 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО1, доверенность от 22.06.2023 

от ответчика: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО "В-СТРОЙ" об обязании ООО "В-СТРОЙ" в течении 30 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу, устранить своими силами и за свой счет, выявленные в гарантийный период недостатки в выполненных работах, указанных в Акте о недостатках от 31.05.2023г., по договору 119-44/21 от 20.04.2021 года на выполнение работ по комплексному ремонту дворовых территорий района Восточное Измайлово, а именно: 

1.1 - ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1: 

- Устройство живой изгороди 1200 пог.м,

- устройство входной «декоративной арки» на спортивной площадке 5 шт. 

1.2 - ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2

- устройство Джаммбоксы 4 шт., Трибуна с навесом на 18 человек 2 шт. 

1.3 - произвести замену резинового покрытия на дворовой территории по адресу: 

<

...> имеющего группу строительного материала ВЗ (легковоспломеняемый) на резиновое покрытие, имеющего согласно сертификата пожарной безопасности, следующие характеристики: 

по группе горючести — умеренно горючие (Г2); 

по группе воспламеняемости — умеренно воспламеняемые (В2); 

по дыму — умеренно дымообразующие (Д2). 

1.4 - произвести высадку (восстановить озеленение): 

- ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2, кустарник декоративный - 217 шт. 

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1, кустарник Спире японская - 2 768 шт.

- ул. 15-я Парковая д. 16, корп. 2 кустарник декоративный - 450 шт.

- ул. Первомайская д. 119, кустарник Спире японская - 887 шт.

- ул. Первомайская д. 121, калина - - 321 шт. 

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1, газон рулонный - 2 600 кв.м. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в соответствии со ст.41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.

Выслушав представителей истца, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Как следует из материалов дела 20.04.2021 года между ГБУ г. Москвы «Жилищник района Восточное Измайлово» (Заказчик) и ООО «В-СТРОЙ» (Подрядчик) заключен Договор 119-44/21 на выполнение работ по комплексному ремонту дворовых территорий района Восточное Измайлово, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по комплексному ремонту дворовых территорий района Восточное Измайлово (далее- работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение№1 к настоящему Контракту, являющееся его неотьемлемой частью) (далее- Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Цена Контракта составляет 34 372 171 руб. 31 коп., в т.ч. НДС 20% (и. 2.1).

Срок выполнения работ: с 01 мая 2021г. до 25.08.2021 (и. 3.1).

Согласно Актам сдачи-приемки выполненных работ, Работы приняты Заказчиком:

ул. Первомайская д. 119 - АКТ сдачи - приемки от 07.10.2021г.

ул. Первомайская д. 121 - АКТ сдачи - приемки от 07.10.2021г.

ул. Первомайская д. 80 - АКТ сдачи - приемки от 25.08.2021г.

ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2 - АКТ сдачи - приемки от 03.11.2021г.

ул. 9-я Парковая, д. 6, корп.1 - АКТ сдачи - приемки от 18.10.2021г., от 21.12.2021г.

ул. 15-я Парковая, д. 26, корп. 4 - АКТ сдачи - приемки от 02.11.2021г., от 12.11.2021г.

ул. 15-я Парковая, 16, корп. 1 -Акт сдачи- приемки от 10.06.2021г.

ул. 15-я Парковая, 16, корп. 2 -Акт сдачи- приемки от 21.06.2021г.

Ответчик перед Истцом, не исполнил обязательства по гарантийному письму ООО «В-СТРОЙ» от 22.12.2021г., ранее принятых и оплаченных Заказчиком:

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1 (Устройство живой изгороди 1200 пог.м, устройство входной «декоративной арки» на спортивной площадке 5 шт.) на сумму 1 757 415 руб. 74 коп. в срок до 30.04.2022г.

- ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2 (Джаммбоксы 4 шт., Трибуна с навесом на 18 человек 2 шт.) на сумму 300 464 руб. 40 коп. в срок до 20.01.2022г.

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту). При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, (п. 6.1 - 6.3)

Согласно п. 4 Технического задания, Гарантийный срок результата выполненных Работ, составляет:

п. 4.1 - Гарантийный срок на выполненные работы (устройство) составляет не менее 3 (трех) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

п. 4.2. - Гарантийный срок на выполненные работы (ремонт) составляет не менее 2 (двух) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

п. 4.3. - Гарантийный срок на выполненные работы по озеленению (посадка, пересадка деревьев, кустарников) составляет не менее 3 (трех) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

п. 4.4. - Гарантийный срок на выполненные работы (установка) в соответствии и с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 2 (двух) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Так, в процессе использования результатов выполненных работ обнаружены недостатки, которые могут повлечь отступления от ГОСТ Р 52169-2012 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования), регламентирующего требования, которым должна отвечать детская площадка, что подтверждается техническим заключением, проведенным Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» 03 октября 2022 года

По результатам проведенных исследований было выдано техническое заключение № 014/11, регистрационный номер №41 к/24 от 03.10.2022 г. об установлении группы строительного материала (резиновой крошки) ВЗ (легковоспломеняемого).

Выявленные в ходе исследования резинового покрытия на дворовой территории по адресу: ул. Первомайская, д. 119, недостатки являются существенными, не позволяющими эксплуатировать объект дворовой территории в соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности.

В Федеральном законе Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» даны определения, а также названы классы пожарной опасности строительных материалов. Положения настоящего закона обязательны к исполнению.

В связи с невозможностью безопасной эксплуатации, Ответчику были направлены требования об устранении выявленных дефектов и исполнения обязательств по гарантийному письму, в срок до 17.06.2022 года, (претензия №исх.520/22 от 08.06.2022г.)

Повторной претензией № исх.282/2023 от 26.05.2023г., Истцом в адрес Ответчика было направлено уведомление о необходимости явки для составления Акта о недостатках, выявленных в гарантийный период.

Направленные требования Ответчик оставил без удовлетворения.

31.05.2023г. был составлен Акт о недостатках с перечнем выявленных нарушений, без участия представителя Ответчика, извещенного надлежащим образом, согласно которому:

1. Не исполнены обязательства по гарантийному письму ООО «В-СТРОЙ» от 22.12.2021г., ранее принятых и оплаченных Заказчиком:

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1 (Устройство живой изгороди 1200 пог.м, устройство входной «декоративной арки» на спортивной площадке 5 шт.) в срок до 30.04.2022г.

- ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2 (Джаммбоксы 4 шт., Трибуна с навесом на 18 человек 2 шт.) в фок до 20.01.2022г.

2. Согласно Техническому заключению №014/11 по результатам проведения лабораторных испытаний на определения группы воспламеняемости строительного материала, регистрационный №41 К/24 от 03.10.2022г., покрытия из резиновой крошки, уложенного при выполнении работ по Контракту, получен показатель пожарной опасности строительного материала ВЗ (легковоспламеняемый) по ГОСТ 30402 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».

Покрытие уложено по следующим адресам:

- ул. Первомайская д. 119, площадь 441 кв.м,

3. Результат выполненных работы по озеленению (посадка, пересадка деревьев, кустарников) не соответствует техническому заданию, уложенный рулонный газон и устройство живой изгороди (кустарники) имеют завядший вид, озеленение отсутствует:

- ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2, кустарник декоративный отсутствуют 217 шт.

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1, кустарник Спире японская отсутствуют 2 768 шт.

- ул. 15-я Парковая д. 16, корп. 2 кустарник декоративный 450 шт.

- ул. Первомайская д. 119, кустарник Спире японская отсутствуют 887 шт.

- ул. Первомайская д. 121, калина отсутствуют - 321 шт.

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1, газон рулонный отсутствует 2 600 кв.м.

Выявленные недостатки при выполнении подрядчиком работ подпадают под гарантийный случай и выявлены в гарантийный период.

Копия Акта о недостатках от 31.05.2023г. с перечнем выявленных нарушений, направлен в адрес Ответчика в соответствии с условиями договора.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений по средством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки, (п.13.1)

Поскольку требования Истца оставлены без внимания, возражения Ответчика в адрес Истца не поступали, работы указанные в Акте о недостатках от 31.05.2023г. не выполнены, Истец, в соответствии с пунктом 11.3.1 Договора считает направленные в адрес Ответчика требования им признанными.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Истца в суд.

Материалами дела подтверждается, что до настоящего времени ответчиком работы указанные в Акте о недостатках от 31.05.2023г. не выполнены. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (ст. 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

При таких обстоятельствах суд считает требование истца в данной части обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд          

 

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО "В-СТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) в течении 30 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу, устранить своими силами и за свой счет, выявленные в гарантийный период недостатки в выполненных работах, указанных в Акте о недостатках от 31.05.2023г., по договору 119-44/21 от 20.04.2021 года на выполнение работ по комплексному ремонту дворовых территорий района Восточное Измайлово, а именно: 

1.1 - ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1: 

- Устройство живой изгороди 1200 пог.м,

- устройство входной «декоративной арки» на спортивной площадке 5 шт. 

1.2 - ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2

- устройство Джаммбоксы 4 шт., Трибуна с навесом на 18 человек 2 шт. 

1.3 - произвести замену резинового покрытия на дворовой территории по адресу: 

<

...> имеющего группу строительного материала ВЗ (легковоспломеняемый) на резиновое покрытие, имеющего согласно сертификата пожарной безопасности, следующие характеристики: 

по группе горючести — умеренно горючие (Г2); 

по группе воспламеняемости — умеренно воспламеняемые (В2); 

по дыму — умеренно дымообразующие (Д2). 

1.4 - произвести высадку (восстановить озеленение): 

- ул. 16-я Парковая, д. 21, корп. 2, кустарник декоративный - 217 шт. 

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1, кустарник Спире японская - 2 768 шт.

- ул. 15-я Парковая д. 16, корп. 2 кустарник декоративный - 450 шт.

- ул. Первомайская д. 119, кустарник Спире японская - 887 шт.

- ул. Первомайская д. 121, калина - - 321 шт. 

- ул. 9-я Парковая, д. 6, корп. 1, газон рулонный - 2 600 кв.м. 

Взыскать с ООО "В-СТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО" (ОГРН 

<

***>) 6 000 (шесть тысяч) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков