7/2023-7773(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

19 января 2023 года Дело № А28-13776/2022  

Арбитражный суд Кировской области в составе: судья Вычугжанин Р.А.  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истца – Муниципальное образование "Город Киров" в лице администрации города  Кирова (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к ответчику – акционерное общество "ГОРДОРМОСТСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить дефекты, 

c участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью "ДСУ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать акционерное общество "ГОРДОРМОСТСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 20 (двадцати) календарных  дней со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет устранить  недостатки (дефекты) работ по ремонту дворовых территорий, выполненных по  муниципальному контракту № 0340200003319003759 от 16.05.2019, а именно:  

 по адресу: 

<

...>: 

 - устранить разрушение бетона в местах крепления монтажных петель;  

 - устранить провал брусчатки на тротуаре вдоль бордюрного камня у  подъездов № 2, № 3;  

 по адресу: 

<

...>: 

 - устранить вспучивание асфальтобетонного слоя с торца дома;  

 - устранить трещины на дворовом проезде и тротуаре (поперечные) по всей  длине;  

 - устранить трещины на тротуаре вдоль поребрика по всей длине, на  площадке у подъездов № 3, № 4;  

 - устранить недостатки (дефекты), являющиеся причиной скопления  дождевой воды на площадке при входе в подъезды № 6, № 7;  

 - устранить недостатки (дефекты), являющиеся причиной скопления  дождевой воды на автопарковке напротив подъездов № 3, № 4;  

 по адресу: 

<

...>:  - устранить трещины на тротуаре с торца дома;  - устранить трещины на тротуаре за домом вдоль поребрика по всей длине; 

 - восстановить асфальтобетонный слой у подъезда № 3 (растрескивание,  вспучивание, провалы) до подъезда № 2 вдоль ул.Преображенской;  

 - устранить трещину на тротуаре у опоры освещения; 

 - устранить выкрашивание асфальтобетонного слоя на дворовом проезде при  въезде во двор.  

 Взыскать с акционерного общества "ГОРДОРМОСТСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000  (шесть тысяч) рублей 00 копеек государственной пошлины по делу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный  апелляционный суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через  Арбитражный суд Кировской области.  

Судья Р.А. Вычугжанин