АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-27465/2022

Дело № А65-26144/2021

г. Казань

13 марта 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 марта 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Федоровой Т.Н.,

судей Тюриной Н.А., Арукаевой И.В.,

при участии представителей:

истца – ФИО1 (доверенность от 21.12.2021), ФИО2 (доверенность от 30.10.2020),

ответчика – ФИО3 (доверенность от 09.01.2023 № 10),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС»

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.06.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2022 

по делу № А65-26144/2021

по исковому заявлению акционерного общества «Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО» (далее – АО «КЗМ «ТЭМПО», Завод, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Управление строительства Пермской ГРЭС» (далее – ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС», Общество, ответчик) о взыскании 12 577 605,21 руб. задолженности.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.06.2022, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2022, исковые требования удовлетворены, с Общества в пользу Завода взыскано 12 577 605,21 руб. задолженности, а также 85 888 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой с дополнениями к ней, в которой просит их отменить в связи с несоответствием выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и неправильным применением ими норм права и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель жалобы ссылается на ненадлежащее исполнение истцом обязательств, связанных с устранением выявленных дефектов поставленной продукции. Указывает, что покупатель исправлял имевшиеся дефекты товара за свой счет силами привлеченных субподрядных организаций. В дальнейшем акты об устранении недостатков направлялись в адрес поставщика. В сопроводительном письме о направлении актов ответчик также заявлял о зачете встречных однородных требований. Полагает, что суды необоснованно не учли указанные обстоятельства при разрешении вопроса о проведении зачета встречных однородных требований сторон и неправомерно удовлетворили требования о взыскании с ответчика в пользу истца долга.

Подробнее доводы заявителя изложены в кассационной жалобе.

В отзыве на кассационную жалобу с дополнениями к нему АО «КЗМ «ТЭМПО» просило оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

В судебных заседаниях суда кассационной инстанции 12.01.2023 и 09.02.2023 с участием представителя ответчика, поддержавшего доводы, изложенные в кассационной жалобе, и представителя истца, возражавшей против ее удовлетворения, судебное разбирательство в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) откладывалось на 09.02.2023 на 15 часов 20 минут и на 09.03.2023 на 16 часов 00 минут соответственно.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 09.03.2023 представители сторон поддержали ранее изложенные позиции.

Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на нее с дополнениями, заслушав представителей сторон, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, 16.01.2019 между АО «КЗМ «ТЭМПО» (поставщик) и ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» (покупатель) заключен договор на поставку стальных строительных конструкций № 1.1- 29/7-5 (в редакции протокола согласования разногласий от 12.02.2019), согласно условиям пункта 1.1. которого поставщик обязался изготовить и передать в собственность покупателю стальные строительные конструкции для объекта «Комплекс по производству Аммиака-Карбамида-Меламина на основе продувочного газа производства метанола», находящегося по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Губаха, а также выполнить работы и услуги, предусмотренные настоящим договором, а покупатель - принять и оплатить конструкции, выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

Согласно пункту 1.2. договора поставщик должен поставить конструкции в количестве и комплектности, необходимом для строительства объектов комплекса, и соответствующих переданной покупателем рабочей документации (чертежи КМ). Вес, размер, номенклатура и ассортимент конструкций, требуемых для поставки по договору, определяются поставщиком посредством разработки чертежей КМД на основании предоставленных покупателем чертежей КМ. 

Постоянные метизы (нормальной точности и высокопрочные) входят в комплект поставки, при этом их количество, подлежащее поставке, определяется в результате разработки чертежей КМД. 

Общее ориентировочное количество (вес) поставляемых конструкций на момент заключения договора, рассчитанное по чертежам КМ, составляет 4 302,764 тн, с указанием конкретного тоннажа по объектам. 

Окончательное количество (вес) поставляемых конструкций устанавливается поставщиком по чертежам КМД, разработанным поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора. 

Пунктом 1.3. договора предусмотрено, что конструкции изготавливаются из материалов поставщика. 

В пункте 1.4. договора указано, что изготовление конструкций производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23118- 2012, СП 53-101-98, СП 70.13330.2012, чертежей КМ, разработанных ОАО «НИИК» г. Дзержинск (подробно изложено в договоре), чертежей КМД, разработанных поставщиком на основании проектов КМ. 

Защита конструкций (антикоррозионная (АКЗ) и огнезащита (ОЗ)) выполняется поставщиком на основании чертежей КМ и в соответствии с требованиями технической документации, разработанной поставщиком: «ППР» и/или «Технологическая карта» с прилагаемым «Технологическим регламентом по нанесению системы покрытий JOTUN», согласованные с покупателем и ПАО «Метафракс»; «Проект огнезащиты стальных конструкций составом Декотерм-Эпокси», согласованного покупателем и ПАО «Метафракс». 

Согласно пункту 1.5. договора сроки изготовления и поставки конструкций определены в приложении № 2 к настоящему договору. Сроки выполнения иных работ и услуг определены в приложении № 5 и 7 к настоящему договору. 

В соответствии с пунктом 1.7. договора размеры (габариты) поставляемых конструкций определяются в ходе разработки чертежей КМД и могут быть габаритными (конструкции длиной не более 13,6 м, высотой не более 2,4 м, шириной не более 2,4 м и массой не более 20 тн), негабаритными. 

Настоящим договором учтена стоимость перевозки конструкций габаритных и негабаритных размеров. 

Согласно пункту 2.1. договора качество конструкций, выполненных работ и оказанных услуг должно соответствовать установленным нормам и правилам, быть подтверждено: документами о качестве на стальные строительные конструкции, которые оформляются поставщиком по форме в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012; сертификатами, предоставленными производителем метизной продукции (качество метизной продукции); актами визуального и измерительного контроля, оформленными в соответствии с РД 03-606-03 (приложение 2 к РД 03-606-03); актами приемки защитного покрытия в соответствии со СНиП 3.04.03-85 (приложение 2 к СНиП 3.04.03-85); актами с результатами ультразвукового контроля в соответствии с ГОСТ 14782-86 или иного контроля. 

В силу пунктов 2.4., 2.5. договора передаваемые по договору конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Поставщик обязан обеспечить необходимое количество компетентного, профессионального персонала для исполнения настоящего договора, квалификация которого соответствует обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. 

Пунктами 2.6. и 2.6.2 договора предусмотрено, что поставщик гарантирует качество поставленных конструкций, их соответствие условиям настоящего договора в течение 66 месяцев со дня поставки последней партии конструкций, и гарантирует качество выполненных работ, оказанных услуг в течение 60 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи результата работ. 

Если в течение 90 календарных дней с момента поставки будут выявлены любые явные дефекты/недостатки, либо в течение гарантийного срока будут выявлены любые скрытые дефекты/недостатки конструкций, работ, услуг, поставщик в соответствии с пунктом 2.6.3. договора обязан за свой счет устранить все такие дефекты/недостатки. Устранение дефектов/недостатков по гарантии должно осуществляться поставщиком в том числе за пределами гарантийного срока в случае, если уведомление направлено покупателем поставщику до истечения гарантийного срока. 

В соответствии с пунктом 2.7. договора приемка конструкций по количеству и (или) качеству (внешний вид) проводится покупателем (либо грузополучателем) совместно с представителем поставщика не позднее 5 рабочих дней со дня выгрузки конструкций на объекте покупателя. В части, не противоречащей требованиям технических регламентов (стандартов), действующего законодательства и условий настоящего договора, при приемке конструкций стороны руководствуются Инструкциями о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П?6, № П-7 (утверждены Постановлением Госарбитража СССР в ред. от 14.11.1974). 

Вышеуказанные документы применяются сторонами и в случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока. 

В случае обнаружения несоответствия конструкций по качеству (по внешнему виду) и (или) количеству условиям настоящего договора, товарно-сопроводительным документам, стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) с участием монтирующей организации (грузополучателем), в котором указывают обнаруженные дефекты, несоответствия, объем (при возможности его определения), маркировку конструкций, в которых обнаружены дефекты, несоответствия, объем (при возможности его определения), маркировку конструкций, в которых обнаружены дефекты, с приложением фотоматериалов несоответствия (дефектов). В случае отсутствия представителя поставщика при приемке, либо немотивированного отказа представителя поставщика от составления акта о выявленных недостатках (дефектах), покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке с участием представителя монтирующей организации (грузополучателем). Скан-копия акта отправляется поставщику на электронный адрес ds@zmktempo.ru для устранения выявленных несоответствий либо замены некачественных конструкций в соответствии с указанным в акте решением. 

В силу пункта 2.8. договора покупатель вправе осуществлять контроль соблюдения поставщиком требований к выполнению антикоррозионной защиты металлоконструкций, сварных соединений металлоконструкций, изготавливаемых в соответствии с настоящим договором, в удобное для покупателя время (на территории производства поставщика). 

Согласно пункту 2.9. договора в случае обнаружения недостатков (дефектов) в поставленных конструкциях либо в выполненных работах, оказанных услугах в период гарантийного срока, покупатель обязан в течение 48 часов с момента обнаружения недостатков (дефектов) направить поставщику уведомление (электронной или факсимильной связью) о необходимости присутствия его представителя для составления акта о выявленных недостатках (дефектах). Представитель поставщика обязан прибыть на строительную площадку в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления покупателя. В случае неприбытия представителя поставщика в установленный срок либо в случае отказа поставщика участвовать в составлении акта, а также в случае, если в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления поставщик не ответит покупателю на его уведомление о вызове представителя поставщика, покупатель составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. 

В пункте 2.10. договора сторонами согласовано, что исправление недостатков конструкций, допущенных по вине поставщика, выявленных при приемке конструкций, а также в период гарантийного срока, производится силами и за счет поставщика. Устранение недостатков производится поставщиком в срок не более 7 рабочих дней с момента подписания акта о выявленных недостатках (дефектах), если иной срок не согласован сторонами в акте о выявленных недостатках (дефектах). Сдача конструкций после устранения недостатков (дефектов) покупателю производится поставщиком по акту об устранении недостатков (дефектов). 

При необоснованном отказе поставщика устранять недостатки (дефекты), либо уклонении поставщика (в т.ч. неполучении ответа поставщика) либо неустранении недостатков (дефектов) в установленный срок, покупатель вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от поставщика возмещения документально подтвержденных расходов на их устранение, в т.ч. расходов на транспортировку, либо вправе отказаться от поставленных конструкций с недостатками (дефектами) и потребовать возврата оплаченной за конструкции стоимости, а поставщик обязан оплатить затраты покупателя либо вернуть оплаченные им денежные средства в срок, указанный в претензии покупателя. В случае, если сторонами будет согласовано устранение недостатков силами покупателя или третьих лиц, привлеченных покупателем, стоимость исправления недостатков должна быть компенсирована покупателю в течение 5 рабочих дней с момента направления покупателем претензии. 

В случае нарушения срока устранения недостатков конструкций, допущенных по вине поставщика, поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора. Приемка конструкций по чистоте производится покупателем в момент получения (приемки) конструкций и подписания товаро-сопроводительных документов. 

Пунктом 2.11. договора предусмотрено, что все вопросы, связанные с установлением несоответствия конструкций по качеству и (или) количеству условиям настоящего договора, товарно-сопроводительным документам, все вопросы несоответствия качества работ по очистке конструкций от окислов и их огрунтовке условиям настоящего договора разрешаются только при условии получения поставщиком соответствующей претензии покупателя, если иное не предусмотрено настоящим договором. Срок для заявления претензий по количеству в течение 5 календарных дней со дня поставки конструкций; по качеству конструкций, по качеству работ по очистке конструкций от окислов и их грунтовке - в течение гарантийного срока. 

Согласно пункту 2.16. договора обязательство поставщика за свой счет устранить выявленные дефекты/недостатки конструкций, выполненных работ, оказанных услуг включает в себя в том числе: повторное выполнение любой дефектной части работ, выполнение пропущенных работ; замену, поставку, ремонт, доработку конструкций, если они повреждены, пришли в негодность либо уничтожены вследствие дефектов/недостатков, за которые отвечает поставщик; проведение проверок качества конструкций, поставляемых взамен дефектных и обеспечение участия покупателя в таких проверках, доставку конструкций на объект взамен дефектных, а также всех необходимых запасных частей и расходных материалов; осуществление таможенного оформления и несение всех расходов по таможенному оформлению (таможенные платежи, НДС и т.п.) в связи с возвратом, ремонтом и/или заменой дефектных материалов, их запасных частей; выполнение всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ в отношении конструкций, материалов, осуществление их складирования до использования в работах по устранению дефектов/недостатков и подачи для выполнения работ по устранению дефектов/недостатков; выполнение всех необходимых для устранения дефектов/недостатков ремонтных, монтажных/демонтажных работ, строительных, пусконаладочных, отделочных и иных работ; раскрытие и последующее закрытие работ; привлечение персонала (работников) в необходимом для устранения дефектов/недостатков количестве и с необходимой квалификацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями договора; осуществление иных необходимых действий и несение в связи с этим всех расходов.

В соответствии с пунктом 3.1. договора срок поставки конструкций - февраль 2019 года - июнь 2019 года в следующем порядке: до 28.02.2019 – 50 тн; до 31.03.2019 - 725 тн; до 30.04.2019 - 1320 тн; до 31.05.2019 -1370 тн; до 30.06.2019 - 837, 764 тн. 

Последовательность и очередность поставки конструкций установлены сторонами в графике поставки (приложение № 2 к настоящему договору). 

Поставка конструкций производится в определенной последовательности очередями. 

Под «очередью» в рамках настоящего договора понимается количество конструкций, которые необходимо поставить в согласованный сторонами период (согласно приложению № 2). 

График изготовления и поставки (приложение №2 к договору) подписывается сторонами одновременно с подписанием настоящего договора. В случае смещения сроков передачи чертежей КМ, указанных в приложении № 1 к настоящему договору, сроки разработки чертежей КМД по приложению № 8 и сроки поставки конструкций по приложению № 2 сдвигаются пропорционально сроку задержки передачи чертежей КМ. 

В соответствии с пунктом 3.2. договора доставка конструкций покупателю осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом на определенных в договоре условиях. 

Поставка конструкций должна осуществляться в последовательности, указанной в графике поставки (приложение № 2 к договору), комплектно: конструкции поставляются совместно с метизной продукцией. 

Доставка конструкций производится партиями. Под «партией» конструкций в рамках настоящего договора понимается количество конструкций, поставленных однм транспортным средством. В одной «партии» должны отгружаться конструкции по одному объекту (титулу). 

Доставка конструкций покупателю осуществляется размеренно (не более четырех автомашин в сутки), с периодичностью не менее двух часов, позволяющей производить разгрузку и складирование конструкций на строительной площадке. 

В силу пункта 3.2.1. договора поставщик обязан заблаговременно, за 5 рабочих дней письменно уведомить о дате отгрузки первой партии конструкций с указанием даты прибытия груза на строительную площадку покупателя посредством электронной связи на адрес, указанный в разделе 16 настоящего договора. 

В соответствии с пунктом 3.2.2. договора поставщик от своего имени обязуется организовать перевозку конструкций автомобильным транспортом своими силами или силами третьих лиц (организации-перевозчика), привлеченных поставщиком, до строительной площадки, расположенной по адресу: Пермский край, г. Губаха строительство объекта «Комплекс по производству Аммиака-Карбамида-Меламина на основе продувочного газа производства метанола». 

Поставщик для доставки конструкций использует тот вид транспорта, который он, исходя из принципов разумности и добросовестности, посчитает наиболее приемлемым: надежным, обеспечивающим качество, и соответствующим действующим нормативам и требованиям для такой перевозки. Поставщик несет ответственность за получение (если применимо) разрешений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на транспортировку конструкций до объекта поставки. Поставщик самостоятельно и за свой счет должен урегулировать претензии, требования всех третьих лиц, которым причинен ущерб, вред в связи с транспортировкой конструкций и не возлагать на покупателя и/или ПАО «Метафракс» никакой ответственности и никаких расходов в связи с этим. Все расходы, связанные с транспортировкой конструкций, считаются включенными в цену поставки одной тонны конструкций, независимо от габаритов и веса. 

При этом поставщик в течение одного рабочего дня с момента отгрузки партии конструкции передает покупателю скан-копию товарной накладной формы ТОРГ-12 на отгруженную партию конструкций посредством электронной связи на адрес, указанный в разделе 16 настоящего договора. 

Датой поставки конструкций считается дата подписания уполномоченным представителем покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12, свидетельствующей о получении конструкций (партии конструкций) на строительной площадке покупателя. 

Разгрузку конструкций на строительной площадке осуществляет покупатель своими силами или с привлечением третьего лица, в т.ч. грузополучателя, за свой счет. 

Согласно пункту 3.5 договора право собственности на конструкции (партию конструкций), включая риск их случайной гибели, переходит от поставщика к покупателю со дня исполнения поставщиком обязательств по поставке в соответствии с датой подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. 

В силу пункта 3.6. договора конструкции поставляются комплектно, промаркированные, мелкие изделия упакованы в ящики с биркой. Маркировка готовых конструкций производится согласно требованиям СП 53-101-98. Конструкции поставляются маркированные металлической биркой завода-изготовителя и с нанесенной в одном месте на наружной боковой поверхности маркировкой контрастной краской. 

Пунктом 3.7. предусмотрено, что конструкции должны поставляться в качественной упаковке, соответствующей режиму перевозок. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23118-2012 и обеспечивать сохранность конструкций, в том числе сохранность лакокрасочного и огнезащитного покрытий, защищать их от любых повреждений или коррозии и предусматривать возможные перевалки/перегрузки и хранение их до использования в работах по монтажу при условии соблюдения требований к хранению и перемещению/продукции на монтажных площадках покупателя после даты поставки.

В соответствии с пунктом 4.1. договора цена одной тонны конструкций составляет 127 118,64 руб., в том числе НДС 20 % - 21 186,44 руб. Цена одной тонны конструкций изменению не подлежит (за исключением ее уменьшения в соответствии с условиями настоящего договора). 

Поставщиком покупателю дано заверение о правильности и достаточности цены одной тонны конструкций и цены договора, а также порядка определения цены одной тонны конструкций и цены договора, как это предусмотрено условиями настоящего договора. 

Согласно пункту 4.2. договора на момент его заключения приблизительная общая стоимость конструкций (цена договора) составляет 546 961 507,92 руб., в том числе НДС 20 % - 91 160 251,32 руб. 

В случае внесения изменений в чертежи марки КМ, приводящих к изменению объема поставляемых конструкций (веса конструкций), цена договора определяется путем умножения измененного веса конструкций на цену одной тонны конструкций и указывается сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

В пункте 4.3. договора определено, что после разработки деталировочных чертежей КМД и определения окончательного объема (веса) поставляемых конструкций по настоящему договору цена одной тонны конструкций, указанная в пункте 4.1. настоящего договора, определяется следующим образом: в случае уменьшения веса конструкций по чертежам КМД относительно веса конструкций по чертежам КМ цена одной тонны конструкций изменению не подлежит, и при этом цена договора, указанная в пункте 4.2. договора, подлежит уменьшению пропорционально уменьшению веса конструкций. 

В соответствии с пунктом 4.4. договора стоимость работ по нанесению огнезащитного состава «Декотерм-Эпокси» на один квадратный метр конструкций является твердой на весь срок действия договора и согласована сторонами в следующих размерах: при пределе огнестойкости конструкций R90 – 4 274,23 руб., в том числе НДС 20 % - 712, 37 руб.; при пределе огнестойкости конструкций R45 – 2 442,71 руб., в том числе НДС 20 % - 407,12 руб.; при пределе огнестойкости конструкций R15 – 1 531,52 руб., в том числе НДС 20% - 255,25 руб. 

В стоимость работ по нанесению огнезащитного состава «Декотерм-Эпокси» включена стоимость всех необходимых материалов и затрат поставщика. 

Общая стоимость работ по нанесению огнезащитного состава «Декотерм Эпокси» по договору определяется после разработки рабочей документации «Огнезащита металлоконструкций» и определения общей площади конструкций, подлежащих защите, и указывается сторонами в дополнительном соглашении к договору. 

После получения согласованной рабочей документации «Огнезащита металлоконструкций» от ПАО «Метафракс» покупатель оплачивает авансовый платеж в размере 50 % от стоимости нанесения огнезащитного состава, определенной сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору. 

Покупатель производит оплату конструкции (партий конструкций) путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в следующем порядке.

Согласно пункту 5.1. договора в целях закупки материала для исполнения договора покупатель перечисляет поставщику авансовый платеж в размере 50 % от стоимости договора, указанной в пункте 4.2. договора, что составляет 273 480 753,96 руб., в том числе НДС 20% - 45 580 125,66 руб., в течение 5 рабочих дней со дня получения от поставщика оригинала счета на оплату авансового платежа. 

В соответствии с пунктом 5.2. договора поставщик обязан в течение 5 календарных дней после получения аванса выставить счет-фактуру на сумму полученной предоплаты. 

Оплата за фактически поставленные и принятые конструкции производится покупателем в следующем порядке: 

- первый платеж: аванс в размере 50 % от стоимости договора на момент его заключения (п. 5.1 договора); 

- второй платеж: в размере 25 % от стоимости каждой партии конструкций, поставленной при полном соблюдении сроков очереди (соответствующей последовательности, определенной в приложении № 2 к договору), и в полной комплектности, в течение 10 календарных дней со дня поставки и получения документов, указанных в пункте 3.2.2 договора, по оплачиваемой партии; 

- третий платеж: в размере 20 % от стоимости конструкций, входящих в объем по одному объекту (титулу), поставленных при полном соблюдении сроков очереди (соответствующей последовательности, определенной в приложении № 2 к договору), и в полной комплектности, в течение 10 календарных дней со дня поставки последней партии конструкций по этому объекту (титулу) и получения всех документов, указанных в пункте 3.2.2 договора; 

- четвертый платеж: в размере 5 % в соответствии с пунктом 5.4. настоящего договора. Поставка одной партии конструкций означает поставку конструкций в количестве, доставленном одним автотранспортным средством (пункт 3.2. договора). 

В силу пункта 5.3.1. договора погашение авансового платежа производится по каждой счет-фактуре в размере 50 % стоимости фактически поставленных конструкций. 

Пунктом 5.3.2. договора предусмотрено, что оплата производится при условии соблюдения поставщиком последовательности, очередности, комплектности и сроков поставки, согласованных сторонами в договоре и приложениях к нему, а так же при условии предоставления следующих документов: письма на оплату за поставленные конструкции очереди с прилагаемой таблицей, оформленной согласно пункту 3.2.3 настоящего договора; оригиналов счетов-фактур на поставленные конструкции; документов о качестве на поставленные конструкции в соответствии с разделом 2 настоящего договора; монтажных схем и списков монтажных метизов; деталировочных чертежей на поставленные конструкции; оригиналов товарных накладных ТОРГ-Д на поставленные конструкции. 

В пункте 5.3.3. договора сторонами оговорено, что конструкции, поставленные с отступлением от условий договора (досрочно) в части сроков, последовательности, очередности и комплектности, оплачиваются покупателем согласно срокам оплаты по графику. 

Нарушение последовательности поставки, или очередности поставки или комплектности-поставки, или поставка конструкций с недостатками (дефектами), выявленными при приемке, либо в течение гарантийного срока (если оплата еще не осуществлена), нарушение срока предоставления указанных документов, являются основанием для отсрочки платежа за поставленные конструкции (приостановлением обязательства покупателя по оплате). Конструкции, поставленные с отступлением от условий договора в части сроков, последовательности, очередности и комплектности по вине поставщика, оплачиваются в течение 120 рабочих дней после поставки. Конструкции, поставленные с недостатками (дефектами), оплачиваются в течение 60 рабочих дней с момента устранения недостатков (дефектов). 

Согласно пункту 5.3.4 договора обязательство покупателя об оплате поставленной партии конструкций является встречным по отношению ко всем обязательствам поставщика, которые он должен исполнить к моменту такой оплаты (в т.ч. по поставке конструкций надлежащего качества, соответствующих условиям настоящего договора, предоставлению надлежаще оформленных документов партии конструкций). В этом случае покупатель не является просрочившим и поставщик не вправе требовать применения мер ответственности к покупателю. 

Пунктом 5.4. договора предусмотрено, что исполнение обязательств поставщика по настоящему договору обеспечивается гарантийными удержаниями в размере 5 % от стоимости по каждому счету-фактуре, предъявляемому поставщиком к оплате. 

Обязательство покупателя по оплате гарантийных удержаний является встречным по отношению ко всем обязательствам поставщика по договору и производится покупателем при условии отсутствия неустраненных замечаний к поставленным конструкциям, выполненным работам, оказанным услугам и исполнению условий договора, в течение 900 календарных дней с даты поставки последней партии конструкций на склад покупателя. 

Оплата подрядчиком гарантийного платежа может быть произведена в иной срок: в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки результата работ при условии предоставления поставщиком банковской гарантии выполнения договора. 

Размер банковской гарантии должен соответствовать размеру гарантийного платежа, срок действия банковской гарантии должен составлять 900 календарных дней. 

Покупатель вправе осуществлять обращение взыскания на банковскую гарантию выполнения договора, если имеет место одно или несколько из числа следующих условий: поставщик нарушает какое-либо из своих обязательств по договору, включая, но не ограничиваясь обязательством выполнения работ в течение гарантийного срока, как это предусмотрено договором или в соответствии с ним, соблюдением законодательства РФ; покупатель намерен осуществить право на возмещение ущерба, причиненного поставщиком. 

Согласно пункту 5.5. договора после выполнения сторонами обязательств стороны проводят сверку расчетов. По требованию одной из сторон сверка расчетов может быть произведена в любой момент в ходе исполнения настоящего договора. 

В силу пункта 5.6. договора датой оплаты конструкций считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка поставщика, указанный в разделе 16 настоящего договора. 

В соответствии с пунктом 5.7. договора в случае досрочного прекращения настоящего договора по причине существенного (более пятнадцати календарных дней) нарушения сроков поставки конструкций, возникших по вине поставщика, предусмотренных настоящим договором, условий договора о качестве конструкций, поставщик обязуется вернуть покупателю полученные им авансовые платежи в течение 20 рабочих дней с момента получения поставщиком требования о возврате аванса за вычетом стоимости конструкций, изготовленных в соответствии с условиями настоящего договора, на момент получения такого требования. 

Согласно пункту 6.1. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора. 

В силу пункта 6.2. договора за несвоевременную поставку конструкций, допущенную по вине поставщика, в том числе с нарушением сроков, указанных в приложении № 2 к настоящему договору, а также за нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) конструкций, покупатель вправе требовать с поставщика уплаты пени в размере 0, 1 % процента от стоимости продукции, в отношении которой нарушены сроки, за каждый день просрочки исполнения обязательства. Факт нарушения указывается покупателем (грузополучателем) при разгрузке конструкций в товарной накладной ф. ТОРГ-12 и/или отгрузочной спецификации. 

В пункте 6.3 договора стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения условий настоящего договора поставщиком, в т.ч. отказа либо  неисполнения, уклонения поставщика от выполнения обязательств по исправлению недостатков конструкций, отказа либо уклонения, не исполнения обязательства по компенсации затрат на устранение недостатков конструкций силами покупателя либо силами третьих лиц, покупатель вправе, при условии направления поставщику требования (или претензии), удержать из суммы стоимости конструкций и обратить в свою пользу стоимость конструкций ненадлежащего качества; суммы расходов на устранение недостатков конструкций ненадлежащего качества; суммы неустойки (пени и штрафов); суммы убытков, которые поставщик обязан уплатить покупателю в соответствии с договором и законодательством Российской Федерации, предварительно письменно уведомив об этом поставщика. С момента получения поставщиком такого письменного уведомления от покупателя обязательства поставщика перед покупателем по уплате этих сумм являются прекращенными исполнением. 

В силу пункта 6.4. договора за несвоевременно произведенную оплату конструкций с нарушением сроков, указанных в разделе 5 настоящего договора, поставщик вправе требовать с покупателя уплаты пени в размере 0,1 % процента от стоимости неоплаченных в срок конструкций за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате. 

Согласно пункту 6.5. договора в случае нарушения поставщиком по его вине очередности изготовления конструкций и готовности их к отгрузке вразрез с очередностью монтажа, и/или не в соответствии с графиком изготовления (поставки) конструкций (приложение №2), поставщик обязуется обеспечить надлежащее хранение указанных конструкций на своей территории за свой счет до момента отгрузки покупателю. 

В соответствии с пунктом 9.1 договора поставщик гарантирует, что поставка товара по настоящему договору не нарушает и не будет нарушать права третьих лиц, в том числе любые интеллектуальные права третьих лиц. 

Пунктом 9.2. договора предусмотрено, что поставщик гарантирует, что все поставляемые товары свободны от любых прав третьих лиц, в том числе, но, не ограничиваясь, залогов, обременения, обеспечений, денежных исков или права удержания. Поставщик гарантирует соблюдение прав интеллектуальной собственности производителей товаров, поставляемых по настоящему договору, и законность введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации импортных товаров (если применимо). 

Согласно пункту 11.1 договора настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует по 31.12.2019, а по обязательствам, возникшим в период его действия, до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

В силу пункта 11.2 договора односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего договора не допускается, за исключением существенного нарушения договора одной из сторон. 

В соответствии с пунктом 11.2.1 договора нарушение настоящего договора поставщиком предполагается существенным в случаях: неоднократной поставки конструкций ненадлежащего качества; неоднократного нарушения сроков поставки, очередности поставки конструкций в соответствии с приложением № 2; нарушение комплектности поставляемых конструкций в рамках объекта поставки (титула); нарушение комплектности поставляемых партий (в рамках объекта поставки (титула); нарушения сроков предоставления деталировочных чертежей КМД. 

Кроме того, в силу пункта 11.2.2. договора нарушение настоящего договора покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения установленных договором сроков оплаты конструкций.

Согласно пункту 11.2.3. договора об одностороннем внесудебном отказе от исполнения настоящего договора сторона уведомляет другую сторону заказным письмом с уведомлением о вручении. Моментом расторжения настоящего договора будет считаться дата получения стороной уведомления об отказе от договора другой стороной. 

Пунктом 11.2.4. договора определено, что в случае одностороннего отказа покупателя от исполнения настоящего договора покупатель обязуется уплатить поставщику стоимость изготовленных и отгруженных (поставленных) поставщиком конструкций надлежащего качества в течение 120 календарных дней после подписания акта сверки и получения от поставщика всех надлежащим образом оформленных документов о расторжении договора: всех предусмотренных договором документов на фактически поставленные конструкции; результата работ, выполненных на дату прекращения договора: акта о прекращении договора с указанием объема и стоимости поставленных конструкций и выполненных работ, услуг; акта сверки взаиморасчетов; исполнительной документации на фактически выполненные работы. 

В соответствии с пунктом 11.2.5. договора оплата работ, выполненных поставщиком после даты прекращения настоящего договора, а равно возмещение понесенных в связи с этим поставщиком убытков, не производится. 

В силу пункта 11.2.6. договора покупатель, отказавшийся от исполнения настоящего договора, вправе привлечь для завершения работ по настоящему договору третье лицо (нового подрядчика) с момента расторжения настоящего договора. 

Согласно пункту 11.2.7. договора прекращение или окончание действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязанностей сторон по нему, за исключением обязательств оплаты работ, выполненных до прекращения договора, гарантийных обязательств поставщика и оплаты гарантийных удержаний, установленных разделом 5 настоящего договора. Прекращение действие договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия настоящего договора. 

Пунктом 11.3. договора предусмотрено, что в случае прекращения договора в соответствии с пунктом 9.14. настоящего договора стороны подписывают соглашение о расторжении договора. Покупатель обязуется уплатить поставщику стоимость изготовленных и отгруженных (поставленных) поставщиком конструкций надлежащего качества в течение 20 рабочих дней после подписания акта сверки и получения от поставщика всех надлежащим образом оформленных документов о расторжении договора: всех предусмотренных договором документов на фактически поставленные конструкции; результата работ, выполненных на дату прекращения договора: акта о прекращении договора с указанием объёма и стоимости поставленных конструкций и выполненных работ, услуг; акта сверки взаиморасчетов; исполнительной документации на фактически выполненные работы. 

Согласно пункту 11.4. договора покупатель имеет право приостановить исполнение поставщиком своих обязательств по договору в части изготовления (поставки) конструкций. Покупатель уведомляет об этом поставщика письменно. Поставщик приостанавливает исполнение своих обязательств по договору в части изготовления (поставки) конструкций на срок, указанный в письме (уведомлении) покупателя. При этом стороны на момент приостановления поставщиком своих обязательств по договору оформляют акт, в котором указывается объем изготовленных конструкций. При неисполнении указанных в настоящем пункте обязательств, поставщик несёт все риски возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.

В соответствии с пунктом 14.1. договора любые уведомления, распоряжения, указания, требования, предложения, согласования, иные сообщения (сообщения) и/или документы, направляемые сторонами в соответствии с договором, должны быть оформлены в письменной форме, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений сторон по договору) номер и дату составления, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей стороны и, при необходимости, печатью стороны. 

В силу пункта 14.2. договора направление сообщений или документов другой стороне может осуществляться по адресу электронной почты другой стороны, указанному в настоящем договоре, любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от стороны, и при условии последующей передачи оригинала документа адресату, либо вручаться лично представителю стороны-адресата под подпись. 

В пункте 14.3 договора указано, что любые сообщения, направленные заказным или ценным письмом почтовой связи или через курьерскую службу доставки, будут считаться доставленными при наличии подписи и даты на документе, подтверждающем вручение (доставку) сообщения, проставленных уполномоченным лицом стороны при получении соответствующего сообщения, либо, в отсутствие подтверждения о вручении (доставке), через 10 рабочих дней после отправления сообщения. В доказательство факта отправки будет достаточно подтвердить, что отправление, содержащее сообщение или документ, имело правильный адрес, было соответствующим образом проштамповано и было передано в организацию почтовой связи или курьерскую службу доставки для передачи заказным или ценным письмом или средствами курьерской службы доставки. 

Пунктами 14.4., 14.5. договора определено, что любое сообщение, направленное по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу или электронной почте, считается доставленным в день получения адресатом соответствующего сообщения или документа в хорошо читаемом виде. Если сообщение или документ доставлены стороне адресату в плохо читаемом виде, такое сообщение или документ считаются ненаправленными и неполученными. Если сообщение доставлено стороне-адресату после окончания рабочего дня, либо в выходной или праздничный день, такое сообщение будет считаться доставленным на следующий рабочий день. 

Сообщение, переданное нарочным, считается полученным в дату, указанную в штампе стороны-адресата, и должно сопровождаться подписью уполномоченного представителя данной стороны на копии оригинала сообщения (документа). 

Согласно пункту 14.6 договора без ущерба для действительности документов, переданных с помощью факсимильной или электронной связи, не позднее 3 рабочих дней после совершения такого отправления оригинал документа на бумажном носителе должен быть выслан стороной-отправителем в адрес стороны-адресата курьерской службой доставки либо передан нарочным. 

Пунктами 14.7., 14.8. договора определено, что стороны обязуются согласовать перечень адресов электронной почты, которые могут использоваться их сотрудниками для переписки по текущим вопросам исполнения договора. 

Все сообщения и/или документы, касающиеся судьбы договора, в том числе: сообщения и документы, касающиеся заключения, изменения, прекращения, расторжения договора; документы, являющиеся основанием для совершения платежей по договору; документы, которыми оформляются мероприятия устранения выявленных недостатков конструкций; документы, подтверждающие поставку; рабочая документация, организационно-технологическая документация, документация, подготовленная ЕРСМ исполнителем, чертежи КМ и КМД; документы, подтверждающие исполнение любых обязанностей по согласованию, одобрению чего-либо между сторонами, уведомления, предусмотренные договором; документы, связанные с обеспечением исполнения обязательств по договору, - в оригиналах должны направляться только по почтовым адресам, указанным в договоре, курьерской службой доставки либо вручаться нарочным представителю стороны-адресата под подпись. Копии таких сообщений и/или документов могут быть направлены по адресам электронной почты, указанным в настоящей статье, при этом в любом случае все последствия, связанные с получением стороной-адресатом сообщений и/или документов, указанных в настоящем пункте, наступают только после получения ею оригиналов таких сообщений и/или документов. 

В соответствии с пунктом 15.1. договора все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью при условии, что они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. 

Технические вопросы, возникающие у поставщика при разработке чертежей КМД и изготовления конструкций, в соответствии с пунктом 15.2 договора должны быть направлены покупателю в течение 2 календарных дней с момента их выявления в период разработки чертежей КМД по каждому объекту (титулу), указанному в приложении № 8. 

Технические вопросы, возникшие у поставщика при разработке чертежей КМД и изготовлении конструкций, в т.ч. связанные с заменами металлопроката, покупатель решает с проектной организацией (автором проекта) в разумный срок, зависящий от сложности вопроса. В любом случае, срок решения вопроса не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления вопроса от поставщика. 

При этом в случае отсутствия ответа от покупателя в течение 10 рабочих дней со дня поступления вопроса срок разработки чертежей КМД, изготовления и поставки конструкций сдвигается на соответствующее количество дней. 

Поставщик не имеет права решать технические вопросы с проектной организацией (автором проекта) без участия покупателя. 

Приложениями к договору являются график передачи рабочей документации шифра КМ, график изготовления и поставки, акт приема-передачи копий документов, действующих на территории ПАО «Метафракс», размер штрафов за нарушение дисциплины и порядка на территории строительной площадки ПАО «Метафракс», условия выполнения работ поставщиком по договору поставки № 1.1-29/7-5 от 16.01.2019, график разработки и передачи деталировочных чертежей КМД. 

Протоколом урегулирования разногласий от 12.02.2019 внесены изменения в пункты 1.6.1, 4.1, 4.3, 5.3, 5.3.3, 5.4, 11.2.7 договора. Сторонами подробно урегулирован порядок оплаты, учитывая аванс и последующие выплаты. 

АО «КЗМ «ТЭМПО» указало, что обязательства по поставке товара, оговоренного в договоре, им были исполнены в полном объеме, в подтверждение чего представило подписанную сторонами и скрепленную оттисками печатей юридических лиц первичную документацию, а именно - товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ведомости отправочных марок, акты выполненных работ, доверенности на представителей ответчика на получение ТМЦ. 

Ссылаясь на неисполнение ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» обязанности по оплате полученной продукции и неисполнение изложенного в претензии требования о погашении долга в заявленной к взысканию сумме, АО «КЗМ «ТЭМПО» обратилось в суд с настоящим иском о взыскании долга за поставленный товар.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» указало на поставку продукции с недостатками.

Ответчик ссылался на то, что из представленной переписки сторон, в том числе из писем истца АО «КЗМ «ТЭМПО» № 1790/9146 от 09.09.2020, № 2450/12239 от 03.12.2020, ответчика ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» № 14/5645 от 13.11.2019, № 14/1633 от 13.03.2020, № 29/2205 от 09.04.2020, № 14/2776 от 30.04.2020, № 14/6024 от 21.09.2020, № 29/7453 от 26.11.2020, № 14/1567 от 15.03.2021, следует, что в рамках исполнения договорных обязательств выявлялись дефекты в поставленной продукции, которые частично устранялись, частично истец просил устранить их самостоятельно. 

Ответчиком также были представлены акт о ненадлежащем изготовлении конструкций от 12.09.2020, протокол совместного совещания от 15.05.2020. 

Обстоятельство наличия недостатков поставленного товара стороной истца не оспаривалось.

В сформированном в ходе рассмотрения настоящего спора заявлении о проведении зачета взаимных требований ответчик отразил суммы сформировавшегося перед ним долга со стороны истца по делу и просил признать спорную задолженность погашенной произведенным зачетом, поскольку обязательства истца перед ответчиком, согласно позиции последнего, составляют 22 392 673,87 руб., тогда как денежное требование истца определено в сумме 11 627 672,39 руб. на основании сведений первичной документации.

Разрешая исковые требования, суды руководствовались статьями 307, 309, 310, 313, 410, 411, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 9, 13, 16, 17 Инструкции о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР, в ред. от 14.11.1974, пунктами 1, 10, 11, 12, 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее ? Постановление Пленума № 6), правовой позицией, изложенной в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», и установив факт поставки истцом ответчику товара без представления последним доказательств его оплаты, в отсутствие оснований для проведения зачета встречных требований произвели спорное взыскание в заявленной сумме.

Судебная коллегия суда округа по доводам кассационной жалобы приходит к следующим выводам.

Как верно указано судами, факт принятия товара покупателем подтвержден надлежащим образом оформленными и подписанными обеими сторонами договора товаросопроводительными документами, соответственно, у стороны покупателя по договору возникли встречные обязательства по оплате принятого товара.

В ходе рассмотрения требования о взыскании с покупателя задолженности за поставленный товар ответчик заявил о зачете в счет заявленных к взысканию сумм его встречного требования к поставщику.

Встречные требования складываются из сумм, затраченных покупателем на самостоятельное устранение выявленных дефектов товара, о которых было известно поставщику (истцу), а также - неустойки за просрочку исправления выявленных недостатков и неустойки за просрочку поставки со стороны истца металлоконструкций.

Из буквального толкования положений Постановления Пленума № 6 следует, что зачет встречных требований должен быть основан на реальных правоотношениях, в том числе подтвержденных документально. Заявление о зачете, предметом которого является прекращение несуществующих обязательств, противоречит содержанию статьей 410 ГК РФ. 

Вывод об отсутствии встречных обязательств, заявленных к зачету, должен быть сделан судом, разрешающим спор, на основании исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, осуществленных по правилам главы 7 АПК РФ. 

Признавая встречные обязательства отсутствующими и зачет ? недопустимым, суды исходили из того, что в условиях оформления приемки товара в отсутствие замечаний и возражений к качеству товара, бремя доказывания поставки истцом товара ненадлежащего качества лежит на покупателе, который, однако, в нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 2.9, 2.10 договора, извещения в адрес поставщика в целях обеспечения участия представителя в составлении акта о выявленных недостатках поставленной продукции и составления соответствующего акта по всем обозначенным им впоследствии событиям, не направлял, как не направлял и требований о сформированной перед ним задолженности. 

Суды отметили, что соответствующие претензионные письма № 29/7275, № 29/171 сформированы 30.12.2021, 17.01.2022, то есть после подачи настоящего искового заявления в суд и его принятия к рассмотрению. 

Однако, согласно пояснениям представителей истца, что также следует из представленной в материалы дела переписки сторон, истец не отрицал обстоятельства выявленных недостатков поставленного товара, подлежавших устранению, фактов уведомления о том покупателем поставщика и частичного осуществления стороной поставщика действий, направленных на исполнение соответствующей договорной обязанности по устранению недостатков.

Из материалов дела следует, что также нашло отражение в обжалуемых судебных актах, что ответчик представил суду сводные таблицы по сложившейся между сторонами переписке и первичной документации по факту выявленных недостатков с приложением самой документации. 

Суды указали, что ссылки ответчика на представленные письма-претензии являются абстрактными, указанные их отправления в электронном виде и почтовой связью таковыми не являются; изложенные в сводной таблице дефекты дублируются, частично отсутствуют подтверждающие документы направления писем ответчика в адрес истца; кроме того, направленные письма в значительном периоде разнятся с датами поставок продукции истцом на объекты, что также противоречит достигнутым сторонами договоренностями по срокам уведомления поставщика. 

Вместе с тем, судами не учтено, что обстоятельство выявления дефектов не при приемке товара, а в последующем, не исключает право покупателя на предъявление впоследствии претензий, основанных на условиях договора и положениях действующего законодательства; в случае подтверждения принятия поставщиком претензий к качеству товара и выказывания намерений на устранение выявленных дефектов, а также ? совершения соответствующих действий, отрицание спорных фактов судами с указанием на неизвещение или несвоевременное извещение поставщика о необходимости явки для участия в осмотре товара не может быть признано обоснованным. При этом ссылки судов на дублирование дефектов в сводной таблице свидетельствует о наличии таких сведений, хотя и продублированных; указание судов на частичное отсутствие документов, подтверждающих направление претензионных писем ответчика в адрес истца, свидетельствует, в то же время, о частичном наличии соответствующей документации. 

При этом, как указал представитель ответчика, материалы дела, в том числе на СД носителе, содержат доказательства направления претензий, переписку сторон относительно недостатков товара и их устранения. Ответчик приводил и приводит ссылки на конкретные документы (с номерами, датами), которые, как он полагает, свидетельствуют о нарушениях договорных обязательств, допущенных со стороны поставщика, влекущих материальную ответственность, допустимую к зачету основного требования.  

Оценка документации, подтверждающей двустороннее признание недостатков товара, сроки уведомления о том поставщика и осуществление/неосуществление поставщиком действий, направленных на устранение недостатков, с целью выявления наличия обстоятельств нарушения поставщиком сроков устранения недостатков, а также ? оценка касающихся данного обстоятельства доводов обеих сторон спора, в судебных актах не приведена. 

При этом постановление суда содержит четкие выводы о том, что доводы апелляционной жалобы о неисполнении обязательств истца по договору, связанных с устранением выявленных дефектов поставленной продукции, не соответствуют действительности; истцом в материалы дела представлена переписка сторон, в соответствии с которой сторонами в ходе исполнения договора выявлялись недостатки в поставленной продукции; в случаях наличия дефектов истцом предпринимались меры по их устранению либо возмещению расходов ответчика на устранение, сторонами проводились зачеты взаимных требований, что подтверждается соответствующим актами, представленными в материалы дела.

Данные выводы противоречат прежде отраженным в судебных актах указаниям на абстрактность представленной ответчиком документации о наличии дефектов товара, нарушениях при извещении о том истца. Ссылок на проведенный анализ какой-либо документации в обоснование данных выводов судов не имеется. 

Относительно требования ответчика на сумму 925 002,62 руб. суды указали на то, что оно не является обоснованным, так как в нарушение статьи 65, 68 АПК РФ указанная сумма долга за материалы и услуги не подтверждена документально. 

Вместе с тем, обе стороны спора подтвердили факт представления ответчиком суду документов, касающихся данной части доводов ответчика. При этом от истца поступило подробное обоснование отсутствия возможности признания соответствующих представленных ответчиком доказательств допустимыми. Оценка представленных доказательств и доводов сторон судами также не дана.

Таким образом, выводы судов по факту заявления ответчика о зачете, а равно – и о взыскании долга в заявленной сумме, являются преждевременными, сделанными при отсутствии надлежащей оценки доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, что влечет отмену судебных актов на основании пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует установить обстоятельства, входящие в предмет исследования, исследовать и оценить содержание всех представленных в дело доказательств, применительно к тому, сведения о каких фактах они содержат и, какие обстоятельства по делу ими устанавливаются (статья 64 АПК РФ); исследовать и дать оценку доводам обеих сторон по делу и вынести законное и обоснованное решение при правильном применении норм материального и процессуального права, а также распределить понесенные сторонами судебные расходы.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, статьями 286, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.06.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2022 по делу № А65-26144/2021 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1, 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                                      Т.Н. Федорова

 

Судьи                                                                                    Н.А. Тюрина

 

                                                                                    И.В. Арукаева