АРБИТРАЖНЫЙ СУД  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-18104/2018

г. Симферополь

22 апреля 2019  года

Резолютивная часть решения оглашена  15.04.2019.

Полный текст решения изготовлен 22.04.2019.

             Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГКУ РК «Центр занятости населения» к ответчику ООО «Альфа» о взыскании,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности №47 от 09.01.2017;

от ответчика – не явился;

Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением о взыскании задолженности в размере 320 860,12 руб.

Определением суда от 12.02.2019 требования выделены в отдельные производства.

В рамках настоящего дела рассматривается требование ГКУ РК «Центр занятости населения»  к ООО «Альфа» о взыскании пени 142 571,01 руб. по Контракту от 19.05.2017 № 0875100006317000076-0674319-02.

Исковые требования обосновываются несвоевременным исполнением ответчиком работ по Контракту.

Ответчик отзыв на иск не предоставил. 

В судебном заседании, которое состоялось 08.04.2019, объявлен перерыв по 15.04.2019. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

                                                      УСТАНОВИЛ:

Между Истцом (Заказчик) и Ответчиком (Подрядчик) 19 мая 2017 года заключен контракт № 0875100006317000076-0674319-02 с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуги, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно п. 1.1 Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обеспечению доступности маломобильных групп населения в территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Евпатория (капитальный ремонт по адресу: 

<

...>) (далее - Работы, Объект соответственно), в объеме, установленном в Техническом задании (приложение №1 к Контракту), локальном сметном расчете (приложение №2 к Контракту) и проектной документацией, в срок, определенный календарным планом- графиком (приложение №3 к Контракту), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, по цене контракта, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта. Заказчик обязуется осмотреть результат выполненных Работ на Объекте, принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Согласно дополнительного соглашения № 1 от 17.11.2017 цена Контракта составляет 1 286 880,00 руб.

Согласно п. 4.1. Контракта срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет:

-начало выполнения работ - с момента подписания Государственного контракта

-окончание работ - не позднее 31.07.2017

Согласно п. 4.3. объем работ по Контракту должен быть выполнен в соответствии с Описанием объекта закупки и переданной Заказчиком документации в срок, установленный Графиком производства работ (приложение 3 к настоящему контракту), и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

Согласно п. 5.4.3. Контракта Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Графиком производства работ, Описанием объекта закупки, проектно-сметной документацией и по цене, не превышающей Цену контракта, строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в срок, установленный п. 4.1. настоящего Контракта.

В соответствии с п. 11.1 Контракта Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме в срок, определенный Контрактом.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Акт приемки выполненных работ датирован 10.11.2017.

Истец в исковом заявлении указывает, что работы ответчиком сданы 30.11.2017, о чем имеется отметка на последнем листе акта выполненных работ. 

Данный довод не может быть принят во внимание, поскольку запись о том, что работы выполнены 30.11.2017 выполнена от руки  неизвестным лицом, без проставления печати на данной записи, или дополняющих записей «исправленному верить» и т.д.

Таким образом, данная запись могла быть выполнена после подписания акта выполненных работ с указанием заинтересованной стороной любой даты. 

Более того, в материалы дела какие-либо иных доказательства, кроме данной записи, что работы выполнены 30.11.2017 отсутствуют.

Согласно ч. 1  ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, просрочка выполнения работ составляет 102 дня.  

Согласно п. 12.3.1 Контракта Пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Истец в расчете пени указывает, что ответчиком своевременно выполнены работы на сумму 282 572,24 руб.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

Таким образом, сумма пени составляет 253 537,49 руб.

Формула

Расчёт

Результат

К = ДП÷ДК × 100%

= 102÷73 × 100%

= 139,73% (К* = 0.03)

Cцб = К* × Ставка ЦБ

= 0.03 × 8.25%

= 0.2475%

C = Cцб × ДП

= 0.2475% × 102

= 0.25245

П = (Ц - В) × C

= (1 286 880,00 - 282 572,24) × 0.25245

= 253 537,49 р.

Ответчиком не представлено доказательств своевременного выполнения работ или оплаты неустойки. 

Более того, ответчиком обстоятельства, изложенные в исковом заявлении не оспариваются. 

В обеспечение исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства в сумме 131 941,00 руб.

Согласно п. 15.2 Контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых обязательств обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств (п. 15.6 Контракта).

На основании ст.410 Гражданского кодекса РФ и в соответствии с п.12.6 Контракта обязательство Заказчика перед Подрядчиком о возврате обеспечения исполнения Контракта прекращено полностью зачетом встречного требования Заказчика к Подрядчику об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств по Контракту. Зачет произведен на сумму 131 941,,00 руб., что подтверждается заявлением (уведомлением) о зачете взаимных требований от 05.12.2017 № с3-13/3575/01-19.

Таким образом, в результате зачета требований задолженность ответчика перед истцом составляет 121 596,49 руб. (253 537,49 – 131 941,00). 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается  ответчиком  в бюджет пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Альфа»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  в пользу ГКУ РК «Центр занятости населения» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) пеню в сумме 121 596,49 руб. 

В удовлетворении требований о взыскании пени в сумме 20 974,52 руб. отказать.

Взыскать с ООО «Альфа» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход Федерального бюджета госпошлину в размере  3 569,00 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                     

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья В.И. Гайворонский