Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-57345/2018

20 июля 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  20 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес:  Россия 190121, Санкт-Петербург, ул Декабристов д.57,кв.76, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ РЕСТОРАНТС" (адрес:  Россия 196128, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР А/ПОМ. 3Н, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 18 135 770 руб. 00 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.06.18.

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 05.06.18.

установил:

ИП ФИО1 обратился в суд с иском к ООО "ЕВРАЗИЯ РЕСТОРАНТС" о взыскании 18 135 770 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора подряда №1/06 от 14.06.12.

Ответчик иск отклонил.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда №1/06 от 14.06.12 и дополнительное соглашение №1 от 10.09.14.

Согласно п.1.1 договора подрядчик – истец обязуется провести в помещении заказчика – ответчика по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 86, литер А своими силами, инструментами и механизмами, а также материалами заказчика ремонтно-отделочные работы согласно смете (Приложение №1 к договору).

Согласно п.1.2 договора дата начала работ – 01.07.12, дата окончания работ – 31.08.12.

Согласно пункта 4.4. Договора, оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: сумма денежных средств в размере 6 135 770 (шесть миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (пункт 4.4.1. Договора), сумма в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта об исполнении гарантийных обязательств (пункт 4.4.2. Договора).

Подрядчик выполнил свои обязательства в соответствии с условиями Договора в полном объеме, что подтверждается подписанными актом по форме КС-2 №7 от 31.08.2012 и актом об исполнении гарантийных обязательств от 10.09.2014г.

Как следует из Дополнительного соглашения №1 от 10.09.2014г. стороны изменили срок оплаты работ и установили, что сумма денежных средств в размере 18 135 770 рублей 00 копеек будет оплачена Заказчиком не позднее 30.12.2016 г.

30.12.2016 г. Заказчик не выполнил свои обязательства по оплате за выполненные работы.

В настоящее время задолженность ответчика по оплате выполненных истцом работ составляет 18 135 770 руб. 00 коп.

Заявление ООО «Звездный» о вступлении в дело в качестве третьего лица, без самостоятельных требований отклонено, так как подано после завершения рассмотрения дела по существу.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ РЕСТОРАНТС" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 18 135 770 руб. 00 коп. задолженности и 113 679 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.