Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-39374/17-3-397

21 августа 2017 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена   09 августа 2017 г.  

Решение в полном объеме изготовлено 21 августа 2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Картавой О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

истца  Минобороны России (ИНН 

<

***>)

к АО «Главное управление обустройства войск» (ИНН 

<

***>)

третье лицо: ФКП «Управление заказчика капитального строительства» Министерства обороны РФ

о взыскании 91 369 210 руб. 99 коп. 

при участии: согласно протоколу 

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании денежных средств по государственному контракту от 12 октября 2010 г. № 574-МХ-4-3/2010  в размере 91 369 210 руб. 99 коп., из которых: сумму неотработанного аванса по государственному контракту от 12 октября 2010 г. № 574-МХ-4-3/2010 в размере 3 021 656,52 рублей; неустойку в размере 52 357 928,932 рублей. проценты за пользование авансом как коммерческим кредитом в размере 35 989 625,54 рублей.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ФНС России, 7 апреля 2015 г. в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «УМР» внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к АО «Главное управление обустройства войск».

В соответствии с п. 2 ст. 58 ст. ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал.

Ответчик представил отзыв, просит отказать о взыскании суммы аванса, а также процентов за пользование коммерческим кредитом, представил Контррасчёт.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, суд в порядке ст.156 АПК РФ рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции в отсутствие третьего лица.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим  основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между Минобороны России (государственный заказчик) и ОАО «УМР» (генподрядчик, ответчик) заключен государственный контракт от 12 октября 2010 г. № 574-МХ-4-3/2010 (далее - Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции мазутного хозяйства котельной войсковой части 33877 в г. Чехов-3 (шифр 574-МХ-4-3).

Цена Контракта составляет 40 462 078,00 рублей (пункт 3.1 Контракта).

      В соответствии с пунктом 5.2 Контракта срок окончания работ -30 октября 2011 г.

Генподрядчику перечислен аванс в размере 26 847 258,00 рублей (списан со счета государственного заказчика 01 декабря 2010 г. на сумму 14 708 635,00 рублей, 30 декабря 2010 г. на сумму 12 138 623,00 рублей.).

Генподрядчиком по Контракту выполнены работы на сумму 23 825 601,48 рублей.

Учитывая, что сумма перечисленного аванса по Контракту составила 26 847 258,00 рублей, а ответчиком выполнено по Контракту работ на сумму 23 825 601,48 рублей, задолженность (сумма неотработанного аванса по Контракту) перед Минобороны России по Контракту составила: 26 847 258,00 - 23 825 601,48 = 3 021 656,52 рублей.

Генподрядчиком работы по Контракту в полном объеме не выполнены и государственному заказчику не сданы.

В связи с невыполнение условий Контракта генподрядчиком Минобороны обратилось в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2015 г. по делу № А40-77888/2014 Контракт расторгнут.

Решением  Арбитражного  судагорода  Москвы от 22 августа 2012 г. по делу № А40-29019/11-95-147«Б» в отношении ОАО «УМР» была введена процедура внешнее управление. В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506, Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

В связи с чем, требования по денежным обязательствам ОАО «УМР» были заявлены уполномоченным органом в рамках дела № А40-29019/11. Вместе с тем, определением Арбитражного суда города Москвы от 2 октября 2014 г. по делу № А40-29019/11 производство по делу о банкротстве было прекращено. Определением Арбитражного суда города Москвы от 4 декабря 2014 г. по делу № А40-29019/2011 производство по требованию было прекращено.

Согласно пункту 4.10 Контракта генподрядчик в случае невыполнения работ или ненадлежащего выполнения им обязательств, предусмотренных Контрактом, лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и обязан уплачивать проценты за пользование авансом как коммерческим кредитом со дня, следующего за днем получения аванса по день фактического исполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом или возврата суммы аванса.

Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты процентов, за каждый день пользование авансом.

Общая сумма процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом составляет: 19 876 513,91 рублей + 16 113 111,63 рублей = 35 989 625,54 рублей.

В связи с расторжением Контракта у истца возникло право на требование суммы неотработанного аванса по Контракту в размере 3 021 656 руб. 52 коп.

Ответчиком утверждается, что Генподрядчиком денежные средства, перечисленные в качестве аванса по Контракту, были полностью израсходованы на выполнение работ по Контракту.

В тоже время, документов, подтверждающих факт выполнения Генподрядчиком работ на заявленную сумму неотработанного аванса по Контракту Ответчиком в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 18.3 Контракта в случае нарушения генподрядчиком сроков окончания работ, предусмотренных Контрактом, генподрядчик уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ.

В соответствии с представленным Истцом расчетом неустойки в размере 52 357 928,932 рублей, проверенным и принятым судом, следует отметить следующее.

При наличии в договоре промежуточных сроков выполнения работ применение мер ответственности без учета исполнения подрядчиком своих обязательств по договору противоречит ст. 330 ГК РФ. 

Начисление неустойки без учета стоимости выполненных работ свидетельствует о злоупотреблении Истцом правом, в связи с чем неустойка должна быть пересчитана исходя из стоимости не исполненных обязательств, которая должна составлять 7 486 414  руб. 43 коп. в соответствии с Контррасчётом № 1.

Ответчик  заявил о применении ст. 333 ГК РФ к заявленной сумме неустойки в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушенного обязательства.

Суд считает, необоснованными доводы Ответчика о несоразмерности  неустойки.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ № 94-ФЗ государственный контракт заключается в порядке, предусмотренном ГК РФ и иными федеральными законами с учетом положений ФЗ № 94-ФЗ.

Учитывая изложенное, как и участие в размещении заказа, так и заключение Контракта на условиях, предложенных государственным заказчиком, не являлось обязанностью для Генподрядчика.

Более того, необходимо отметить, что Контракт согласно преамбуле заключен на основании пп. 4 п. 2 ст. 55 ФЗ № 94-ФЗ, то есть как с единственным исполнителем.

То есть, заключая Контракт, Генподрядчик согласился со всеми его условиями, в том числе и с положениями об ответственности в случае невыполнения работ по Контракту, включенным в Контракт согласно нормам ФЗ № 94-ФЗ.

В остальной части  иск  о взыскании неустойки (штрафа) подлежит отклонению.

По мнению Ответчика, удовлетворение одновременно требований Истца о взыскании неустойки и требований о взыскании процентов за пользование денежными средствами нарушает основополагающий принцип права о недопустимости двойной ответственности за одно и тоже нарушение.

Данный довод Ответчика является необоснованным в виду следующего.

В соответствии с п. 4.10. Контракта Генподрядчик в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств, предусмотренных Контрактом, лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и обязан уплачивать проценты за пользование авансом как коммерческим кредитом со дня, следующего за днем получения аванса по день фактического исполнения всех обязательств, предусмотренных государственным контрактом или возврата суммы аванса. Плата за пользование устанавливается в размере одной сотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), действующей на день уплаты процентов, за каждый день пользования авансом.

То есть условие о коммерческом кредите предусмотрено Контрактом.

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Из буквального толкования государственного контракта сторонами достигнуто соглашение по вопросу предоставления коммерческого кредита и уплате процентов за коммерческий кредит, что соответствует положениям ст. 823 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом.

В п. 14 совместного постановления Пленума Верховного СудаРоссийской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда РоссийскойФедерацииот 8 октября 1998 г. № 13/14 разъяснено, что согласно ст.823 ГК РФ к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами. Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с момента, определенного законом или договором.

Таким образом, подлежащая на этом основании сумма является платой за кредит, а не мерой ответственности за неисполнение обязательства.

Проценты за пользование коммерческим кредитом не могут быть признаны мерой гражданско-правовой ответственности, так как они являются частью основного обязательства, предусмотренного условием о предоставлении коммерческого кредита.

Таким образом, неустойка по государственному контракту в сумме является обеспечением обязательства по государственному контракту (то есть мерой гражданско-правовой ответственности), а проценты за пользование авансом как коммерческим кредитом - частью основного обязательства должника по государственному контракту.

В связи с чем, а также принимая во внимание различную правовую природу возникновения обязательств по уплате процентов за пользование авансом и неустойки, взыскание с должника процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом, не может рассматриваться как применение двойной меры ответственности по государственному контракту.

Ответчиком заявлено о несоблюдении Истцом претензионного порядка урегулирования спора, что не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Частью 5 ст. 4 АПК РФ установлена обязательность соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора.

В соответствии с п. 20.2 Контракта при расторжении Контракта до завершения работ Генподрядчик возвращает Государственному заказчику в течение 30 дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства, в том числе авансовые платежи.

В связи с чем, в результате неисполнения Генподрядчиком обязательств по Контракту Минобороны России в адрес Генподрядчика 8 октября 2013 г. за № 212/6/2953 направлена претензия с предложением расторгнуть Контракт в связи с нарушением его условий, а также о взыскании неустойки и процентов за пользование авансом по Контракту.

Ответчиком неверно дано толкование п. 20.2 Контракта, поскольку в данном пункте не содержится условия о том, что авансовые платежи подлежат возврату в течение 30 дней с момента расторжения Контракта.

В связи с невыполнением условий Контракта Генподрядчиком Минобороны России обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о расторжении данного Контракта.

В тоже время, решением Арбитражного суда города Москвы от 22 августа 2012 г. по делу № А40-29019/11-95-147«Б» в отношении ОАО «УМР» была введена процедура внешнее управление.

В связи с чем, требования по денежным обязательствам подлежат предъявлению к должнику в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее -Закон о банкротстве).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2015 г. по делу № А40-77888/2014 Контракт расторгнут.

С учетом особенностей Закона о банкротстве, требования по денежным обязательствам Генподрядчика по Контракту перед Минобороны России были заявлены в рамках дела № А40-29019/11 через Федеральную налоговую службу, которая представляет интересы Российской Федерации по денежным обязательствам в делах о банкротстве.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ФНС России, 7 апреля 2015 г. в единый государственный реестр юридических лиц в отношении Генподрядчика внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к АО «ГУОВ».

В соответствии с п. 2 ст. 58 ст. ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

В связи с чем, все права и обязанности Генподрядчика, в том числе по Контракту, перешли к Ответчику.

Поскольку к Ответчику перешли все права и обязанности Генподрядчика в связи с его реорганизацией, Ответчик не мог не знать о наличие судебного спора.

В свою очередь, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2015 г. по делу № А40-77888/2014 вступило в законную силу, при этом Ответчиком не были предприняты меры по вступлению в процесс, а также по обжалованию судебного акта в случае не согласия с ним.

В связи с чем, претензионный порядок урегулирования спора является соблюденным.

Аналогично, претензионный порядок является соблюденным и по требованию о взыскании неустойки и процентов за пользование авансом, поскольку данные требования также содержались в претензии от 8 октября 2013 г. за № 212/6/2953.

Более того, Ответчик, являясь одним из основных кредиторов по делу № А40-29019/2011 (сумма, включенная в реестр требований кредиторов более 225 млн. рублей), не мог не знать о наличии требования по Контракту, заявленного и в рамках дела № А40-29019/2011 в 2014 году, поскольку Законом о банкротстве на арбитражного управляющего возложена обязанность по уведомлению кредиторов должника о поступлении новых требований.

Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности по требованию о взыскании неустойки и процентов за пользованием авансом.

При этом Ответчиком не учтено следующее.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года.

В соответствии с п. 1 ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

Срок исковой давности по требованиям об уплате периодического платежа должен исчисляться отделано по каждому просроченному платежу за соответствующий период.

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд города Москвы 3 марта 2017 г., что подтверждается штампом ФГУП «Почта России» на конверте почтового отправления.

Расчет неустойки произведен на дату расторжения Контракта.

В связи с чем, срок исковой давности не является пропущенным.

В соответствии с общими положениями об обязательствах (ст. ст. 307 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации) обязательства должны исполняться надлежащим образом и необоснованный односторонний отказ от их исполнения не допускается.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требования по заявленным истцом основаниям являются обоснованными и подлежат частичному удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711,  823 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 110, 112, 156, 161-167, 171-176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «Главное управление обустройства войск» в пользу Минобороны России сумму неотработанного аванса по государственному контракту от 12 октября 2010 г. № 574-МХ-4-3/2010  в размере 3 021 656 руб. 52 коп.,  неустойку в размере 7 486 414  руб. 43 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 35 989 625 руб. 54 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АО «Главное управление обустройства войск» в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 200 000  руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый  Арбитражный апелляционный суд.

Судья                          Картавая О.Н.