Арбитражный суд Мурманской области 

улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038, www.murmansk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Мурманск Дело № А42-11637/2023   «26» февраля 2024 года  

 Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального  Кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ООО «Управляющая компания Гарант+» в течение 30 дней со дня  вступления решения в силу безвозмездно устранить недостатки работ,  выполненных им по гражданско-правовому договору № 0149200002322001017002  от 13 апреля 2022 года:  

1) устранить некачественное проведение работ с выполнением работ по:  

- установке и разборке наружных инвентарных лесов высотой до 16 м  трубчатых (h-6,8 м) по периметру здания;  

- разборке желобов подвесных (со стороны дворового фасада) на 12 мп в  количестве 4 шт.;  

- устройству желобов подвесных (со стороны дворового фасада) на 12 мп с  применением: желоба водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет, в  количестве 4 шт., держателя желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм,  стандартный цвет, в количестве 4 шт., соединителя желоба МП, диаметр 125 мм,  стандартный цвет, в количестве 5 шт.;  

- устройству желобов настенных - замена воронки водосборной МП,  диаметром 300/100 мм, стандартный цвет, в количестве 1 шт.;  

- устройству дополнительных держателей желобов карнизных концевых (с  двух сторон от центрального фронтона) диаметром 125*132 мм, стандартный цвет,  в количестве 2 шт.;  

- герметизации отверстий на кровле (от выкрученных саморезов, головки  саморезов без кровельной накладки) резиновым герметиком - левая сторона от  центрального входа на площади 2,50 кв.м.;  

2) заменить некачественную тротуарную плитку на центральном крыльце  здания с выполнением работ по:  

- демонтажу перильного ограждения из нержавеющей стали с сохранением  материала для последующего восстановления в размере 3 мп;  

- разборке тротуарной плитки с расчисткой основания от раствора (площади  крыльца и горизонтали ступеней на площади 32,5 кв. м.;  

- демонтажу решетки приямка (демонтаж (разборка) металлических  конструкций) с сохранением материала в количестве 1 шт.;  

- облицовке крыльца и ступеней тротуарной плиткой «Тучка» 300*300-30 мм,  цвет серый, на клее (на ступенях горизонтальные плитки перекрывают  вертикальные) с сохранением приямка на площади 32,5 кв. м.;  

- монтажу перильного ограждения из нержавеющей стали в размере 3 мп; - установке решетки в приямок ранее демонтированной в количестве 1 шт.; 3) провести окрашивание фасада здания с выполнением работ по: 

- очистке поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и  лесов (цоколь) на площади 76,60 кв.м.;  

- отбивке штукатурки с поверхностей стен на площади 30,00 кв.м.; 

- ремонту штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной  слоя до 30 мм на площади 15,00 кв.м.;  

- ремонту штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м  толщиной слоя до 50 мм на площади 15,00 кв.м.;  

- сплошной шпаклевке ранее оштукатуренных поверхностей фасада и откосов  цементно-поливинилацетатным составом на площади 30,00 кв.м.;  

- огрунтовке ранее окрашенных фасадов на площади 76,60 кв.м.; 

- окраске цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная за 2  раза на площади 76,60 кв.м.  

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая  компания Гарант+» (ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»  (ИНН 

<

***>) на случай неисполнения судебного акта сумму 500 рублей 00  копеек за каждый день просрочки исполнения вступившего в законную силу  решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая  компания Гарант+» (ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 6 000 рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции месячный  срок со дня принятия.  

 Судья: Н.В. Быкова