АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799  

E-mail: arhangelsk.info@arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-4477/2024

г. Архангельск

25 июля 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2024 года 

Решение в полном объёме изготовлено 25 июля 2024 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Волкова И.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лысенко А.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества  

"Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия 164500, г.Северодвинск, Архангельская  область, Архангельское шоссе, дом 58)  

к ответчику - индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>; место жительства: Россия 163046, г.Архангельск)  

о взыскании 702 699 руб. 42 коп., без участия в заседании представителей сторон, установил: 

акционерное общество "Производственное объединение "Северное  машиностроительное предприятие" обратилось в Арбитражный суд Архангельской  области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 702 699 руб. 42 коп. неустойки за период с 15.11.2021  по 31.12.2022, начисленной за нарушения срока по выполнению работ по демонтажу  подъемных сооружений (кранов).  

В ходе судебного разбирательства истце уточнил сумму неустойки, просив  взыскать с ответчика 313 448 руб. 81 коп., исключив период моратория при расчете  неустойки.  

Уточнение цены иска принято судом. Ответчик отзыв на иск не представил.  Стороны извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.  

Исследовав письменные доказательства, суд установил следующее. 

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор на  выполнение работ по демонтажу подъемных сооружений (кранов) в соответствии с  техническим заданием № 63.63.11/531.  

В соответствии с п. 2.1. стоимость работ составляет 9 799 461 руб. 22 коп. 

Как следует из материалов дела заказчик 03.11.2021г. направил уведомление  подрядчику, в котором просил приступить к выполнению работ с 15.11.2021г.  

В соответствии с п. 9 технического задания, п. 4.1. договора подрядчик обязан  выполнить работы в течение одного месяца с даты начала их выполнения.  

Таким образом работы должны были быть выполнены не позднее 15.12.2021г.  

Как следует из искового заявления, по состоянию на март 2023г. подрядчик  выполнил работы лишь на 5 545 356 руб.; работы стоимостью 4 254 105 руб. не  выполнены.  

23.03.2023г. истцом было принято решение об отказе от исполнения договора и его  расторжении в одностороннем порядке (письмо в адрес ответчика № 80.323/489 от  23.03.2023г.).  

Пунктом 10.3 договора предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение  срока выполнения работ в размере 0,05% от цены невыполненных работ за каждый день  просрочки исполнения обязательства.  

По расчету истца неустойка за период с 15.11.2021г. по 31.12.2022г. за  исключением периода моратория составила 484 967 руб. 97 коп. Кроме того истец при  расчете исключил сумму удержания в размере 171 519 руб. 16 коп. Итого сумма  неустойки составила 313 448 руб. 81 коп.  

Проверив указанный расчет истца, суд счел его верным. Ответчик доводы истца ничем не опроверг. 

При изложенных обстоятельствах иск о взыскании неустойки подлежит  удовлетворению в полном объеме.  

По результатам рассмотрения дела и в соответствии с частью 1 статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине  относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества  "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 313 448 руб. 81 коп. неустойки, а также 9 269 руб. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить из федерального бюджета акционерному обществу "Производственное  объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 7 785 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области  в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья И.Н. Волков