АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28  

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-2398/2022

г. Южно-Сахалинск

21 июля 2022 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес  регистрации: 693000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Спиро» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 694550, 

<

...>)  

о возложении обязанности по устранению недостатков в рамках гарантийных  обязательств по муниципальному контракту от 03.07.2017 № 70/2017  

при участии: 

от истца: ФИО2 по доверенности № 387 от 03.09.2021;  в отсутствии ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «Спиро»  обязанность в течение месяца с даты вступления решения суда в законную силу  устранить за свой счет следующие недостатки и дефекты по государственному  контракту № 70/2017 от 03.07.2017, выявленные в период гарантийного срока:  

1. Устранить нарушения герметичности стыков сендвич-панелей (как  продольных, так и поперечных по всей площади кровли).  

2. Восстановить герметичность примыкания фасонного элемента (планки)  между парапетом и кровлей по осям 1/А-И, 6/А-И.  

3. Восстановить герметичность примыкания фасонного элемента (планки)  между вентшахтами и кровлей.  

4. Устранить зазоры в местах примыкания покрытия парапетов листовой  оцинкованной сталью и их крепление по осям 1/А-И, 6/А-И, в местах нахлеста  листов установить саморезы.  

5. Устранить замокание стены в осях И/1-6 (техническое помещение на отм. - 0,900), произвести отделочные работы.  

6. Устранить попадание влаги через продух вентиляции по оси 6 (техническое  помещение отм-0.900).  

7. Произвести замену поврежденных панелей потолка типа «Армстронг» на  лестничном марше в осях В-Г/5-6.  

8. Произвести замену поврежденных панелей потолка типа «Армстронг» на  лестничном марше в осях В-Г/1-2, устранить протечку в районе стыка перекрытия  и стены.  

9. Произвести замену панелей потолка типа «Армстронг» в помещениях на  отм. +3,600 (зал фитнеса, тренажерный зал, коридор).  

10. Восстановить плинтус из керамической плитки в коридоре на отм. +3,600 -  (1 м.п.).  

11. Изменить уклон напольной плитки помещения бассейна, мужская  душевая, для оттока воды по направлению к трапу.  

12. Устранить замокание стены бассейна в осях И-Е/1 отм. +3,600. 

13. Изменить уклон плитки пандуса на разворотной площадке, устранить  застой воды.  

14. Восстановить ограждения лестниц и пандусов, покрытие перил из  нержавеющей стали.  

15. Восстановить плитку в местах установки стоек перил. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спиро» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч)  рублей.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном  объеме через арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников