АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А59-3397/2023

г. Южно-Сахалинск

12 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 11.10.2023,  решение в полном объеме изготовлено 12.10.2023.  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес регистрации: 694490, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Золотой век» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Бумажная, д. 37)  

о взыскании неустойки, штрафа по муниципальному контракту   № 0361300002922000004 от 18.04.2022 «МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. Буюклы  Капитальный ремонт помещений, монтаж фасада здания»  

третьи лица: средняя общеобразовательная школа № 1 г. Охи им. героя  Советского союза А.Е. Буюклы  

при участии: от ответчика: ФИО2 по доверенности от 26.05.2023; в отсутствии истца и третьего лица 

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального  строительства городского округа «Охинский» (далее - истец, Учреждение, МКУ  «УКС «Охинский») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «Золотой век» (далее - ответчик,  Общество, ООО «Золотой век») о взыскании пени и штрафа по муниципальному  контракту № 0361300002922000004 от 18.04.2022 «МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е.  Буюклы Капитальный ремонт помещений, монтаж фасада здания» в общем размере  3 004 360 рублей 24 копейки.  

Исковые требования нормативно обоснованы положениями статьи 309, 310,  330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы  ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по государственному  контракту, ввиду чего истцом начислена неустойка.  

Определением от 05.06.2023 исковое заявление принято к производству суда и  назначено к рассмотрению в судебном заседании.  

В судебное заседание истец явку своего представителя не обеспечил, о дате и  месте его проведения уведомлен надлежащим образом, ввиду чего суд,  руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее - АПК РФ), определил провести заседание в его  отсутствие.  

Представитель ответчика, принимающая участие в судебном заседании  указала, что заявленная к взысканию неустойка не превышает 5% цены контракта,  ввиду чего она подлежала списанию на основании Постановления Правительства  Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов,  пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом». В связи с изложенным, просили в удовлетворении  исковых требований отказать.  

Изучив материалы дела, выслушав представителей ответчика и оценив по  правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд установил  следующее.  

18.04.2022 между МКУ «УКС «Охинский» (Заказчик) и ООО «Золотой Век»  

(Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0361300002922000004 «МБОУ  СОШ № 1 г. Охи им. А. Е. Буюклы. Капитальный ремонт помещений, монтаж  фасада здания» (далее - Контракт).  

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта, Подрядчик принимает на себя  обязательства выполнить капитальный ремонт объекта «МБОУ СОШ № 1 г. Охи  им. А. Е. Буюклы. Капитальный ремонт помещений, монтаж фасада здания»  соответствующие работы, в сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить  выполнение работ на объекте в соответствии со сметой Контракта (Приложение   № 2 к муниципальному контракту), а также в соответствии с Техническим  заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и проектной  документацией, с соблюдением технологии и всех требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данных работ и  условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику  необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить в  установленном настоящим Контрактом порядке.  

В силу пункта 1.2 Контракта объект капитального ремонта: Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа   № 1 г. Охи имени Героя Советского ФИО3 Буюклы. 694494,  

<

...> СССР, д. 32/1.  

На основании пункта 2.1 контракта, его цена составляет 150 777 770,00 (сто  пятьдесят миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят) рублей 00  копеек. НДС не облагается на основании статьи 346.11 Налогового кодекса  Российской Федерации.  

24.07.2023 между сторонами без замечаний и возражений подписан акт № 1  сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с которым, Заказчик принял у  Подрядчика работы, фактическая стоимость которых составила 145 900 064 рубля  22 копейки.  

Ввиду просрочки исполнения обязательств по Контракту, а также в связи с  нарушением ООО «Золотой Век» пунктов 4.1.7.,4.1.13 Контракта, истец претензией   № 4/1 от 22.12.2022 потребовал от последнего оплаты пени и штрафа.  

Неисполнение в добровольном порядке данного требования, явилось  основанием для обращения истца в суд, с рассматриваемым исковым заявлением.  

Оценив условия заключенного контракта, суд приходит к выводу о том, что  отношения сторон подлежат регулированию положениями главы 37 ГК РФ с  особенностями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе)  

В соответствии со статьями 307, 309, 310 ГК РФ в силу обязательства одно  лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать  услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо  воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  должника исполнения его обязанности.  

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие  причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных  оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными  обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.  

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение  проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель)  обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или)  выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их  результат.  

Истцом заявлено требование о взыскании пени за просрочку исполнения  обязательства по Контракту.  

Согласно статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться  неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой  гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

В пункте 1 статьи 330 ГК РФ указано, что неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По  требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему  убытков.  

В силу с пункта 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт  включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика  (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренных контрактом.  

В пункте 5.2 Контракта сторонами установлена ответственность Подрядчика  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.  

5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе  гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в  иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает заказчику  неустойку (штраф, пеня).  

5.2.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего  исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  контрактом. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта.  

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, за исключением  просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик начисляет Подрядчику штраф,  определяемый в следующем порядке:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  не превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);  

Размер штрафа составляет 753 888,85 (семьсот пятьдесят три тысячи  восемьсот восемьдесят восемь) рублей 85 копеек.  

5.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет  стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Заказчик  начисляет Подрядчику штраф, определяемый в следующем порядке:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.  рублей (включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.  рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.  Размер штрафа составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.  

5.2.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе  гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в  иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает заказчику  неустойку (штраф, пеня).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после  дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату  уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом  (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически  исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

За нарушение сроков исполнения обязательства по Контракту, Заказчиком  Подрядчику начислены пени в размере 2 250 471 рубль 39 копеек, а за нарушение  пунктов 4.1.7.,4.1.13 Контракта штраф в размере 753 888 рублей 85 копеек.  

Однако в соответствии с частью 9.1 статьи 34 Закона о контрактной системе,  Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок  списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных  заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.  

Как следует из пункта 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, списание или  предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) является  обязанностью заказчика, в связи с чем, суд обязан проверить соблюдение им  требований указанной нормы.  

Согласно части 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе, начисленные  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы  неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим  исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных  контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены  Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской  Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов,  пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом» (далее - Постановление Правительства РФ № 783)  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном  объеме, за исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке  исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара,  

работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных  контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с  возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя)  обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в  связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные  ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком  (подрядчиком, исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине  возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта  обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в  связи с введением политических или экономических санкций иностранными  государствами, совершающими недружественные действия в отношении  Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских  юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными  государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)  государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных  государств или государственных объединений и (или) союзов мер  ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).  

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ № 783 (в  редакции Постановлений Правительства РФ от 26.04.2020 № 591, от 10.03.2022 №  340) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:  

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)  не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением  случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта;  

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)  превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены  контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и  

неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением  случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта;  

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по  контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств,  повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);  

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по  контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на  строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта  поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты  заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым  подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9  августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства  Российской Федерации» предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об  изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением  цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при  исполнении такого контракта, с приложением информации и документов,  обосновывающих такое предложение;  

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие  неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по  контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств,  повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и  (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

Согласно подпункту «а» пункта 5 Постановления Правительства РФ от  04.07.2018 № 783 для списания неустойки до 5 % от цены контракта необходимо  наличие документа об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном  объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.  

Поскольку сумма начисленной истцом ответчику неустойки за просрочку  исполнения обязательства по контракту не превышает 5% от цены контракта;  контракт исполнен обеими сторонами в полном объеме, суд находит основания для  списания заявленной истцом суммы неустойки, предусмотренного подпунктом «а»  пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 04.07.2018 № 783 с учетом изменений, внесенных Постановлением  Правительства РФ от 10.03.2022 № 340.  

Данный правовой подход соответствует правовой позиции, изложенной в  Определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2022 № 302-ЭС21- 25561.  

Ввиду изложенных обстоятельств, суд не проверяет правильность расчета  неустойки, а также констатирует, что иные доводы сторон правового значения для  разрешения спора не имеют.  

С учетом изложенного, суд отказывает МКУ «УКС «Охинский» в  удовлетворении исковых требований.  

При распределении судебных расходов, понесенных истцом в виде уплаты  государственной пошлины, суд исходит из положений статьи 110 АПК РФ,  регламентирующей, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в  деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со  стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 179 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном  объеме через арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников