Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-100052/2020

16 февраля 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  04 февраля 2021 года. Полный текст решения изготовлен  16 февраля 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нефедовой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СОТЭКС" (188513, Ленинградская область, район Ломоносовский, деревня Разбегаево, зона 4-й микрорайон (Большевик промзона), здание 16/10, помещение №1, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "САН-ТЭК СПб" (192283, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 97, корпус 2 литер А, помещение 18Н, офис 1, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 21 455 965 руб. 06 коп., в т.ч. 

- 5 568 243 руб. 41 коп. неотработанного аванса по договору подряда № С-170/19 (Жк/Л) от 02.09.2019, 

- 13 608 483 руб. 13 коп. стоимости принятых подрядчиком материалов,

-  1 124 778 руб. 88 коп. компенсации затрат за электроэнергию и на работу машин и механизмов, услуги доставки, транспортные расходы, обслуживание бытового городка, 

- 1 002 283 руб. 81 коп. неустойки по п. 13.4.1 договора за период с 28.04.2020 по 06.07.2020, 

- 152 175 руб. 83 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2020 по 02.11.2020 с последующим их начислением, начиная с 03.11.2020 и по дату фактического исполнения обязательства исходя из ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующие периоды, а также 130 280 руб. расходов по уплате государственной пошлины

при участии

согласно протоколу судебного заседания от 04.02.2021

установил:

Истец - общество с ограниченной ответственностью "СОТЭКС" (далее – Компания, ООО "СОТЭКС"), обратился в Арбитражный суд города Санкт – Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью "САН-ТЭК СПб" (далее – Общество, ООО "САН-ТЭК СПб") о взыскании 21 455 965 руб. 06 коп., в т.ч. 

- 5 568 243 руб. 41 коп. неотработанного аванса по договору подряда № С-170/19 (Жк/Л) от 02.09.2019, 

- 13 608 483 руб. 13 коп. стоимости принятых подрядчиком материалов,

-  1 124 778 руб. 88 коп. компенсации затрат за электроэнергию и на работу машин и механизмов, услуги доставки, транспортные расходы, обслуживание бытового городка, 

- 1 002 283 руб. 81 коп. неустойки по п. 13.4.1 договора за период с 28.04.2020 по 06.07.2020, 

- 152 175 руб. 83 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2020 по 02.11.2020 с последующим их начислением, начиная с 03.11.2020 и по дату фактического исполнения обязательства исходя из ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующие периоды, а также 130 280 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 18.11.2020 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное заседание на 04.02.2021 на 12 час.00 мин., судебное разбирательство на 04.02.2021 на 12 час. 05 мин.

Стороны, извещенные в порядке, предусмотренном ст. ст. 121-122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в настоящее заседание не явились; ответчик отзыв не представил, иск ни по праву, ни по размеру не оспорил, возражений против рассмотрения дела в  его отсутствие не заявил; истец в электронном виде направил испрашиваемые в определении суда от 18.11.2020 документы.

Суд на основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершил предварительное заседание и рассмотрел спор по существу в отсутствие сторон по правилам ч.3 ст.156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между Компанией (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) заключен договор подряда № С-170/19 (Жк/Л) от 02.09.2019 (далее – договор), по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по отделке внутренних помещений корпуса 2.1 (секция 1-2) на объекте: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой", по адресу: Санкт-Петербург, Новолитовская улица, кадастровый номер 78:36:0005121:1222.

В порядке пункта 2.3.4. договора, в целях промежуточного авансового финансирования работ заказчиком перечислены подрядчику денежные средства в размере 20 915 318 руб. 21 коп., что подтверждается платежными поручениями № 928 от 10.09.2019, № 1290 от 02.10.2019, №1419 от 04.10.2019, № 2215 от 11.11.2019, № 2286 от 13.11.2019 на сумму 2 000 000,00 руб. №3051 от 11.12.2019, № 3422 от 23.12.2019, № 1388 от 17.03.2020, № 1706 от 31.03.2020, № 177 от 31.01.2020, № 531 от 11.03.2020, № 635 от 17.03.2020.

Письмом от 23.01.2020 года № 24 ответчик гарантировал заказчику исполнить обязательства по завершению работ на общую сумму 21 170 795 руб. 64 коп. и передать результат работ заказчику, эксплуатирующей организации и участникам долевого строительства, а также сдать исполнительную документацию в срок 07.04.2020.

В соответствии с пунктом 3.1.2 договора работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 07.04.2020. 

Заказчиком приняты работы на общую сумму 15 347 074 руб. 80 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.09.2019, №2 от 31.10.2019, а также справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 30.09.2019, № 2 от 31.10.2019.

Между тем, как утверждает истец, к согласованному сроку работы ответчик не выполнил в полном объеме.

Согласно расчету истца,  ответчиком не выполнены работы на общую сумму 5 568 243 руб. 41 коп., результат работ не предъявлен к приемке заказчику, эксплуатирующей организации; исполнительная документация не сдана.

Также Компания поставила Обществу материалы на общую сумму 13 608 483 руб. 13 коп., что подтверждается двусторонними УПД № 3860 от 16.09.2019, № 4518 от 27.09.2019, №4806 от 02.10.2019, № 4809 от 04.10.2019, № 4815 от 05.10.2019, № 4819 от 09.10.2019, № 4812 от 11.10.2019, № 4810 от 11.10.2019, № 4813 от 14.10.2019, № 4915 от 16.10.2019, № 4829 от 17.10.2019, № 5164 от 23.10.2019, № 4939 от 23.10.2019, № 4938 от 29.10.2019, № 5165 от 29.10.2019, № 5185 от 31.10.2019, № 5230 от 13.11.2019, № 5235 от 19.11.2019, № 5597 от 20.11.2019, № 6253 от 26.12.2019, № 6272 от 27.12.2019, № 6026 от 27.12.2019, № 6404 от 31.12.2019, № 223 от 22.01.2020, №227 от 27.01.2020, № 419 от 09.02.2020.

Согласно пункту 2.8. договора, подрядчик компенсирует заказчику затраты по потребляемой электо-, тепло- энергии и воды на основании акта расхода. 

При этом при немотивированном отказе подрядчика от подписания акта, акт подписывается в одностороннем порядке, после чего данный акт является достаточным основанием для возникновения у подрядчика обязательств по оплате стоимости фактически израсходованных ресурсов.

На основании актов подрядчик компенсирует затраты заказчика на тепло-, электроэнергию и водоснабжение путем оплаты выставленных счетов в течение 5-ти  рабочих дней.

Ответчик,  как указывает истец,  не компенсировал ему  затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, а именно: затраты на работу машин и механизмов, услуги доставки, транспортные расходы, обслуживание бытового городка, коммунальные затраты и имеет  долг в сумме 1 124 778 руб. 88 коп.

16.06.2020 истец направил ответчику уведомление №И102/20(С) о расторжении договора с требованием о возврате неотработанного аванса, а также компенсации затрат, понесенных вследствие исполнения договора, при этом ответчик уклонился от получения уведомления, согласно условиям соглашения сторон, договор считается расторгнутым с 06.07.2020.

Поскольку обязательство по выполнению работ ответчиком не исполнено, денежные средства (аванс), уплаченные по договору не возвращены, истец обратился с настоящим иском в суд.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности.

По правилам статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение условий договорного обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой стороны. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

Специальные основания и правила расторжения договора подряда установлены в статьях 715 и 717 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Как следует из  положений статьи 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Материалами дела подтверждается перечисление истцом ответчику авансового платежа в заявленном размере, а также расторжение истцом договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом ответчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

По смыслу указанных выше положений ГК РФ, а также правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении Президиума от 29.06.2004 N 3771/04, неосновательное обогащение на стороне приобретателя возникает с момента поступления в его владение и пользование чужого имущества, если при этом правоотношения сторон (приобретателя и потерпевшего) не урегулированы нормами обязательственного права и не связаны с исполнением гражданско-правовой сделки.

В силу статей 9, 41, 65 АПК РФ участвующие в деле лица самостоятельно осуществляют свои процессуальные права и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, обязаны своевременно представлять доказательства в подтверждение своих доводов.

Истцом обязательства по перечислению предварительного платежа (аванса) выполнены в полном объеме; между тем доказательства сдачи истцу результата выполненных работ либо возврата перечисленных денежных средств в заявленном размере Обществом в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлены.

Положениями статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

Согласно пункту 13.4.1 договора за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,2 % от стоимости невыполненных работ по договору.

За нарушение сроков выполнения работ истец начислил 1 002 283 руб. 81 коп. неустойки по пункту 13.4.1 договора за период с 28.04.2020 по 06.07.2020. Расчет неустойки судом проверен и признан арифметически верным, ответчиком не оспорен.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

За просрочку возврата денежных средств, истцом начислено 152 175 руб. 83 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2020 по 02.11.2020. Расчет процентов судом проверен и признан арифметически верным, ответчиком не оспорен.

Проценты за пользование чужими средствами по требованию истца взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). 

Пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума N 7) разъяснено, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Кодекса, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Кодекса).

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 03.11.2020 и по день фактической оплаты задолженности, исходя из ключевой ставки  ЦБ РФ, действующей в соответствующих периодах, признано судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно статье 747 ГК РФ в договоре строительного подряда могут быть предусмотрены обязанности генподрядчика по предоставлению субподрядчику в пользование необходимых для осуществления строительных работ зданий и сооружений, оказанию услуг по транспортировке грузов, временной подводке сетей электроснабжения, водопровода и оказанию других услуг, связанных с организацией и обслуживанием строительства. В этом случае генподрядчик в рамках договора строительного подряда предоставляет субподрядчику встречные услуги.

В силу пункта 2 указанной статьи стороны вправе предусмотреть в договоре и другие обязанности заказчика.

Пункт 3 статьи 747 ГК РФ взаимосвязан с пунктом 2 и предписывает сторонам урегулировать в договоре строительного подряда вопрос о распределении между ними расходов, связанных с предоставленных заказчиком услуг.

Буквально формулировка пункта 2 статьи 747 ГК РФ предполагает, что обязанность по оказанию "генподрядных услуг" возникает в случаях, предусмотренных договором строительного подряда. То же самое касается оплаты таких услуг (пункт 3 статьи 747 ГК РФ).

По смыслу указанных норм оплата услуг генподряда в данном случае призвана компенсировать затраты понесенные генподрядчиком в процессе выполнения работ, в том числе административные, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, сдачей работ основному заказчику.

В силу статьи 421 ГК РФ при заключении договора стороны, вправе определять его условия самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Факт  передачи ответчику материала на общую сумму 13 608 483 руб. 13 коп. подтверждается двусторонними УПД № 3860 от 16.09.2019, № 4518 от 27.09.2019, №4806 от 02.10.2019, № 4809 от 04.10.2019, № 4815 от 05.10.2019, № 4819 от 09.10.2019, № 4812 от 11.10.2019, № 4810 от 11.10.2019, № 4813 от 14.10.2019, № 4915 от 16.10.2019, № 4829 от 17.10.2019, № 5164 от 23.10.2019, № 4939 от 23.10.2019, № 4938 от 29.10.2019, № 5165 от 29.10.2019, № 5185 от 31.10.2019, № 5230 от 13.11.2019, № 5235 от 19.11.2019, № 5597 от 20.11.2019, № 6253 от 26.12.2019, № 6272 от 27.12.2019, № 6026 от 27.12.2019, № 6404 от 31.12.2019, № 223 от 22.01.2020, №227 от 27.01.2020, № 419 от 09.02.2020,  которые  ответчиком в установленном порядке не оспорены, о фальсификации которых в порядке  статьи  161 АПК РФ не заявлено.

Согласно пункту 2.8. договора, подрядчик компенсирует заказчику затраты по потребляемой электо-, тепло- энергии и воды на основании акта расхода. 

При этом при немотивированном отказе подрядчика от подписания акта, акт подписывается в одностороннем порядке, после чего данный акт является достаточным основанием для возникновения у подрядчика обязательств по оплате стоимости фактически израсходованных ресурсов.

На основании актов подрядчик компенсирует затраты заказчика на тепло-, электроэнергию и водоснабжение путем оплаты выставленных счетов в течение 5-ти  рабочих дней.

По данным истца, не оспоренным ответчиком, размер  компенсация затрат за электроэнергию, на работу машин и механизмов, услуги доставки, транспортные расходы, обслуживание бытового городка составил 1 124 778 руб. 88 коп.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Материалы дела не содержат доказательств оплаты ответчиком суммы затрат за электроэнергию, на работу машин и механизмов, услуги доставки, транспортные расходы, обслуживание бытового городка, контррасчета не представлено, доводы истца не опровергнуты, что в силу положений  части  3.1  статьи 70 АПК  РФ является основанием для удовлетворения требований истца в вышеуказанном размере.

При указанных обстоятельствах исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В части 1 статьи 110 АПК РФ  указано, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны.

Руководствуясь статьями  110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд решил:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "САН-ТЭК СПб" в  пользу общества с ограниченной ответственностью "СОТЭКС" 21 455 965 руб. 06 коп., в т.ч.  5 568 243 руб. 41 коп. неотработанного аванса по договору подряда № С-170/19 (Жк/Л) от 02.09.2019,  13 608 483 руб. 13 коп. стоимости принятых подрядчиком материалов,   1 124 778 руб. 88 коп. компенсации затрат за электроэнергию и на работы машин и механизмов, услуги доставки, транспортные расходы, обслуживание бытового городка, 1 002 283 руб. 81 коп. неустойки по п. 13.4.1 договора за период с 28.04.2020 по 06.07.2020, 152 175 руб. 83 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2020 по 02.11.2020 с последующим их начислением, начиная с 03.11.2020 и по дату фактического исполнения обязательства исходя из ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующие периоды, а также 130 280 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

Судья                                                                                Нефедова А.В.