322/2023-61613(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-11651/2022

21 июня 2023 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Индейкиной Ю.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Егоровой О.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального государственного  унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного  движения в Российской Федерации» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>),  

об обязании устранить недостатки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение 30 календарных дней со дня вступления в  

законную силу решения по настоящему делу безвозмездно устранить недостатки  

выполненных работ по договору от 01.06.2021 № 32110231072, а именно: 

1) Устройство бетонной подготовки под всеми железобетонными плитами, а также  

оклейка рубероидом между бетонной подготовкой и железобетонными плитами на  

которых установлена металлическая башня WFT-6-II и аппаратный контейнер путем  

выполнения комплекса работ: - устройство бетонной подготовки – 3,588 м3, 

- гидроизоляция фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид) – 92  

м2; 

2) Привести в соответствие с Проектом смонтированные контуры защитного  

заземления металлической башни и дизель-генераторной установки путем выполнения  

комплекса работ: - демонтаж заземлителя горизонтального – 36 м., - демонтаж заземлителя вертикального – 9 шт., - разработка грунта в траншеях под горизонтальный заземлитель – 11,7 м3., 

- устройство горизонтального заземлителя из стальной полосы 40*4 мм в траншее –  

65 м., 

- устройство горизонтального заземлителя из стальной полосы 40*4 мм по месту –  

15 м., - монтаж вертикальных заземлителей на глубину 3,6 м. – 14 шт.; 

- обратная засыпка грунтом траншеи горизонтальный заземлитель (с уплотнением  

грунта) – 11,7 м3. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Федерального государственного унитарного  предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в  Российской Федерации» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6 000 руб. расходов  по уплате государственной пошлине.  

Взыскать на случай неисполнения решения в установленный срок с общества с  ограниченной ответственностью «Норд-Строй» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия  «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской  Федерации» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) судебную неустойку в размере  2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики  Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме. Кассационная жалоба на  решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Индейкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 2:44:00

Кому выдана Индейкина Юлия Александровна