ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-101965/22-67-792

г. Москва

04 июля 2022 г.

Резолютивная часть решения оглашена 28 июня 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 04 июля 2022 г.

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ СБ" (117042, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2011, ИНН: 

<

***>),

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЯРТЕК" (129343, 

<

...>, ЭТ/ПОМ 1/11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2003, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 2 224 060,04 руб.

При участии:

От истца: ФИО1 по дов-ти от 01.06.2022 г., диплом

От ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ СБ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ЯРТЕК" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору от 23.01.2020 № 23/01/2020 в размере 2 224 060 руб. 04 коп., неустойки в размере 222 406 руб. 00 коп.

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, 23.01.2020 между ООО «Интех СБ» (далее по тексту – Истец, Подрядчик) и ООО «Яртек» (далее по тексту – Ответчик, Заказчик) был заключен Договор  подряда № 23/01/2020 (далее по тексту - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности выполнить работы по монтажу системы трубопроводов пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода по адресу: 

<

...>, в соответствии с условиями Договора, согласно утвержденной проектной (технической) документации в полном объеме, в соответствии  со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктами 2.1 и 2.2 Договора установлено, что общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему Договору определена Сторонами в Смете (Приложение № 1 к Договору) и составляет: 15 091 198, 40 (Пятнадцать миллионов девяносто одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (20%) - 2 515 199, 73 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 73 копейки. В общую стоимость работ включены все издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ.

В силу  п. 1.3 Договора, срок выполнения работ: с 27 января 2020 года по 30 апреля      2020 года. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по настоящему Договору.

30 апреля 2020 Истец и Ответчик заключили Дополнительное соглашение № 1, согласно которому срок выполнения работ был перенесен: с 27 января 2020 по 15 июля 2020.

Все работы, предусмотренные Договором, были выполнены Подрядчиком качественно и в срок и приняты Заказчиком.  Согласно платежным поручениям № 159 от 29.01.2020, № 535 от 12.03.2020,   № 178 от 25.03.2020,   № 796 от 23.04.2020,   № 825 от 27.04.2020,   № 789 от 06.05.2020,   № 846 от 20.05.2020,   № 1979 от 17.08.2020,   № 2878 от  20.10.2020,   № 2906 от 30.10.2020, № 3888 от 21.12.2020,   № 3930 от 24.12.2020, Заказчик выполнил свои обязательства перед Подрядчиком по оплате основных работ по Договору.

Согласно п. 1.4 Договора, в случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения отдельных изменений в сроки выполнения работ, влияющих на конечный срок, такие изменения согласовываются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

В соответствии с п. 4.2.3 Договора, Заказчик вправе вносить изменения по ходу работ в проектную (техническую) документацию, если они не меняют характера предусмотренных в Договоре работ, при условии заключения Дополнительного соглашения.

Так, 15.07.2020 между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 2 (далее по тексту – Дополнительное соглашение), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить дополнительные работы согласно смете (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению).

Согласно п. 2 Дополнительного соглашения общая стоимость дополнительных работ составляет 1 469 500, 12 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей     12 копеек, в т.ч. НДС 20% - 244 916,69 (двести сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек.

В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения, оплата за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, производится Заказчиком в течение 10  (Десять) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2) и  Справки стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3),  передачи Подрядчиком Заказчику документации согласно п. 3.1.10. и надлежащим образом оформленных  бухгалтерских документов,  в размере 100% стоимости работ,  что составляет 1 469 500, 12 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 12 копеек, в т.ч. НДС 20% - 244 916,69 (двести сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек. Заказчик оставляет за собой право не перечислять окончательный платеж до момента предоставления бухгалтерских документов оформленных надлежащим образом и предоставления документации согласно п. 3.1.10 Договора.

В силу п. 4 Дополнительного соглашения, срок выполнения дополнительных работ составляет с 15 июля 2020 по 30 декабря 2020.

Также, Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.3 Договора и принять его в следующей редакции: «1.3 Срок выполнения работ: с 27 января 2020 года по 30 декабря     2020 года».

Выполнение Истцом дополнительных работ подтверждается следующими документами:

В письмах Подрядчика, адресованных Заказчику, № 52 от 11.06.2020, № 55 от 21.07.2020, № 68 от 03.09.2020, № 69 от 03.09.2020, № 80 от 27.11.2020, Подрядчик указывает что, в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию, необходимо заключение Дополнительного соглашения на общую сумму 1 469 500, 12 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 12 копеек. Обращаю внимание суда, что на эту же сумму, с указанием этих же видов работ и было заключено Дополнительное соглашение № 2, подписанное обеими Сторонами.

Между сторонами подписаны также следующие документы: Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.02.2020 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.02.2020 (КС-3) на сумму 1 993 547,28 руб.;  Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.03.2020 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.03.2020 (КС-3) на сумму 2 996 159,14 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.06.2020 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.03.2020 (КС-3) на сумму 2 879 045,14 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 4 от 25.09.2020 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.09.2020 (КС-3) на сумму 1 532 087,94 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 5 от 12.11.2020 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 12.11.2020 (КС-3) на сумму 408 439,46 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 6 от 30.12.2020 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.12.2020 (КС-3) на сумму 1 469 500,12 руб. Таким образом, работы выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащего качества и в обусловленный Договором срок, и приняты Заказчиком.

В силу п. 4.1.3 и п. 4.1.5 Договора, Заказчик обязан принять по Акту выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) результаты выполненных работ и оплатить Подрядчику выполненную работу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

В соответствии  п. 6.1 и 6.2 Договора, сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком осуществляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2  (Приложение № 2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  (Приложение №3), которые предоставляет Подрядчик по Акту приема передачи.  Заказчик вправе привлечь независимых специалистов для оценки выполненных работ и представленных Актов и Справок. Работы считаются выполненными Подрядчиком, принятыми Заказчиком  и подлежат оплате исключительно  после утверждения Заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2  и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заказчик обязуется утвердить представленные Акты и Справки в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня  их представления Подрядчиком или представить мотивированный отказ в письменной форме с указанием причин (недоделки, дефекты в работах). Если Акты не утверждены и не представлен мотивированный отказ, работы считаются Подрядчиком не выполнены, Заказчиком не приняты и оплате не подлежат.

Акты и Справки Заказчиком подписаны, мотивированного отказа в письменной форме, равно как и в устной, не поступало.

Таким образом, Заказчик не выполнил свои обязательства по оплате работ согласно Дополнительному соглашению №2 в размере 1 396 025,11 (один миллион триста девяносто шесть тысяч двадцать пять рублей) 11 копеек.

Кроме того, согласно п. 2.3.3 Договора, 5% от Договорной стоимости в размере       754 559, 92 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)  рублей 92 копейки,  в т.ч. НДС (20%) - 125 759, 99 (Сто двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 99 копеек, удерживается Заказчиком,  в целях возмещения возможных убытков Заказчика от неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.  Удержанная Заказчиком сумма оплачивается  по истечении 6-ти месяцев с момента завершения работ и подписания Акта (форма КС-2), Справки стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3).

Так, с учетом того, что все работы Подрядчиком были выполнены в срок до 30 декабря 2020, а Акт (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3) подписаны обеими сторонами 30.12.2020, 6-ти месячный срок истек еще 01.07.2021.

Таким образом, Заказчик не выполнил и обязательства по выплате удержанной суммы в размере 828 034,93 (восемьсот двадцать восемь тысяч тридцать четыре) рубля 93 копейки. Данная сумма сложилась из расчета 5% от общей стоимости работ по Договору и Дополнительному соглашению - 16 560 698,52 (15 091 198,40+1 469 500,12) .

Между Истцом и Ответчиком подписаны Акты сверки взаимных расчетов.

Согласно Акту сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2020, по состоянию на       31.12.2020 задолженность ООО «Яртек» в пользу ООО «Интех СБ» составляет 2 224 060,04 (два миллиона двести двадцать четыре тысячи шестьдесят) рублей 04 копейки. Эта сумма долга складывается из неоплаченных, но выполненных Подрядчиком работ на сумму 1 396 025,11 рублей и суммы, удержанной Заказчиком, как покрытие возможных убытков (5%) в размере 828 034,93 рублей. Настоящий Акт со стороны Ответчика подписан Заместителем главного бухгалтера ФИО2

Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 15.04.2021, по состоянию на 15.04.2021 задолженность ООО «Яртек» в пользу ООО «Интех СБ» также составляет 2 224 060,04 (два миллиона двести двадцать четыре тысячи шестьдесят) рублей       04 копейки. Эта сумма долга складывается из неоплаченных, но выполненных Подрядчиком работ на сумму 1 396 025,11 рублей и суммы, удержанной Заказчиком, как покрытие возможных убытков (5%) в размере 828 034,93 рублей. Настоящий Акт со стороны Ответчика подписан Генеральным директором ФИО3

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права.

Суд отмечает, что ответчик путем подписания актов о приемке выполненных работ, составленных по унифицированной форме №КС-2, без замечаний и возражений принял выполненные ответчиком работы, что исходя из буквального значения содержащихся в пунктах  договора слов и выражений и принципа добросовестности участников гражданских правоотношений, свидетельствует о том, что исполнительная документация была ему передана.

Доказательств того, что без исполнительной документации невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре, ответчик не представил.

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности по договору от 23.01.2020 № 23/01/2020 в размере 2 224 060 руб. 04 коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

 

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 222 406 руб. 00 коп.

В соответствии с 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 9.10 Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от размера платежа подлежащего оплате за каждый день просрочки, но не более 10% от размера платежа подлежащего оплате.

Согласно условиям Договора оплата за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, производится Заказчиком в течение 10  (Десять) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2) и  Справки стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3) (п. 2.3.2 Договора и п. 3 Дополнительного соглашения).

Сумма основной задолженности за оплату работ составляет 1 396 025,11 (один миллион триста девяносто шесть тысяч двадцать пять рублей) 11 копеек. Оплата должна была быть произведена не позднее 21.01.2021, однако до настоящего момента задолженность не погашена.

Соответственно, сумма неустойки, подлежащей оплате, составляет 139 602,51 руб. (сто тридцать девять тысяч шестьсот два) рубля 51 копейка (расчет прилагается).

Также, Ответчик необоснованно удерживает сумму в размере 5% от Договорной стоимости, что составляет 828 034,93 (восемьсот двадцать восемь тысяч тридцать четыре) рубля 93 копейки. Оплата должна была быть произведена не позднее 30.06.2021, однако до настоящего момента задолженность не погашена.

Соответственно, сумма неустойки, подлежащей оплате, составляет 82 803,49 руб. (восемьдесят две тысячи восемьсот три) рубля 49 копеек (расчет прилагается).

Согласно расчету истца, общая сумма неустойки, подлежащая выплате Истцу за невыполнение своих обязательств Ответчиком, составляет 222 406,00 (двести двадцать две тысячи четыреста шесть) рублей.

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 390 861 руб. 10 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЯРТЕК" (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ СБ" (ИНН: 

<

***>) задолженность по договору от 23.01.2020 № 23/01/2020 в размере 2 224 060 (два миллиона двести двадцать четыре тысячи шестьдесят) руб. 04 коп., неустойку в размере 222 406 (двести двадцать две тысячи четыреста шесть) руб. 00 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 35 232 (тридцать пять тысяч двести тридцать два) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев