Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-150780/17-57-1072

16 января 2018 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 10 января 2018 года

Полный текст решения изготовлен 16 января 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Ждановой Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1.

рассматривает в открытом судебном заседании дело

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО-ЛЕНД" (ИНН 

<

***>)

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЕСТ-Р" (ИНН 

<

***>)

о взыскании 21 370 837 руб. 24 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.04.2017 г.

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 23.08.2017 г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМО-ЛЕНД" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕСТ-Р" о взыскании убытков в размере 21 370 837 руб. 24 коп.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что 07 апреля 2016 г. между ООО «ЭДЛАЙН» и ООО «Технотест-Р» был заключен договор № 3-В, в соответствии с которым ООО «ЭДЛАЙН» поручает, а ООО «Технотест-Р» принимает на себя обязательства по изготовлению и доставке объёмно-декоративной конструкции (далее - ОДК) «Арки цветочные М» габаритным размером 6,0x4,7 м в количестве 14 шт. на общую сумму 5 866 308 руб. 

Во исполнение своих обязательств по договору №3-В ООО «ЭДЛАЙН» в порядке и сроки, установленные договором, произвело полную оплату товара на общую сумму 5 866 308 руб., что подтверждается платежным поручением № 494 от 12.04.2016 г., платежным поручением № 507 от 15.04.2016 г., платежным поручением № 554 от 25.04.2016 г., платежным поручением № 553 от 25.04.2016 г., платежным поручением № 28 от 28.06.2016 г., платежным поручением № 869 от 28.06.2016 г., платежным поручением № 1001 от 27.07.2016 г. и не оспаривается ответчиком.

31 мая 2016 г. между ООО «ЭДЛАЙН» и ООО «Технотест-Р» был заключен договор № 4-В (см. Приложение №3), в соответствии с которым ООО «ЭДЛАЙН» поручает, а ООО «Технотест-Р» принимает на себя обязательства по изготовлению и доставке объёмно-декоративной конструкции (далее - ОДК) «Фонарик» в количестве 25 шт. на общую сумму 3 956 075  руб. 

Во исполнение своих обязательств по договору №4-В ООО «ЭДЛАЙН» в порядке и сроки, установленные договором произвело полную оплату товара на общую сумму 3 956 075 руб., что подтверждается платежным поручением № 9 от 08.06.2016 г., платежным поручением № 779 от 15.06.2016 г. и не оспаривается ответчиком.

17 июня 2016 г. между ООО «ЭДЛАЙН» и ООО «Технотест-Р» был заключен договор № 7-В, в соответствии с которым ООО «ЭДЛАЙН» поручает, а ООО «Технотест-Р» принимает на себя обязательства по изготовлению и доставке объёмно-декоративной конструкции (далее - ОДК) «Фонарик» в количестве 20 шт. на общую сумму 3 164 860 руб. 00 коп.

Во исполнение своих обязательств по договору №7-В ООО «ЭДЛАЙН» в порядке и сроки, установленные договором произвело полную оплату товара на общую сумму 3 164 860 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 812 от 17.06.2016 г., платежным поручением № 845 от 23.06.2016 г. и не оспаривается ответчиком.

23 августа 2016 г. между ООО «ЭДЛАЙН» и ООО «Промо-Ленд» был заключен договор № 2308/16-ПЛ поставки и шефмонтажа объемно-декоративных конструкций (ОДК), в соответствии с которым ООО «ЭДЛАЙН» передал в собственность ООО «Промо-Ленд» поставленные по вышеуказанным договорам с ООО «Технотест-Р» ОДК «Фонарик» в количестве 45 шт. и ОДК «АРКА ЦВЕТОЧНАЯ М» в количестве 14 шт.

19 июня 2017 г. между ООО «ЭДЛАЙН» и ООО «Промо-Ленд» было заключено Соглашение об уступке права требования, согласно условиям которого ООО «ЭДЛАЙН» уступает, а ООО «Промо-Ленд» принимает права (требования) к ООО «Технотест-Р» по договорам № 3-В от 07.04.2016 г.;  № 4-В от 31.05.2016 г.; № 7-В от 17.06.2016 г. возникшие у ООО «ЭДЛАЙН» на момент заключения соглашения об уступке права требования (цессии), включая, но не ограничиваясь:

•право на предъявление претензий к качеству выполненных должником работ, равно как поставленного товара по договорам;

•право требования в части исполнения должником гарантийных обязательств по договорам (предусмотрено п. 7.1 договоров);

•право требования безвозмездного устранения недостатков выполненных работ/ поставленного товара в разумный срок;

•право требования соразмерного уменьшения установленной цены за выполненную работу/поставленный товар;

•право требования возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных работ/поставленного товара;

•право требования возмещения любых убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств должником;

•право требования уплаты неустойки, штрафов, пеней в связи с просрочкой исполнения должником обязательств по оплате;

•другие права, связанные с вышеперечисленными правами требования, в том числе, в полном объёме, право на возмещение издержек по получению исполнения (судебные расходы, нотариальные расходы и др.).

В соответствии с п. 1.5 соглашения об уступке права (требования) (цессии), вышеуказанные права (требования) ООО «ЭДЛАЙН» перешли к ООО «Промо-Ленд» в момент подписания соглашения.

ООО «Технотест-Р» был надлежащим образом уведомлен о переходе вышеуказанных прав (требований) от ООО «ЭДЛАЙН» к ООО «Промо-Ленд».

Из материалов дела следует, что 20 июля 2016г. между ООО «Промо-Ленд» и ООО «Технотест-Р» был заключен договор № 07/2016, в соответствии с которым ООО «Промо-Ленд» поручает, а ООО «Технотест-Р» принимает на себя обязательства по разработке чертежно-конструкторской документации (далее - ЧКД), изготовлению и монтажу объемно-декоративной конструкции (далее - ОДК) «Арка цветочная М» габаритным размером 6,0x4,7м в количестве 40 шт.» на общую сумму 16'760'880 руб. 00 копеек.

По договору № 07/2016 от 20 июля 2016г. ООО «Промо-Ленд» была произведена частичная оплата в размере 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением N° 12 от 26.08.2016 г. 

20 июля 2016 г. между ООО «Промо-Ленд» и ООО «Технотест-Р» был заключен договор №08/2016, в соответствии с которым ООО «Промо-Ленд» поручает, а ООО «Технотест-Р» принимает на себя обязательства по разработке чертежно-конструкторской документации (далее - ЧКД), изготовлению и монтажу объемно-декоративной конструкции (далее - ОДК) «Фонарик» «ЕТ-версия2» на фигурном столбе высотой от 5,25м. в количестве 105 шт. на общую сумму 16 615 515 руб. 

По договору № 08/2016 от 20 июля 2016г. истцом была произведена частичная оплата в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 6 от 24.08.2016 г. 

Таким образом, ООО «Технотест-Р» по пяти договорам (№ 3-В от 07.04.2016 г.; № 4-В от 31.05.2016 г.; № 7-В от 17.06.2016 г.; № 07/2016 от 20.07.2016 г.; № 08/2016 от 20.07.2016 г., было изготовлено и поставлено в адрес ООО «Промо-Ленд» и ООО «ЭДЛАЙН» 54 арки и 150 фонариков (далее - «ОДК») на общую сумму 46 363 638 руб. 00 коп.

При этом право собственности на все поставленные ОДК в настоящий момент принадлежит Акционерному обществу «Объедененная энергетическая компания» (АО «ОЭК») на основании заключенных между ООО «Промо-Ленд» и АО «ОЭК» договоров подряда № 11733-ДНОнАХП-16 и № 11735-ДНОнАХП-16 от 28.11.2016г.

Как указывает истец, в ходе эксплуатации поставленных ОДК было выявлено, что конструкции не соответствуют стандартам качества, их состояние неудовлетворительное (бетонные основания крошатся, все металлоконструкции подвержены коррозии, значительная часть электрики перегорела), всем конструкциям требуется капитальный гарантийный ремонт.

Для оценки соответствия ОДК стандартам качества, требованиям договоров, ГОСТов, строительных норм и правил, а также стоимости их восстановительного ремонта ООО «Промо-Ленд» был заключен договор с экспертной организацией ООО «Коломенский центр оценки и экспертизы». Осмотр ОДК экспертом осуществлялся 23 мая 2017г. ООО «Технотест-Р» был заблаговременно уведомлено о проведении экспертизы, что подтверждается почтовой квитанцией.

По итогам проведенной оценки был подготовлен отчет № 90 от 10.07.2017г. об оценке качества товара и определении стоимости восстановительного ремонта, согласно которому в виду некачественно выполненных работ дальнейшая эксплуатация ОДК допустима только после проведения восстановительных работ, стоимость которых составит  21 370 837 руб. 24 коп. 

Истец указывает, что сумма, установленная данным экспертным заключением, является для истца убытками, что и послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд не может согласиться с данным доводом истца в виду следующего.

Как следует из материалов дела, между ООО «Эдлайн» и ответчиком, были заключены три договора на разработку чертежно-конструкторской документации (ЧКД), изготовление и монтаж объемно-декоративных конструкций (ОДК): №3-В от 07.04.2016г., №4-В от 31.05.2016г., №7-В от 17.06.2016г. в соответствии с которыми были подписаны акты выполненных работ,  соответственно № 144 от 30.06.2016г., № 148 от 30.06.2016г. и № 149 от 30.06.2016г., согласно которым ООО «Эдлайн» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.

Также из материалов дела следует, что в период гарантийных обязательств в течении 1 года (п. 7.1 договоров) ответчик производил необходимый гарантийный ремонт ОДК по заявкам ООО «Эдлайн» и истца предоставляемых ему по средствам корпоративной электронной почты, и со стороны ООО «Эдлайн» и истца никаких претензий к ответчику предъявлено не было.

Из материалов дела следует и не оспаривается сторонами, что между истцом и ООО «Эдлайн» существуют партнерские отношения и после длительных переговоров между ООО «Эдлайн», истцом и ответчиком, ООО «Эдлайн» взял на себя обязательства в случаи не оплаты долга истцом частично оплатить долг истца в размере 18 553 395 руб., что подтверждается гарантийным письмом исх. № 164 от 21.04.2017 г.

Данное обстоятельство, по мнению суда, подтверждает отсутствие каких либо претензий у ООО «Эдлайн» к ответчику на момент составления гарантийного письма.

Согласно п. 5.1 договоров исполнитель по окончании всех работ представляет заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, подписанный со стороны исполнителя.

Согласно п. 5.2 договора в течение 5 рабочих дней после получения от исполнителя документов, заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, либо подписывает мотивированный отказ от принятия работ.

В соответствии с п. 5.3 договора для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям договора, заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Доказательств того, что ООО «Эдлайн» воспользовалось предоставленным правом по привлечению независимого эксперта до подписания акта, суду не представлено.

Согласно п. 5.4 договора датой исполнения обязательств по договору для исполнителя считается дата подписания акта сдачи-приемки.

Согласно представленным актам от 30.06.16 года, подписанным сторонами, заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Из материалов дела следует, что экспертное заключение составлено 10.07.17 года, то есть спустя год после исполнения сторонами принятых обязательств.

Доказательств надлежащего хранения и надлежащей эксплуатации изделий за весь указанный период истцом суду не представлено.

Доказательств того, что истец требовал замены товара в рамках предоставленной по договору гарантии, суду не представлено.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком были заключены два договора на разработку чертежно-конструкторской документации (ЧКД), изготовление и монтаж объемно-декоративных конструкций (ОДК): договор № 07/2016 от 20 июля 2016г. на разработку ЧКД, изготовление и монтаж ОДК «Арка цветочная М» габариты размером 6,0x4,7м в количестве 40 шт. общей стоимостью 16 760 880 руб., срок выполнения работ установлен - не позднее 31 августа 2016 г.; договор № 08/2016 от 20 июля 2016 г. на разработку ЧКД, изготовление и монтаж ОДК «Фонарик» «ЕТ-версия 2» на фигурном столбе высотой 5,25м, в количестве 105 шт. общей стоимостью 16 615 515 руб., срок выполнения работ установлен - не позднее 31 августа 2016 г.

В соответствии с условиями договоров ответчик выполнил все обязательства в полном объеме, письменных или устных замечаний и претензий по разработке ЧКД, изготовлению и монтажу ОДК ответчику предъявлено не было, в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 договоров акты выполненных работ в течение 5 дней после выполнения всех работ подписаны не были.

В период гарантийных обязательств в течение 1 года (предусмотренного п. 7.1 договоров) ответчик производил необходимый гарантийный ремонт ОДК по заявкам истца предоставляемых ему по средствам корпоративной электронной почты, и со стороны истца никаких претензий к ответчику предъявлено не было.

Из материалов дела следует, что 26.09.2016г. ответчик направил на юридический адрес истца заказное письмо с описью с актами выполненных работ и сопроводительными документами, однако письмо вернулось, как неполученное, также и по настоящее время совершались повторные отправления, но вернулись как неполученные.

Сумма задолженности истца перед ответчиком за исполненные обязательства по вышеуказанным договорам составляет 29 876 395 руб.

Кроме того, из материалов дела следует, и не оспаривается истцом, что по всем договорам все поставленные ОДК в настоящий момент принадлежат АО «ОЭК» по договорам №11733-ДНО и АХП-16 от 28.11.2016г. (Фонарики -ОДК «СФ») на сумму 34 635 346,71 руб., №11763-ДНО и АХП-16 от 28.11.2016г. (Фонарики -ОДК «СФ»- ) на сумму 47 911 342,89 руб., №11735-ДНО и АХП-16 от 22.11.2016г. (Арки -ОДК «ИКЦ-106») на сумму 37 569 117,89 руб.

В судебном заседании ответчик пояснил суду, что ООО «Эдлайн» в результате проведенных торгов в декабре 2016г. заключил два договора с АО «ОЭК» на монтаж и повторную эксплуатацию и демонтаж изготовленных ответчиком конструкций Фонарики - ОДК «СФ» в период с 15 декабря 2016 г. по 20 февраля 2017г. по договору №13058-ДНО и АХП-16 от 15.12.2016г. и договору №13554-ДНО и АХП-16 от 27.12.2016г., что подтверждает вторичную сборку и демонтаж.

Кроме того, истец не представил суду доказательств, подтверждающих понесение истцом указанных расходов на сумму 21 370 837 руб. 24 коп.

Указание указанной суммы в заключении эксперта, в отсутствие иных доказательств, не подтверждает размер убытков и факт их понесения истцом.

Согласно ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Возмещение убытков – это мера гражданско-правовой ответственности. Поэтому ее применение возможно лишь при наличии условий ответственности, предусмотренных законом. Лицо, требующее возмещение убытков, должно доказать факт нарушения обязательства контрагентом, наличие и размер понесенных истцом убытков, причинную связь между правоотношением и убытками.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что истец не представил суду доказательств, подтверждающих наличие оснований для наложения на ответчика ответственности в виде взыскания убытков в заявленном размере, в виду чего у суда отсутствуют правовые основания к удовлетворению иска.

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина и судебные расходы относится на истца.

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 11, 12, 15, 393 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 65, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                  Ю.А. Жданова