АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-17658/2019

г. Ярославль

08 апреля 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 18 марта 2020 года.

В полном объеме решение изготовлено 08 апреля 2020 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Овечкиной Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала «Ярэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о расторжении договора, взыскании 66 160 рублей 68 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился,  

от ответчика – ФИО2 по доверенности от  09.01.2020, 

установил:

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – истец, Компания, сетевая организация, ПАО «МРСК Центра») обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее – ответчик, Общество, ООО «Вектор») о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2017 № 41442515/ТП-17 (далее – договор) и взыскании 66 160 рублей 68 копеек убытков, а также расходов по уплате государственной пошлины.

Исковые требования основаны на положениях договора, статей 309, 393, 450, 452, 453 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), пунктов 16(5), 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861) и мотивированы неисполнением договорных обязательств со стороны ответчика.

В порядке статьи 158 АПК РФ рассмотрение дела неоднократно откладывалось по  ходатайствам обеих сторон. 

В судебное заседание, состоявшееся 18.03.2020, истец явку представителя не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ. ПАО «МРСК Центра» направило письменное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, а также дополнительно сообщило, что между сторонами договора 26.02.2020 подписаны акты о выполнении технических условий № 52506/201В и об осуществлении технологического присоединения № 52506/201В. 

Представитель ответчика иск не признал, указав, что со стороны ООО «Вектор» договор исполнен в полном объеме, что следует из подписанных сторонами 26.02.2020 актов о выполнении технических условий № 52506/201В и об осуществлении технологического присоединения № 52506/201В. 

На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено без участия представителя истца по имеющимся доказательствам. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, суд установил следующее.

04.05.2017 между ПАО «МРСК Центра» (сетевая организация) и ООО «Вектор» (заявитель) заключен договор, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (технологическое присоединение), многоквартирного жилого (стр. № 4) с инженерными коммуникациями, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 72,4 кВт,

- категория надежности: первая, вторая (первая – 7,2 кВт, вторая – 65.2 кВт),

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ,

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоквартирного жилого дома (стр. № 4) с инженерными коммуникациями, расположенного (который будет располагаться) по адресу:  

<

...> (кадастровые номера земельных участков: 76:23:062415:10, 76:23:062415:11), д. 4 (кадастровый номер земельного участка: 76:23:062415:22). Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении к договору. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (пункты 1-5 договора).

Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение пяти дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; не позднее двенадцати дней со дня уведомления заявителем  о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить  фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю (пункт 6 договора).  

В соответствии с пунктом 8 договора, в обязанности заявителя входит: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продолжении срока действия технических условий (пункт 9 договора). 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2016 № 418-стс в редакции, действующей на момент заключения договора, составляет: 48 845 рублей 51 копейка, в том числе НДС (18 %) 7 451 рубль 01 копейка. 

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 150 дней со дня фактического присоединения;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания  акта об осуществлении технологического присоединения. 

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (пункты 10, 11, 12 договора в редакции протокола урегулирования разногласий от 04.05.2017).

В силу пунктов 14, 15 договора он может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке. Договор также может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 

Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении договора стороны решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 20 договора). 

Договор согласно пункту 21 считается заключенным с даты наступления  подписанного заявителем экземпляра  договора в сетевую организацию. 

В прилагаемых у договору технических условиях (далее также – ТУ) стороны согласовали следующее: наименование энергопринимающего устройства заявителя: многоквартирный жилой дом (стр. № 4) с инженерными коммуникациями, находящиеся по адресу: 

<

...> в районе д. 4 (кадастровый номер земельного участка 76:23:062415:10, 76:23:062415:11, 76:23:062415:22). Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 72,4 кВт. Категория надежности: первая, вторая (первая – 7,2 кВт, вторая – 65.2 кВт); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя определяется в соответствии с пунктом 5 договора. Точки присоединения (не далее 25 метров от границы  участка заявителя): первая точка: соединительная кабельная муфта вновь строящейся кабельной линии 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 1742; вторая точка: соединительная кабельная муфта вновь строящейся кабельной линии 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 1742. Основной источник питания: базовая подстанция/базовая ЛЭП: ПС 1

<

***>/6 кВ «Южная», ф.120, ПС 110/6 кВ «Институтская», ф. 

<

***>; распределительная подстанция:  РП 11, РП 15; трансформаторная подстанция: ТП 1742 (1 сек. и 2 сек.).  Резервный источник питания: базовая подстанция/базовая ЛЭП: ПС 1

<

***>/6 кВ «Южная», ф.120, ПС 110/6 кВ «Институтская», ф. 

<

***>; распределительная подстанция:  РП 11, РП 15; трансформаторная подстанция: ТП 1742 (1 сек. и 2 сек.).  По ТУ сетевая организация осуществляет следующие мероприятия: строительство новых линий электропередачи: запроектировать и смонтировать две  четырехжильные КЛ-0,4 кВ в одной траншее с пластмассовой  изоляцией сечением свыше 75 до 100 квадратных мм включительно от 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 1742 до границы  земельного участка заявителя протяженностью 2х0,01 км. Трассу, марку и сечение токоведущих элементов линии определить при проектировании. Реконструкция существующих ТП (РП): выполнить реконструкцию оборудования РУ-0,4 кВ ТП 1742. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии: обеспечение качества электрической энергии по ГООСТ 32144-2013. Требования  к устройствам релейной защиты  (аппаратам защиты до 1000 кВ): выбрать параметры пускозащитной аппаратуры 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 1742 по отключающей возможности. Обязанности заявителя: запроектировать и смонтировать кабельные линии 0,4 кВ (сечение определить проектом) от точек присоединения на границе земельного участка заявителя до объекта. Кабель принять с применением фазной изоляции и наружного  покрова из ПВХ пластиката, а также броней из стальных неоцинкованных лент с применением  термоусаживаемых  соединительных муфт. Сечение кабеля выбрать по пропускной способности согласно заявленной мощности из расчета потери напряжения и проверить на термическую устойчивость действию токов к.з. Согласовать с сетевой организацией порядок выноса эл. сетей в случае попадания их в зону застройки. Исключить возможность нарушения границ действующих охранных зон и повреждения существующих линий электропередач. Обеспечить схемы внешнего электроснабжения в границах земельного участка, вводных устройств в здания и сооружения необходимой автоматикой, обеспечивающей требуемую категорийность электроприемников, требуемую в соответствии с  технологическим  процессом производства. Схему размещения АВР (автоматическое включение резерва) определить в проекте и согласовать с филиалом  ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Рекомендуется обеспечить автономным резервным источником питания электроприемники 1 категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых можно повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности или безопасности государства. Необходимость установки автономного резервного источника питания, его тип, мощность, место установки и способы подключения к электрической сети определить в проекте. Исключить возможность параллельной работы автономного резервного источника  питания с электрическими сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): заявитель должен обеспечить организацию учета электрической энергии в точках присоединения его энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации с соблюдением следующих требований.  К пункту учета непосредственно: счетчики должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений (тип применяемого счетчика электроэнергии должен быть утвержден федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесен в государственный реестр средств измерений); счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы госповерки давностью не более 12 месяцев для 3-фазных счетчиков. На зажимной крышке должна быть предусмотрена установка пломбы энергоснабжающей организации; трансформаторы тока должны иметь действующее свидетельство о поверке, выданное организацией, аккредитованной в установленном порядке в области обеспечении единства измерений, а трансформаторы тока разборной конструкции - должны иметь пломбы госповерки; класс точности применяемого счетчика электроэнергии должен быть 1.0 и выше, для физических лиц 2.0 и выше; класс точности применяемых трансформаторов тока должен быть 0.5 и выше; учет реактивной энергии должен обеспечивать возможность определения количества реактивной энергии в установленных случаях, класс точности прибора учета реактивной энергии должен быть 2.0 или выше (за исключением физических лиц). К установке пункта учета: приборы учета подлежат установке на границе балансовой принадлежности электроустановок заявителя и сетевой организации в соответствии с НТД. Установку счетчика выполнить в соответствии с ПУЭ. Высота установки счетчика от пола (поверхности земли) в пределах 0.8-1.7 м. Рекомендуется установка счетчиков в выносных шкафах наружной установки; для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м. коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику: рекомендуется установка перед счетчиком многополюсного коммутационного аппарата для одновременного отключения фазных и нулевого рабочего проводников. Конструкция коммутационного аппарата должна предусматривать возможность его опломбирования; трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности; коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока должны соответствовать требованиям ПУЭ; допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %; нагрузки измерительных трансформаторов тока должны соответствовать требованиям ПУЭ и ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»; для обеспечения возможности замены счетчика и подключения эталонного счетчика без прекращения передачи электрической энергии, подключение цепей тока и напряжения к электросчетчику должно быть произведено через испытательную коробку (специализированный клеммник) с возможностью ее последующего пломбирования;  для защиты от возможного искажения результатов измерений должно быть исключено наличие неизолированных токоведущих частей, открыто расположенных до прибора учета. Заявителям рекомендуется согласовывать с сетевой организацией тип прибора учета для обеспечения возможности включения прибора учета в существующую АСКУЭ сетевой организации. Требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии: потребитель не должен оказывать возмущающее воздействие  на качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимые. Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 B): укомплектовать ВПУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой  от короткого замыкания и перегрузке в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-распределительное устройство ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования. B случаях, предусмотренных статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выполнить рабочий проект электроустановки с учётом пунктов раздела 11 технических условий согласно ПУЭ с его последующим согласованием с сетевой организацией в объёме требований технических условий до выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить готовность к физическому соединению  КЛ-0,4 кВ. Срок действия технических условий составляет два года со дня  заключения договора.

Во исполнение договора ПАО «МРСК Центра» подготовило и выдало ТУ, на что затратило 3 819 рублей 70 копеек (с учетом НДС). Также своими силами сетевая организация  произвела строительства  двух кабельных линий; КЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1742, КЛ-0,4 кВ № 20 ТП 1742 до границ земельного участка заявителя, на что затратило согласно актам о приеме-сдаче здания (сооружения) от 31.08.2017 №№ 2, 3, актам приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от  31.08.2017 №№ 2, 3 62 340 рублей 97 копеек  (с учетом НДС). 

28.06.2017 Компания направила в адрес ответчика уведомление от 26.06.2017 № ЯР/Р-19-2/2191-1 о необходимости выполнении ответчиком своей части мероприятий по технологическому присоединению. 

19.04.2018 истец направил в адрес ответчика уведомление о невыполнении в срок мероприятий по договору с предложением выполнить технические условия либо подписать соглашение о расторжении договора. Отсутствие соответствующего ответа на свое предложение побудило Компанию обратиться в Арбитражный суд Ярославской области с настоящим иском. 

При рассмотрении спора в арбитражном суде стороны договора подписали акты о выполнении технических условий от 26.02.2020 № 52506/201В и об осуществлении технологического присоединения от 26.02.2020 № 52506/201В. 

В силу статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, предусмотренном АПК РФ. Пункт 1 статьи 8 ГК РФ предусматривает, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статьям 420, 421 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, в заключении которого участники гражданского оборота свободны. То есть стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор), и по своему усмотрению определить условия договора, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Как определено в пункте 4 статьи 426 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и тому подобное).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ, закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно пунктам 3, 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям, при этом сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил № 861 и наличии технической возможности технологического присоединения.

Договор считается заключенным с момента поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

По смыслу приведенных норм технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевой компании производится на основе договора, который является публичным и носит возмездный характер.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Как следует из пункта 1 статьи 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

При этом требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя в том числе: разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. 

В силу статей 407, 408 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Стороны своим соглашением вправе прекратить обязательство и определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства.

Обязательство прекращается, в том числе и его надлежащим исполнением. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части.

Судом установлено, что заявитель (ответчик) со своей стороны мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные договором и техническими условиями, выполнил, что следует из обоюдно подписанных контрагентами актов о выполнении технических условий от 26.02.2020 № 52506/201В и об осуществлении технологического присоединения от 26.02.2020 № 52506/201В. 

Таким образом, учитывая, что договор между сторонами фактически исполнен 

в соответствии с его условиями, а обязательства прекращены (статьи 309, 408 ГК РФ), суд не усматривает оснований для расторжения договора, уже ранее прекращенного его исполнением, в том числе по основаниям, перечисленным в статье 450 ГК РФ.  

Пунктом 5 статьи 453 ГК РФ установлено, что если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

В соответствии со статьей 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В рамках настоящего спора требование истца о взыскании убытков связано именно с требованием о расторжении договора. С четом того, что оснований для расторжения договора суд не усмотрел в данном случае не усматриваются основания и для  удовлетворения требований истца в части взыскании убытков. 

В силу статей 110, 112 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в связи с отказом в иске остаются на истце.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала «Ярэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2017 № 41442515/ТП-17 и взыскании 66 160 рублей 68 копеек убытков отказать. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством их подачи через личный кабинет, созданный в информационной системе «Мой арбитр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья

Е.А. Овечкина