АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-14527/2018

г. Новосибирск

22 июня 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2018 года,

решение в полном объёме изготовлено 22 июня 2018 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Печуриной Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тенёвой Т.В., рассмотрев  в судебном заседании дело  по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Новострой" (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Кварсис-Строитель" (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск 

о взыскании 5 232 740 руб. 76 коп.,

при участии в  судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1, директор, решение от 01.03.2018, паспорт,   

от ответчика: не явился, извещен,      

 

у с т а н о в и л:

Иск предъявлен о взыскании задолженности  по договору субподряда №02с/267-16  от 08.07.2016  года на общую сумму 5 232 740 руб. 76 коп. и расходов по уплате госпошлины.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный о месте и времени рассмотрения спора по последнему известному месту нахождения, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, мотивированного отзыва, возражений на иск не представил.

Руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя  ответчика  по имеющимся в деле доказательствам.

 Как следует из материалов дела, 08 июля 2016 года между обществом с ограниченной ответственностью "Кварсис-Строитель" (далее – ответчик, генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания "Новострой" (далее – истец, субподрядчик) заключен договор субподряда № 02с/267-16, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить по заданию генподрядчика работы по устройству фасада на строительстве объекта: Многоквартирный дом № 2 с помещениями общественного назначения, подземные автостоянки и трансформаторные подстанции, расположенные по адресу: Новосибирская область, Центральный район, ул. Демьяна Бедного, 73 стр.», сдать их результаты генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

В связи с изменением условий поставки краски фасадной, стороны  пришли к соглашению уменьшить стоимость договора субподряда № 02с/267-16 от 08.07.16 на сумму 1 779 976 руб. 90 коп., в том числе НДС 18%,

-стоимость работ: -249 631 руб. 01 коп., в том числе НДС 18%.

-стоимость материалов (изделий):-1 530 345 руб. 89 коп., в том числе НДС 18%.(дополнительное соглашение № 2 от 29.11.2017).

Срок выполнения работ:

-начальный – с момента заключения договора,

-окончание выполнения работ- согласно графика производства работ (дополнительное соглашение № 2 от 29.11.2017).

По своей правовой природе заключенный договор является договором подряда. Правоотношения сторон регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении спора, суд исходит из того, что в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

Во исполнение заключенного договора, субподрядчик  выполнил работы на сумму 13 047 676 руб. 74 коп., что подтверждается:

-актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.08.2016 на общую сумму 1 851 783 руб. 76 коп.;

- актом о приемке выполненных работ № 2 от 25.09.2016 на общую сумму  1 572 705 руб. 50 коп.;

-актом о приемке выполненных работ № 3 от 25.10.2016 на общую сумму 1 131 971 руб.64 коп.;

-актом о приемке выполненных работ № 9 от 25.07.2017 на общую сумму 1 361 320 руб. 44 коп.;

- актом о приемке выполненных работ № 7 от 25.07.2017 на общую сумму 4 598 руб. 46 коп.;

-актом о приемке выполненных работ № 8 от 25.07.2017 на общую сумму 7 337 руб. 24 коп.;

- актом о приемке выполненных работ № 12 от 25.01.2018;

-актом о приемке выполненных работ № 11 от 25.01.2018 на общую сумму 3 776 833 руб. 08 коп.;

-актом о приемке выполненных работ № 10 от 25.08.2017 на общую сумму 4 013 222руб. 76 коп.;

-актом о приемке выполненных работ № 5 от 25.02.2017 на общую сумму 15 003 руб. 70 коп.;

-актом о приемке выполненных работ № 6 от 25.02.2017 на общую сумму 28 722 руб.;

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.02.2017 на общую сумму 43 726 руб. 08 коп.;

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.08.2017 на общую сумму 4 013 222 руб. 76 коп.;

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 25.01.2018 на общую сумму 3 061 010 руб. 86 коп.;

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.07.2017 на общую сумму 1 373 256 руб. 14 коп.;

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.10.2016 на общую сумму 1 131 971 руб. 64 коп.;

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.09.2016 на общую сумму 1 572  705 руб. 50 коп.;

-справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 о  25.08.2016 на общую сумму 1 851 783 руб. 76 коп. Указанные документы подписаны со стороны истца и ответчика и содержат оттиски печатей организаций.

Согласно п. 2.5. договора генподрядчик оплачивает субподрядчику 95% стоимости всех выполненных и принятых работ (без учета стоимости материалов поставки генподрядчика), согласно подписанным обеими сторонами актам выполненных работ формы КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетам-фактурам, при условии предоставления исполнительной документации, в течение 15 банковских дней с момента их представления и подписания обеими сторонами.

Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных и принятых работ (без учета стоимости материалов поставки генподрядчика) (гарантийное удержание) производится генподрядчиком в течение 15 банковских дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также при условии устранения субподрядчиком к этому сроку всех выявленных в процессе строительства объекта недостатков, за которые отвечает субподрядчик (п. 2.6. договора).

В свою очередь ответчик произвел оплату в размере 7 539 528 руб. 57 коп. Таким образом, 95% стоимости выполненных и неоплаченных ответчиком работ составила 5 232 740 руб. 76 коп.

Окончательный расчет ответчиком  не произведен, на письменную претензию об уплате долга по договору субподряда № 02с/267-16 от 08.07.2016  ответ не получен, в связи с чем, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается

        В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств оспаривания количества и качества выполненных работ, следовательно, ответчик обязан  был оплатить их стоимость в сроки, установленные договором.

Так как на момент рассмотрения спора сумма долга ответчиком не оплачена и не оспорена, долг в размере 5 232 740 руб. 76 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. ст. 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Распределение судебных расходов производится по правилам статей 102, 104, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь 110, 167 – 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кварсис-Строитель" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Новострой" (ОГРН 

<

***>) 5 232 740 рублей 76 копеек долга, 49 164 рубля судебных расходов в виде уплаченной госпошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Новострой" (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в сумме 1 991 рубля.

После вступления решения в законную силу выдать исполнительный лист и справку на возврат госпошлины.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

Ю.А. Печурина