АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва Дело № А40-52436/23-89-302 13.09.2023 года Арбитражный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи О.А. Акименко, единолично, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  МОСКВЫ "ШКОЛА № 1251 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ" (125252, ГОРОД  МОСКВА, САЛЬВАДОРА АЛЬЕНДЕ УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1027739698315, Дата присвоения  ОГРН: 04.12.2002, ИНН: 7743024406, КПП: 774301001) к ответчику ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (107113, ГОРОД МОСКВА, ЛОБАЧИКА  УЛИЦА, ДОМ 23, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМ 3, ОГРН: 1127747273830, Дата присвоения ОГРН:  21.12.2012, ИНН: 7718915230, КПП: 771801001) о взыскании 119 880 руб.  

без вызова сторон. 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки по контрактам № 102-21 от 31.08.2021 и № 103-21 от  31.08.2021 в размере 119 880 руб. 00 коп.  

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату  принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом  срока.  

В порядке ч. 2 ст. 229 АПК РФ судом составлено мотивированное решение. 

Исследовав и оценив письменные доказательства, суд считает исковые требования не  подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

31 августа 2021 года между Государственным бюджетным общеобразовательным  учреждением города Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля» и Обществом с  ограниченной ответственностью «Феникс» заключен гражданско-правовой договор бюджетного  учреждения № 102-21 на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке нежилых  помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих  конструкций (далее - Контракт).  

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика  выполнить работы разработке проекта по перепланировке нежилых помещений, с проведением  инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций (далее - работы) в  объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его  неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат  выполненных работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом.  

Согласно п. 2.1 Контракта Цена Контракта 599 400 (пятьсот девяносто девять тысяч  четыреста) рублей 0 (ноль) копеек. НДС не облагается, (далее -Цена Контракта).  

На основании п. 3.1 Контракта поставка товара осуществляется на условиях и в сроки,  установленные Контрактом и Техническим заданием: с момента подписания контракта по 31  декабря 2021г.  

В соответствии с п. 12.1 Контракта Контракт вступает в силу со дня его подписания  Сторонами и действует по 31 декабря 2021 года включительно.  

Согласно п.п. 5.4.1-5.4.2 Контракта, Подрядчик обязан своевременно и надлежащим  образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания и представить  Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта, а также  обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и  здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам  государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим  законодательством Российской Федерации.  

В силу п. 6.1 Контракта, Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в  соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.  

Пунктом 6 Технического задания определен перечень нормативных и регламентирующих  документов, которым результат выполнения работ должен соответствовать.  

Согласно п. 8 Технического задания по завершении всех работ подрядчик передает  Заказчику комплект проектной документации по системам электроснабжения помещений в 3-х  экземплярах по каждому из объектов, а также на электронном носителе в формате AutoCAD.  

Согласно п. 2 Технического задания, целью проведения работ является разработка проекта  по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии  несущих и ограждающих конструкций Заказчика по адресам: г. Москва, Песчаный переулок, д.6,  Песчаный переулок, д. 1 а, Песчаный переулок, д.4а.  

Работы приняты Заказчиком в полном объеме по УПД от 23.11.2021г. № 23/11/21-102,  оплата подтверждается п/п от 01.12.2021г. № 1908.  

На основании поручения руководителя Департамента образования и науки горда Москвы  и приказа ТКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК «О проведении тематической  проверки в ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля», приказа ГКУ СФК ДОНМ от  10.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК/1 «О внесении изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г.   № 01-05-71/22-ФК», приказа ГКУ СФК ДОНМ от 21.06.2022г. № 01-05-76/22-ФК «О внесении  изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК» в период с 06.06.2022г. по  30.06.2022г. проведена тематическая проверка исполнения отдельных бюджетных процедур ГБОУ  Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля за период с 01.01.2018г. по 05.06.2022г. По  результатам проверки составлен Акт № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г.  

В ходе проверки выполненных работ установлено, что проектная документация  Подрядчика имеет следующие недостатки:  

- в пояснительной записке Проекта перепланировки здания по адресу: г. Москва,  Песчаный пер., д. 6, указано, что проект перепланировки и переустройства помещений разработан  для 1 этажа, в то время как согласно листам 4-10 указанного проекта перепланировки работы по  перепланировке помещений планируются на 2 этаже.  

Согласно Акта по результатам тематической проверки по Контракту № 102-21 от  31.08.2021г. с ООО «Феникс» на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке  нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих  конструкций, ГКУ СФК ДОЕМ, установлено, что с Подрядчика не взыскана неустойка в размере 59  940,00 руб. (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.) за ненадлежащее исполнение  условий контракта в соответствии с п. 7.3 Контракта.  

В силу п. 7.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер  штрафа составляет: 10 процентов Цены Контракта, что соответствует 59 940,00 руб.  

Поскольку выявленный факт нарушения имеется в 1 проекте перепланировки, при расчете  штрафа берется во внимание 1 факт нарушения, и соответственно расчет штрафа выглядит  следующим образом:  

59 940,00 руб. х 1 нарушение = 59 940,00 руб. 

В соответствии с п. 5.1.6 Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (также  выявленные после окончания срока действия контракта), в том числе в части объема и стоимости  этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок  использования средств бюджета города Москвы.  

Согласно п. 5.1.7 Заказчик вправе при обнаружении уполномоченными контрольными  органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям  Технического задания и УКЭП УПД вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для  представления разъяснений в отношении выполненных работ.  

В соответствии с п. 7.11 Контракта в случае установления уполномоченными  контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения их  стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.  

Руководствуясь п. 7.3 Контракта и Актом СФК № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г. Заказчик  выставил в адрес Исполнителя претензию от 13.12.2022 № 870/22 за ненадлежащее исполнение  обязательств по Контракту в виде штрафа в размере 59 940 (пятьдесят девять тысяч девятьсот  сорок) рублей 00 копеек.  

31 августа 2021 года между Государственным бюджетным общеобразовательным  учреждением города Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля» и Обществом с  ограниченной ответственностью «Феникс» заключен Гражданско-правовой договор бюджетного  учреждения № 103-21 на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке нежилых  помещений, с проведением инженерных изысканий с проведением инженерных изысканий о  состоянии несущих и ограждающих конструкций по адресам: г. Москва, улица Сальвадора Альенде,  д. 9, улица Сальвадора Альенде, д. 6 (далее - Контракт).  

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика  выполнить работы по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий  о состоянии несущих и ограждающих конструкций (далее - работы) в объеме, установленном в  Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью)  (далее -Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить  его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.  

Согласно п. 2.1 Контракта Цена Контракта 599 400 (пятьсот девяносто девять тысяч  четыреста) рублей 0 (ноль) копеек. НДС не облагается.  

На основании п. 3.1 Контракта поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки,  установленные Контрактом и Техническим заданием: с момента подписания контракта по "31  "декабря 2021г.  

В соответствии с п. 12.1 Контракта Контракт вступает в силу со дня его подписания  Сторонами и действует по31 декабря 2021 года включительно.  

Согласно п.п. 5.4.1-5.4.2 Контракта, Подрядчик обязан своевременно и надлежащим  образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания и представить  Заказчик отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта, а также  обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и  здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам  государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим  законодательством Российской Федерации.  

В силу п. 6.1 Контракта, Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в  соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.  

Пунктом 6 Технического задания определен перечень нормативных и регламентирующих  документов, которым результат выполнения работ должен соответствовать.  

Согласно п. 8 Технического задания по завершении всех работ подрядчик передает  Заказчику комплект проектной документации по системам электроснабжения помещений в 3-х  экземплярах по каждому из объектов, а также на электронном носителе в формате AutoCAD.  

Согласно п. 2 Технического задания, целью проведения работ является разработка проекта  по перепланировке нежилых помещений, с проведением инженерных изысканий о состоянии  несущих и ограждающих конструкций Заказчика по адресам: г. Москва, улица Сальвадора Альенде,  д.9, улица Сальвадора Альенде, д.6.  

Работы приняты Заказчиком в полном объеме по УПД от 23.11.2021г. № 23/11/21-103,  оплата подтверждается п/п от 24.11.2021г. № 1902.  

На основании поручения руководителя Департамента образования и науки города Москвы  и приказа ТКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК «О проведении тематической  проверки в ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля», приказа ГКУ СФК ДОНМ от  10.06.2022г. № 01-05-71/22-ФК/1 «О внесении изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г.   № 01-05-71/22-ФК», приказа ГКУ СФК ДОНМ от 21.06.2022г. № 01-05-76/22-ФК «О внесении  изменений в приказ ГКУ СФК ДОНМ от 03.06.2022г. № 01-05-71/22- ФК» в период с 06.06.2022г.  по 30.06.2022г. проведена тематическая проверка исполнения отдельных бюджетных процедур  ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля за период с 01.01.2018г. по 05.06.2022г. По  результатам проверки составлен Акт № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г.  

В ходе проверки выполненных работ установлено, что проектная документация  Подрядчика имеет следующие недостатки:  

- в пояснительной записке Проекта перепланировки здания по адресу: ул. Сальвадора  Альенде, д. 6, указано, что проект перепланировки и переустройства помещений разработан для  здания по адресу: ул. Сальвадора Альенде, д. 9.  

Согласно Акта по результатам тематической проверки по Контракту № 103-21 от  31.08.2021г. на выполнение работ по разработке проекта по перепланировке нежилых помещений, с  проведением инженерных изысканий о состоянии несущих и ограждающих конструкций по  адресам: г. Москва, улица Сальвадора Альенде, д. 9, улица Сальвадора Альенде, д. 6, ГКУ СФК  ДОНМ, установлено, что с Подрядчика - ООО «Феникс» не взыскана неустойка в размере 59 940,00  руб. (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.) за ненадлежащее исполнение условий  контракта в соответствии с п. 7.3 Контракта.  

В силу п.7.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер  штрафа составляет: 10 процентов Цены Контракта, что соответствует 59 940,00 руб.  

Поскольку выявленный факт нарушения имеется в 1 проекте перепланировки, при расчете  штрафа берется во внимание 1 факт нарушения, и соответственно расчет штрафа выглядит  следующим образом:  

59 940,00 руб. х 1 нарушение = 59 940,00 руб. 

В соответствии с п. 5.1.6 Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (также  выявленные после окончания срока действия контракта), в том числе в части объема и стоимости  этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок  использования средств бюджета города Москвы.  

Согласно п. 5.1.7 Заказчик вправе при обнаружении уполномоченными контрольными  органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям  Технического задания и УКЭП УПД вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для  представления разъяснений в отношении выполненных работ.  

В соответствии с п. 7.11 Контракта в случае установления уполномоченными  контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения их  стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.  

Руководствуясь п. 7.3 Контракта и Актом СФК № ОВ-05-2022 от 07.07.2022г. Заказчик  выставил в адрес Исполнителя претензию от 13.12.2022 № 871/22 за ненадлежащее исполнение  обязательств по Контракту в виде штрафа в размере 59 940 (пятьдесят девять тысяч девятьсот  сорок) рублей 00 копеек.  

До настоящего времени претензии ответчиком не удовлетворены, штрафные санкции не  оплачены.  

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения с исковыми  требованиями в суд.  

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых  требований по следующим основаниям.  

В соответствии с требованиями ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства  должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и  

требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением  случаев, предусмотренных законом.  

Судом установлено, что между истцом и ответчиком в течение 2021 года заключены  следующие договоры подряда № 119-21 от 16.11.2021г., № 115-21 от 26.10.2021г., № 103-21 от  31.08.2021г., № 102-21 от 31.08.2021г., № 118-21 от 10.11.2021г., № 96-21 от 30.08.2021г., которые  фактически исполнялись первым заместителем директора, и по совместительству контрактным  управляющем Истца - Демченко Павлом Викторовичем и ведущим инженером Истца Ефремовым  Дмитрием Олеговичем.  

При заключении договоров установлено, что фактически никаких работ ответчику  проводить не надо, поскольку истец имеет свою бригаду рабочих и может выполнить все работы  хозяйственным способом (самостоятельно), а целью заключения договоров являлось получение  Демченко Павлом Викторовичем и Ефремовым Дмитрием Олеговичем наличных денежных средств  для закупки истцом строительных материалов и проведения расчетов с рабочими, которые  привлечены истцом для выполнения работ, указанных в договорах.  

Таким образом, истец и ответчик при заключении договоров, не только не имели  намерения их исполнить, но и фактически их не исполняли, что свидетельствует о ничтожности  сделок в порядке п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Данные обстоятельства в том числе подтверждаются материалами уголовного дела №  123024500160000025, расследуемого Отделом по расследованию особо важных дел следственного  управления по Северо-Восточному административному округу, где Меркушину Андрею  Анатольевичу (генеральному директору и единственному учредителю Ответчика), Демченко Павлу  Викторовичу и Ефремову Дмитрию Олеговичу предъявлено обвинение в совершении преступления  по п. б ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбужденного в связи с  обстоятельствами исполнения договоров.  

С учетом изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения исковых  требований.  

Аналогичные обстоятельства установлены по делу № А40-52457/23. Расходы по государственной пошлине распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 393, 702 ГК РФ, руководствуясь статьями 41,  65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований отказать.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный суд апелляционной инстанции в  

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  

мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. 

Судья: О.А. Акименко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 5:52:00Кому выдана АКИМЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА