АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

14 июля 2025 года

Дело № А33-8890/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5202.20 от 29.10.2020, заключенного между публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» и индивидуальным  предпринимателем ФИО1 Рафиком (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>,                  г. Красноярск), предусмотренные разделом 10 технических условий № 8000423239 к указанному договору, а именно:

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- строительство ТП 10 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом;

- строительство ЛЭП 10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до проектируемой ТП 10 кВ (пункт 10.2.1). Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10 кВ. Тип и место установки разъединителя определить проектом;

- от проектируемой ТП 10 кВ (п.10.2.1) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала;

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

- составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения;

- уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 Рафика (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, г. Красноярск) 165 507,38 руб. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям                           № 20.2400.5202.20 от 29.10.2020, рассчитанной за периоды с 30.04.2021 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по 24.02.2025, с 25.02.2025 по день фактического исполнения обязательства в размере 136,33 руб. за каждый день просрочки, а также 28 275 руб. судебных расходов по уплате госпошлины, несение которых подтверждается чеком по операции ПАО «Сбербанк России» от 24.03.2025.

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 Рафика (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>, г. Красноярск) 1 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда.

В удовлетворении требования в остальной части отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2