АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                                 Дело  № А19-8654/2023 

 

24.04.2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  11.04.2024 года.

Решение  в полном объеме изготовлено   24.04.2024 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кокориной В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (665710, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРАТСК, УЛ БАРКОВА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ж/Р), Д.43, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРАФТ» (664081, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ИРКУТСКОЙ 30 ДИВИЗИИ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2016, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 671 037 руб. 95 коп., 

при участии в судебном заседании 28.03.2024: 

от истца –  ФИО1, представитель по доверенности №123 от 09.11.2023, паспорт, диплом;

от ответчика – не явились, извещены.

В судебном заседании 28.03.2024, в порядке статьи 163 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 11.04.2024 до 11 час. 00 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено 11.04.2024, в том же составе суда, при участии от истца –  ФИО2, представитель по доверенности №6 от 18.08.2023, паспорт; от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности от 10.06.2023, паспорт. 

 

установил:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 24.04.2023 обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРАФТ»  о взыскании 671 037 руб. 95 коп. 

Путем автоматического распределения дел в суде ПК «Судебно-арбитражное делопроизводство», дело передано на рассмотрение судье Колосовой Е.Ю.

Определением суда от 15.05.2023 в связи с назначением судьи Колосовой Е.Ю. заместителем председателя Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) дело в соответствии с пунктом 32 Регламента Арбитражного суда Иркутской области подлежит передаче в производство другому судье через систему автоматизированного распределения дел в суде ПК «Судебно-арбитражное делопроизводство».

Путем распределения электронной системой дело № А19-8654/2023 передано на рассмотрение судье Кириченко С.И.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 02.11.2023 произведено правопреемство ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БРАТСКА на  ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" в связи с реорганизацией в форме присоединения.

Ответчик, через систему «Мой Арбитр», 28.03.2024 направил письменные возражения на исковое заявление, просил снизить суму взыскания до 583 198 руб. 41 коп. 

Истец в судебном заседании 11.04.2024, в порядке статьи 49 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил взыскать с ответчика 667 870 руб. 31 коп.

Уточнение суммы иска принято судом.

Ответчик в судебном заседании 11.04.2024, доводы, изложенные в письменных пояснениях, поддержал в полном объеме. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (заказчик) и ООО «ДРАФТ» (подрядчик)  заключен контракт №5139-ЭА/21 от 27.09.2021 на Капитальный ремонт административного здания ОГКУ ЦЗН города Братска по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Баркова, 43, по условиям которого, подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту административного здания ОГКУ ЦЗН города Братска по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Баркова, 43 (далее - Работы), в объеме, установленном в Технической документации (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (пункт 1.1 контракта).

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, место выполнения Работ: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Баркова, д. 43.

Согласно пункту 2.2 контракта, в редакции дополнительного соглашения №5 от 14.12.2021, цена контракта составляет 33 852 260 руб.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта, в редакции дополнительного соглашения №3 от 30.11.2021, срок выполнения Работ Подрядчиком в полном объеме: со дня подписания Сторонами Контракта по 15.12.2021.

Согласно абзаца 13 пункта 6 Технической документации (технического задания) (Приложение № 1 к Контракту от №5139-ЭА/21 от 27.09.2021, являющимся неотъемлемой частью Контракта) Подрядчик своими силами и (или) за свой счет оплачивает потребленные на объекте в период производства работ коммунальные ресурсы. 

Актом приема-передачи объекта к производству работ по капитальному ремонту от 27.09.2021 Подрядчик принял Объект.

Актом приема-передачи от 21.07.2022, подписанного сторонами, объект после проведения работ по капитальному ремонту сдан заказчику.

Истец, в обоснование заявленных требований, указал, что в полном объеме оплатил организациям, поставляющим коммунальные услуги, расходы по коммунальным услугам за период с сентября 2021 года по июль 2022 года, в период проведения капитального ремонта Объекта, что подтверждается платежными поручениями №1113023 от 16.09.2021, №1284372 от 27.10.2021, №1367771 от 16.11.2021, №1513931 от 16.12.2021, №1383752 от 28.07.2022, №1388416 от 27.09.2022, №1447052 от 11.08.2022, №1447054 от 11.08.2022, №1473576 от 17.08.2022, №1269963 от 22.10.2021, №1275156 от 25.10.2021, №1361584 от 15.11.2021, №1379760 от 18.11.2021, №1486105 от 13.12.2021, №24556 от 21.01.2022, №125306 от 17.02.2022, №158151 от 28.02.2022, №158152 от 28.02.2022, №832037 от 21.03.2022, №844530 от 24.03.2022, №844540 от 24.03.2022, №1083259 от 19.05.2022, №1118327 от 30.05.2022, №1759126 от 24.10.2022, №1132724 от 22.09.2021, №1132739 от 22.09.2021, №1148975 от 27.09.2021, №1257897 от 20.10.2021, №1279540 от 26.10.2021, №1373593 от 17.11.2021, №1373601 от 17.11.2021, №1486104 от 13.12.2021, №24558 от 21.01.2022, №131675 от 18.02.2022, №158154 от 28.02.2022, №821039 от 17.03.2022, №821040 от 17.03.2022, №821043 от 17.03.2022, №844531 от 24.03.2022, №1083257 от 19.05.2022, №1116731 от 30.05.2022, №1345478 от 15.07.2022, №1353341 от 19.07.2022, №1508988 от 29.08.2022.

Уведомлением №74-4-807/23 от 20.02.2023, истец просил в срок до 17.03.2023 произвести оплату потребленных на объекте в период производства работ коммунальных ресурсов, в соответствии с абзацем 13 пункта 6 Технической документации (технического задания) (Приложение № 1 к Контракту от №5139-ЭА/21 от 27.09.2021).

Уведомление истца ответчиком оставлено без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

По своей правовой природе, заключенный между сторонами контракт №5139-ЭА/21 от 27.09.2021, является договором подряда, правовое регулирование которого осуществляется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (статья 702 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 747 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

В соответствии с пунктом 3 статьи 747 Гражданского Кодекса Российской Федерации, оплата предоставленных заказчиком услуг, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

Согласно абзаца 13 пункта 6 Технической документации (технического задания) (Приложение № 1 к Контракту от №5139-ЭА/21 от 27.09.2021, являющимся неотъемлемой частью Контракта) Подрядчик своими силами и (или) за свой счет оплачивает потребленные на объекте в период производства работ коммунальные ресурсы. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании изложенного, из материалов дела следует, что ООО «ДРАФТ» приняло на себя обязанность по оплате потребленных на объекте в период производства работ коммунальных ресурсов, в связи с чем, исковые требования являются правомерными.

Довод ответчика, о том что, 01.04.2022 Заказчик заехал на объект, а именно в здание ОГКУ ЦЗН по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Баркова, 43, и с 01.04.2022 по 21.07.2022 осуществлял там деятельность и пользовался коммунальными ресурсами и Заказчик и Подрядчик, в связи с чем, ответчиком сделан перерасчет задолженности, которая составила 583 198  руб. 41 коп. (период с апреля 2022 года по июль 2022 года разделен на 2), подлежит отклонению, поскольку данная позиция ответчика не подтверждена нормами права.

При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств оплаты задолженности за потребленные в период с сентября 2021 года по июль 2022 года коммунальные ресурсы в размере 667 870 руб. 31 коп., суд находит требования истца правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Всем существенным доводам, пояснениям и возражениям сторон, судом дана соответствующая оценка, что нашло отражение в данном решении; иные доводы и пояснения не существенны и на выводы суда не влияют.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Истец в силу действующего законодательства освобожден от уплаты государственной пошлины.

В силу положений статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины при цене иска 667 870 руб. 31 коп. составляет 16 357 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРАФТ» в пользу ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 667 870 руб. 31 коп. –    сумма основного долга.

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРАФТ» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 16 357 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.

 

Судья                                                                                                  С.И. Кириченко