101/2023-86424(1) 

Арбитражный суд Брянской области 241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  решения

 по делу 

№ А09-9814/2022

город Брянск

02 августа 2023 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Прокопенко Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Отдела культуры, спорта и  

молодежной политики Новозыбковской городской администрации, Брянская область,  

г.Новозыбков (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  

«Стройгарант», г.Москва (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту  

 № 0127600001219000003 от 13.12.2019, обнаруженных в период гарантийного срока,  

третьи лица: государственное казенное учреждение «Управление капитального  

строительства Брянской области, г.Брянск; муниципальное бюджетное учреждение  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» г.Новозыбкова, г.Новозыбков Брянской  

области, при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, 

от ответчика (в режиме веб-конференции): ФИО2 по доверенности № 1 от  

20.03.2023, от третьих лиц: не явились, извещены, 

руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Отдела культуры, спорта и молодежной политики  Новозыбковской городской администрации удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Стройгарант» в течение одного месяца с даты вступления решения суда в  законную силу в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальному  контракту № 0127600001219000003 от 13.12.2019 на выполнение строительно-монтажных  работ по объекту: Дворец спора по ул.Гагарина, 8а, г.Новозыбков Брянской области,  устранить следующие недостатки: протекание кровли по оси B – 10/3 – кабинет  директора; в осях А/Б – (5/2-7/1) – в помещении буфета.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Стройгарант» государственную пошлину в доход федерального бюджета в  размере 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный  апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд  Брянской области.  

Судья Электронная подпись действительна.Прокопенко Е.Н.  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 02.05.2023 10:27:00

Кому выдана Прокопенко Екатерина Николаевна