АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-4713/2022

24 августа 2022 года

г. Курск

 

Резолютивная часть решения объявлена 17.08.2022.

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект» 

к областному казенному учреждению «Курскавтодор» 

о взыскании задолженности по государственному контракту №6-ПИР от 02.09.2019 в размере 2 362 220 руб. 00 коп., по государственному контракту №8-ПИР от 10.09.2019 в размере 469 272 руб. 20 коп., по государственному контракту №12-ПИР от 10.09.2019 в размере 498 743 руб. 40 коп., по государственному контракту №15-ПИР от 10.09.2019 в размере 648 130 руб. 00 коп., расходов по оплате госпошлины.

В судебном заседании участвуют представители:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 12.08.2022,

от ответчика: ФИО3 - по доверенности от 21.07.2022 №02.2-1910.

Общество с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект» обратилось в арбитражный суд с иском к областному казенному учреждению «Курскавтодор» о взыскании задолженности по государственному контракту №6-ПИР от 02.09.2019 в размере 2 362 220 руб. 00 коп., по государственному контракту №8-ПИР от 10.09.2019 в размере 469 272 руб. 20 коп., по государственному контракту №12-ПИР от 10.09.2019 в размере 498 743 руб. 40 коп., по государственному контракту №15-ПИР от 10.09.2019 в размере 648 130 руб. 00 коп., расходов по оплате госпошлины.

Через канцелярию суда от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать задолженность по государственному контракту №6-ПИР от 02.09.2019 в размере 2 362 220 руб. 00 коп., по государственному контракту №8-ПИР от 10.09.2019 в размере 1 517 343 руб. 80 коп., по государственному контракту №12-ПИР от 10.09.2019 в размере 1 525 756 руб. 00 коп., по государственному контракту №15-ПИР от 10.09.2019 в размере 648 130 руб. 00 коп. Уточненные требования приняты судом к производству.

Через канцелярию суда от ответчика поступил письменный отзыв на заявленные требования. Приобщается судом к материалам дела.

Соглашение сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям. 

Представитель истца в полном объеме поддержал заявленные требования с учетом уточнения.

Представитель ответчика заявленные требования не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Суд в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции. 

Представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Представитель ответчика заявленные требования не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект», юридический адрес - 123104, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул.М.Бронная, д. 2, стр. 1, этаж 4, помещ./комн. I/73А, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 24.03.2016, ИНН: 

<

***>.

Областное казенное учреждение «Курскавтодор», юридический адрес - 305004, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 

<

***>.

Как следует из материалов дела, 02.09.2019 между ООО «УралГеоПроект» (Исполнитель) и ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» (Заказчик, в настоящее время ОКУ «Курскавтодор») был заключен Госконтракт № 6-ПИР, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные и изыскательские работы на реконструкцию мостов: мост через ручей Кастора на км 11+260 автомобильной дороги «Курск-Борисоглебск»-Касторное-граница Липецкой области»-Погожево в Касторенском районе Курской области; мост через реку Грайворонка на км 1+350 автомобильной дороги «Курск-Касторное»-Варварино в Советском районе Курской области (далее - Объект), в соответствии с Приложениями № 1.1,1.2 к Контракту (Техническое задание) и Приложением № 2 (Календарный график и стоимость выполнения работ) к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Существенное условие о сроке производства проектных работ установлено в порядке п. 1.3 Госконтракта Календарным графиком (Приложение № 2 к Госконтракту), в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 24.12.2020. Дата начала - с момента подписания Госконтракта. Дата окончания работ - 30.06.2021.

Заказчиком приняты без замечаний по составу, объемам, качеству и срокам:

- отчетные материалы по инженерным изысканиям объектов проектирования и проектные работы (начало) этапы 1 и 2, разработанные Подрядчиком, о чем сторонами утверждены Акты о приемке выполненных работ № 1.1 от 20.12.2019 на сумму 3 645 747,0 руб.. в том числе НДС и № 1.2 от 20.12.2019 на сумму 3 795 246.0 руб.. в том числе НДС;

- проектные работы (окончание) и ППТ и ПМТ этапы 3 и 4, акты о приемке выполненных работ по объектам № 2.1 от 31.05.2020 на сумму: 983 773.0 руб.. в том числе НДС и № 2.2 от 31.05.2021 на сумму 1 024 114, 0 руб.. в том числе НДС.

Положительные заключения Главгосэкспертизы получены Исполнителем 02.02.2022 года по объекту: мост через ручей Кастора на км 11+260 автомобильной дороги «Курск-Борисоглебск»-Касторное-граница Липецкой области»-Погожево в Касторенском районе Курской области и

02.03.2022 года по объекту: мост через реку Грайворонка на км I +350 автомобильной дороги «Курск-Касторное»-Варварино в Советском районе Курской области.

Отчетные документы по этапам 5 объектов в полном объеме переданы Заказчику по накладным № 250-1/2 от 10.03.2022 и № 250-2/2 от 14.03.2022.

01.04.2022 по накладной Даймекс № 45439880 Заказчику сопроводительными письмами № 400-70-250-535 отправлен акт о приемке выполненных работ № 3.1 от 10.03.2022 по этапу 5 на сумму 1 157 380.0 руб., в том числе НДС и №400-70-250-534 акт о приемке выполненных работ №3.2 от 14.03.2022 по мат. 5 на сумму I 204 840.0 руб., в том числе 11, К . а также счета на оплату и справки по форме KG-3, которые получены Заказчиком 04.04.2022.

В адрес Исполнителя подписанные Заказчиком акты о приемке выполненных работ по этапам 5 на выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию мостов в адрес Исполнителя не вернулись.

Письмом № 03-709 от 30.03.2022 Заказчик уведомил Исполнителя о том, что направленная им проектная документация по накладной № 261-2-2 от 28.02.2022 принимается, но Заказчик не имеет возможности произвести оплату работ в 2022 году, так как срок действия Госконтракта истек в 2021 году.

10.09.2019 между ООО «УралГеоПроект» (Исполнитель) и ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» (Заказчик, в настоящее время ОКУ «Курскавтодор») был заключен Госконтракт № 8-ПИР, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные и изыскательские работы на строительство автомобильных дорог в Медвенском, Октябрьском, Обоянском и Пристенском районах Курской области (далее - Объект), в соответствии с Приложениями № 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5.1.6,1.7 к Контракту (Техническое задание) и Приложением № 2 (Календарный график и стоимость выполнения работ) к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Существенное условие о сроке производства проектных работ установлено в порядке п. 1.3 Госконтракта Календарным графиком (Приложение № 2 к Госконтракту), в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 24.12.2020. Дата начала - с момента подписания Госконтракта. Дата окончания работ - 30.06.2021.

Заказчиком приняты без замечаний по составу, объемам, качеству и срокам:

- отчетные материалы по инженерным изысканиям объекта проектирования и проектные работы (начало) этапы 1 и 2. разработанные Подрядчиком, о чем сторонами утвержден Акт о приемке выполненных работ№ 1.5 от 20.12.2019 на сумму 539 663.0 руб. в том числе НДС;

- проектные работы (окончание) и ППТ и ПМТ этапы 3 и 4. акт о приемке выполненных работ № 2.5 от 10.10.2020 на сумму: I 337 425.80 руб.. в том числе НДС.

Положительное заключение Главгосэкспертизы получено Исполнителем 21.02.2022 года. Отчетные документы по этапу 5 в полном объеме переданы Заказчику по накладной № 266-6-2 от 28.02.2022.

09.03.2022 Заказчику отправлен акт о приемке выполненных работ № 3.6 по этапу 5 на сумму 469 272.20 руб., в том числе НДС, который был получен им 11.03.2022.

В адрес Исполнителя подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных работ № 3.6 от 09.03.2022 г. по этапу 5 на сумму 469 272.20 руб., в том числе НДС не поступал.

Письмом № 13-590 от 18.03.2022 Заказчик уведомил Исполнителя о том, что направленная им проектная документация по накладной № 266-6-2 от 28.02.2022 принимается, но Заказчик не имеет возможности произвести оплату работ в 2022 году, так как срок действия Госконтракта истек в 2021 году.

25.05.2022 Заказчику сопроводительным письмом № 400-70-266-826 отправлен акт о приемке выполненных работ № 3.3 от 25.05.2022 по этапу 5 на сумму 527 464,00 руб., в том числе НДС, который был получен и подписан Заказчиком.

- «Автомобильная дорога «Дьяконово - Старково - Соколовка» - 2-я Малая ФИО4 в Октябрьском районе Курской области».

03.06.2022 сопроводительным письмом № 400-70-266-797 Заказчику отправлен акт о приемке выполненных работ № 3.4 от 03.06.2022 по этапу 5 на сумму 520 607,60 руб., в том числе НДС, который был получен и подписан Заказчиком.

10.09.2019 между ООО «УралГеоПроект» (Исполнитель) и ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» (Заказчик, в настоящее время ОКУ «Курскавтодор») был заключен Госконтракт № 12-ПИР, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные и изыскательские работы на строительство автомобильных дорог в Горшеченском. Касторенском и Советском районах Курской области (далее - Объект), в соответствии с Приложениями № 1.1,1.2,1.3,1.4.1.5,1.6,1.7,1.8,1.9 к Контракту (Техническое задание) и Приложением № 2 (Календарный график и стоимость выполнения работ) к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Существенное условие о сроке производства проектных работ установлено в порядке п. 1.3 Госконтракта Календарным графиком (Приложение № 2 к Госконтракту), в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 24.12.2020. Дата начала - с момента подписания Госконтракта. Дата окончания работ - 30.06.2021.

Заказчиком приняты без замечаний по составу, объемам, качеству и срокам:

- отчетные материалы по инженерным изысканиям объекта проектирования и проектные работы (начало) этапы 1 и 2. разработанные Подрядчиком, о чем сторонами утвержден Акт о приемке выполненных работ № 1.6 от 20.12.2019 на сумму 1 143 267,0 руб., в том числе НДС,

- проектные работы (окончание) и ППТ и ПМТ этапы 3 и 4, акт о приемке выполненных работ № 2.7 от 10.10.2020 на сумму: 851 706.60 руб.. в том числе НДС.

Положительное заключение Главгосэкспертизы получено Исполнителем 04.02.2022 года. Отчетные документы по этапу 5 в полном объеме переданы Заказчику по накладной № 268-7-2 от 10.02.2022.

10.02.2022 Заказчику отправлен акт о приемке выполненных работ № 3.7 от 10.02.2022 г. по этапу 5 на сумму 498 743.40 руб.. в том числе НДС. который был получен им 15.02.2022.

На дату настоящего обращения в адрес Исполнителя подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных работ №3.7 от 10.02.2022 г. по этапу 5 на сумму 498 743.40 руб.. в том числе НДС не поступал.

Письмом № 13-591 от 18.03.2022 Заказчик уведомил Исполнителя о том. что направленная им проектная документация по накладной № 266-6-2 от 28.02.2022 принимается, но Заказчик не имеет возможности произвести оплату работ в 2022 году, так как срок действия Госконтракта истек в 2021 году.

27.05.2022 Заказчику сопроводительным письмом № 400-70-250-836 отправлен акт о приемке выполненных работ № 3.1 от 27.05.2022 по этапу 5 на сумму 1 027 012,60 руб., в том числе НДС, который был получен и подписан Заказчиком.

10.09.2019 между ООО «УралГеоПроект» (Исполнитель) и ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» (Заказчик, в настоящее время ОКУ «Курскавтодор») был заключен Госконтракт № 15-ПИР, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные и изыскательские работы на строительство автомобильных дорог: Автомобильная дорога «Крым» - х. Полный -Полевая в Медвенском и Курском районах Курской области; Автомобильная дорога «Крым» - «Курск -Петрин» - Кукуевка в Курском районе Курской области (далее -Объект), в соответствии с Приложениями № 1.1,1.2 к Контракту (Техническое задание) и Приложением № 2 (Календарный график и стоимость выполнения работ) к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Существенное условие о сроке производства проектных работ установлено в порядке п. 1.3 Госконтракта Календарным графиком (Приложение № 2 к Госконтракту), в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 24.12.2020. Дата начала - с момента подписания Госконтракта. Дата окончания работ - 30.06.2021.

Заказчиком приняты без замечаний по составу, объемам, качеству и срокам:

- отчетные материалы по инженерным изысканиям объекта проектирования и проектные работы (начало) этапы 1 и 2. разработанные Подрядчиком, о чем сторонами утвержден Акт о приемке выполненных работ № 1.1 от 20.12.2019 на сумму I 620 325,0 руб., в том числе НДС;

- проектные работы (окончание) и ППТ и ПМТ этапы 3 и 4. акт о приемке выполненных работ № 2.2 от 31.05.2020 на сумму: 972 195.0 руб.. в том числе НДС.

Положительное заключение Главгосэкспертизы получено Исполнителем 05.03.2022 года. Отчетные документы по этапу 5 в полном объеме переданы Заказчику по накладной № 261-2-2 от 17.03.2022.

01.04.2022 Заказчику сопроводительным письмом № 400-70-261-536 отправлен акт о приемке выполненных работ № 3.2 от17.03.2022 по этапу 5 на сумму 648 130.0 руб., в том числе НДС, который был получен им 04.04.2022.

В адрес Исполнителя подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных работ № 3.2 от 17.03.2022 г. по этапу 5 на сумму 648 130.0 руб., в том числе НДС не поступал.

Письмом № 03-709 от 30.03.2022 Заказчик уведомил Исполнителя о том, что направленная им проектная документация по накладной № 261-2-2 от 28.02.2022 принимается, но Заказчик не имеет возможности произвести оплату работ в 2022 году, так как срок действия Госконтракта истек в 2021 году.

14.04.2022 года Претензионными письмами № 410/40-649, № 410/40-650. № 410/40-651, № 410/40-652 ответчику предложено во внесудебном порядке исполнить денежное обязательство по оплате принятых проектных работ и уплатить неустойку за просрочку исполнения договорного обязательства.

Данные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения.

Таким образом, у ответчика образовалась задолженность  в размере 6 053 449 руб. 80 коп., в том числе задолженность по государственному контракту №6-ПИР от 02.09.2019 в размере 2 362 220 руб. 00 коп., по государственному контракту №8-ПИР от 10.09.2019 в размере 1 517 343 руб. 80 коп., по государственному контракту №12-ПИР от 10.09.2019 в размере 1 525 756 руб. 00 коп., по государственному контракту №15-ПИР от 10.09.2019 в размере 648 130 руб. 00 коп.

Ссылаясь на данные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с уточненным иском о взыскании задолженности.

Ответчик в письменном отзыве заявленные требования отклонил, указав на просрочку выполнения истцом работ, однако, подтвердив факт их принятия и соответствие работ условиям контрактов по качеству и объему. Так же ответчик указывает на невозможность оплаты выполненных работ в виду окончания финансового года и отсутствия лимитов бюджетных обязательств.

Оценив доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, арбитражный суд считает, что уточненные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.   

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В силу пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Правовое регулирование правоотношений определено главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.10.2011 № 9382/11 по делу № А56-43217/2010 в регулировании подрядных работ для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за нормами Гражданского кодекса: в части, не урегулированной статьями 763 - 767 Кодекса, должны применяться в зависимости от вида подрядных работ положения параграфа 3 или 4 главы 37 Кодекса, а затем - общие положения о договоре подряда (параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса).  

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной Гражданским кодексом Российской Федерации, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно части 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ, пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

В соответствии с положениями Контрактов работы должны быть выполнены до 30.06.2021.

Факт принятия выполненных по контрактам работ, их соответствие условиям контрактов по объему и качеству, подтверждается материалами дела, в том числе позицией ответчика, изложенной в письменном отзыве.

Доказательств оплаты выполненных работ ответчиком в материалы дела не представлено.

Доводы, изложенные ответчиком в письменном отзыве, суд отклоняет, как несостоятельные и основанные на неправильном применении правовых норм. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в заявленной сумме 6 053 449 руб. 80 коп. 

Согласно части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с областного казенного учреждения «Курскавтодор» в пользу общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект» 6 053 449 руб. 80 коп., в том числе задолженность по государственному контракту №6-ПИР от 02.09.2019 в размере 2 362 220 руб. 00 коп., по государственному контракту №8-ПИР от 10.09.2019 в размере 1 517 343 руб. 80 коп., по государственному контракту №12-ПИР от 10.09.2019 в размере 1 525 756 руб. 00 коп., по государственному контракту №15-ПИР от 10.09.2019 в размере 648 130 руб. 00 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 42 892 руб. 00 коп. 

Взыскать с областного казенного учреждения «Курскавтодор» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 375 руб. 00 коп.

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                 А.Ю. Беседина