100115_304940  

Арбитражный суд Республики Алтай 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1627/2019

город Горно-Алтайск

22 октября 2019 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окунева И. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Сибмост"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт Димитрова, д. 16, г. Новосибирск,  область Новосибирская, 630099) к муниципальному учреждению "Управление  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно- Алтайска" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Строителей, д. 3/1, г. Горно- Алтайск, 

<

...>) о внесении изменений в муниципальный контракт   № 2015.ОК-01 на выполнение работ по строительству объекта: «Инженерная защита г.  Горно-Алтайска, р. Майма Республики Алтай» от 05.10.2015, изложив:  

- пункт 2.4 в следующей редакции: «Начало выполнения работ: с момента  заключения контракта. Окончание работ: по 30 ноября 2020 года»,  

- пункт 2.5 в следующей редакции: «Срок действия контракта с момента  заключения контракта по 31 декабря 2020 года»,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

полностью удовлетворить исковые требования акционерного общества  "Сибмост".  

Внести изменения в муниципальный контракт № 2015.ОК-01 на выполнение  работ по строительству объекта: «Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма  Республики Алтай» от 05.10.2015, заключенного между акционерным обществом  "Сибмост" и муниципальным учреждением "Управление жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска", изложив:  

пункт 2.4 муниципального контракта в следующей редакции: «Начало  выполнения работ: с момента заключения контракта. Окончание работ: по 30 ноября  2020 года»,  

пункт 2.5 муниципального контракта в следующей редакции: «Срок действия  контракта с момента заключения контракта по 31 декабря 2020 года».  

Взыскать с муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Строителей, д. 3/1, г. Горно-Алтайск, 

<

...>)  в пользу акционерного общества "Сибмост" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  пр-кт Димитрова, д. 16, г. Новосибирск, область Новосибирская, 630099) 6 000 руб.  расходов на уплату государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного  текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с подачей  жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья И.В. Окунева