16_8706083  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-38014/19

05 августа 2019 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,  при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального казенного  учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения  наказаний по Московской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Артель- Строй» об обязании исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту и  взыскании неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Артель-Строй» в течение 30 дней  с момента вступления в законную силу решения суда собственными силами и за свой счет  выполнить работы по устранению недостатков выполненных работ по капитальному  ремонту кровли склада готовой продукции швейной фабрики ФКУ ИК-5 УФСИН России по  Московской области по государственному контракту от 12.09.2017 № ГК75/17, выявленных  в период гарантийного срока и установленных экспертным заключением от 05.10.2018, по  адресу: 

<

...>, а именно:  

- выполнить ремонтно-строительные работы по замене дефектного покрытия  кровельного ската западной стороны на новое покрытие из аналогичного материала на  площади 102 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артель-Строй» в пользу  федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Управления  Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» 7 017 руб. 91 коп.  неустойки, 80 000 руб. 00 коп. расходов на оплату экспертного заключения и 9 481 руб. 00  коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья М.В. Досова