ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-27124/2024

г. Новосибирск

26 сентября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сурмановой  Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ "СИБИРЬ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И  СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по ГК № 23-18 от  29.01.2018  

третьи лица: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ДОРЭКСПЕРТ" (ОГРН 

<

***>), 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДОР-МОСТ" (ОГРН 

<

***>),  

при участии представителей: истца – ФИО1 (доверенность от 09.01.2024, паспорт, диплом); ответчика – ФИО2, доверенность от 06.03.2024, диплом, паспорт; третьих лиц – не явился (извещен), 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

"ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СИБИРЬ"  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.  

Обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И  СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" (ОГРН 

<

***>) в течение месяца с момента  вступления решения в законную силу, при наступлении климатических условий (в  сухую погоду, весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С,  осенью - не ниже 10°С) исполнить гарантийные обязательства по Государственному  контракту от 29.01.2018 № 23-18 на выполнение дорожных работ по капитальному  ремонту автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск км 108+000 - км 123+000, Новосибирская область и устранить следующие  дефекты, установленные Актом от 14.05.2024 № 255-4-24-1 о выявленных дефектах по  веденной в эксплуатацию автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск км 108+000- км 123+000, Новосибирская область:  

 1)выбоины на а.б. покрытии проезжей части, км 108+400 слева, км 108+600  справа, км 109+700 слева, км 112+550 слева, км 113+220 справа, км 114+300 слева, км  114+500 слева, км 115+350 слева, км 115+700 справа, км 116+100 справа, км 116+110  слева, км 116+120 слева, км 116+900 слева, км 117+200 слева, км 117+950 слева, км  118+100 справа, км 118+800 слева, км 118+850 справа, км 119+050 слева, км 119+070  слева, км 119+150 справа, км 119+300 справа, км 119 +500 слева = 805 м2;  

2) разрушение а.б. покрытия проезжей части (поперечные трещины с раскрытием  от 3 мм до 10 мм), км 115+000-км 120+000 =80 п.м.  

Взыскать с АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И  СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со  

дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья В.Г. Осипов