АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-2601/2017

г. Южно-Сахалинск

16 августа 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Че С.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-2601/2017  

по исковому заявлению муниципального унитарного предприятия  «Тепловые сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СК Беккер» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки, допущенные при  выполнении работ по Договору № 1 на выполнение работ по капитальному  ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский  городской округа» от 15.03.2016  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора: Администрация муниципального  образования «Холмский городской округ», Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального образования  «Холмский городской округ», Министерство жилищно-коммунального  хозяйства Сахалинской области,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального унитарного предприятия  «Тепловые сети» удовлетворить.  

Обязать общества с ограниченной ответственностью «СК Беккер»  безвозмездно в течение 30 дней с даты вступления в законную силу  решения суда по настоящему делу устранить недостатки, допущенные при  выполнении работ по Договору № 1 на выполнение работ по капитальному  ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский  городской округ» от 15 марта 2016 года, а именно:  

1. По адресу: 

<

...> (Акт № 1 от  26.10.2016):  

-  в квартирах 4, 54 установить водомерные счетчики. 

-  в квартирах № 111, 114, 117, 120, 64, 67, 70, 73, 1, 4, 7, 10, 13  произвести установку торцевых радиаторов.  

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  

-  в квартирах № 62, 65, 68, 71, 74 заменить стояк  водоснабжения.  

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  проекту.  

- закрепить соединительные коробки, организовать к ним  доступ.  

-  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- канал или запасовать в гофру.  

-  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. - доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  

2. По адресу: 

<

...> (Акт № 2 от  

26.10.2016): 

-  в подвале 1-го подъезда произвести работы по изоляции на  

стояках отопления. -  заделать отверстия в перекрытиях отопления. 

-  в подвале 1-го подъезда убрать строительный мусор.  

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы  

отопления, устранить течь в месте заглушки. 

-  в подвале 2-го подъезда устранить течь в месте сопряжения  

стояков канализации и водоснабжения. 

-  произвести изоляцию полотенцесушителей в подвале 2-го и 3- 

го подъездов. 

-  в квартире № 25 устранить неполадки в работе  

полотенцесушителя. 

-  в подвале 3-го подъезда убрать строительный мусор.  

-  устранить течь по стояку водоотведения в подвале 3-го  

подъезда. 

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

- закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. 

-  заменить СИЗы.  

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. 

-  предоставить акты пуско-наладочных работ.  

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  -  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. - доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  

3. По адресу: 

<

...> (Акт № 3 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. 

-  предоставить акты пуско-наладочных работ.  

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  -  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

NP7L 1-1-3 согласно смете. 

-  доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой.  -  предоставить исполнительную документацию на объект.  

4. По адресу: 

<

...> (Акт № 4 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. 

- доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой.  -  предоставить исполнительную документацию на объект.  

5. По адресу: 

<

...> (Акт № 6 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в нежилых квартирах № 33, 35 установить радиаторы  

отопления. 

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. -  доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  

6. По адресу: 

<

...> (Акт № 7 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в подвале 1-го подъезда демонтировать старые сети  

отопления. 

-  во 2-ом подъезде устранить течь подъездного радиатора.  

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. 

-  предоставить акты пуско-наладочных работ.  

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. - доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  

7. По адресу: 

<

...> (Акт № 8 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в подвале 1-го подъезда произвести демонтаж старых труб  

отопления. -  завершить работы по изоляции сетей теплоснабжения. 

-  в подвале 3-го подъезда закрепить горизонтальные сети  

водоотведения. -  установить торцевой радиатор в квартире № 48. -  закрепить радиаторы в квартире № 21. -  в квартире № 7 наладить работу полотенцесушителя. 

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. - доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  

8. По адресу: 

<

...> (Акт № 9 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления,  

покрасить стояки. 

-  закрепить в подвале 1-го подъезда вертикальные трубы  

отопления. -  завершить работы по изоляции сетей теплоснабжения. -  в подвале 5-го подъезда убрать строительный мусор. -  в квартирах № 34, 43 наладить работу полотенцесушителя. 

-  наладить работу радиаторов (устранить неравномерный  

прогрев) в квартире № 49. 

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. 

- доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой.  -  предоставить исполнительную документацию на объект.  

9. По адресу: 

<

...> (Акт № 10 от  

26.10.2016): 

-  закрепить в подвале 4-го подъезда трубы отопления возле  

торцевого приямка. 

-  в подвалах 3-го, 4-го подъезда убрать строительный мусор.  -  в квартире № 48 наладить работу радиаторов.  

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в квартире № 29 установить полотенцесушители надлежащим  

образом. 

- в квартирах № 52, 56, 60, 64 установить полотенцесушители.  -  в квартире № 30 установить водомерный счетчик.  

-  наладить температурный режим в жилых помещениях. 

-  в квартирах № 2, 6, 10, 14 установить торцевые радиаторы.  

- установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  -  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. -  доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  

10. По адресу: 

<

...> (Акт № 11 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в квартирах № 5, 14, 17, 25, 29, 42 наладить работу  

полотенцесушителей. -  произвести демонтаж старых сетей отопления. 

-  в квартире № 40 заделать отверстия в перекрытиях.  

-  в подвале 5-го подъезда завершить работы по монтажу  

изолирующего материала. -  в квартире № 77 наладить теплоснабжение. -  в квартире № 89 установить полотенцесушитель. 

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  -  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. 

- доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой.  -  предоставить исполнительную документацию на объект.  

11. По адресу: 

<

...> (Акт № 12 от 26.10.2016):  -  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в квартирах № 26, 29, 31 устранить течь полотенцесушителей.  -  в квартире № 32 закрепить радиаторы.  

-  установить клемные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

- закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  -  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3, согласно смете. 

- доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой.  -  предоставить исполнительную документацию на объект.  

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в квартирах № 2, 7, 17 заделать отверстия в перекрытиях,  

закрепить стояк. 

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3, согласно смете. - доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  13. По адресу: 

<

...> (Акт № 14 от 26.10.2016):  

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. - заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. 

-  предоставить акты пуско-наладочных работ.  

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  -  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3, согласно смете. -  доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. 

-  предоставить исполнительную документацию на объект.  

14.  По адресу: 

<

...> (Акт № 15 от  

26.10.2016): -  в квартирах № 9, 37, 33 наладить работу радиаторов. 

-  в подвале 2-го подъезда убрать строительный мусор в виде  

старых труб отопления. 

-  в подвале 3-го подъезда утеплить 1,5 м труб отопления  

(лежаки). 

- установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. 

-  предоставить акты пуско-наладочных работ.  

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. 

- доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой.  -  предоставить исполнительную документацию на объект.  

15.  По адресу: 

<

...> (Акт № 16 от  

26.10.2016): -  в квартире № 12 заменить стояк водоснабжения. -  в квартире № 15 наладить работу радиаторов. -  в квартире № 24 опломбировать водомерный счетчик. 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

- закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. -  заменить СИЗы. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. -  установить выключатели в соответствии со сметой. 

-  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

-  установить приборы учета Матрица NP73L.3-5-2 и Матрица  

NP7L 1-1-3 согласно смете. 

- доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой.  -  предоставить исполнительную документацию на объект.  

16. По адресу: 

<

...> (Акт № 17 от  

26.10.2016): 

-  в подъездах установить новые чугунные радиаторы отопления.  -  в первом подвале произвести демонтаж старых сетей  

теплоснабжения, водоснабжения (лежаки). 

-  в квартире № 1 в угловой комнате установить второй радиатор  

на торцевую стенку. -  в квартире № 4 в спальне закрепить радиатор. 

-  в квартире № 10 заделать отверстия в перекрытиях.  

-  во втором подвале произвести демонтаж старых сетей  

теплоснабжения, водоснабжения. -  в квартире № 18, 22 закрепить радиаторы. 

-  в квартире № 20 закрепить стояк водоснабжения, заделать  

отверстия в перекрытии. 

-  в квартире № 29 закрепить радиатор на кухне, а в ванной -  

стояк водоснабжения. 

-  в третьем подвале заменить один стояк канализации,  

водоснабжения. 

-  в квартирах № 35, 39 заделать отверстия в перекрытиях.  

-  установить клеммные коробки согласно смете, рабочему  

проекту. 

-  закрепить соединительные коробки, организовать к ним  

доступ. 

-  находящиеся вне силового щита кабели уложить в кабель- 

канал или запасовать в гофру. -  предоставить акты пуско-наладочных работ. 

-  произвести монтаж ВРУ в соответствии со СНиП, ПУЭ,  

рабочим проектом. 

-  установить выключатели в соответствии со сметой.  -  выполнить заземление в соответствии со сметой и ПУЭ.  

NP7L 1-1-3, согласно смете.  

- доукомплектовать этажные щиты, предусмотренные сметой. -  предоставить исполнительную документацию на объект. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  Беккер» в пользу муниципального унитарного предприятия «Тепловые  сети» штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по договору № 1  на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда  муниципального образования «Холмский городской округа» от 15.03.2016  в сумме 1 507 928 (один миллион пятьсот семь тысяч девятьсот двадцать  восемь) рублей 42 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  Беккер» в пользу муниципального унитарного предприятия «Тепловые  сети» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере  6 000 (шесть тысяч) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  Беккер» в доход федерального бюджета государственную пошлину за  рассмотрение искового заявления в сумме 28 079 (двадцать восемь тысяч  семьдесят девять) рублей.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Т.С. Горбачева