Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-57463/2018

08 октября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  21 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  08 октября 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "ЭрБи" (адрес:  Россия 194044, 

<

...>, лит. А пом. 2Н-9Н; ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>; Дата регистрации: 04.06.2010);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Вертикаль" (адрес:  Россия 192236, 

<

...>, стр. 1, пом. 1-Н, оф. 252; ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>; Дата регистрации: 23.09.2015);

о взыскании,

 

при участии: 

- от истца: ФИО2 по доверенности от 26.03.2018;

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 03.07.2018; 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭрБи» (далее – ООО «ЭрБи») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточенным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Вертикаль» (далее - ООО «Строй-Вертикаль») о взыскании 246 390 руб. 17 коп. задолженности по оплате выполненных работ, 13 797 руб. 66 коп. неустойки по договору от 06.11.2015 № 06-11/15-К-7.4-2.2-ОВ2, 416 678 руб. 22 коп. суммы гарантийных удержаний, 15 796 руб. 67 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.11.2017 по 14.05.2018. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 06.11.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Вертикаль» (Генеральный подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЭрБи» (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № 06-11/15-К-7.4-2.2-ОВ2, согласно которому ООО «ЭрБи» приняло на себя обязательства выполнить комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также выполнить пусконаладочные работы и сдать их результаты Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить их.

Согласно п. 2.7.1 Договора расчеты по Договору осуществляются Генеральным подрядчиком в следующем порядке: Промежуточные расчеты по Договору осуществляются Генеральным подрядчиком в размере стоимости работ, выполненных в отчетном месяце и определенной на основании актов по форме КС-2 и справок по форме KС-3 за отчетный период, с вычетом суммы гарантийных удержаний, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3% и аванса в течение 15 банковских дней со дня подписания Генеральным подрядчиком акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 за отчетный период, при условии представления исполнительной документации и счета-фактуры, на основании выставленного Подрядчиком счета.

Выполненные работы подтверждаются следующими документами:

1)         подписанными Сторонами справкой о стоимости выполненных работ № КС – 3 от 31.12.2015, актом о приемке выполненных работ № КС - 2 от 31.12.2015 на сумму 287 504 руб. 88 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура № 166 от 31.12.2015, счет № 229 от 31.12.2015         на сумму 250 129 руб. 24 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3%.

В нарушение сроков, установленных п.2.7.1 Ответчиком произведены платежи: 31.03.2016 - 192 628 руб. 26 коп.; 25.05.2016 - 57 500 руб. 98 коп., что подтверждается платежными поручениями.

2)         подписанными Сторонами справкой о стоимости выполненных работ № КС – 3 от 30.06.2016, актом о приемке выполненных работ № КС - 2 от 30.06.2016 на сумму 15 355 руб. 87 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура № 52 от 30.06.2016, счет № 64 от 30.06.2016 на сумму 10 288 руб. 43 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3%.

В нарушение сроков, установленных п.2.7.1 Ответчиком произведены платежи: 06.09.2016 - 10 288 руб. 43 коп., что подтверждается платежными поручениями.

3)         подписанными Сторонами справкой о стоимости выполненных работ № КС – 3 от 31.08.2016, актом о приемке выполненных работ № КС - 2 от 31.08.2016 на сумму 457 720 руб. 43 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура № 79 от 31.08.2016, счет № 94 от 31.08.2016 на сумму 306 672 руб. 69 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3%.

В нарушение сроков, установленных п.2.7.1 Ответчиком произведены платежи: 04.10.2016 - 306 672 руб. 69 коп., что подтверждается платежным поручением.

4)         подписанными Сторонами справкой о стоимости выполненных работ № КС – 3 от 31.10.2016, актом о приемке выполненных работ № КС - 2 от 31.10.2016 на сумму 2 809 000 руб. 68 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура № 108 от 31.10.2016, счет № 132 от 31.10.2016 на сумму 1 882 030 руб. 45 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3%.

С нарушением сроков, установленных п.2.7.1 Ответчиком произведены платежи: 05.12.2016 - 1 882 030   руб. 45 коп., что подтверждается платежным поручением.

5)         подписанными Сторонами справкой о стоимости  выполненных работ № КС – 3 от 30.11.2016, актом о приемке выполненных работ № КС – 2 от 30.11.2016 на сумму 35 933 руб. 56 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура № 127 от 30.11.2016, счет № 155 от 30.11.2016 на сумму 24 075 руб. 48 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размер: 3%.

С нарушением сроков, установленных п.2.7.1 Ответчиком 11.04.2017 внесен платеж в размере 24 075 руб. 48 коп., что следует из платежного поручения.

6)         подписанными Сторонами справкой о стоимости выполненных работ № КС – 3 от 31.12.2016, актом о приемке выполненных работ № КС - 2 от 31.12.2016 на сумму 31 792 руб. 36 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура №143 от 31.12.2016, счет № 171 от 31.12.2016          на сумму 21 300 руб. 88 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных и.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3%.

С нарушением сроков, установленных п.2.7.1 Ответчиком 13.06.2017 внесен платеж в размере 21 300 руб. 88 коп., что следует из платежного поручения.

7)         подписанными Сторонами справкой о стоимости выполненных работ № КС – 3 от 28.02.2017, актом о приемке выполненных работ № КС - 2 от 28.02.2017 на сумму 456 493 руб. 29 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура № 15 от 28.02.2017, счет № 22 от 28.02.2017 на сумму 305 850 руб. 50 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3%.

Дополнительно по акту взаимозачета встречных требований от 30.09.2017г. была зачтена задолженность ООО «ЭрБи» перед ООО «Строй-Вертикаль» по предоплате по договору строительного подряда № 06-11/15-К-7.4-2.2-ОВ2 в сумме 108 357 руб. 66 коп. 

8) подписанными Сторонами справкой о стоимости выполненных работ № КС - 3 от 31.07.2017 г., актом о приемке выполненных работ № КС - 2 от 31.07.2017 г. на сумму 72 981 руб. 09 коп.

По данным работам выставлены счет-фактура № 62 от 31.07.2017 г., счет № 98 от 31.07.2017 г. на сумму 48 897 руб. 33 коп., с учетом вычета суммы гарантийных удержаний в размере 10%, предусмотренных п.2.4 Договора, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3%.

В соответствии с требованиями ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с п.6.2 Договора в случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных работ более чем на 20 банковских дней, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

Претензии с требованием о погашении задолженности и уплате неустойки, направленные ООО «ЭрБи» в адрес Ответчика и полученные им 17.10.2017 г., 22.02.2018 г., 13.04.2018 г.

Размер неустойки составляет:

1) по счету № 229 от 31.12.2015 на сумму 250 129 руб. 24 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 05.02.2016.

С 05.02.2016 по 31.03.2016 просрочка составляет 55 дней. Пени за данный период составляют: 192 628,26 * 0,01% * 55 дней = 1 059, 46 руб.

С учетом поступления 31.03.2016 платежа в сумме 192 628 руб. 26 коп., размер задолженности уменьшился до 57 500 руб. 98 коп., просрочка с 05.02.2016 но 25.05.2016 составила 110 дней. Таким образом, пени за данный период составляют: 57 500,98 * 0,01% * 110 = 632,51 руб.

Итого, 1 059,46 + 632,51= 1 691,97 руб.

2)         по счету № 64 от 30.06.2016    на сумму  10 288 руб. 43 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 28.07.2016. 

Просрочка на сумму 10 288 руб. 43 коп. составила 40 дней. 

Размер пени составил: 10 288,43 * 0,01% * 40 = 41,15 руб.

3)         по счету    № 94 от 31.08.2016    на сумму 306 672 руб. 69 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 28.09.2016. 

Просрочка на сумму 306 672 руб. 69 коп. составила 6 дней. 

Размер пени составил: 306 672,69 * 0,01% * 6 = 184 рублей.

4)         по счету   № 132 от 31.10.2016   на сумму 1 882 030 руб. 45 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 29.11.2016. 

Просрочка на сумму 1 882 030 руб. 45 коп. составила 6 дней. 

Размер пени составил: 1 882 030.45 * 0,01% * 6 = 1 129,22 руб.

5)         по счету    № 155 от 30.11.2016    на сумму 24 075 руб. 48 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 28.12.2016. 

Просрочка на сумму 24 075 руб. 48 коп. составила 104 дня. 

Размер пени составил: 24 075,48 * 0,01% * 104 = 250,38 рублей.

6)         по счету    № 170 от 31.12.2016    на сумму 2 300 руб. 88 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 03.02.2017.

С 03.02.2017 по 13.06.2017 просрочка составляет 130 дней. 

Размер пени составил: 21 300,88 * 0,01% * 130 дней = 276,91 рублей.

7)         по счету    № 22 от 28.02.2017    на сумму 305 850 руб. 50 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 29.03.2017. 

Просрочка на сумму 108 357 руб. 66 коп. составила 184 дня.

Размер пени составил: 108 357,66 * 0,01% * 184 = 1 993,78 руб. 

С учетом поступления 30.09.2017 платежа в сумме 108 357 руб. 66 коп, размер задолженности уменьшился до 197 492 руб. 84 коп., просрочка с 29.03.2017 по 20.04.2018 составила 364 дня. Таким образом, пени заданный период составляют: 197 492,84 * 0,01% * 364 = 7 188,74 руб.

8)         по счету    № 98 от 31.07.2017    на сумму 48 897 руб. 33 коп. ответственность за просрочку наступает при поступлении платежа после 29.08.2017. 

Просрочка на сумму 48 897 руб. 33 коп. составила 213 дней. 

Размер пени составил: 48 897,33 * 0,01% * 213 = 1 041,51 руб. 

В соответствии с п. 2.6 Договора работы по Договору считаются выполненными в полном объеме с момента выполнения Подрядчиком всего объема работ, предусмотренного Договором.

Пунктом 2.7.2 определено, что окончательная оплата по Договору осуществляется Генеральным подрядчиком по факту выполненных работ в полном объеме с вычетом суммы гарантийных удержаний, стоимости услуг Генерального подрядчика в размере 3% и аванса в течение 15 банковских дней со дня подписания Генеральным подрядчиком Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии представления документации, указанной в п.5.1 Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

Согласно п.2.5 Договора возврат гарантийных удержаний должен происходить в следующем порядке: 50% от суммы гарантийных удержаний подлежат возврату Подрядчику  после выполнения работ по Договору в полном объеме не ранее чем 15 банковских дней  с  момента получения  Генеральным  Подрядчиком счета, выставленного Подрядчиком на сумму гарантийных удержаний, подлежащих возврату; 50% от суммы гарантийных удержаний подлежат возврату Подрядчику не позднее 30.09.2016, но не ранее чем в течение 15 банковских дней с момента получения Генеральным Подрядчиком счета, выставленного гарантийных удержаний, подлежащих возврату.

Счет № 157 от 23.10.2017 на возврат 50% гарантийных удержаний получен Ответчиком 24.10.2017.

Счет № 158 от 23.10.2017 на возврат второй половины гарантийных удержаний получен Ответчиком 24.10.2017.

Согласно правилам ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Расчётов процентов, начисленных в связи с нарушением срока выплаты гарантийного удержания, проверен судом и признан обоснованным.

Исходя из условий договора, суд признал невозможным применение договорной неустойки на случай нарушения срока выплаты гарантийного удержания. 

Размер долга ответчиком документально не опровергнут. 

С учётом изложенного иск подлежит удовлетворению.

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Вертикаль" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭрБи" долг на общую сумму 663 068 руб. 39 коп., 13 797 руб. 66 коп. пеней, 15 796 руб. 67 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 16 853 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.