АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-5157/2025

г. Астрахань

26 августа 2025 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Аюповой А.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кружановой И.А.,  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Внести в муниципальный контракт № 01256000012240000110001 от 24.06.2024 г.,  

заключенный между Управлением дорожного хозяйства и транспорта Администрации  

муниципального образования «Город Астрахань» и Обществом с ограниченной  

ответственностью «Рустранспиш» следующие изменения: 

 1. Пункт 3.1 раздела 3 "Сроки и условия выполнения работ Подрядчиком" Контракта  

изложить в следующей редакции: 

 "3.1. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с даты заключения  

муниципального контракта. Окончание выполнения работ: 31.03.2026 г." 2. В приложении № 4 к Контракту строчку № 2 п. 2 изложить в следующей редакции: "Окончание выполненных работ: по 31.03.2026 г.". 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья А.Н. Аюпова  

26 августа 2025 года