23/2017-65123(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-26254/2016

город Новосибирск

04 мая 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Краевой А.Г., рассмотрев  в судебном заседании дело по иску 9 Центра заказчика-застройщика внутренних  войск МВД России по Сибирскому региону (войсковая часть 6903), г. Новосибирск,  

к ответчику: строительно-проектно-промышленному открытому акционерному  обществу "СтройГАЗ", г. Барнаул,  

третье лицо: войсковая часть № 6749, г. Новосибирск, об обязании устранить недостатки. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать строительно-проектно-промышленное открытое акционерное общество  "СтройГАЗ" (ОГРН 1022201131116) в течение 1 месяца с момента вступления  решения в законную силу безвозмездно устранить следующие недостатки работ по  Контракту:  

1.1. Восстановить асфальтовое покрытие: 

- на перекрестке дорог между складом артиллерийского вооружения и газовой  котельной на стыке проезжей части с въездом на территорию склада артиллерийского  вооружения, провал асфальтового покрытия толщиной 80 мм., площадью участка  провалившегося асфальтового покрытия 3,5 м2;  

- подъездных путей к газовой котельной, расположенных между газовой  котельной и березовой рощей, трещина в асфальтовом покрытии поперек проезжей  части, длиной 4 м., шириной раскрытия от 2 до 5 см., глубиной 80 мм, с общей  площадью 6 м2.  

1.2. Восстановить магистраль сети холодного водоснабжения питающей 100- 

квартирный жилой дом, путем замены гидравлической муфты магистрали  холодного водоснабжения в месте соединения магистрали, (диаметр трубопровода  200 мм), находящейся в камере, расположенной в 7 метров в сторону оврага от  правого угла многоквартирного жилого дома Зеленодолинская 55/1 со стороны  частного сектора.  

1.3. Выполнить гидроизоляцию колодцев: 

- камеры магистрали холодного водоснабжения, в которой находится прибор  учета расхода холодной воды, расположенного у проезжей части по ул.  Зелнодолинская, на газоне, находящемся через дорогу от дома 55/1;  

- камеры магистрали холодного водоснабжения, в которой находится прибор  учета расхода холодной воды, расположенного у проезжей части по ул.  Зеленодолинская у здания КНС на газоне через дорогу от въездных ворот № 2 на  территорию воинской части.  

1.4. Восстановить трубу пожарной магистрали в колодце с пожарным гидрантом  путем замены гидравлической муфты в месте соединения магистрали и установки  пожарной колонки (диаметр трубопровода 200 мм), находящейся в камере в 2 метрах  от угла здания пункта заправки ГСМ воинской части по направлению в сторону  автомобильных боксов № 14.  

Взыскать с строительно-проектно-промышленного открытого акционерного  общества "СтройГАЗ" (ОГРН 1022201131116) в доход федерального бюджета  Российской Федерации государственную пошлину по иску 6000 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия. Решение  может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина