АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

г. Томск                                                                             Дело № А67-691/2022

07.04.2022 дата оглашения резолютивной части решения

08.04.2022 дата изготовления решения в полном объеме

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной, 

при ведении протокола заседания помощником судьи Ю.В. Балацкой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

об обязании исполнить обязательство по контракту,

при участии в заседании:

от истца – представителя ФИО1 по доверенности № 32 от 23.11.2020,

от ответчика – не явился (извещен),

У С Т А Н О В И Л:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области обратился в Арбитражный суд Томской области к обществу с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» с исковым заявлением с требованием обязать ответчика исполнить государственный контракт от 10.03.2020 № Ф.2020.3265 на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на притоках р. Томи в населенных пунктах Томской области (II этап) в полном объеме в срок до 01.05.2022.

Определением арбитражного суда от 31.01.2022 исковое заявление принято, предварительное судебное заседание назначено на 21.02.2022 на 10 час. 30 мин.

В предварительном судебном заседании по устному ходатайству истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований, следуя которому истец просил обязать ответчика исполнить государственный контракт от 10.03.2020 № Ф.2020.3265 на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на притоках р. Томи в населенных пунктах Томской области (II этап) в полном объеме в течение 1 месяца с момента вступления решения в законную силу.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании пояснил, что общество с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» прикладывает все усилия для исполнения контракта, планирует выполнить все обязательства в течение 1,5 месяцев.

Определением от 21.02.2022 дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 07.04.2022  на 10 час.  30 мин.  

До дня заседания от ответчика поступило ходатайство об участии в судебном заседании в режиме онлайн путем использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел». Указанное ходатайство в установленном порядке удовлетворено судом, вместе с тем, ответчик к конференции не подключился.

06.04.2022 в Арбитражный суд Томской области посредством электронной системы «Мой Арбитр»  от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому подрядчик во исполнение пункта 8 технического задания согласовывает результаты выполненных работ с отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Центральному Сибирскому округу по Томской области.

В день заседания, но до его начала в материалы дела от ответчика посредством электронной системы «Мой Арбитр» поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с тем, что представитель ответчика ФИО2 не может принять участие в заседании 07.04.2022 по причине госпитализации. К ходатайству приложена выписка из ЕГРЮЛ, копия дополнительного соглашения № 2 от 06.12.2019, копия решения № 2 от 06.12.2019.

Согласно части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Отложение судебного разбирательства по данной причине является правом суда, а не его обязанностью. При рассмотрении соответствующего ходатайства суд учитывает конкретные обстоятельства и рассматривает представленные сторонами доказательства.

Учитывая, что в отзыве на исковое заявление возражений в отношении исковых требований не приведено, а истец никаких дополнительных документов не представил и не привел новых доводов после предварительного заседания в обоснование иска, суд критически оценивает довод ответчика о том, что рассмотрение спора в отсутствие его представителя может серьезно нарушить его интересы.

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что ходатайство ответчика документально не подтверждено (не представлены доказательства госпитализации), учитывая, что необоснованное отложение судебного разбирательства не соответствует цели эффективного правосудия, суд протокольным определением отказал в  удовлетворении ходатайства.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в иске.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителя истца, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено решением Арбитражного суда Томской области от 13.01.2021 по делу № А67-6796/2020, имеющим преюдициальное значение для настоящего дела, между Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (далее – подрядчик) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0865200000320000065-2-1 от 25.02.2020 заключен государственной контракт № Ф.2020.3265 на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на притоках р. Томи в населенных пунктах Томской области (II этап)  от 10.03.2020 (далее – контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы по определению границ зон затопления, подтопления на притоках р. Томи в населенных пунктах Томской области (II этап)  в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены контрактом.

Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет 1 872 658,25 руб. и включает всебя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями контракта, втом числе: стоимость выполнения работ и иных расходов, связанных с выполнением контракта; налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи; все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением. Цена контракта, в соответствии с пунктом 2.2  является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.1-8.2 контракта.

Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результат отдельного этапа выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ (пункт 3.4.1 контракта).

Согласно пункту 3.4.7 контракта подрядчик обязан передать заказчику вместе с выполненными работами следующие документы: итоговый отчет о результатах выполненных работ, содержащий: Том 1. Пояснительная записка. В пояснительных записках к каждой зоне в обязательном порядке приводятся: сведения о типе и названии водного объекта; сведения об участке водного объекта, параметрах зоны; информация об использованных данных; описание зон; реестр жилых домов и информация о численности населения, объектов экономики, мостов, протяженности дорог, линий связи и электропередачи, переходов трубопроводов, площадей сельскохозяйственных угодий, мелиоративных систем и других объектов, попадающих в зоны затопления, подтопления; материалы по определению границ зон затопления, подтопления, включая результаты инженерных изысканий; перечень ограничений прав в границах зон затопления, подтопления. Том 2. Текстовые и графические описания местоположения границ зон затопления (или подтопления). Том 3. Опорные точки границ зон затопления (или подтопления), их описание и каталог координат. Текстовые и графические описания, а также перечни координат приводятся для границы зоны затопления 1 - процентной обеспеченности и каждой из зон подтопления. Обоснованные предложения по определению границ зон затопления, подтопления в населенных пунктах Томской области после согласования направляются подрядчиком в Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов для внесения сведений в Государственный водный реестр. Документация должна быть представлена заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных).

Согласно пункту 4.1 контракта сроки начала выполнения работ: с даты заключения контракта. Сроки завершения всего объема работ: 27.11.2020.

В соответствии с пунктом 4.3 контракта функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к контракту), условиям контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода.

Согласно пункту 5.1 контракта заказчик осуществляет приемку результатов отдельного этапа работ в течение 10 рабочих дней. 

В соответствии с пунктом 8 приложения № 1 к контракту (далее - Техническое задание) для каждой территории населенных пунктов, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию, подрядчик обязан выполнить:

8.1. Актуализировать сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической, гидрологической, геологической, гидрогеологической и картографической изученности затопляемых территорий для соответствующих участков водных объектов.

Исходными данными для определения зон затопления, в том числе, являются:

- материалы, полученные в результате геодезических и картографических работ, выполненных в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии, а также данные обследований по выявлению паводкоопасных территорий;

- данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

- данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

- данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ (при наличии);

- расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов (при наличии);

- параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий;

- материалы, полученные в результате геодезических и картографических работ, выполненных в соответствии с законодательством о геодезии и картографии, а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон.

Сбору и анализу подлежат:

- материалы гидрометеорологических наблюдений, включая полученные на их основе обобщения и расчетные характеристики; материалы гидрологических, геологических, гидрогеологических, почвенно-мелиоративных изысканий прошлых лет;

- сведения об экстремальных значениях гидрометеорологических характеристик;

- сведения о наличии и характере проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

В случае отсутствия материалов в фондах данных необходимо проведение выше указанных изысканий.

8.2. Подготовка или приобретение картографических материалов масштаба 1:10000 для подготовки единой картографической основы в системе координат МСК-70.

8.3. Проведение рекогносцировочного маршрутного обследования затопляемых, подтапливаемых территорий, прилегающих к водным объектам, в том числе выполнение инструментальных геодезических и гидрометрических работ. Описание всех сооружений в русле и пойме рек, оказывающих влияние на водный режим (дамбы, плотины, мосты, набережные, причалы, дороги, переходы трубопроводов и т.п.), их местоположение в плане, капитальность, морфометрию, протяженность, у мостов - количество и размеры опор, их расположение по ширине реки, высоту пролетов от уреза воды.

8.4. Определение расчетных параметров границ зон затопления на территориях населенных пунктов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию, на основе инженерно-гидрологических расчетов в соответствии с СП 33-101-2003 с обязательным привлечением данных последних лет наблюдений, с указанием источника, на основании которого установлена гидрологическая информация.

8.5. Определение параметров границ подтоплений на основе данных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий с обязательным привлечением данных последних лет наблюдений.

8.6. Определение границ затопления, в отношении территорий населенных пунктов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию, затапливаемых при половодьях и паводках либо в результате ледовых заторов и зажоров однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений. 

8.7. В границах зон подтопления определяются:

- территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

- территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности;

- территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

8.8.Описание границ зон затопления, подтопления, их координат и опорных точек. Составление каталога координат опорных точек.

8.9. Подготовка сведений о границах каждой зоны, которые должны содержать пояснительную записку, текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости,  выполненные в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Текстовые и графические описания, перечни координат приводятся для границы зоны затопления 1 - процентной обеспеченности и каждой из зон подтопления.

8.10. Создание файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, необходимых для направления в орган кадастрового учета сведений о границах каждой зоны, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.

8.11. Подготовка сведений о зонах с особыми условиями использования территорий (границы зон затопления, подтопления) для внесения в государственный водный реестр (в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29.05.2007 № 138 «Об утверждении формы государственного водного реестра») и государственный кадастр недвижимости (в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). 

8.12. Определение численности населения, объектов экономики, мостов, протяженности дорог, линий связи и электропередачи, переходов трубопроводов, площади сельскохозяйственных угодий, мелиоративных систем и других объектов, попадающих в зоны затопления и (или) возможных подтоплений.

8.13. Графические описания для зон затопления и зон подтопления оформлять отдельно томами с титульными листами, на которых необходимо предусмотреть утверждение Верхне-Обским бассейновым водным управлением и согласование в пронумерованном и сброшюрованном виде со следующими уполномоченными органами: органами местного самоуправления (городских и сельских поселений, муниципальных районов), в отношении которых подготовлены Проекты; Департаментом федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу; Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора; Главным управлением МЧС России по Томской области; Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу по Томской области; Управлением Росреестра по Томской области.

8.14. Иные непредвиденные работы согласуются между заказчиком и подрядчиком в письменной форме.

В приложении № 1 к Техническому заданию указан перечень населённых пунктов Томского района Томской области по которым определяются границы зон затопления, подтопления: с. Яр, с. Вершинино, с. Батурино, д. Госконюшня, д. Кандинка, д. Барабинка, с. Тахтамышево, д. Черная Речка, п. Заречный, с. Петухово, д. Вороново, д. Некрасово, с. Богашево,  участок от с. Лучаново до границы с г. Томском, г. Томск, д. Аркашево, участок от д. Б.Протопопово до границы с г. Томском, г. Томск, участок от  д. Лязгино до границы с г. Томском, г. Томск,  с. Корнилово, д. Кусково, п. Рассвет, д. Конино, п. Копылово, д. Кисловка, д. Верхнее Сеченово, д. Лаврово, с. Рыбалово, д. Березкино, с. Зоркальцево,  от д. Поросино до д. Быково, п. Самусь, с. Петропавловка, д. Кижирово, п. Орловка.

Приложением № 2 к контракту определен календарный план выполнения работ по контракту, в котором установлено проведение работ в 4 этапа:

I этап: Сбор, анализ и обобщение данных (согласно пунктам 8.1 и 8.2 Технического задания). Проведение рекогносцировочного маршрутного обследования затопляемых, подтапливаемых территорий (согласно пунктам 8.4. и 8.6. Технического задания). Определение расчетных параметров границ затопления (при максимальных уровнях воды 1- процентной обеспеченности) на основе инженерно-гидрологических расчетов. Подготовка и предоставление заказчику на согласование отчетных материалов о выполненных работах. Срок исполнения: с даты заключения контракта по 01.07.2020.

II этап: Определение параметров границ подтоплений на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий (согласно пунктам 8.5 и 8.7 Технического задания). Описание границ зон затопления на территориях, затапливаемых при максимальных уровнях воды 1- процентной обеспеченности, границ зон подтопления, их координат и опорных точек. Составление каталога координат опорных точек (согласно пункту 8.8 Технического задания). Подготовка сведений о границах каждой зоны (согласно пункту 8.9 Технического задания). Составление реестра жилых домов и определение численности населения, объектов экономики, мостов, протяженности дорог, линий связи и электропередачи, переходов трубопроводов, площади сельскохозяйственных угодий, мелиоративных систем и других объектов, попадающих в зоны затопления и (или) возможных подтоплений (по информации органов местного самоуправления) (согласно пункту 8.12 Технического задания). Подготовка и предоставление заказчику на согласование отчетных материалов о выполненных работах. Срок исполнения: с 02.07.2020 по 01.09.2020.

III этап: Создание файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML (согласно пункту 8.10 Технического задания). Предоставление итоговой отчетной документации для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости (согласно пункту 8 Технического задания). Срок исполнения: с 02.09.2020 по 02.10.2020.

IV этап: согласование и утверждение положений об определении границ зон затопления, подтопления в населенных пунктах Томской области с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Подписание последнего акта сдачи- приемки выполненных работ.

25.08.2020 в адрес Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от  общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» поступило уведомление № ИП92-БКИ/20 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решением Арбитражного суда Томской области от 13.01.2021 по делу № А67-6796/2020 односторонний отказ подрядчика от исполнения контракта признан недействительным.

Согласно пояснениям истца, контракт подрядчиком не исполнен, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Отношения сторон, возникшие в связи с заключением рассматриваемого контракта, регулируются положениями параграфов 4, 5, главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются также общие нормы о подряде, договорах и обязательствах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с абзацем 8 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства. Применительно к рассматриваемой ситуации такой способ защиты права означает, что истец  вправе просить суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» в соответствии с условиями заключенного контракта выполнить работы, передать истцу результат выполненных работ.

По пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательства.

Как следует из статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентировано, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В силу диспозитивности метода гражданско-правового регулирования общественных отношений, закрепленного в пунктах 1, 2 статьи 1, пункте 1 статьи 9, статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники гражданского оборота осуществляют права и обязанности, руководствуясь своей автономной волей и в своем интересе.

Принцип свободы договора является конституционно признанной гарантией свободы экономической деятельности, относящейся к основам конституционного строя государства (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 28-П).

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Как следует из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что общество с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров», исходя из принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), в добровольном порядке приняло на себя обязательства по контракту.

По доводам ответчика, в настоящее время спорный контракт находится на стадии исполнения, результаты работ находятся на стадии согласования с отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Центральному Сибирскому округу по Томской области. Ответчик не уклоняется от исполнения своих обязательств по контракту, напротив, действия общества направлены на его исполнение. 

Доказательств в подтверждение указанных доводов ответчик не представил, в связи с чем они отклоняются судом.

Поскольку ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства выполнения работ, передачи истцу результатов выполненных работ, исковые требования Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области подлежат удовлетворению. 

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, она подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 6 000 руб. на основании части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнить в полном объеме государственный контракт от 10.03.2020 № Ф.2020.3265 на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на притоках р. Томи в населенных пунктах Томской области (II этап), заключенный между  Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от имени Томской области и обществом с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров», в течение 1 месяца с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья                                   Н.Н. Какушкина