АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-899/2020

г. Уфа

03 февраля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 27.01.2021

Полный текст решения изготовлен 03.02.2021

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Акционерного общества "Горно-добывающая компания "БЕРЕЛЕХ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "РУССКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о расторжении договора и взыскании 7 509 703руб.

В судебное заседание явился:

От ответчика – ФИО2 по доверенности от 28.10.2020, представлен диплом о высшем юридическом образовании Ессентукского института управления бизнеса и права регистрационный номер 969 от 15.07.2005, представлен паспорт гражданина РФ;

От истца – явки нет, извещены надлежащим образом;

 

Акционерное общество "Горно-добывающая компания "БЕРЕЛЕХ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)   обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "РУССКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о расторжении договора на выполнение буровых работ №02/17 от 23.01.2017 г. и взыскании неосновательного обогащения в размере 7 509 703руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в  размере 66 549руб.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в удовлетворении исковых требований о расторжении договора просит отказать в полном объеме, поскольку договор является расторгнутым в одностороннем порядке Акционерным обществом "Горно-добывающая компания "БЕРЕЛЕХ" на основании пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части  взыскания предварительной оплаты по договору подряда № 02/17 от 23.01.2017 г. в размере 7 509 703 руб., просит удовлетворить частично соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору (сальдо встречных обязательств).

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца.

Проверив материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, «23» января 2017 года между АО «Горно-добывающая компания «Берелех» (Истец) и ООО «Русская Буровая Компания» (Ответчик) был заключен Договор на выполнение буровых работ № 02/17 (далее «Договор»), в соответствии с которым ООО «Русская Буровая Компания» (Подрядчик по Договору) принимало на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика разведочное бурение для доразведки погребенных аллювиальных месторождений золота  руч. Раковский и руч. Болотный (Сусуманский район Магаданской области), а АО «Горно-добывающая компания «Берелех» (Заказчик по Договору) — принять и оплатить результаты работ.

Согласно п. 2.2 Договора, Подрядчик приступает к выполнению работ в течении 21 дня с момента исполнения Заказчиком обязательства по оплате аванса, предусмотренного п.п. 4.3.1. настоящего Договора, но не ранее 01.03.2017 г.

Согласно п. 4.3.1. Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс на проведение буровых работ в размере: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. 

Зачет аванса производится ежемесячно пропорционально стоимости выполненных в отчетном месяце работ. 

Платежным поручением № 406 от 06.03.2017 г. Истец перечислил Ответчику аванс по Договору в размере: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

В пункте 3 приложения № 1 к договору сторонами согласованы сроки выполнения работ по договору:

Начало производства работ: март  2017 года.

Окончание производства работ: июль 2017 года.

В обоснование требований истец указывает, что, в нарушение условий договора, ответчик в установленные в договоре сроки принятые на себя обязательства не исполнил, в связи с чем, истец направил в адрес ответчика письмо от 09.08.20218 исх. № 61/11-651 о расторжении договора и возвращении денежных средств перечисленных в качестве предоплаты.

Подписанных актов о приемке истцом выполненных ответчиком работ на сумму  7 509 703 рубля у истца отсутствуют.

В связи с указанными обстоятельствами, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителей сторон, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, признаются сделками.

В силу пункта 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации, для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

По договору подряда подрядчик обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик принять результат работ и оплатить его (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации). По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, на основании п. 1 ст. 702 и п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным условиями договора подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ), а также начальный и конечный срок их выполнения.

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу ст. 753 ГК РФ подрядчик обязан уведомить заказчика о завершении работ (этапа работ) по договору и готовности результата работ к сдаче, а заказчик обязан организовать и осуществить приемку результата работ.

По смыслу названных норм права сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы являются основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ. Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (п. 2 ст. 720 ГК РФ).

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из представленного в материалы дела письма от 09.08.20218 исх. № 61/11-651 следует, что истец утратил интерес к исполнению спорного договора в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ и расторг договор в одностороннем порядке.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. При этом статья 715 кодекса не предусматривает специальной формы, в которой должен быть выражен отказ от исполнения договора и не устанавливает какого-либо предварительного порядка извещения другой стороны о намерении прекратить договор, а определяет лишь условия возникновения такого права.

Из данной нормы следует, что при наличии условий, указанных в п. 2, 3 ст. 715 ГК РФ, заказчик вправе в любой момент и любым способом отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Следовательно, волеизъявление на отказ от договора может содержаться в письменном документе, направленном подрядчику, а также может быть выражено в любых фактических действиях (заключении договора с другим подрядчиком на выполнение тех же работ, составлении претензии и т.п.).

Поскольку ответчик в установленные договор сроки и в соответствующем объеме работы не выполнил, то расторжение договора истцом в одностороннем порядке следует оценивать как правомерное.

В силу п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Таким образом, в силу п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 715 ГК РФ договор подряда № 02/17 от 23.01.2017 г. считается расторгнутым.

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Таким образом, с 28.08.2018 г. (вх. № 116 от 28.08.2018г) спорный договор является расторгнутым в одностороннем порядке Акционерным обществом "Горно-добывающая компания "БЕРЕЛЕХ"  на основании пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи  с чем, основания для удовлетворения требования  истца о расторжении договора подряда № 02/17 от 23.01.2017 г. отсутствуют. 

В части требования истца о взыскании предварительной оплаты по договору подряда № 02/17 от 23.01.2017 г. в размере 7 509 703 руб. суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору (сальдо встречных обязательств) и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2018 N 304-ЭС17-14946).

В этом случае заказчик не лишен возможности взыскания неосвоенных денежных средств, если подтвердит, что спорные денежные средства являются для ответчика неосновательным обогащением в связи с невыполнением последним работ либо их выполнением на меньшую сумму, в то время как подрядчик обязан возвратить полученные денежные средства, если не докажет факт выполнения работ стоимостью, не меньшей, чем полученная оплата. В случае превышения стоимости выполненных до момента расторжения договора работ над суммой полученной за них оплаты, на стороне заказчика возникает обязанность оплатить соответствующую разницу.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу указанной выше нормы права, такое приобретение или сбережение производится за счет другого лица (за чужой счет).

Как правило, это означает, что имущество потерпевшего уменьшается вследствие выбытия из его состава некоторой части или неполучения доходов, на которые это лицо правомерно могло рассчитывать. Кроме того, необходимым условием является отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно.

Таким образом, для удовлетворения требований о взыскании неосновательного обогащения необходимо установить отсутствие оснований, дающих приобретателю право на получение имущества потерпевшего (договоры, сделки и иные основания, предусмотренные статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 1102 ГК РФ, ч. 2 ст. 65 АПК РФ в предмет доказывания по иску о взыскании неосновательного обогащения входит установление обстоятельств (факта) получения (сбережения) ответчиком имущества за счет истца; отсутствие для этого установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований; размер неосновательного обогащения.

Обязательства сторон по договору подряда носят встречный характер (ст. 328, 702 ГК РФ), в этой связи по иску заказчика о возврате авансового платежа подлежат установлению обстоятельства исполнения ответчиком принадлежащих ему встречных обязательств на заявленную к взысканию сумму.

При этом бремя предоставления доказательств исполнения встречных обязательств в таком случае относится на ответчика, как лицо, которому такие обязательства принадлежат (ст. 702, 720 ГК РФ).

Как следует из материалов дела (в электронном виде), надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных предметом Договора, подтверждается двусторонним подписанием Сторонами: 

- Акта сдачи-приемки работ, выполненных за май 2017 г. № 01 от 31.05.2017 г. на сумму: 5 214 560,00 рублей, в том числе НДС 18%;

- Акта сдачи-приемки работ, выполненных за сентябрь 2017 г. № 02 от 30.09.2017 г. на сумму: 1 922 800,00 рублей, в том числе НДС 18%;

- Акта сдачи-приемки работ, выполненных за ноябрь 2017 г. № 03 от 30.11.2017 г. на сумму: 1 766 400,00 рублей, в том числе НДС 18%;

- Акта сдачи-приемки работ, выполненных за декабрь 2017 г. № 04 от 27.12.2017 г. на сумму: 1 840 000,00 рублей, в том числе НДС 18%;

а всего на общую сумму: 10 743 760,00 (Десять миллионов семьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18%. 

 «27» декабря 2017 года Сторонами было подписано Соглашение о зачете взаимных требований от 27.12.2017 г., согласно которому, после проведения зачета встречных требований, задолженность ООО «Русская Буровая Компания» перед АО ГДК «Берелех» составляет: 3 075 616,95 (Три миллиона семьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 95 коп., без учета выданного аванса. 

В период после проведения Сторонам зачета от 27.12.2017 г., Подрядчиком от Заказчика было дополнительно получено ГСМ, электрической энергии и услуг по питанию работникам на общую сумму: 194 265,76 (Сто девяносто четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 76 коп.

Таким образом, задолженность ООО «РБК» перед АО ГДК «Берелех» составила: 3 075 616,95 руб. + 194 265,76 руб. = 3 269 882,71 (Три миллиона двести шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 71 коп.

Остаток не зачтенного Подрядчиком аванса, перечисленного Заказчиком Платежным поручением № 406 от 06.03.2017 г., составил: 4 239 820,39 (Четыре миллиона двести тридцать девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 39 коп.

Согласно п. 4.3.3. Договора, стоимость затрат Подрядчика на мобилизацию и демобилизацию оборудования, материалов и персонала к месту выполнения работ и обратно не включена в Общую цену работ и оплачивается Заказчиком отдельно в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком платежных документов, а также документов, подтверждающих фактические расходы Подрядчика. 

Руководствуясь п. 4.3.3. договора, Ответчиком в адрес Истца была направлена Справка-расчет фактических затрат ООО «РБК» на мобилизационные работы по доставке бурового оборудования и техники на участок буровых работ «Берелех» в Магаданской области в марте-апреле 2017 года на общую сумму: 4 106 158,04 (Четыре миллиона сто шесть тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 04 коп., в том числе НДС 18%.

В ответ на отправленный Справку-расчет на мобилизационные работы ответчиком от истца были получены возражения по расчету на мобилизацию исх. № 61/11-706 от 22.08.2018 г., в соответствии с которым АО «ГДК «Берелех» не согласилось с п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 3, 4, 7, 8 представленного Расчета и предложило дать пояснения по заданным вопросам, а также представить на согласование порядок, способ осуществления и оплаты затрат на мобилизацию и демобилизацию механизмов, инвентарных сооружений и инструментов, стоимости данных расходов, порядка предъявления к оплате данных расходов.

В ответ на Возражения по расчету на мобилизацию исх. № 61/11-706 от 22.08.2018 г. ответчиком в адрес истца было направлено письмо исх. № 410 от 13.09.2018 г. с пояснениями относительно расчета мобилизации, по каждому из спорных пунктов, указанных АО «ГДК «Берелех» в Возражениях.

К письму исх. № 410 от 13.09.2018 г. ООО «РБК» были также приложены все подтверждающие документы относительно произведенных затрат на мобилизацию (приказ о создании участка Берелех, платежные поручения, иные документы).

По факту проведения работ по демобилизации техники с участка «Берелех», Ответчиком в адрес Истца была направлена Справка-расчет фактических затрат ООО «РБК» на демобилизационные работы по доставке бурового оборудования и техники с участка буровых работ «Берелех» на УБР «Павлик» в Магаданской области в декабре 2017 г., январе-феврале 2018 года, на общую сумму: 3 306 762,42 (Три миллиона триста шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 42 коп., в том числе НДС 18%.

Ответа на полученную Справку-расчет фактических затрат на демобилизационные работы ООО «РБК» от АО «ГДК «Берелех» не получило.

Поскольку вопрос по оплате мобилизации и демобилизации не был решен Сторонами в 2018 году, и в связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 г. на 20%, ООО «РБК» направило в адрес АО «ГДК «Берелех» уточненные (корректировочные) расчеты по мобилизации и демобилизации.

Сумма по корректировочной Справке-расчету фактических затрат ООО «РБК» на мобилизационные работы составила: 4 175 753,94 (Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 94 коп., в том числе НДС 20%.

Расчет затрат на мобилизацию подтверждается следующими документами и доказательствами:

Сумма в размере: 619 665,30 рублей, согласно пункта 1. Справки-расчета (Трудозатраты работников буровой бригады и вспомогательной службы на время мобилизационных работ) складывается из суммы подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, и подтверждается Справкой о заработной плате работников буровой бригады и вспомогательной службы при подготовке к мобилизации и в период мобилизации оборудования на участке буровых работ «Берелех» за март-апрель 2017 г. от 23.06.2017 г. (Приложение № 2 к Справке-расчету на мобилизацию). 

Сумма в размере: 193 335,57 рублей (31,20% от суммы 619 665,30 рублей), согласно пункта 2. Справки-расчета (ЕСН) подтверждается действующими размерами страховых взносов:

- 22% — тариф взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 2.1. ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»);

- 5,1% — тариф на обязательное медицинское страхование (п.п. 1 ч. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ);

- 2,9% — взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (п.п. 1 ч. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ);

 - 1,20% - указанный взнос подтверждается Уведомлением о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно которому для ООО «РБК», в соответствии с заявленным основным видом деятельности по ОКВЭД 43.13 Разведочное бурение определен 11 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 1,20 процентов к сумме выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Итого страховые взносы: 22% + 5,1% + 2,9% + 1,2% = 31,20%. 

Сумма в размере: 295 325,66 рублей, согласно п. 3. Справки-расчета (Материалы)  складывается из суммы подпунктов 3.1, 3.2, 3.3, и подтверждается Справкой расхода ГСМ при доставке бурового оборудования, автотранспортной техники, механизмов, грузов и материалов ООО «РБК» на участок «Берелех» в Магаданской области в марте-апреле 2017 г., (Приложение № 1 к Справке-расчету на мобилизацию). 

Данные, содержащиеся в представленной Справке расходов ГСМ подтверждаются следующими документами. 

По расходам в марте 2017 г.:

- Накладная № 550 от 01.04.2017 г.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м Урал, гос.номер Т293НО750, водитель ФИО3, ФИО4); Путевой лист № 923/04 от 30.03.2017 г.; Раздаточная ведомость № 923/04; Требование-накладная № 489 от 01.05.2017 г.; товарные чеки АЗС.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м ИВЕКО, гос.номер Р292ХТ197, водитель ФИО5); Требование-накладная № 489 от 01.05.2017 г.; товарные чеки АЗС.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м УАЗ, гос.номер А376ОВ750, водитель ФИО6); Путевой лист от 29.03.2017 г.; Путевой лист от 30.03.2017 г.; Требование-накладная № 489 от 01.05.2017 г.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за март 2017 г. (а/м УАЗ, гос.номер А376ОВ750, водитель ФИО7); Накладная на внутреннее перемещение № 600 от 01.04.2017 г.; товарные чеки АЗС.

По расходам в апреле 2017 г.:

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м УРАЛ, гос.номер А589АУ138, водитель ФИО8, ФИО9);

- Раздаточная ведомость № 376/04;

- Сводный отчет о работе тракторной техники за апрель 2017 г. (бульдозер Шантуй, гос.номер 8250НМ77, водитель ФИО10); Путевой лист № 32/04 от 30.04.2017 г.; Маршрутный лист № 32/04 от 30.04.2017 г.; Раздаточная ведомость № 32/04; Требование-накладная № 489 от 01.05.2017 г.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м УАЗ, гос.номер А376ОВ750, водитель ФИО6); Путевой лист от 31.03.2017 г., Путевой лист от 01.04.2017 г., Путевой лист от 02.04.2017 г., Путевой лист от 03.04.2017 г., Путевой лист от 04.04.2017 г., Путевой лист от 05.04.2017 г., Путевой лист от 06.04.2017 г., Путевой лист от 07.04.2017 г., Путевой лист от 08.04.2017 г., Путевой лист от 27.04.2017 г., Требование-накладная № 489 от 01.05.2017 г.

- Раздаточная ведомость № 292/04;

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м ИВЕКО, гос.номер Р292ХТ197, водитель ФИО5); товарные чеки АЗС.

- Накладная на внутреннее перемещение № 534 от 11.04.2017 г.; Раздаточная ведомость за апрель 2017 г.;

- Накладная на внутреннее перемещение № 615 от 30.04.2017 г.;

- Раздаточная ведомость № 589/04;

- Требование-накладная № 489 от 01.05.2017 г.

- Товарная накладная № 1838 от 31.03.2017 г.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за март 2017 г. (а/м Урал, гос.номер М393АВ138, водитель ФИО11); Путевой лист от 12.04.2017 г.; Требование-накладная № 489 от 01.05.2017 г.

- Накладная на внутреннее перемещение № 461 от 31.03.2017 г.; Раздаточная ведомость.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м Урал, гос.номер Р629МА03, водитель ФИО12).

- Сводный отчет о работе автотранспорта за апрель 2017 г. (а/м ГАЗ, гос.номер К304АК138, водитель ФИО13); Путевой лист № 304/04 от 21.04.2017 г.; Путевой лист № 304/04 от 22.04.2017 г.; - Накладная на внутреннее перемещение № 611 от 30.04.2017 г.; Раздаточная ведомость.

- Товарная накладная № 2632 от 30.04.2017 г.

Сумма в размере: 126 100,00 рублей, согласно п. 4. Справки-расчета (Полевое довольствие) подтверждается Справкой о заработной плате работников буровой бригады и вспомогательной службы при подготовке к мобилизации и в период мобилизации оборудования на участке буровых работ «Берелех» за март-апрель 2017 г. от 23.06.2017 г. (Приложение № 2 к Справке-расчету на мобилизацию).

Сумма в размере: 129 614,79 рублей, согласно п. 6 Справки-расчета (Накладные расходы) подтверждается следующими документами: 

- Приказом ООО «РБК» № 184/1 от 29.12.2016 г. «Об утверждении норм накладных расходов, плановых накоплений, дополнительной зарплаты работников на 2017 год»;

- Приказом ООО «РБК» № 174 от 29.12.2017 г. «Об утверждении норм накладных расходов, плановых накоплений на 2018 год».

Сумма в размере: 363 147,34 рублей, согласно п. 7 Справки-расчета (Аренда оборудования на мобилизационный период) складывается из суммы подпунктов 7.1, 7.2.

Сумма расходов в размере: 57 115,82 рублей, согласно п.п. 7.1. Справки-расчета (Аренда оборудования на мобилизационный период в марте 2017 г.) подтверждается следующими документами: 

- Договор аренды имущества № 91/11-13/АР от 20.11.2013 г. с Дополнительным соглашением № 4 от 24.12.2014 г. и Дополнительным соглашением № 20 от 24.11.2016 г.;

- Договор аренды имущества № 01АР-РБК/16 от 01.02.2016 г. с Дополнительным соглашением от 01.12.2017 г.;

- Акт оказанных услуг по аренде № 6 от 31.03.2017 г. (строки акта п/п №№ 8, 24, 49), Исполнитель ООО «НЕФТЕБУРТРАНС»; Платежное поручение № 4483 от 05.09.2017 г. на сумму 1 800 000,00 рублей.

- Акт оказанных услуг по аренде № 10 от 31.03.2017 г. (строка акта п/п № 44), Исполнитель ООО «ЭКСПОГЕОЗЕМСЕРВИС»; Платежное поручение № 2864 от 18.06.2018 г. на сумму 1 100 000,00 рублей.

- Акт оказанных услуг по аренде № 8 от 31.03.2017 г. (строка акта п/п № 29), Исполнитель ООО «БУРНЕДРКОМ»; Платежное поручение № 303 от 20.01.2020 г. на сумму 6 500 000,00 рублей.

Сумма расходов в размере: 306 031,53 рублей, согласно п.п. 7.2. Справки-расчета (Аренда оборудования на мобилизационный период в апреле 2017 г.) подтверждается следующими документами: 

- Акт оказанных услуг по аренде № 11 от 30.04.2017 г. (строки акта п/п №№ 15, 29), Исполнитель ООО «БУРНЕДРКОМ»; Платежное поручение № 303 от 20.01.2020 г. на сумму 6 500 000,00 рублей.

- Акт оказанных услуг по аренде № 8 от 30.04.2017 г. (строки акта п/п №№ 8, 24, 40, 49, 36), Исполнитель ООО «НЕФТЕБУРТРАНС»; Платежное поручение № 5345 от 16.10.2017 г. на сумму 3 150 000,00 рублей.

- Акт оказанных услуг по аренде № 13 от 30.04.2017 г. (строки акта п/п №№ 44, 52), Исполнитель ООО «ЭКСПОГЕОЗЕМСЕРВИС»; Платежное поручение № 3767 от 24.07.2018 г. на сумму 1 000 000,00 рублей.

Сумма в размере: 1 498 330,50 рублей, согласно п. 8. Справки-расчета (Услуги сторонних организаций по доставке бурового инструмента, грузов и механизмов на мобилизационный период) складывается из суммы подпунктов 8.1, 8.2.

Сумма расходов в размере: 346 144,06 рублей, указанная в п.п. 8.1. Справки-расчета (Услуги сторонних организаций по доставке бурового инструмента, грузов и механизмов в марте 2017 г.), подтверждается следующими документами:

- Платежным поручением № 1474 от 29.03.2017 г. на сумму 195 000,00 рублей, в том числе НДС 18%, в отношении ООО «Транс-Логистик»;

- Платежным поручением № 1539 от 03.04.2017 г. на сумму 195 000,00 рублей, в том числе НДС 18%, в отношении ООО «Транс-Логистик»;

- Актом оказанных услуг № 83 от 31.03.2017 г. (строка акта п/п № 5, Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ».

Сумма расходов в размере: 1 152 186,44 рублей, указанная в п.п. 8.2. Справки-расчета (Услуги сторонних организаций по доставке бурового инструмента, грузов и механизмов в апреле 2017 г.), подтверждается следующими документами:

- Актом оказанных услуг № 90 от 04.04.2017 г. (строка акта п/п № 3), Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ» и Платежным поручением № 1619 от 05.04.2017 г.

- Актом оказанных услуг № 93 от 10.04.2017 г. (строка акта п/п № 5), Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ» и Платежным поручением № 1780 от 12.04.2017 г.

- Актом оказанных услуг № 94 от 11.04.2017 г. (строка акта п/п № 3), Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ» и Платежным поручением № 1732 от 11.04.2017 г.

- Актом оказанных услуг № 100 от 12.04.2017 г. (строки акта п/п № 2 и № 3), Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ» и Платежным поручением № 1796 от 13.04.2017 г.

- Актом оказанных услуг № 105 от 17.04.2017 г. (строка акта п/п № 3), Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ» и Платежным поручением № 1919 от 18.04.2017 г.

- Актом оказанных услуг № 126 от 28.04.2017 г. (строка акта п/п № 6), Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ» и Платежным поручением № 2197 от 02.05.2017 г.

- Актом оказанных услуг № 129 от 30.04.2017 г., Исполнитель ООО «ЭНФЛАЙ» (строка акта п/п № 1) и Платежным поручением № 2219 от 03.05.2017 г.

Сумма расходов в размере: 254 275,78 рублей, согласно п. 9. Справки-расчета (Приобретение билетов для сотрудников не мобилизационный период) подтверждается Справкой фактических расходов по доставке работников ООО «РБК» на период мобилизации бурового оборудования и техники на участок «Берелех» в марте-апреле 2017 г.г.» (Приложение № 3 к Справке-расчету на мобилизацию).

Данные, содержащиеся в представленной Справке фактических расходов по доставке работников, подтверждаются следующими документами: 

- Авансовые отчеты работников о сдаче в бухгалтерию ООО «РБК» проездных документов под отчет;

- Платежными поручениями ООО «РБК» в отношении АО «В.И.П. Сервис» в счет оплаты по договору № ПРТБ-2013/2615 от 28.10.2013 г за авибилеты: № 986 от 02.03.2017 г. на сумму: 1 000 000,00 рублей; № 1750 от 11.04.2017 г. на сумму: 2 000 000,00 рублей; № 1390 от 24.03.2017 г. на сумму: 1 000 000,00 рублей.

В Справке фактических расходов по доставке работников ООО «РБК» на период мобилизации бурового оборудования и техники на участок «Берелех» в марте-апреле 2017 г.г. указана сумма большая, чем в Справке-расчете, а именно: 283 045,08 рублей, поскольку на практике авансовые отчеты работниками сдаются позже авансовых периодов, в связи чем, Подрядчик предъявлял Заказчику расходы по фактически имеющимся в наличии документам, полученных от работников. 

Сумма по корректировочной Справке-расчету фактических затрат ООО «РБК» на демобилизационные работы составила: 3 201 446,18 (Три миллиона двести одна тысяча четыреста сорок шесть) рублей 18 коп., в том числе НДС 20%.

Расчет затрат на демобилизацию подтверждается следующими документами и доказательствами:

Сумма в размере: 669 896,95 рублей, согласно пункта 1 Справки-расчета (Трудозатраты работников буровой бригады и вспомогательной службы на время демобилизационных работ) складывается из суммы подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, и подтверждается Справкой о заработной плате работников буровой бригады и вспомогательной службы при подготовке к демобилизации и в период демобилизации бурового оборудования и техники на участке буровых работ «Берелех» за январь-февраль 2018 г. от 10.09.2018 г. (Приложение № 2 к Справке-расчету на демобилизацию).  

Сумма в размере: 209 007,85 рублей (31,20% от суммы 669 896,95 рублей), согласно пункта 2. Справки-расчета (ЕСН) подтверждается действующими размерами страховых взносов:

- 22% — тариф взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 2.1. ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»);

- 5,1% — тариф на обязательное медицинское страхование (п.п. 1 ч. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ);

- 2,9% — взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (п.п. 1 ч. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ);

 - 1,20% - указанный взнос подтверждается Уведомлением о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно которому для ООО «РБК», в соответствии с заявленным основным видом деятельности по ОКВЭД 43.13 Разведочное бурение определен 11 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 1,20 процентов к сумме выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Итого страховые взносы: 22% + 5,1% + 2,9% + 1,2% = 31,20%. 

Сумма в размере: 535 532,39 рублей, согласно п. 3 (Материалы ГСМ) Справки-расчета, складывается из суммы подпунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, и подтверждается Справкой расхода ГСМ при доставке бурового оборудования, автотранспортной техники, механизмов, грузов и материалов ООО «РБК» с участка «Берелех» в Магаданской области в декабре 2017 г., январе-феврале 2018 г. (Приложение № 1 к Справке-расчету на демобилизацию).

Данные, содержащиеся в представленной Справке расходов ГСМ подтверждаются следующими документами. 

По расходам в декабре 2017 г.: 

- Сводный отчет о работе автотранспорта за декабрь 2017 г. (а/м Урал 4320, гос.номер М026ОА777, водитель ФИО14); Путевой лист № 26 от 31.12.2017 г.; Маршрутный лист № 12/026 от 31.12.2017 г.

По расходам в январе 2018 г.:

- Сводный отчет о работе автотранспорта за январь 2018 г. (а/м МАН, гос.номер О871АН750, водитель ФИО15); Путевой лист № 5 от 15.01.2018 г.; Маршрутный лист № 5 от 12.01.2018 г., Путевой лист № 2 от 11.01.2018 г.; Путевой лист № 2 от 03.01.2018 г.; Маршрутный лист № 2 от 02.01.2018 г.; Путевой лист № 1 от 01.01.2018 г.; Маршрутный лист № 1 от 29.12.2017 г.; Акт об использовании бензина от 31.01.2018 г.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за январь 2018 г. (а/м МАН, гос.номер О016ХЕ197, водитель ФИО16); Путевой лист № 4 от 26.01.2018 г.; Маршрутный лист № 4 от 26.01.2018 г., Чеки № 162, 164.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за январь 2018 г. (а/м УАЗ, гос.номер А376ОВ750, водитель ФИО6); Путевой лист № 01 376 от 01.01.2018 г.; Путевой лист № 02 376 от 02.01.2018 г.; Путевой лист № 03 376 от 03.01.2018 г.; Путевой лист № 5 376 от 05.01.2018 г.; Путевой лист № 6 376 от 06.01.2018 г.; Путевой лист № 7 376 от 07.01.2018 г.; Путевой лист № 8 376 от 08.01.2018 г.; Путевой лист № 9 376 от 09.01.2018 г.; Путевой лист № 10 376 от 10.01.2018 г.; Путевой лист № 11 376 от 11.01.2018 г.; Путевой лист № 12 376 от 12.01.2018 г.; Путевой лист № 13 376 от 13.01.2018 г.; Путевой лист № 14 376 от 14.01.2018 г.; Путевой лист № 15 376 от 15.01.2018 г.; Путевой лист № 17 376 от 17.01.2018 г.; Путевой лист № 21 376 от 21.01.2018 г.; Путевой лист № 23 376 от 23.01.2018 г.; Путевой лист № 26 376 от 26.01.2018 г.; Путевой лист № 27 376 от 27.01.2018 г.; Путевой лист № 29 376 от 29.01.2018 г.; Путевой лист № 31 376 от 31.01.2018 г.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за январь 2018 г. (а/м Урал, гос.номер А589АУ138, водитель ФИО9); Путевой лист № 589 от 31.01.2018 г.; Маршрутный лист № 1/589 от 31.01.2018 г.

- Сводный отчет о работе автотранспорта за январь 2018 г. (а/м ИВЕКО, гос.номер Р292ХТ197, водитель ФИО17); Требование-накладная № 116 от 01.02.2018 г.;   Маршрутный лист № 7 от 26.02.2018 г.; Требование-накладная № 115 от 01.02.2018 г.; Путевой лист № 7 от 26.01.2018 г.; Сводный отчет о работе автотранспорта за январь 2018 г. (а/м ИВЕКО, гос.номер Р292ХТ197, водитель ФИО17); Требование-накладная № 70 от 31.01.2018 г.; Путевой лист № 6 от 03.01.2018 г.; Маршрутный лист № 6 от 03.01.2018 г.; Акт об использовании бензина от 31.01.2018 г.

- Сводный отчет о работе тракторной техники за январь 2018 г. (Бульдозер Шантуй, гос.номер 8250НМ77, водитель ФИО18); Путевой лист № 8289 от 10.01.2018 г.; Маршрутный лист № 1 от 10.01.2018 г.

По расходам в феврале 2018 г.:

- Сводный отчет о работе автотранспорта за февраль 2018 г. (а/м МАН, гос.номер О016ХЕ197, водитель ФИО16); Требование-накладная № 133 от 28.02.2018 г.; Путевой лист № 5 от 01.02.2018 г.; Маршрутный лист № 5 от 01.02.2018 г.

- Требование-накладная № 163 от 28.02.2018 г.; Сводный отчет о работе автотранспорта за февраль 2018 г. (а/м УАЗ, гос.номер А376ОВ750, водитель ФИО6); Путевой лист № 01 376 от 01.02.2018 г.; Путевой лист № 4 376 от 04.02.2018 г.; Путевой лист № 5 376 от 05.02.2018 г.; Путевой лист № 6 376 от 06.02.2018 г.

 

Сумма в размере: 187 200,00 рублей, согласно п. 4. Справки-расчета (Полевое довольствие) подтверждается Справкой о заработной плате работников буровой бригады и вспомогательной службы при подготовке к демобилизации и в период демобилизации бурового оборудования и техники на участке буровых работ «Берелех» за январь-февраль 2018 г. от 10.09.2018 г. (Приложение № 2 к Справке-расчету на демобилизацию).

Сумма в размере: 168 171,90 рублей, согласно п. 5 Справки-расчета (Накладные расходы) подтверждается следующими документами: 

- Приказом ООО «РБК» № 184/1 от 29.12.2016 г. «Об утверждении норм накладных расходов, плановых накоплений, дополнительной зарплаты работников на 2017 год»;

- Приказом ООО «РБК» № 174 от 29.12.2017 г. «Об утверждении норм накладных расходов, плановых накоплений на 2018 год».

Сумма в размере: 647 084,75 рублей, согласно п. 6 Справки-расчета (Аренда оборудования на демобилизационный период) складывается из суммы подпунктов 6.1, 6.2, 6.3).

Сумма расходов в размере: 34 042,37 рублей, согласно п.п. 6.1. Справки-расчета (Аренда оборудования на демобилизационный период в декабре 2017 г.) подтверждается следующими документами: 

- Договор аренды имущества № 91/11-13/АР от 20.11.2013 г. с Дополнительным соглашением № 4 от 24.12.2014 г. и Дополнительным соглашением № 20 от 24.11.2016 г.;

- Договор аренды имущества № 01АР-РБК/16 от 01.02.2016 г. с Дополнительным соглашением от 01.12.2017 г.;

- Акт оказанных услуг по аренде № 2 от 31.01.2018 г. (строки акта п/п №№ 5 и 19), Исполнитель ООО «НЕФТЕБУРТРАНС»; Платежное поручение № 2075 от 26.03.2020 г. на сумму 3 100 000,00 рублей.

- Акт оказанных услуг по аренде № 3 от 31.01.2018 г. (строка акта п/п № 22), Исполнитель ООО «ЭКСПОГЕОЗЕМСЕРВИС»; Платежное поручение № 5805 от 23.08.2018 г. на сумму 2 500 000,00 рублей.

Сумма расходов в размере: 522 457,63 рублей, согласно п.п. 6.2. Справки-расчета (Аренда оборудования на демобилизационный период в январе 2018 г.) подтверждается следующими документами: 

- Акт оказанных услуг по аренде № 2 от 31.01.2018 г. (строки акта п/п №№ 5, 7, 19, 36), Исполнитель ООО «НЕФТЕБУРТРАНС»; Платежное поручение № 2075 от 26.03.2020 г. на сумму 3 100 000,00 рублей.

- Акт оказанных услуг по аренде № 3 от 31.01.2018 г. (строки акта п/п №№ 3, 22), Исполнитель ООО «ЭКСПОГЕОЗЕМСЕРВИС»; Платежное поручение № 5805 от 23.08.2018 г. на сумму 2 500 000,00 рублей.

Сумма расходов в размере: 90 584,75 рублей, согласно п.п. 6.3. Справки-расчета (Аренда оборудования на демобилизационный период в феврале 2018 г.) подтверждается следующими документами: 

- Акт оказанных услуг по аренде № 5 от 28.02.2018 г. (строки акта п/п №№ 5, 19), Исполнитель ООО «НЕФТЕБУРТРАНС»; Платежное поручение № 3381 от 26.05.2020 г. на сумму 2 000 000,00 рублей.

- Акт оказанных услуг по аренде № 5 от 28.02.2018 г. (строки акта п/п №№ 3, 22), Исполнитель ООО «ЭКСПОГЕОЗЕМСЕРВИС».

Сумма расходов в размере: 250 977,98 рублей, согласно п. 7. Справки-расчета (Приобретение билетов для сотрудников не демобилизационный период) подтверждается Справкой фактических расходов по доставке работников ООО «РБК» на период демобилизации бурового оборудования и техники с участка «Берелех» в 2017-2018 г.г.» (Приложение № 3 к Справке-расчету на демобилизацию).

Данные, содержащиеся в представленной Справке фактических расходов по доставке работников подтверждаются следующими документами: 

- Авансовые отчеты работников о сдаче в бухгалтерию ООО «РБК» проездных документов под отчет;

- Железнодорожные билеты и электронные авиа-билеты (маршрут-квитанции);

- Платежными поручениями ООО «РБК» в отношении АО «В.И.П. Сервис» в счет оплаты по договору № ПРТБ-2013/2615 от 28.10.2013 г за авибилеты: № 5941 от 15.11.2017 г. на сумму: 1 000 000,00 рублей; № 6037 от 17.11.2017 г. на сумму: 1 000 000,00 рублей; № 267 от 19.01.2018 г. на сумму: 1 000 000,00 рублей; № 652 от 13.02.2018 г. на сумму: 1 000 000,00 рублей.

В Справке фактических расходов по доставке работников ООО «РБК» на период демобилизации бурового оборудования и техники с участка «Берелех» в 2017-2018 г.г. указана сумма большая, чем в Справке-расчете, а именно: 331 897,75 рублей, поскольку на практике авансовые отчеты работниками сдаются позже авансовых периодов, в связи чем, Подрядчик предъявлял Заказчику расходы по фактически имеющимся в наличии документам, полученных от работников.

Таким образом, общая стоимость работ по мобилизации и демобилизации оборудования, материалов и персонала к месту выполнения работ и обратно, выполненных Подрядчиком, и подлежащих оплате Заказчиком (согласно п.п. 4.3.3. Договора), составила: 4 175 753,94 рублей + 3 201 446,18 рублей = 7 377 200,12 (Семь миллионов триста семьдесят семь тысяч двести) рублей 12 коп.

«13» марта 2020 г. Ответчиком в адрес Истца также были направлены на подписание:

- Акт выполненных работ по расходам на мобилизационные работы № 26 от 01.03.2019 г. на сумму: 4 175 753,94 (Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 94 коп., в том числе НДС 20% (Оригинал в 2-х экземплярах);

- Акт выполненных работ по расходам на демобилизационные работы № 27 от 01.03.2019 г. на сумму: 3 201 446,18 (Три миллиона двести одна тысяча четыреста сорок шесть) рублей 18 коп., в том числе НДС 20% (Оригинал в 2-х экземплярах);

а также счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ по мобилизации и демобилизации.

Согласно информации, полученной на официальном сайте ФГУП «Почта России», вышеуказанные акты были получены АО «ГДК «Берелех» «02» апреля 2019 г.

Однако подписанные со стороны Заказчика экземпляры актов, или письменные мотивированные отказы от подписания Актов не получены Подрядчиком до настоящего времени. 

Согласно п.п. 3.1.2 Договора, ежемесячно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения календарного месяца Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за отчетный месяц с приложением счета на оплату и счета-фактуры, оформленной в соответствии с  требованиями статьи 169 НК РФ.

Согласно п.п. 3.1.3 Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязуется подписать его или, при наличии замечаний, направить мотивированный отказ от приемки работ.

Согласно п.п. 3.2 Договора, В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в срок, установленный в п. 3.1.3. настоящего Договора, и не направления Заказчиком в этот же срок письменного мотивированного отказа от приемки работ, Работы, передаваемые по такому акту, считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в полном объеме.

Таким образом, по смыслу п.п. 3.2 Договора, работы, переданные Подрядчиком Заказчику по Акту выполненных работ по расходам на мобилизационные работы № 26 от 01.03.2019 г. и по Акту выполненных работ по расходам на демобилизационные работы № 27 от 01.03.2019 г., в отсутствие письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в полном объеме.

Согласно п. 1 ст. 720 ГК РФ, Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно ст. 410 ГК РФ, Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Руководствуясь п.п. 3.2 Договора и ст. 410 ГК РФ, ООО «РБК» произвело зачет встречных однородных обязательств, путем зачета суммы неиспользованного аванса, перечисленного Заказчиком Платежным поручением № 406 от 06.03.2017 г., в размере: 4 239 820,39 рублей и задолженности ООО «РБК» перед АО ГДК «Берелех», оставшейся после заключения Соглашения о зачете от 27.12.2017 г. в размере: 3 269 882,71 рубля, в счет подлежащих оплате Заказчиком работ по мобилизации и демобилизации в общем размере: 7 377 200,12 рублей.

После проведения зачета встречных однородных обязательств, сумма задолженности ООО «РБК» перед АО «ГДК «Берелех» составила: 132 502,98 (Сто тридцать две тысячи пятьсот два) рубля 98 коп.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что требования Акционерного общества "Горно-добывающая компания "БЕРЕЛЕХ"  о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежат удовлетворению частично в размере 132 502 руб. 98 коп.

В  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями  110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

 

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества "Горно-добывающая компания "БЕРЕЛЕХ"  удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РУССКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Горно-добывающая компания "БЕРЕЛЕХ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере 132 502 руб. 98 коп., расходы по оплате  государственной пошлины в размере 1 068 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                Д.П.Кузнецов