Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13657/2019

11 ноября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Бутовой Р.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев 24.10.2019 в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» (197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, лит. А, эт. 4, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» (199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 5, лит. А, пом. 23-н, кааб. 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об обязании передать оформленную надлежащим образом исполнительную документацию и о взыскании неустойки, 

третье лицо: временный управляющий ФИО2

при участии:

от истца: ФИО3 (доверенность от 26.09.2018, паспорт)

от ответчика: не явился, извещен

от третьего лица: не явился, извещен 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» (далее – Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с иском (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации; далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» (далее – Компания, ответчик) о взыскании 19 377 руб. 94 коп. неустойки за нарушение сроков предоставления исполнительной документации по договору генерального подряда от 22.12.2017 № 259-5296-ДПД-17 (далее – Договор) и об обязании в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать оформленную надлежащим образом исполнительную документацию по объекту «Обустройство дополнительных помещений медицинского пункта, расположенного по адресу: 

<

...>, лит. Д, БЦ «Юпитер», по Договору согласно следующему перечню:

№ п/п

Шифр РД

 Наименование и номер комплекта исполнительной документации по видам работ / конструктивным элементам / инженерным системам  

Номер папки

Содержание папки

Наличие замечаний к исполнительной документации, отраженных в письмах ООО "Газпром социнвест" по результатам проверки переданной ООО «Капитал стройиндустрия» исполнительной документации 

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на бумажном носителе (с учетом устранения замечаний)

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на электронном носителе (с учетом устранения замечаний)

1

Разрешительная документация

-

1/3

Разрешительная документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

2

Разрешительная документация

 -

1/4

Разрешительная документация

 

2

-

3

Разрешительная документация

-

1/5

Разрешительная документация

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

-

4

Разрешительная документация

 - 

1/6

Разрешительная документация

 

2

-

5

Журнал входного контроля и учета материалов

 - 

2/2-2.1

Журнал входного контроля и учета материалов

исх. № 3576 от 22.05.2018

4

-

6

Журнал производства сварочных работ

 -

2/2-4

Журнал производства сварочных работ

исх. № 3600 от 23.05.2018

1

-

7

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

 -

2/2-5

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

исх. № 3576 от 22.05.2018

1

-

8

Общий журнал работ

-

2/3-1

Общий журнал работ

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

9

Журнал входного контроля и учета материалов

 - 

2/3-2

Журнал входного контроля и учета материалов

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

10

Общий журнал работ

-

2/4-1

Общий журнал работ

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

-

11

Общий журнал работ

-

2/5-1.1

Общий журнал работ

исх. № 4555 от 25.06.2018

4

-

12

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

Архитектурные решения

3/1-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

13

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/1-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

-

14

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/1-2.2

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

15

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

Архитектурные решения

3/2-1.1

Рабочая документация

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

1

16

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/2-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

17

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/3-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

1

18

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-КМ

Конструктивные решения

3/4-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

19

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-КМ

3/4-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

-

20

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВС

Водоснабжение 

3/5-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

21

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВС

3/5-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

-

22

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВО

Водоотведение

3/6-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

23

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВО

3/6-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

1

24

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-СПС

Пожарный водопровод

3/7-1.1

Рабочая документация

 

-

1

25

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ДИС

Диспетчеризация инженерных систем

3/8-1.1

Рабочая документация

 

-

1

26

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АИС

Автоматизация инженерных систем

3/9-1.1

Рабочая документация

 

-

1

27

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭО

Электроосвещение

3/10-1.1

Рабочая документация

 

-

1

28

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭО

3/10-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 4555 от 25.06.2018

4

-

29

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭМ

Силовое электрооборудование

3/11-1.1

Рабочая документация

исх. № 3576 от 22.05.2018

4

1

30

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭМ

3/11-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 3576 от 22.05.2018

4

-

31

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ1

Отопление

3/12-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

-

1

32

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ1

3/12-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

1

-

33

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ2

Вентиляция. Дымоудаление

3/13-1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

3

1

34

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ2

3/13-2.1

Акты, документы,

удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

-

35

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ3

Кондиционирование

3/14-.1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

3

1

36

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ3

3/14-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

-

37

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-СОУЭ

Система оповещения и управления эвакуацией

3/15-1.1

Рабочая документация

 

-

1

38

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУПС

Автоматическая установка пожарной сигнализации

3/16-1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

1

39

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУПС

3/16-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

40

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АППЗ

Автоматизация противопожарной защиты

3/17-1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

1

41

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОТС

Охранно- тревожная сигнализация

3/18-1.1

Рабочая документация

 

-

1

42

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ПВ

Противопожарный водопровод

3/19-1.1

Рабочая документация

 

-

1

43

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ПВ

Противопожарный водопровод

3/19-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

44

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУВПТ

Автоматическая установка водяного пожаротушения

3/20-1.1

Рабочая документация

 

-

1

45

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУВПТ

Автоматическая установка водяного пожаротушения

3/20-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

Занесенным в протокол судебного заседания определением, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В связи с введением в отношении ответчика определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.07.2019 (оглашена 18.07.2019) по делу № А56-58832/2019 процедуры банкротства – наблюдение, определением от 27.09.2019 по настоящему делу к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ФИО2.

В судебном заседании 24.10.2019 представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме (с учетом принятых судом уточнений), сославшись на доводы, изложенные в исковом заявлении, дополнительно пояснил, что перечень документов в уточненном иске сформулирован по итогам совместной сверки с ответчиком и фактически признаются последним. 

Представитель ответчика не явился, извещен надлежащим образом о месте и времени судебного заедания, направил письменное ходатайство о рассмотрении спора в его отсутствие. Компания не признала исковые требования по мотивам, изложенным в отзыве на иск, ссылаясь на то, что по актам приема-передачи исполнительной документации №№1-33 за период с 30.10.2017 по 13.07.2018 передал исполнительную документацию Обществу в полном объеме и комплектации, в порядке, предусмотренном пунктом 14.7 Договора; настаивал на отсутствии оснований для взыскания неустойки по подпункту «и» пункта 17.2 Договора, поскольку исполнительная документация не относится к категории отчетов, графиков и планов. 

Представитель третьего лица не явился, извещен надлежащим образом о месте и времени судебного заедания (РПО 19085437753161 получено 08.10.2019).

Арбитражный суд, заслушав представителя истца, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее. 

Общество (заказчик) и Компания (генподрядчик) заключили Договор, по условиям которого генподрядчик обязуется выполнить на объекте строительные и отделочные работы по инженерно-техническому оснащению, пусконаладочные работы (включая индивидуальные испытания и комплексное опробование), предусмотренные рабочей документацией, выданной в производство работ, в объеме и в сроки, определенные в договоре, а также иные работы и услуги, необходимые для строительства объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в предусмотренном договором порядке. 

В силу пункта 3.1 Договора срок начала и окончания выполнения работ по Договору, включая промежуточные сроки, определяются графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), согласованным обеими сторонами с учетом выделенного лимита капитальных вложений на строительство инвестором.  

При этом согласно графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) исполнительная документация должна быть переедена не позднее 15.11.2017. 

Согласно пункту 4.1 Договора стоимость работ составила 64 539 129,20 руб.

В силу пункта 6.1.11 Договора генподрядчик обязан оформлять своевременно и надлежащим образом исполнительную документацию (в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в формате pdf) в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов, иных обязательных требований и условий договора.  

Генподрядчик обязан к моменту приемки выполненных в полном объеме работ передать заказчику по акту приема-передачи, полный комплект исполнительной документации (оригинал в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе) и иных документов, относящихся к деятельности генподрядчика, необходимой для поставки объекта на баланс инвестору, в том числе оригиналы: исполнительных чертежей, актов скрытых и иных работ, технических паспортов на все технологическое оборудование, изделий, материалов и конструкций, изготовляемых по отдельным заказам, а также 2 экз. копий, заверенных генпорядрядчиком, сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции  (пункт 6.1.46 Контракта).

К установленному в графике производства работ сроку (15.11.2017) Компания обязательства по передаче Обществу исполнительной документации не выполнила, однако письмом от 25.12.2017 № 17-3409 гарантировала его исполнение к 29.12.2017, которые также не выполнила.

 Неоднократные обращения Общества в адрес Компании с требованием передать исполнительную документацию, ответчиком полностью не исполнены. Так, часть исполнительной документации была возвращена Компании с замечаниями (письма от 16.02.2018 № 1167, от 26.03.2018 № 2084, от 22.05.2018 № 3576, от 23.05.2018 № 3600, от 30.05.2018 № 3834, от 25.06.2018 № 4555, от 10.07.2018 № 5088). Обязанность по устранению данных замечаний и направление Обществу полного комплекта исправленной исполнительной документации Компания не исполнила.

Общество направило Компании претензию от 26.03.2018 № 2104.

Ответчик оставил претензию без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Общества в арбитражный суд с настоящим иском.

Заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

В силу статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Условие Договора о передаче Обществу надлежащим образом оформленной (в соответствии с требованиями Договора) исполнительной документации Компания не выполнила.

Исполнительная документация включает в себя документы, свидетельствующие об объеме и качестве выполненных работ, сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемые при производстве работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственным конструкций, акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, журналы производства работ и иные материалы, без которых невозможно сдать и эксплуатировать объект.

В соответствии с пунктами 3 и 5 Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных и введенных в действие приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ; исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.

В силу части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации.

Согласно пункту 6.1.11 Договора генподрядчик обязан своевременно и надлежащим образом оформлять исполнительную документацию.

В соответствии с пунктом 6.1.46 Договора генподрядчик обязан к моменту приемки выполненных в полном объеме работ передать заказчику по акту приема-передачи, полный комплект исполнительной документации.

Во исполнение указаний суда стороны провели совместное исследование документации, по результатам которой составили акт сверки приема-передачи исполнительной документации, в которой отразили точный перечень документации, которая ответчиком не передана, характер выявленных замечаний, подлежащих устранению, и количество экземпляров к передаче – на бумажном и/или электронном носителе. 

Доказательств надлежащего исполнения Компанией обязанности по передачи исполнительной документации, отраженной в акте сверки, материалы дела не содержат.

Ответчик и третье лицо данный акт не оспорили, наличие обязанности по передаче истцу документации согласно данному перечню фактически не отрицали, о невозможности передать документацию в требуемый истцом срок (в частности, по причине его недостаточности), не заявили. Первоначально ответчик ссылался на невозможность исполнить обязательство, поскольку истец не возвратил ему переданную документацию – для внесения правок. Вместе с тем документация возвращена ответчику с соответствующими замечаниями и впоследствии ответчик не заявлял об отсутствии у него материалов, необходимых для внесения исправлений.

При таком положении, поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по Договору подтверждается актом сверки, требование истца об обязании передать исполнительную документацию подлежит удовлетворению.

Общество также заявило требование о взыскании с Компании 19 377 руб. 94 коп. неустойки за нарушение сроков предоставления исполнительной документации в полном объеме.

Согласно части 1 статьи  330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно подпункту «и» пункта 17.2 Договора генподрядчик уплачивает по письменному требованию заказчика штрафы и неустойки за непредставление в установленные договором сроки планов, графиков, отчетов, иной информации – штраф в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки, но не более 0,03% от цены работ (пункт 4.1 Договора).

Просрочка передачи исполнительной документации имеет место.

Неустойка рассчитана за период с 10.02.2018 по 18.12.2018.

Расчет истца проверен судом, соответствует положениям Договора; контррасчет/возражение по расчету (в том числе, по периоду начисления неустойки) от ответчика не поступили.

Соответственно, требование о взыскании 19 377 руб. 94 коп. неустойки за указанный период подлежит удовлетворению.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, подлежат отклонению судом, поскольку из буквального толкования подпункта «и» пункта 17.2 Договора следует, что неустойка подлежит начислению не только за непредставление планов, графиков, отчетов, но и иной информации, к которой относится исполнительная документация, непредставление которой препятствует истцу осуществлять надлежащую эксплуатацию объекта.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Платежным поручением от 12.10.2018 № 2692 истец перечислил в бюджет 8000 руб. государственной пошлины, расходы по уплате которой в силу приведенной нормы подлежат отнесению на Компанию. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» оформленную надлежащим образом исполнительную документацию по объекту «Обустройство дополнительных помещений медицинского пункта, расположенного по адресу: 

<

...>, лит. Д, БЦ «Юпитер» по договору генерального подряда от 22.12.2017 № 259-5296-ДПД-17, согласно следующему перечню:

№ п/п

Шифр РД

 Наименование и номер комплекта исполнительной документации по видам работ / конструктивным элементам / инженерным системам  

Номер папки

Содержание папки

Наличие замечаний к исполнительной документации, отраженных в письмах ООО "Газпром социнвест" по результатам проверки переданной ООО «Капитал стройиндустрия» исполнительной документации 

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на бумажном носителе (с учетом устранения замечаний)

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на электронном носителе (с учетом устранения замечаний)

1

Разрешительная документация

-

1/3

Разрешительная документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

2

Разрешительная документация

 -

1/4

Разрешительная документация

 

2

-

3

Разрешительная документация

-

1/5

Разрешительная документация

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

-

4

Разрешительная документация

 - 

1/6

Разрешительная документация

 

2

-

5

Журнал входного контроля и учета материалов

 - 

2/2-2.1

Журнал входного контроля и учета материалов

исх. № 3576 от 22.05.2018

4

-

6

Журнал производства сварочных работ

 -

2/2-4

Журнал производства сварочных работ

исх. № 3600 от 23.05.2018

1

-

7

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

 -

2/2-5

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

исх. № 3576 от 22.05.2018

1

-

8

Общий журнал работ

-

2/3-1

Общий журнал работ

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

9

Журнал входного контроля и учета материалов

 - 

2/3-2

Журнал входного контроля и учета материалов

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

10

Общий журнал работ

-

2/4-1

Общий журнал работ

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

-

11

Общий журнал работ

-

2/5-1.1

Общий журнал работ

исх. № 4555 от 25.06.2018

4

-

12

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

Архитектурные решения

3/1-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

13

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/1-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

-

14

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/1-2.2

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

15

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

Архитектурные решения

3/2-1.1

Рабочая документация

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

1

16

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/2-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

17

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АР

3/3-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 3600 от 23.05.2018

4

1

18

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-КМ

Конструктивные решения

3/4-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

19

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-КМ

3/4-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

-

20

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВС

Водоснабжение 

3/5-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

21

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВС

3/5-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

-

22

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВО

Водоотведение

3/6-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

4

1

23

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ВО

3/6-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

1

24

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-СПС

Пожарный водопровод

3/7-1.1

Рабочая документация

 

-

1

25

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ДИС

Диспетчеризация инженерных систем

3/8-1.1

Рабочая документация

 

-

1

26

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АИС

Автоматизация инженерных систем

3/9-1.1

Рабочая документация

 

-

1

27

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭО

Электроосвещение

3/10-1.1

Рабочая документация

 

-

1

28

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭО

3/10-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 4555 от 25.06.2018

4

-

29

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭМ

Силовое электрооборудование

3/11-1.1

Рабочая документация

исх. № 3576 от 22.05.2018

4

1

30

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ЭМ

3/11-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 3576 от 22.05.2018

4

-

31

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ1

Отопление

3/12-1.1

Рабочая документация

исх. № 1167 от 13.02.2018

-

1

32

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ1

3/12-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

1

-

33

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ2

Вентиляция. Дымоудаление

3/13-1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

3

1

34

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ2

3/13-2.1

Акты, документы,

удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

-

35

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ3

Кондиционирование

3/14-.1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

3

1

36

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОВ3

3/14-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 1167 от 13.02.2018

3

-

37

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-СОУЭ

Система оповещения и управления эвакуацией

3/15-1.1

Рабочая документация

 

-

1

38

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУПС

Автоматическая установка пожарной сигнализации

3/16-1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

1

39

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУПС

3/16-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

40

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АППЗ

Автоматизация противопожарной защиты

3/17-1.1

Рабочая документация

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

1

41

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ОТС

Охранно- тревожная сигнализация

3/18-1.1

Рабочая документация

 

-

1

42

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ПВ

Противопожарный водопровод

3/19-1.1

Рабочая документация

 

-

1

43

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-ПВ

Противопожарный водопровод

3/19-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

44

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУВПТ

Автоматическая установка водяного пожаротушения

3/20-1.1

Рабочая документация

 

-

1

45

ОПГС-2017-БЦ-СПБ-014-АУВПТ

Автоматическая установка водяного пожаротушения

3/20-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

исх. № 2084 от 26.03.2018

4

-

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» 19 377 руб. 94 коп. неустойки за нарушение сроков предоставления исполнительной документации в полном объеме и 8 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Бутова Р.А.