ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. (87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки                                                                                          Дело № А63-1794/2024

30.01.2025

Резолютивная часть постановления объявлена   23.01.2025.

Постановление изготовлено в  полном объеме   30.01.2025.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Жукова Е.В., судей: Семенова М.У., Луговой Ю.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прикота А.О., при участии в судебном заседании представителя акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» – ФИО1 (по доверенности от 01.01.2025), в отсутствии иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО «ЧиркейГЭСстрой» на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 по делу № А63-1794/2024, принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройКомплект-КМВ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ставрополь к акционерному обществу «ЧиркейГЭСстрой», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, п. Иноземцево г. Железноводска о взыскании 144 480 руб. долга и 7 224 руб. неустойки по договору № 080/ПТО/ДП-2023(КГ) от 01.03.2023, 3 700 568 руб. 82 руб. долга и 185 028 руб. 40 коп. неустойки по договору № 042/ПТО/СП-2022 от 11.02.2022, 331 200 руб. долга и 16 560 руб. неустойки по договору № 191/ПТО/ДП-2023(КГ) от 07.04.2023, 12 310 593 руб. 02 коп. долга и 615 529 руб. 65 коп. неустойки по договору № 607/ПТО/СП-2021(КГ) от 27.12.2021, 1 841 400 руб. долга и 92 070 руб. неустойки по договору № 529/СТ/Усл-2022(КГ) от 07.09.2022, 150 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также встречное исковое заявление акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, п. Иноземцево г. Железноводска к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСтройКомплект-КМВ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ставрополь о взыскании 2 141 687 руб. 09 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 042/ПТО/СП2022 (КГ) от 11.02.2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройКомплект-КМВ" (далее - ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ") обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу "ЧиркейГЭСстрой" (далее - АО "ЧиркейГЭСстрой") о взыскании 144 480 руб. долга и 7 224 руб. неустойки по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023, 3 700 568 руб. 82 руб. долга и 185 028 руб. 40 коп. неустойки по договору N 042/ПТО/СП-2022 от 11.02.2022, 331 200 руб. долга и 16 560 руб. неустойки по договору N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023, 12 310 593 руб. 02 коп. долга и 615 529 руб. 65 коп. неустойки по договору N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021, 1 841 400 руб. долга и 92 070 руб. неустойки по договору N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022, 150 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Определением от 03.05.2024 суд принял встречное исковое заявление АО "ЧиркейГЭСстрой" к ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" о взыскании 2 141 687 руб. 09 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022.

 Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 по делу № А63-1794/2024 исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ЮгСтройКомплект-КМВ" удовлетворены. Суд взыскал с акционерного общества "ЧиркейГЭСстрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЮгСтройКомплект-КМВ" 18 328 241 руб. 84 коп. долга, 916 412 руб. 05 коп. неустойки, 75 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 119 223 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Встречные исковые требования акционерного общества "ЧиркейГЭСстрой" удовлетворены частично. Суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью "ЮгСтройКомплект-КМВ" в пользу акционерного общества "ЧиркейГЭСстрой" 440 072 руб. 69 коп. неустойки за период с 01.01.2023 по 29.06.2023, 33 708 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 по делу № А63-1794/2024 АО «ЧиркейГЭСстрой» обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы, апеллянт ссылается на то, что при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права и не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Отзыв на апелляционную жалобу суду не представлен.

В судебном заседании представитель АО «ЧиркейГЭСстрой» поддерживал доводы, изложенные в апелляционной  жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и  месте судебного заседания, не явились, явку представителей не обеспечили.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена на сайте http://kad.arbitr.ru/ в соответствии положениями  статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) при неявке в судебное заседание арбитражного суда лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Правильность решения Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 по делу № А63-1794/2024 проверена в апелляционном порядке в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции, рассмотрев повторно дело по апелляционной жалобе, проверив правильность применения норм материального и процессуального права, учитывая доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, изучив и оценив в совокупности материалы дела, считает, что решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 по делу № А63-1794/2024 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 27.12.2021 между АО "ЧиркейГЭСстрой" (подрядчик) и ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" (субподрядчик) был заключен договор субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к договору) выполнить работы по устройству систем остекления оконных проемов зданий ГЭС и административного здания Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик обязался создать субподрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену договора.

Согласно пунктам 1.5, 1.5.1 - 1.5.6, 1.6 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 в редакции дополнительного соглашения N 1 от 31.01.2022 работы выполняются субподрядчиком в следующие сроки: начало выполнения работ - с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ; окончание выполнения работ - не более 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ.

Выполнение работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным графиком выполнения работ (приложение N 3 к договору) в рамках общих сроков.

Пунктом 3.1 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 в редакции дополнительного соглашения N 2 стороны предусмотрели, что цена договора в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение N 2 к договору) является предельной и составляет 28 879 731 руб. без НДС, который исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ, в том числе:

- по Красногорской МГЭС-2 и административного здания в соответствии со сводным сметным расчетом, локальным сметным расчетам (приложение N 2 к договору) является предельной и составляет 15 617 180 руб. без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ;

- по Красногорской МГЭС-1 и административного здания в соответствии со сводным сметным расчетом, локальным сметным расчетам (приложение N 2 к договору) является предельной и составляет 13 262 551 руб. без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Из календарного графика выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью дополнительного соглашения N 2 к договору субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021, следует, что сроки выполнения работ по устройству систем остекления оконных проемов по зданию МГЭС-2 и административного здания - с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ и до 30.11.2022, сроки выполнения работ по устройству систем остекления оконных проемов по зданию МГЭС-1 - с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ и до 31.12.2022.

Оплата по договору осуществляется подрядчиком в следующем порядке:

1) авансовые платежи в счет стоимости каждого этапа работ в размере 30% от стоимости соответствующего этапа работ без НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 НК РФ ставке на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты получения подрядчиком счета, выставленного субподрядчиком, при условии согласования сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 3.1 договора, но не ранее, чем за 30 календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение N 3 к договору), и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора;

2) последующие платежи в размере 70% от стоимости выполненных работ, указанной в акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 НК РФ ставке на дату платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора.

Окончательный расчет по этапу работ производится в следующем порядке:

1) если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС по установленной статьей 164 НК РФ ставке на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2 договора, соответствующая разница выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.4.4, 3.4.5 договора;

2) если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС установленной статьей 164 НК РФ по ставке на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет менее сумму авансовых платежей, ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2 договора, соответствующая разница, определенная, в том числе с учетом пункта 3.5.5 договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося субподрядчику по договору, либо возврату субподрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением сторон (пункты 3.4, 3.4.1 - 3.4.3, 3.4.3.1 - 3.4.3.2 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 в редакции дополнительного соглашения N 1 от 31.01.2022).

В случае выставления субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате подрядчиком не принимается и подлежит замене субподрядчиком независимо от его фактического вручения подрядчику. В случае выставления субподрядчиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета подрядчиком (пункт 3.4.4 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021).

Пунктом 3.9 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 стороны предусмотрели, что подрядчик в ходе исполнения договора оказывает субподрядчику генподрядные услуги, по факту оказания которых подписывается акт оказанных генподрядных услуг. За услуги, оказываемые подрядчиком вне зависимости от фактического объема услуг, субподрядчик ежемесячно производит отчисления в размере 10% от стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1 договора. Оплата услуг, указанных в акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет подрядчика на основании выставленного подрядчиком счета в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта оказанных генподрядных услуг.

Порядок сдачи-приемки работ предусмотрен сторонами в разделе 4 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021.

Так, согласно пунктам 4.1, 4.4 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 приемка работ осуществляется подрядчиком ежемесячно по окончании календарного месяца. Субподрядчик в течение 3-х рабочих дней представляет подрядчику подписанный со своей стороны в 3-х экземплярах акт освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ по форме КС-6а в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf).

В течение 15 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 договора, подрядчик подписывает и передает субподрядчику один экземпляр каждого акта либо направляет субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ), в котором отражает недостатки, несоответствия и (или) дефекты работ (этапа работ), а также срок на их устранение.

За нарушение подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), субподрядчик вправе требовать в соответствии с пунктом 7.3 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 уплаты подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

По факту выполнения работ уполномоченными представителями обеих сторон без каких-либо замечаний и возражений подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.06.2023 N 1 и N 2 на общую сумму 34 655 677,20 руб., а также акты приемки законченного строительством объекта от 30.06.2023 N 1.

Ответчик произвел оплату выполненных работ на общую сумму 22 345 084,18 руб. платежными поручениями от 24.02.2022 N 458, от 18.11.2022 N 5336, от 30.11.2022 N 313, от 29.1 2.2022 N 6079, от 20.06.2023 N 1946, от 30.06.2023 N 62.

С учетом произведенной ответчиком частичной оплаты задолженность по договору N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 составила 12 310 593,02 руб.

Также 11.02.2022 между АО "ЧиркейГЭСстрой" (подрядчик) и ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" (субподрядчик) был заключен договор субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к договору) изготовить и выполнить работы по монтажу дверных блоков зданий ГЭС и административного здания Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик обязался создать субподрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену договора.

Согласно пунктам 1.5, 1.5.1 - 1.5.4, 1.6 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 в редакции дополнительного соглашения N 2 работы выполняются субподрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения работ по зданию МГЭС-2 - с даты заключения договора;

- окончание выполнения работ по зданию МГЭС-2 - 30.12.2022;

- начало выполнения работ по зданию МГЭС-1 - 01.06.2022;

- окончание выполнения работ по зданию МГЭС-1 - 30.12.2022.

Выполнение работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным графиком выполнения работ (приложение N 3 к договору) в рамках общих сроков.

Пунктом 3.1 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 стороны предусмотрели, что цена договора в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение N 2 к договору) является предельной и составляет 9 783 333,33 руб. без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ, в том числе:

- по Красногорской МГЭС-1 в соответствии с расчетом стоимости (приложение N 3 к договору) является предельной и составляет 4 891 666,66 руб. без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ;

- по Красногорской МГЭС-2 в соответствии с расчетом стоимости (приложение N 3 к договору) является предельной и составляет 4 891 666,67 руб. без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Оплата по договору осуществляется подрядчиком в следующем порядке:

1) авансовые платежи в счет стоимости каждого этапа работ в размере 30% от стоимости соответствующего этапа работ без НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 НК РФ ставке на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты получения подрядчиком счета, выставленного субподрядчиком, но не ранее, чем за 30 календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение N 2 к договору), и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора;

2) последующие платежи в размере 70% от стоимости выполненных работ, указанной в акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 НК РФ ставке на дату платежа, выплачиваются в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора.

Окончательный расчет по этапу работ производится в следующем порядке:

1) если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2 договора, соответствующая разница выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора;

2) если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет менее сумму авансовых платежей, ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2 договора, соответствующая разница, определенная, в том числе с учетом пункта 3.5.5 договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося субподрядчику по договору, либо возврату субподрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением сторон (пункты 3.5, 3.5.1 - 3.5.3, 3.5.3.1 - 3.5.3.2 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022).

В случае выставления субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате подрядчиком не принимается и подлежит замене субподрядчиком независимо от его фактического вручения подрядчику. В случае выставления субподрядчиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета подрядчиком (пункт 3.5.4 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022).

Пунктом 3.9 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 стороны предусмотрели, что подрядчик в ходе исполнения договора оказывает субподрядчику генподрядные услуги, по факту оказания которых подписывается акт оказанных генподрядных услуг. За услуги, оказываемые подрядчиком вне зависимости от фактического объема услуг, субподрядчик ежемесячно производит отчисления в размере 10% от стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1 договора. Оплата услуг, указанных в акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет подрядчика на основании выставленного подрядчиком счета в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта оказанных генподрядных услуг.

Порядок сдачи-приемки работ предусмотрен сторонами в разделе 4 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022.

Так, согласно пунктам 4.1, 4.4 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 приемка работ осуществляется подрядчиком ежемесячно по окончании календарного месяца. Субподрядчик в течение 3-х рабочих дней представляет подрядчику подписанный со своей стороны в 3-х экземплярах акт освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ по форме КС-6а в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf).

В течение 15 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 договора, подрядчик подписывает и передает субподрядчику один экземпляр каждого акта либо направляет субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ), в котором отражает недостатки, несоответствия и (или) дефекты работ (этапа работ), а также срок на их устранение.

За нарушение подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), субподрядчик вправе требовать в соответствии с пунктом 7.3 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 уплаты подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

За нарушение субподрядчиком обязательств по выполнению работ, в том числе сроков выполнения работ, установленных календарным графиком выполнения работ (приложение N 3 к договору), сроков предоставления приемо-сдаточной и исполнительной документации, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результата работ, подрядчик в соответствии с пунктом 7.4.1 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 вправе требовать уплаты субподрядчиком штрафной неустойки в размере 0,2% от цены этапа работ за каждый день просрочки - в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ.

ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" выполнило работы, что подтверждается подписанными уполномоченными представителями обеих сторон без каких-либо замечаний и возражений актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.11.2022 N 01ПР и N 01, от 30.06.2023 N 1 и N 2 на общую сумму 11 612 296,80 руб., а также актом приемки законченного строительством объекта от 30.06.2023 N 1.

Ответчик произвел оплату выполненных работ на общую сумму 7 911 727,98 руб. платежными поручениями от 19.04.2022 N 1398, от 22.08.2022 N 3651, от 14.11.2022 N 5129, от 30.11.2022 N 313, от 29.12.2022 N 6080, от 30.06.2023 N 62.

С учетом произведенной ответчиком частичной оплаты задолженность по договору N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 составила 3 700 568,82 руб.

07 сентября 2022 года между АО "ЧиркейГЭСстрой" (заказчик) и ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" (исполнитель) был заключен договор возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ), по условиям которого исполнитель обязуется по заданию и согласно указаниям заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к договору) оказать услуги с применением специальной техники - телескопической автовышки, а заказчик обязуется создать исполнителю указанные в договоре условия для оказания услуг и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

Общий срок оказания услуг: начало - с даты заключения договора, по заявкам заказчика; окончание - в течение 6 месяцев с даты заключения договора или до исчерпания суммы договора.

Услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком с момента подписания сторонами акта об оказании услуг (пункты 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 3.6 договора возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022).

Согласно пунктам 4.1, 4.4, 4.5.1 договора возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022 стоимость услуг по договору в соответствии с расчетом стоимости услуг (приложение N 3 к договору) является предельной и составляет 4 637 500 руб. без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ, в том числе:

- 1 391 250 руб. без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 НК РФ ставке - на объект строительства Красногорская МГЭС-1;

- 3 246 250 руб. без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 НК РФ ставке - на объект строительства Красногорская МГЭС-2.

Оплата за оказанные услуги в размере 100% от стоимости оказанных услуг за соответствующий месяц выплачивается в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 3.2 договора, на основании счета, выставленного исполнителем, и с учетом пункта 4.5.1 договора.

В случае выставления исполнителем счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене исполнителем независимо от его фактического вручения заказчику. В случае выставления исполнителем счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета заказчиком.

За нарушение заказчиков сроков оплаты, установленных разделом 4 договора, исполнитель в соответствии с пунктом 5.2 договора возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022 вправе требовать уплаты заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

На основании направленной заявки на оказание услуг N 4 (количество маш/час 297; срок оказания услуг - с 05.01.2023 по 31.01.2023; место оказания услуг - Красногорские МГЭС-2, КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС-2 и в 40 км южнее города Черкесска) ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" оказало АО "ЧиркейГЭСстрой" услуги на общую сумму 801 900 руб., в том числе НДС 20% - 133 650 руб.

Услуги приняты заказчиком без каких-либо замечаний и возражений, что подтверждается актом об оказании услуг от 31.01.2023 N 1 и справкой для расчетов за выполненные работы (услуги) от 31.01.2023 N 4.

На основании направленной заявки на оказание услуг N 5 (количество маш/час 308; срок оказания услуг - с 01.02.2023 по 28.02.2023; место оказания услуг - Красногорские МГЭС-2, КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС-2 и в 40 км южнее города Черкесска) ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" оказало АО "ЧиркейГЭСстрой" услуги на общую сумму 831 600 руб., в том числе НДС 20% - 138 600 руб.

Услуги приняты заказчиком без каких-либо замечаний и возражений, что подтверждается актом об оказании услуг от 28.02.2023 N 3 и справкой для расчетов за выполненные работы (услуги) от 28.02.2023 N 5.

На основании направленной заявки на оказание услуг N 6 (количество маш/час 77; срок оказания услуг - с 01.03.2023 по 07.03.2023; место оказания услуг - Красногорские МГЭС-2, КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС-2 и в 40 км южнее города Черкесска) ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" оказало АО "ЧиркейГЭСстрой" услуги на общую сумму 207 900 руб., в том числе НДС 20% - 34 650 руб.

Услуги приняты заказчиком без каких-либо замечаний и возражений, что подтверждается актом об оказании услуг от 07.03.2023 N 4 и справкой для расчетов за выполненные работы (услуги) от 07.03.2023 N 6.

Оказанные по заявкам NN 4-6 услуги АО "ЧиркейГЭСстрой" не оплатило, в связи с чем за ним по договору возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022 образовалась задолженность в сумме 1 841 400 руб.

01 марта 2023 года между АО "ЧиркейГЭСстрой" (покупатель) и ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" (поставщик) был заключен договор поставки N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ), по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные договором, передать в собственность покупателя взрывобезопасную бесцветную пленку в соответствии со спецификацией (приложение N 1 к договору) и оказать услуги по проклейке взрывобезопасной бесцветной пленки контура безопасности на оконных проемах здания Красногорской МГЭС-1 в соответствии с расчетом стоимости услуг (приложение N 3 к договору), а покупатель обязуется принять товар и услуги и уплатить цену договора.

Общий срок поставки услуг: начало - с даты подписания договора; окончание - не более 30 календарных дней с даты заключения договора.

Сроки поставки товара (партий товара) и оказания услуг указаны в календарном графике поставки товара и оказания услуг (приложение N 2 к договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5 договора (пункты 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.6 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023).

Из календарного графика поставки товара и оказания услуг следует, что срок поставки товара - 5 календарных дней с даты заключения договора, срок оказания услуг - 10 календарных дней с даты поставки товара.

Согласно пунктам 2.1, 2.1.1, 2.1.2 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 цена договора в соответствии со спецификацией (приложение N 1 к договору) и расчетом стоимости услуг (приложение N 3 к договору) является предельной и составляет 160 000 руб. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ, в том числе:

- стоимость товара в соответствии со спецификацией (приложение N 1 к договору) является предельной и составляет 100 000 руб. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ;

- стоимость услуг в соответствии с расчетом стоимости услуг (приложение N 3 к договору) является предельной и составляет 60 000 руб. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Оплата по договору осуществляется покупателем в следующем порядке:

1) авансовые платежи за каждую партию товара в размере 30% от стоимости соответствующей партии товара выплачиваются поставщику в течение 30 календарных дней с даты получения покупателем счета, выставленного поставщиком, но не ранее чем за 30 календарных дней до плановой даты поставки партии товара, и с учетом пункта 2.4.5 договора;

2) авансовые платежи в счет стоимости услуг в размере 30% от стоимости услуг выплачиваются поставщику в течение 30 календарных дней с даты получения покупателем счета, выставленного поставщиком, но не ранее чем за 30 календарных дней до даты начала оказания услуг, определенной в соответствии с календарным графиком поставки товара и оказания услуг (приложение N 2 к договору), и с учетом пункта 2.4.5 договора;

3) последующие платежи в размере 70% от стоимости партии товара выплачиваются поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 на основании счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.4.5 договора;

4) последующий платеж в размере 70% от стоимости услуг выплачиваются поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 6.1 договора, на основании счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.4.5 договора.

В случае выставления поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате покупателем не принимается и подлежит замене поставщиком независимо от его фактического вручения покупателю. В случае выставления поставщиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета покупателем (пункты 2.4, 2.4.1 - 2.4.5 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023).

В соответствии с пунктами 3.1, 3.9, 3.10 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 поставка товара осуществляется партиями в место поставки: Красногорская МГЭС-1, расположенная на реке Кубань (806 км от устья), на территории Карачаево-Черкесской Республики, в Усть-Джегутинском муниципальном районе, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и в 40 км южнее города Черкесска.

Датой поставки партии товара является дата подписания сторонами накладной ТОРГ-12.

Приемки партии товара по количеству тар и упаковок, в которых производилась отгрузка товара, осуществляется покупателем в день поставки в присутствии представителя поставщика согласно представленным транспортным и сопроводительным документам, указанным в пункте 3.4 договора. По результатам проверки количества упаковочных мест покупатель подписывает представленные транспортные документы.

В соответствии с пунктами 6.1, 6.2, 6.5 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 по окончании оказания услуг поставщик представляет покупателю подписанный со своей стороны в 2-х экземплярах акт сдачи-приемки оказанных услуг.

В течение 5 рабочих дней с даты получения от поставщика акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с пунктом 6.1 договора покупатель подписывает и передает поставщику один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо направляет поставщику письменный мотивированный отказ от приемки услуг, в котором отражает выявленные недостатки, несоответствия и (или) дефекты услуг, а также срок на их устранение.

Услуги считаются оказанными поставщиком и принятыми покупателем с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Пунктом 7.3 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 стороны предусмотрели, что в случае нарушения покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), поставщик вправе требовать уплаты покупателем исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

АО "ЧиркейГЭСстрой" произвело авансирование по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 в сумме 36 000 руб. платежным поручением от 29.03.2023 N 892.

10 апреля 2023 года ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" поставило ответчику товар (взрывобезопасную бесцветную пленку, класс пленки К4, толщина 112 мкм) на сумму 112 800 руб. (в том числе НДС 20% - 18 800 руб.), что подтверждается подписанной уполномоченными представителями обеих сторон товарной накладной от 10.04.2023 N 17.

14 апреля 2023 года сторонами подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг N 15 по проклейке взрывобезопасной бесцветной пленки контура безопасности на оконных проемах здания Красногорской МГЭС-1 на сумму 67 680 руб. (в том числе НДС 20% - 11 280 руб.).

С учетом произведенного ответчиком авансирования задолженность по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 составила 144 480 руб.

Также 07.04.2023 между АО "ЧиркейГЭСстрой" (покупатель) к ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" (поставщик) был заключен договор поставки N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ), по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные договором, передать в собственность покупателя автоматические приводы на створки окон в здании Красногорской МГЭС-1 в соответствии со спецификацией (приложение N 1 к договору), а покупатель обязуется принять товар и услуги и уплатить цену договора.

Общий срок поставки услуг: начало - с даты заключения договора; окончание - не более 30 календарных дней с даты заключения договора (пункты 1.4, 1.4.1, 1.4.2 договора N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023).

Согласно пунктам 2.1, 2.5, 2.5.1 - 2.5.3 договора N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 цена договора является предельной и составляет 276 000 руб. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Оплата по договору осуществляется покупателем в следующем порядке:

1) авансовые платежи в счет стоимости договора в размере 30% от цены договора без учета НДС, а также НДС по установленной статьей 164 НК РФ ставке на дату авансового платежа, выплачиваются поставщику в течение 30 календарных дней с даты получения покупателем счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.5.3 договора;

2) последующие платежи в размере разницы между стоимостью партии товара без учета НДС, а также НДС по установленной статьей 164 НК РФ ставке на дату подписания сторонами накладной ТОРГ-12/УПД, и суммой ранее уплаченного авансового платежа выплачиваются поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12/УПД на основании счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.5.3 договора.

В случае выставления поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате покупателем не принимается и подлежит замене поставщиком независимо от его фактического вручения покупателю. В случае выставления поставщиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета покупателем

В соответствии с пунктами 3.10, 3.11 договора N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 датой поставки товара является дата подписания сторонами накладной ТОРГ-12. Приемка товаров осуществляется покупателем в дату поставки товара в присутствии представителя поставщика.

За нарушение покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), поставщик вправе требовать уплаты покупателем исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы (пункт 5.3 договора N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023).

10 апреля 2023 года ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" поставило ответчику товар (автоматический привод на створки окон) на сумму 331 200 руб., что подтверждается подписанной уполномоченными представителями обеих сторон товарной накладной от 10.04.2023 N 16.

Ответчик оплату поставленного товара не произвел, в связи с чем, за ним образовалась задолженность по договору N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 в сумме 331 200 руб.

Задолженность АО "ЧиркейГЭСстрой" перед ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" по договорам на общую сумму 18 328 241,84 руб. (из которых 144 480 руб. - задолженность по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023, 3 700 568,82 руб. - задолженность по договору N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022, 331 200 руб. - задолженность по договору N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023, 12 310 593,02 руб. - задолженность по договору N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 и 1 841 400 руб. - задолженность по договору возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022) также отражена в подписанном уполномоченными представителями обеих сторон актом сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2023 года.

Поскольку направленная истцом претензия с требованием погасить задолженность и уплатить неустойку за нарушение сроков оплаты по договорам была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

При этом пунктом 1 статьи 509 ГК РФ предусмотрено, что поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Договор поставки является отдельным видом договора купли-продажи и в соответствии с положениями пункта 5 статьи 454 ГК РФ к нему применяются положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 названного Кодекса о купле-продаже, если иное не предусмотрено правилами Кодекса об этом виде договора.

Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом (пункт 1 статьи 458 ГК РФ).

В соответствии с положениями статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Судом первой инстанции установлено, что поставка товара (взрывобезопасной бесцветной пленки) стоимостью 112 800 руб. (с учетом НДС 20%) по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 произведена ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" 10.04.2023, что подтверждается подписанной уполномоченными представителями обеих сторон товарной накладной от 10.04.2023 N 17.

Услуги по проклейке взрывобезопасной бесцветной пленки контура безопасности на оконных проемах здания Красногорской МГЭС-1 на сумму 67 680 руб. (с учетом НДС 20%) оказаны истцом ответчику 14.04.2023, что отражено в подписанном уполномоченными представителями обеих сторон акте сдачи-приемки оказанных услуг N 15.

Из положений пунктов 2.4.1 и 2.4.2 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 следует, что АО "ЧиркейГЭСстрой" обязано было перечислить ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" авансовые платежи за товар и услуги в размере 30% от их стоимости.

АО "ЧиркейГЭСстрой" платежным поручением от 29.03.2023 N 892 произвело частичное авансирование по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 в размере 36 000 руб.

Исходя из фактической стоимости поставленного товара и оказанных услуг, а также с учетом положений статьи 319.1 ГК РФ и пунктов 2.1.1, 2.1.2, 2.4.1, 2.4.2 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023, полученный ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" авансовый платеж распределяется следующим образом: 22 500 руб. на поставку товара (62,5%) и 13 500 руб. на оказание услуг (37,5%), доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, общий размер задолженности АО "ЧиркейГЭСстрой" перед ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 составил 144 480 руб., из которых 90 300 руб. - за поставку товара и 54 180 руб. - за оказанные услуги.

Доказательства погашения долга, суду не представлены.

Пунктом 7.3 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 стороны предусмотрели, что в случае нарушения покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), поставщик вправе требовать уплаты покупателем исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

Из положений пункта 2.4.3 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 следует, что окончательный платеж за поставленный товар выплачивается поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 (в рассматриваемом случае 10.04.2023).

Из положений пункта 2.4.4 договора N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 следует, что окончательный платеж за оказанные услуги выплачивается поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 6.1 договора, то есть акта сдачи-приемки оказанных услуг (в рассматриваемом случае 14.04.2023).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Проверив представленный истцом, расчет неустойки по состоянию на 22.01.2024 суд первой инстанции признал его выполненным методологически неверно, самостоятельно производя расчет неустойки, суд установил, что ее размер не превышает заявленный к взысканию (7 224 руб.)

Ответчик контррасчет неустойки, равно как и доказательства ее уплаты, а также надлежащие доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 401 ГК РФ, суду не представил, в связи с чем, требования ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" о взыскании с АО "ЧиркейГЭСстрой" 144 480 руб. долга и 7 224 руб. неустойки по договору N 080/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 01.03.2023 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Относительно поставки товара (автоматические приводы на створки окон в здании Красногорской МГЭС-1) стоимостью 331 200 руб. (с учетом НДС 20%) по договору N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 произведена ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" 10.04.2023, что подтверждается подписанной уполномоченными представителями обеих сторон товарной накладной от 10.04.2023 N 16.

В нарушение пункта 2.5.1 договора N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 ответчик авансирование поставляемого товара не произвел.

Таким образом, общий размер задолженности АО "ЧиркейГЭСстрой" перед ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" по договору N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 составил 331 200 руб.

Доказательств оплаты в материалы дела не представлено.

Пунктом 5.3 договора N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 стороны предусмотрели, что в случае нарушения покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), поставщик вправе требовать уплаты покупателем исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

Из положений пункта 2.5.2 договора N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 следует, что окончательный платеж за поставленный товар выплачивается поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 (в рассматриваемом случае 10.04.2023).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Суд, проверив представленный истцом расчет неустойки по состоянию на 22.01.2024, признает его выполненным арифметически и методологически верно.

Ответчик контррасчет неустойки, равно как и доказательства ее уплаты, а также надлежащие доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 401 ГК РФ, суду не представил, в связи с чем, требования ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" о взыскании с АО "ЧиркейГЭСстрой" 331 200 руб. долга и 16 560 руб. неустойки по договору N 191/ПТО/ДП-2023 (КГ) от 07.04.2023 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

По договору возмездного оказания услуг № 529/СТ/Усл-2022(КГ) судом первой инстанции установлено, что АО "ЧиркейГЭСстрой" в адрес ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" были направлены заявки на оказание услуг NN 4-6.

Услуги на общую сумму 1 841 400 руб. приняты АО "ЧиркейГЭСстрой", что подтверждается представленными в материалы дела подписанными уполномоченными представителями обеих сторон без каких-либо замечаний и возражений актами об оказании услуг от 31.01.2023 N 1, от 28.02.2023 N 3, от 07.03.2023 N 4, а также справками для расчетов за выполненные работы (услуги) от 31.01.2023 N 4, от 28.02.2023 N 5, от 07.03.2023 N 6.

Поскольку ответчик оплату за оказанные услуги не произвел, общий размер задолженности АО "ЧиркейГЭСстрой" перед ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" по договору N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022 составил 1 841 400 руб.

Доказательства оплаты долга суду не представлено.

Пунктом 5.2 договора возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022 стороны предусмотрели, что в случае нарушения заказчиком сроков оплаты исполнитель вправе требовать уплаты заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

Из положений пункта 4.4 договора возмездного оказания услуг N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022 следует, что оплата за оказанные услуги производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 3.2 договора, то есть акта об оказании услуг (в рассматриваемом случае 31.01.2023, 28.02.2023 и 07.03.2023).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Суд, проверив представленный истцом расчет неустойки по состоянию на 22.01.2024, признает его выполненным арифметически и методологически верно.

Ответчик контррасчет неустойки, равно как и доказательства ее уплаты, а также надлежащие доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 401 ГК РФ, суду не представил,  в связи с чем, требования ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" о взыскании с АО "ЧиркейГЭСстрой" 1 841 400 руб. долга и 92 070 руб. неустойки по договору N 529/СТ/Усл-2022 (КГ) от 07.09.2022 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

По договору субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021  работы выполнены ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" и приняты АО "ЧиркейГЭСстрой" без каких-либо замечаний и возражений по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 34 655 677,20 руб.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является подписанный обеими сторонами акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Оплата заказчиком работ, выполненных подрядчиком, ставится в прямую зависимость от сдачи результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Как установлено судами спора относительно объема, стоимости и качества фактически выполненных субподрядчиком работ между сторонами отсутствует, о назначении и проведении по делу судебной экспертизы в порядке статьи 82 АПК РФ стороны судам не заявляли.

АО "ЧиркейГЭСстрой" произвело оплату выполненных субподрядчиком работ на общую сумму 22 345 084,18 руб. платежными поручениями от 24.02.2022 N 458, от 18.11.2022 N 5336, от 30.11.2022 N 313, от 29.1 2.2022 N 6079, от 20.06.2023 N 1946, от 30.06.2023 N 62, которые на основании положений статьи 319.1 ГК РФ и пункта 3.4.1 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 зачтены истцом в счет оплаты выполненных и принятых ответчиком работ на сумму 18 740 607,80 руб. и частичного авансирования выполнения этапа работ по устройству систем остекления оконных проемов по зданию МГЭС-1.

Таким образом, с учетом произведенного частичного авансирования (оплаты) работ задолженность АО "ЧиркейГЭСстрой" перед ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" по договору субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 составила 12 310 593,02 руб.

Доказательств погашения указанной суммы суду не представлено.

Пунктом 7.3 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 стороны предусмотрели, что в случае нарушения подрядчиком сроков оплаты субподрядчик вправе требовать уплаты подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

Из положений пункта 3.4.3.1 договора субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 в редакции дополнительного соглашения N 1 от 31.01.2022 следует, что окончательный расчет по этапу работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, то есть акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в рассматриваемом случае 30.06.2023).

Проверив представленный истцом расчет неустойки по состоянию на 22.01.2024, признает его выполненным арифметически и методологически верно, в связи с чем, требования ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" о взыскании с АО "ЧиркейГЭСстрой" 12 310 593,02 руб. долга и 615 529,65 руб. неустойки по договору субподряда N 607/ПТО/СП-2021 (КГ) от 27.12.2021 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

По договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022  работы выполнены ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" и приняты АО "ЧиркейГЭСстрой" без каких-либо замечаний и возражений по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 11 612 296,80 руб.

АО "ЧиркейГЭСстрой" произвело оплату выполненных субподрядчиком работ на общую сумму 7 911 727,98 руб. платежными поручениями от 19.04.2022 N 1398, от 22.08.2022 N 3651, от 14.11.2022 N 5129, от 30.11.2022 N 313, от 29.12.2022 N 6080, от 30.06.2023 N 62, которые на основании положений статьи 319.1 ГК РФ и пункта 3.4.1 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 зачтены истцом в счет оплаты выполненных и принятых ответчиком работ на сумму 5 663 166 руб. и частичного авансирования выполнения этапа работ по монтажу дверных полотен Красногорской МГЭС-1.

Таким образом, с учетом произведенного частичного авансирования (оплаты) работ задолженность АО "ЧиркейГЭСстрой" перед ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 составила 3 700 568,82 руб.

Доказательств погашения указанной суммы суду не представлено.

Пунктом 7.3 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 стороны предусмотрели, что в случае нарушения подрядчиком сроков оплаты субподрядчик вправе требовать уплаты подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.

Из положений пункта 3.5.3.1 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 следует, что окончательный расчет по этапу работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, то есть акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в рассматриваемом случае 30.06.2023).

Проверив представленный истцом расчет неустойки по состоянию на 22.01.2024, признает его выполненным арифметически неверно.

Производя самостоятельно расчет неустойки и установил, что ее размер не превышает заявленный к взысканию (185 028,40 руб.), в связи с чем, требования ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" о взыскании с АО "ЧиркейГЭСстрой" 3 700 568,82 руб. долга и 185 028,40 руб. неустойки по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 от 11.02.2022 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Таким образом, общий размер подлежащей взысканию с АО "ЧиркейГЭСстрой" в пользу ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" задолженности по договорам составляет 18 328 241,84 руб., общий размер неустойки по договорам - 916 412,05 руб.

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В силу пункта 2 статьи 333 ГК РФ уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7), бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Исходя из разъяснений, данных в пункте 75 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7, при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ) (пункт 77 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается, в том числе исходя из принципа свободы договора и согласования его сторонами условия о размере неустойки (статья 421 ГК РФ).

По смыслу статьи 333 ГК РФ уменьшение неустойки является правом, а не обязанностью суда, а наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности, определяется судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств (статьи 71, 168 АПК РФ).

В рассматриваемом случае условие о договорной неустойке определено по свободному усмотрению сторон. При подписании договора и принятии на себя взаимных обязательств у сторон не возникало споров по поводу чрезмерности согласованного размера неустойки. Доказательств обратного, в том числе наличия преддоговорных споров об этом, в материалах дела не имеется.

Ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, относящимся к коммерческой организации, имеющей своей основной целью извлечение прибыли (статья 50 ГК РФ), в соответствии со статьей 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а, следовательно, должен и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением принятых по договору обязательств.

Определив соответствующий порядок начисления договорной неустойки, ответчик тем самым принял на себя риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с возможностью применения истцом мер договорной ответственности.

Кроме того, согласованный сторонами размер неустойки (0,1%) соответствует ставке неустойки, которая является обычно и широко применяемой ставкой в договорных отношениях согласно обычаям делового оборота. Наряду с этим сторонами согласовано ограничение по размеру неустойки в 5% (аналогичный правовой подход изложен в постановлениях Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.08.2024 N Ф08-5019/2024 по делу N А32-3542/2023, от 10.08.2022 N Ф08-7279/2022 по делу N А32-32709/2021, от 13.04.2022 N Ф08-2224/2022 по делу N А53-20502/2021, постановлениях Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2024 N 16АП-935/2024 по делу N А77-1366/2023, от 24.04.2024 N 16АП-625/2024 по делу N А63-12943/2023, от 27.02.2024 N 16АП-4505/2023 по делу N А63-11934/2023 и др.).

Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства с учетом установленного ограничения не представлено, явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства не установлена, оснований для применения арбитражным судом статьи 333 ГК РФ в рассматриваемом споре не имеется.

Истец по встречному иску просил взыскать с ответчика по встречному иску 2 141 687,09 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022.

Работы по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 должны были быть выполнены в срок не позднее 30.12.2022 (пункты 1.5.2, 1.5.4 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 в редакции дополнительного соглашения N 2).

Пунктом 7.4.1 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 стороны предусмотрели, что в случае нарушения субподрядчиком установленных календарным графиком выполнения работ сроков выполнения работ, повлекших за собой изменение срока выполнения работ в целом, подрядчик вправе требовать уплаты субподрядчиком штрафной неустойки в размере 0,2% от цены этапа работ за каждый день просрочки.

Работы по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 выполнены ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" и приняты АО "ЧиркейГЭСстрой" без каких-либо замечаний и возражений по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 11 612 296,80 руб., из которых 5 663 166 руб. - 30.11.2022 и 5 949 130,80 руб. - 30.06.2023.

Поскольку факт нарушения субподрядчиком срока выполнения работ по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 установлен, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии оснований для начисления договорной неустойки, в связи с чем, требование АО "ЧиркейГЭСстрой" к ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" о взыскании 2 141 687,09 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 является обоснованным.

Субподрядчик, заключая договор и приступая к выполнению работ, выступал как лицо, обладающее специальными познаниями и опытом в области выполнения данного вида работ. Доказательств реализации субподрядчиком прав, предусмотренных статьями 716 - 719 ГК РФ, уведомление о приостановлении работ в адрес подрядчика не направлялось, переписка сторон, свидетельствующая о наличии обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ, а также доказательства передачи места производства работ с опозданием, в материалах дела отсутствуют.

Ответчиком по встречному иску заявлено о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

Начисление неустойки на общую сумму договора без учета надлежащего исполнения части работ признано судом первой инстанции противоречащим принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Кодекса, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом.

Принимая во внимание, что пунктами 7.3 и 7.4.1 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 предусмотрен разный размер неустойки для истца и ответчика, а также ограничения в части начисления неустойки в случае нарушения подрядчиком сроков оплаты, стороны изначально поставлены в неравное положение, положения пункта 7.4.1 договора субподряда N 042/ПТО/СП-2022 (КГ) от 11.02.2022 ставят нарушившего обязательство субподрядчика в более неблагоприятное положение по сравнению с генподрядчиком, допустившим нарушение, то есть имеется дисбаланс условий ответственности сторон договора.

При наличии возражений ответчика по встречному иску АО "ЧиркейГЭСстрой" не было лишено возможности доказывать, что снижение неустойки не обеспечивает компенсацию потерь кредитора ненадлежащим исполнением обязательства, однако таких доказательств истцом по встречному иску в нарушение требований статьи 65 АПК РФ представлено не было.

Принимая во внимание критерии соразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства, высокий размер договорной неустойки 0,1% за каждый день просрочки, суд пришел к правильному выводу о необходимости снижения размера неустойки до двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения, до 440 072,69 руб. (из расчета: 5 949 130,80 руб. ? 2 ? 7,5% ? 180 дн. / 365  дн.).

Снижение в данном случае размера неустойки до двукратной ключевой ставки Банка России соответствует компенсационному характеру неустойки и согласуется со сложившейся судебной практикой (постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.08.2024 N Ф08-6985/2024 по делу N А63-13373/2023, от 23.05.2024 N Ф08-3501/2024 по делу N А20-4916/2023, от 11.04.2024 N Ф08-1044/2024 по делу N А32-37876/2022).

Таким образом, суд правомерно взыскал с ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" в пользу АО "ЧиркейГЭСстрой" неустойку в размере 440 072 руб. 69 коп. за период с 01.01.2023 по 29.06.2023.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

ООО "ЮгСтройКомплект-КМВ" просило взыскать 150 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя по договору оказания юридических услуг от 27.09.2023 N 1.

Оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, учитывая объем фактически оказанных заявителю представителем услуг, сложность дела, сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что заявленная сумма понесенных судебных расходов в размере 150 000 руб. является явно завышенной и не соответствует требованиям разумности и соразмерности, в связи с чем, подлежит снижению до 75 000 руб. (из расчета: 60 000 руб. за представление интересов в суде первой инстанции и 15 000 руб. за участие в судебном заседании при длительности судебного разбирательства свыше 3-х судодней).

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Апелляционная жалоба не содержит доводов по существу спора, заявляя о несогласии вынесенным решением, заявитель не раскрывает свою позицию относительно заявленного несогласия. Апелляционная жалоба не мотивирована, обстоятельства, вызывающие у ее подателя несогласие, в ней не указаны, а материалы дела не свидетельствуют об ошибочности выводов суда.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены либо изменения которого не имеется. Выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 266 - 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 по делу № А63- 1794/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через суд первой инстанции.      

         Председательствующий

Е.В. Жуков 

         Судьи

М.У. Семенов

Ю.Б. Луговая