АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

11.12.2020                                                                Дело № А62-5069/2020

Резолютивная часть решения объявлена 02.12.2020

Полный текст решения изготовлен 11.12.2020                         

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Безруковой И.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Муниципального бюджетного учреждения "Служба благоустройства" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области 1096725000723; ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРИЧАЛ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки в сумме 105309,15 руб., начисленной за период с 01.10.1019 по 22.11.2019,

при участии:

от истца: не явился, извещен надлежаще;

от ответчика: не явился, извещен надлежаще; 

У С Т А Н О В И Л:

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области  (далее – истец, Учреждение, заказчик) обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРИЧАЛ" (далее – ответчик, Общество, подрядчик) о взыскании неустойки в сумме 105309,15 руб., начисленной за период с 01.10.1019 по 22.11.2019.

       Ответчик отзыв на иск не представил.

       Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключён контракт от 22.07.2019 № 0163300041619000059 по

                                                            2

 благоустройству территории городского пляжа (далее – контракт) в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, которые являются неотъемлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы надлежащего качества в порядке и на условиях предусмотренных контрактом.

      Цена контракта составляет 9013623,51 руб. (пункт 2.1 контракта).

       Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного подрядчиком счета после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС -2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении 30 календарных дней с момента подписания указанных документов (пункт 2.4 контракта).

      Срок окончания работ – 30.09.2019 (пункт 4.1.2 контракта).

      В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (пункт 7.5 контракта).

      Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом в размере одной трехсотой действующей на дата уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком (пункт 7.6 контракта).

       В материалы дела предоставлена справка о стоимости выполненных работ от 22.11.2019 на сумму 4211274,18 руб., подписанная обеими сторонами.

      24.12.2020 контракт расторгнут по соглашению сторон.

       В связи с тем, что вышеперечисленные работы производились с просрочкой, заказчиком за  период с 01.10.1019 по 22.11.2019, начислены пени в сумме 105309,15 руб.

        Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

        Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, согласно статье 310 ГК РФ не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

                                                       3

       Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

      В соответствии со ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

       В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. По правовой природе неустойка является мерой имущественной ответственности.

     Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

      В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

      Как установлено судами, стороны в пункте 7.6 контракта согласовали, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом в размере одной трехсотой действующей на дата уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

      По расчету общая сумма неустойки 105309,15 руб. и исчислена на цену контракта 9013623,57 руб. за период с 01.10.2019 по 25.10.2019  из расчета 1/300  (52579,50 руб.)  и за период с 26.10.2019 по 21.11.2019 из расчета  1/300 ставки ЦБ РФ 6,5 %  (52579,50 руб.).

             Ответчик контррасчет не предоставили, ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявил.

       Проверив расчет истца, суд признал его неверным, не соответствующим позиции Президиума Верховного Суда РФ, изложенной в пункте 38 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 28.06.2017 (утв. Президиумом Верховного 

                                                          4

Суда РФ 28 июня 2017 года),  согласно которому в рассматриваемом случае подлежит применению ключевая ставка, установленная Банком России на дату исполнения обязательства.

     Следовательно, сумма  неустойки должна определяться исходя из ключевой ставки 6,5 % годовых, установленной Банком России с 28.10.2020 (Информация Банка России от 25.10.2019).

      Таким образом, сумма неустойки, подлежащая взысканию составляет 101553,49 руб. (9013623,51 руб. (цена контракта) х 6,5 % х 52 дня (период с 01.10.2019 по 21.11.2019)).

        В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

       Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРИЧАЛ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального бюджетного учреждения "Служба благоустройства" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области 1096725000723; ИНН 

<

***>) 101553,49 руб. неустойки, начисленной за период с 01.10.1019 по 22.11.2019, а также 4011 руб. в возмещение судебных расходов.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить Муниципальному бюджетному учреждению "Служба благоустройства" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области 1096725000723; ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 5352 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 467 от 17.04.2020.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу

                                           5

 в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья  Е.Г. Бажанова