Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

07 апреля 2021 года               Дело № А56-9543/2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нестерова С.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец Общество с ограниченной ответственностью "Лейпуриен Тукку" (адрес: 191119, 

<

...>, лит. А, пом. 15-Н, оф. 351, ОГРН: 

<

***>);

ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Климат Монтаж" (адрес: 115193, 

<

...>, эт. 4, кв. 43, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании 49 070 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 3 505 руб. 00 коп. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 08.08.2019 по 19.01.2021 на основании платежного поручения от 02.08.2019 № 4970 и досудебной претензии от 09.12.2020 о расторжении договора, поступившей в адрес ответчика 13.12.2020 согласно сведениям, размещенным на официальном сайта АО «Почта России» по почтовому идентификатору №19900453118070,

проверив произведенный истцом расчет неустойки за просрочку сдачи ответчиком работ по договору, суд признал его ошибочным ввиду неверного определения истцом как даты начала просрочки на стороне ответчика, так и даты окончания просрочки на стороне последнего, поскольку с учетом положений пунктов 4.1, 4.2 договора ответчик должен был сдать истцу работы не позднее 12.08.2019, а с 13.12.2020 (дата поступления в адрес ответчика претензии истца от 09.12.2020) договор между сторонами расторгнут, кроме того, при расчете неустойки истец вопреки положениям пункта 8.3 договора ошибочно производил его от суммы предварительной оплаты по договору, а не от цены договора, вместе с тем, поскольку заявленная истцом к взысканию с ответчика сумма неустойки с учетом установленного договором 10% ограничения от цены договора не превышает размер штрафных санкций, подлежащих начислению ответчику в соответствии с условиями договора, суд, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 450, 450.1, 453, 702, 708, 715, 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 70, 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ваш Климат Монтаж" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Лейпуриен Тукку" 52 575 руб. 00 коп., в том числе 49 070 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 3 505 руб. 00 коп. неустойки за период с 13.08.2019 по 12.12.2020, а также 2 103 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья С. А. Нестеров