АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-2559/2022

14 декабря 2022 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  07.12.2022

Полный текст решения изготовлен  14.12.2022

             Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «ЮГ-Авто-Метан» к ООО «Блокстрой» о взыскании     

При участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 03.10.2022;

от ответчика –  не явился;

Обстоятельства дела:  Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением о взыскании 800 000,00 руб. неосновательного обогащения. 

         Исковые требования обосновываются неосновательным обогащением. 

Ответчик отзыва на иск не представил.

Рассмотрев материалы дела, суд 

                                                      УСТАНОВИЛ:

«23» июня 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГ- АВТО-МЕТАН» (Далее - «Заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «БЛОКСТРОЙ» (Далее - «Подрядчик») заключен Договор № ЮАМ 08/06

Согласно п. 1.1. Договора. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы, указанные в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ.

Перечень работ по устройству асфальтобетонного покрытия дорог закреплен в Приложении №1 к настоящему Договору. Подрядчик должен был выполнить следующий перечень работ:

-кладка кафеля (стены, пол);

-установка унитазов;

-установка умывальников;

-укладка плитки тротуарной с материалом;

-установка бордюра с материалом.

В пункте 1.2 Договора содержится информация о сроках выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: 10 июня 2021 года.

Срок сдачи работ: 10 июля 2021 года.

В силу пункта 2.2. Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 133 333.33 (Сто тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки в течении 5 (Пяти) дней с момента подписания Договора. Оставшаяся сумма выплачивается по факту завершения Работ или этапов Работ, в день подписания Сторонами Акта приема-передачи Работ.

Заказчик произвел Подрядчику предоплату в размере 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается платёжным поручением № 75 от 10.06.2021 г. в сумме 300 000,00 рублей, платёжным поручением № 82 от 22.06.2021 г. в размере 500 000,00 рублей, а также актом сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2021 г. и актом сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2021 г.

ООО «БЛОКСТРОЙ» принятые на себя обязательства не исполнило, Работы согласно Договора и Приложения № 1 не выполнило.

«05» августа 2021 года ООО «ЮГ-АВТО-МЕТАН» в адрес ООО «БЛОКСТРОЙ» отправило официальное письмо исх. №05/1.08-21. в котором ООО «ЮГ-АВТО-МЕТАН» сообщает, что по состоянию на 05.08.2021г., работы Подрядчиком по Договору не выполнены, ежедневные (неоднократные) предупреждения по телефону и мессенджерам с фото и видео фиксацией не дают результатов выполнения работ, работников на объекте нет, работы не ведутся.

В соответствии с ПУНКТОМ 3.6. Договора, в случае обнаружения Заказчиком в ходе проверки выполнения Работ недостатков, влияющих на качество Работ и/или делающих невозможным либо затрудняющим использование в будущем результата Работ по назначению, Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков своими силами и за свой счет.

В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков либо неоднократного выявления недостатков в ходе 3-х и более проверок выполнения Работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от подрядчика возмещения всех прочиненных ему в связи с расторжением Договора убытков, включая упущенную выгоду и расходов, связанных с заключением нового Договора подряда на выполнение работ с третьим лицом на новых условиях и за новую цену.

Пунктом 3.7. Договора предусмотрено, что Подрядчик обязан выполнить работу в установленный Договором срок.

В силу пункта 3,8. Договора, Работа должна быть выполнена надлежащим качеством, согласно Приложения № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена ненадлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление выполненных Подрядчиком Работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В пункте 3.10. Договора указано, что сдача-приемка результатов выполненных Работ (этапа Работ) производится путем составления обеими Сторонами передаточного документа в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента уведомления Подрядчиком о завершении Работ (этапа Работ).

Согласно пункта 3.15. Договора, Подрядчик предоставляет гарантию на результат выполненной Работы в течении 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненной работы.

В силу пункта 4,1. Договора, качество результата Работ, предусмотренных пунктом 1.1. Договора, должно соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид Работ, а в случае обязательной сертификации подтверждаться сертификатами качества и сертификатами соответствия.

В соответствии с пунктом 4.2. Договора, недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счёт в течении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о наступлении гарантийного случая.

Так, ООО «БЛОКСТРОЙ», в силу пунктов 1.2., 3.7. и 3.10. Договора, обязано было выполнить Работы, указанные в Приложении № 1 к Договору до 10 июля 2021 года, а также сдать Заказчику результат выполненных Работ путем составления передаточного документа в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента уведомления Заказчика о завершении Работ (этапа Работ).

Однако, ООО «БЛОКСТРОЙ» свои обязанности по выполнению Работ в указанный срок, а именно, до 10.07.2021 г., не исполнило. Передаточный документ составлен не был.

Претензией истец отказался от договора и потребовал возврата денежных средств.  

Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Ответчиком изложенные обстоятельства не оспариваются.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, исковые требования законные,  и подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Блокстрой» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «Юг-Авто-Метан» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) 800 000,00 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 19 000,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                     В.И. Гайворонский