Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-218757/23-63-999

г. Москва

30 ноября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2023года

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2023 года

Арбитражный суд  г. Москвы

в составе судьи Ликшикова Э.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ", 107031, 

<

...>, СТР.5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: 

<

***>

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", 123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2006, ИНН: 

<

***>

о взыскании 1360889 руб 02 коп.

при участии: согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ", 107031, 

<

...>, СТР.5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: 

<

***> обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", 123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2006, ИНН: 

<

***> о взыскании 1360889 руб 02 коп., составляющих в том числе: задолженность в размере 696932 руб. 28 коп., неустойку по состоянию на 27.09.2023 в размере 250082  руб. 78 коп., неустойку за период с 28.09.2023 по дату фактического исполнения обязательства, гарантийное удержание в размере 126266 руб. 24 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 27.09.2023 в размере 9928 руб. 32 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28.09.2023 по дату фактического исполнения обязательства (с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ уточнения исковых требований).

         В судебном заседании в порядке ст.163 АПК РФ  объявлялся перерыв до 22.11.2023 до 13 час. 20 мин. 

         Представитель исцта поддержал исковые требования в полном объеме.          

         Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам отзыва.  

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителей сторон, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материала дела между ООО «Комплекс «Серебряный бор», выступавшим на стороне заказчика, и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», выступавшим на стороне генерального подрядчика, был заключен Договор от 01.04.2022 № 21-22КПП, по которому АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» приняло обязательства выполнить комплекс строительных работ на контрольно-пропускном пункте конноспортивного комплекса и передать результат таких строительных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор», а ООО «Комплекс «Серебряный бор» приняло обязательства принять такой результат строительных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и оплатить выполненные строительные работы АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ».

Во исполнение Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП:

АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»: выполнило строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, и передало такие строительные работы ООО «Комплекс «Серебряный бор», что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.04.2022 № 1, Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.06.2022 № 2 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 3; выставило соответствующие счета и счета-фактуры ООО «Комплекс «Серебряный бор», что подтверждается Счетом от 30.04.2022 № 67, Счетом от 30.06.2022 № 107, Счетом от 30.09.2022 № 121, Счетом-фактурой от 30.04.2022 № 108, Счетом-фактурой от 30.06.2022 № 143 и Счетом-фактурой от 30.09.2022 № 174;

ООО «Комплекс «Серебряный бор»: приняло строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» без указания на существование отступлений Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП и на иные недостатки в выполненных строительных работах, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.04.2022 № 1, Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.06.2022 № 2 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 3; приняло результат выполненных строительных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта от 30.09.2022 № 3 и Актом приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию от 30.09.2022.

С принятием строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникли обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ. Причем в силу пункта 4.3. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП, соответствующие части такой денежной суммы подлежали уплате АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ООО «Комплекс «Серебряный бор» в оплату выполненных строительных работ в течение 10 календарных дней со дней, следующих за днями выставления, соответственно, Счета от 30.04.2022 № 67, Счета от 30.06.2022 № 107 и Счета от 30.09.2022 № 121 ООО «Комплекс «Серебряный бор» АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ».

ООО «Комплекс «Серебряный бор» прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ, которые несло ООО «Комплекс «Серебряный бор», в части, равняющейся 252 532,48 рубля, удержав денежную сумму, равняющуюся 252 532,48 рубля, у АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в качестве гарантийного резерва, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.04.2022 № 1, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2022 № 2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 № 3. После таких удержаний ООО «Комплекс «Серебряный бор» продолжило нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 4 798 117,21 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 4 798 117,21 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ, которые несло ООО «Комплекс «Серебряный бор», в части, равняющейся 4101184,93 рубля, уплатив денежную сумму, равняющуюся 4 101 184,93 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ, что подтверждается Платежным поручением от 06.07.2022 № 5359, которое прилагаются к данному Исковому заявлению. После такого платежа ООО «Комплекс «Серебряный бор» продолжило нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 696 932,28 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 696 932,28 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ. Как следствие, по состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» имеет долг, равняющийся 696 932,28 рубля, перед АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Калькуляцией величины долга по оплате выполненных строительных работ от 27.09.2023.

Приняв строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» без указания на существование отступлений Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП и на иные недостатки в выполненных строительных работах, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, согласилось с тем, что АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» выполнило строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, и передало такие строительные работы и результат этих строительных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор». Следовательно, на основании пункта 1 статьи 746 ГК ООО «Комплекс «Серебряный бор» стало должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ в сроки, определенные в пункте 4.3. Договора от 01.04.2022 №21-22КПП.

Прекратив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 10 966 046,56 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ только в часто, равняющейся 4 353 717,41 рубля, и не исполнив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 696 932,28 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ по состоянию на 27.09.2023, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, односторонне отказалось от исполнения обязательства, что является недопустимым в силу пункта 1 статьи 310 ГК. Следовательно, согласно пункту 1 статьи 746 ГК, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 696 932,28 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ.

Между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» достигнуто согласие о сроке оплаты выполненных работ.

Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется. Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом, пропорционально суммы, авансового платежа. (пункт 4.3. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом, или договором.» (пункт 1 статьи 329 ГК).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. (пункт 1 статьи 330 ГК).

Между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» существует согласие о договорной неустойке, которую ответчик должно уплатить истцу в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, выполненных работ по настоящему Договору на срок более тридцати дней Генеральный подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Генеральному подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.» (подпункт 19.3.1. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП).

С принятием выполненных строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»   в   оплату   выполненных   строительных   работ  в  сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП, а именно - в течение 10 календарных дней со дней, следующих за днями выставления, соответственно Счета от 30.04.2022 № 67, Счета от 30.06.2022 №107 и Счета от 30.09.2022 №121 ООО «Комплекс «Серебряный бор» АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до, соответственно, 10.05.2022,10.07.2022 и 10.10.2022, что подтверждается Договором от 01.04.2022 № 21-22КПП, Счетом от 30.04.2022 № 67, Счетом от 30.06.2022 № 107 и Счетом от 30.09.2022 № 121.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП. Не существует никаких доказательств обратного.

В заключенном между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» Договоре от 01.04.2022 № 21-22КПП предусматривается договорная неустойка, которую ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, что подтверждается подпунктом 19.3.1. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 527 772,18 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату предусмотренной в пункте 19.3.1. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных строительных работ в течение периода времени, начиная с 11.05.2022 и заканчивая 27.09.2023, что подтверждается Калькуляцией величины договорной неустойки от 27.09.2023.

He исполнив обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 5 050 649,69 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП, на основании пункта 1 статьи 329 и пункта 1 статьи 330 ГК и подпункта 19.3.1. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 527 772,18 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных строительных работ в течение периода времени, начиная с 11.05.2022 и заканчивая 27.09.2023.

Кроме того, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить исчисляемую, исходя из ставки, равняющейся 0,1% за каждый день просрочки, денежную сумму АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» за просрочку оплаты выполненных работ в течение периода времени, начиная с 28.09.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 696 932,28 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в оплату выполненных строительных работ.

Также, между ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» существует согласие о сроке возвращения 1-й части гарантийного резерва.

Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) - в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

оставшаяся часть в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.» (пункт 4.2. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим. Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.» (пункт 1 статьи 310 ГК).

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приняло результат выполненных строительных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта от 30.09.2022 № 3 и Актом приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию от 30.09.2022.

С принятием результата выполненных строительных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» у ООО «Комплекс «Серебряный бор» возникла обязанность уплатить денежную сумму, равняющуюся 126 266,24 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва. Причем в силу пункта 4.2. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП, такая денежная сумма подлежала уплате АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» ООО «Комплекс «Серебряный бор» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта приемки законченного строительством объекта от 30.09.2022 № 3 и Акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию от 30.09.2022 между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до 10.10.2022.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» не исполнило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 126 266,24 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва и, как следствие, ООО «Комплекс «Серебряный бор» имеет долг, равняющийся 126 266,24 рубля, перед АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», что подтверждается Калькуляцией величины долга по возвращению 1-й части гарантийного резерва от 27.09.2023.

Приняв результат выполненных строительных работ от АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, согласилось с тем, что АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» передало результат выполненных строительных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор». Следовательно, в силу пункта 4.2. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП ООО «Комплекс «Серебряный бор» стало должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 126 266,24 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, определенный в пункте 4.2. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП, а именно - в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта приемки законченного строительством объекта от 30.09.2022 № 3 и Акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию от 30.09.2022 между ООО «Комплекс «Серебряный бор» и АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ», то есть до 10.10.2022.

Не исполнив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 126 266,24 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-й части гарантийного резерва по состоянию на 27.09.2023, ООО «Комплекс «Серебряный бор», тем самым, односторонне отказалось от исполнения обязательства, что является недопустимым в силу пункта 1 статьи 310 ГК. Следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 126 266,24 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-й части гарантийного резерва.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.» (пункт 1 статьи 395 ГК).

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.» (пункт 3 статьи 395 ГК).

В гражданском законодательстве предусматриваются проценты за пользование чужими деньгами, которые ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить ООО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»  в случае нарушения срока возвращения 1-й части гарантийного резерва.

По состоянию на 27.09.2023 ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 928,32 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 11.10.2022 и заканчивая 27.09.2023, что подтверждается Калькуляцией величины процентов за незаконное пользование чужими деньгами от 27.09.2023.

Не исполнив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 126 266,24 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, предусмотренный в пункте 4.2. Договора от 01.04.2022 № 21-22КПП, на основании пункта 1 статьи 395 ГК ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 928,32 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 11.10.2022 и заканчивая 27.09.2023.

Кроме того, ООО «Комплекс «Серебряный бор» должно уплатить исчисляемую, исходя из ключевой ставки, денежную сумму АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва, начиная с 28.09.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 126 266,24 рубля, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в возвращение 1-ой части гарантийного резерва.

Доводы отзыва ответчика исследованы судом и признаны несостоятельными в виду следующего. 

Ответчик ссылается на пункт 9.1 и 17.2 Договора, приводит довод о том, что по мнению АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» сдача результата работ в окончательном виде является Акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию от 30.09.2022.

АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» подписали 30.09.2022 Акт №3 приемки законченного строительства объекта, который со стороны ООО «Комплекс «Серебряный бор» был подписан генеральным директором ООО «Комплекс «Серебряный бор».

Согласно пункту 15.1 Договора, сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленных за отчетный период на основании исполнительной документации и локальных смет к исполнительной документации. АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «Комплекс «Серебряный бор» осуществляли сдачу-приемку выполненных работ согласно пункту 15.1 Договора, что подтверждается подписанными Актами по форме № КС-2, КС-3, что подтверждает принятие ООО «Комплекс «Серебряный бор» выполненных АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» комплекс строительно-монтажных работы на объекте КПП на территории «Конноспортивного комплекса» по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, владение «Изумрудный лес». Следовательно, такой довод ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приводит довод о том, что с учетом положений пункта 19.3.1 Договора, АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» неправильно указало начало течения сроков возникновения задолженности. Однако, оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально суммы авансового платежа.» (пункт 4.3 Договора). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по Договору на срок более тридцати дней Генеральный подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Генеральному подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки (пункт 19.3.1 Договора). Иными словами, оплата выполненных работ должна быть произведена в течение десяти календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально суммы авансового платежа, но у Заказчика есть не более тридцати дней на оплату выполненных строительно-монтажных работ без начисления процентов. Если в течение тридцати дней Заказчик не оплатит выполненные работы, проценты начисляются с 11 дня, следующего за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально суммы авансового платежа. Кроме того, ООО «Комплекс «Серебряный бор» ошибочно указывает конец исчисления сроков процентов 02.08.2023, в то время как АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» указывало в своем расчете 27.09.2023 (дату подачи Иска). 02.08.2023 АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» указывало в Калькуляции величины договорной неустойки от 02.08.2023 при подаче Претензии ООО «Комплекс «Серебряный бор». Соответственно, такой довод ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

  Также ответчик ссылается на то, что подпадает под мораторий, введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497, при этом не ссылается ни на одно доказательство того, что ООО «Комплекс «Серебряный бор» пострадало от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497. 

ООО «Комплекс «Серебряный бор» приводит довод о том, что АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» не провело испытаний инженерных систем, которые АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» должно было провести в соответствии с Договором. Согласно Реестру №1, Акту приемки сетей СКУД КПП от 26.08.2022, Акту приемки сетей связи КПП от 26.08.2022, Акту приемки сетей электромонтажных работ КПП от 26.08.2022, Акту приемки сетей охранного телевидения КПП от 26.08.2022, Акту приемки сетей видеонаблюдения Парковки от 26.08.2022, Акту приемки наружных сетей связи КПП от 26.08.2022, которые прилагаются к данным Возражениям, ООО «Комплекс «Серебряный бор» провело приемку выполненных работ, которые выполнены согласно утвержденному проекту. Соответственно, такой довод ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

Также ООО «Комплекс «Серебряный бор», ссылаясь на пункты 4.2. и 19.8. Договора, приводит довод о том, что на гарантийный резерв проценты не подлежат начислению. ООО «Комплекс «Серебряный бор» неправильно толкует пункты 4.2 и 19.8 Договора, которые касаются только процентов за законное пользование чужими деньгами и не касаются процентов за незаконное пользование чужими деньгами. Более того, обязанность должника уплачивать проценты за незаконное пользование чужими деньгами не может быть отменена соглашением сторон, поскольку пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не является диспозитивным. В Иске АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» просит Суд, в частности, присудить ООО «Комплекс «Серебряный бор» к уплате процентов за незаконное пользование чужими деньгами, а не процентов за законное пользование чужими деньгами. Следовательно, такой довод ООО «Комплекс «Серебряный бор» не содержит основания для оставления иска без удовлетворения.

             Учитывая вышеизложенное, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

             В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.    

             Руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 395, 702, 711  ГК РФ, ст. ст. 41, 49, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд                    

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", 123103, 

<

...>, КАБИНЕТ 203, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2006, ИНН: 

<

***> в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ", 107031, 

<

...>, СТР.5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: 

<

***> задолженность в размере 696932 (Шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать два) руб. 28 коп., неустойку по состоянию на 27.09.2023 в размере 250082 (Двести пятьдесят тысяч восемьдесят два) руб. 78 коп., неустойку за период с 28.09.2023 по дату фактического исполнения обязательства, гарантийное удержание в размере 126266 (Сто двадцать шесть тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 24 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 27.09.2023 в размере 9928 (Девять тысяч девятьсот двадцать восемь) руб. 32 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28.09.2023 по дату фактического исполнения обязательства, а также расходы по госпошлине в размере 23832 (Двадцать три тысячи восемьсот тридцать два) руб. 00 коп.

Возвратить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ", 107031, 

<

...>, СТР.5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: 

<

***> из средств федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину п/п №875 от 25.09.2023 в размере 2777 (Две тысячи семьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

 СУДЬЯ                        Э.Б. Ликшиков