Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-14564/2018

19 октября 2020 г.

г. Ханты-Мансийск

 

 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Тихоненко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Югорского фонда  капитального ремонта многоквартирных домов (628011, Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, 

<

...>, ОГРН 

<

***> от  17.12.2013, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительное управление № 14» (628450, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Сургутский район, поселок городского типа Барсово, улица 5-я Левая, дом 4, ОГРН  

<

***> от 20.04.2015, ИНН 

<

***>) об устранении недостатков выполненных  работ,  

с участием представителей сторон: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2020 № 4, ФИО3 по  доверенности от 03.08.2020 № 45, ФИО4 по доверенности от 16.10.2020 № 9,  от ответчика: ФИО5 по доверенности от 19.09.2019,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

РЕШИЛ:

исковые требования Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов  удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №  14» в течение месячного срока после вступления решения суда в законную силу  устранить недостатки выполненных работ по кровле в объеме 1 172 кв.м в  многоквартирном доме № 41 по ул. Энергетиков в г. Сургуте, а именно:  

 - демонтировать неармированную стяжку и произвести армирование всей  поверхности кровли многоквартирного дома;  

 - восстановить стяжку на карнизном участке кровли многоквартирного дома;  - выполнить работы по гидроизоляции всей поверхности кровли; 

 - выполнить примыкания к канализационным стоякам (выступающим элементам  кровли) без дополнительных слоев и без заведения рулонного слоя на определенную  высоту не менее чем на 250 мм - в соответствии с проектным решением и технологией  устройства рулонной кровли;  

 - выполнить разуклонку карнизной части керамзитобетоном в соответствии с  проектом в объеме 9,4 м3  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление   № 14» в пользу Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов 6 000  рублей - расходов по государственной пошлине.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  

дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Судья Т.В. Тихоненко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 01.08.2019 5:40:06

Кому выдана Тихоненко Татьяна Викторовна