И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 

 г. Москва                                                                             Дело № А40-141593/23-151-1142

01.03.2024 года                                                                                      

Резолютивная часть решения объявлена 08.02.2024

Решение в полном объеме изготовлено 01.03.2024

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН: 

<

***>)

к ответчику: АО «ГУОВ» (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 9 888 334,35 руб.

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 22.02.2023

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 19.10.2023 

 

У С Т А Н О В И Л:

С учетом принятых судом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, иск заявлен о взыскании задолженности в размере 8 547 364 руб. 19 коп., процентов в размере 1 340 970 руб. 16 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 8 547 364 руб. 19 коп. начиная с 09.02.2023 по день фактической оплаты, исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей в соответствующие периоды. 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.  

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

12 ноября 2015 г. между АО «ГУОВ» (генподрядчик) и ООО «ВСК» (подрядчик) заключен договор № 1516187388342090942000000/2015/2-765 на полный комплекс работ по объекту: «Устройство тентовых мобильных укрытий с учетом подготовки площадок под установку ТМУ, н.п. Каблуково (ДСК Слава), Щелковский р-н МО» (шифр объекта Т-41/15-103) в редакции дополнительных соглашений №№1-3 (далее -договор).

Договор заключён в рамках исполнения государственного оборонного заказа (идентификационный код 15161873 88342090942000000).

Согласно пункту 2.1 договора, генподрядчик осуществляет финансирование, оказывает необходимое содействие подрядчику и контроль за выполнением работ, а подрядчик - выполняет работы по обмерам, обследованиям, инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, по разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы в соответствии с условиями договора, Техническим заданием (Приложение №4 к договору), ведение авторского надзора и работы(услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями договора (далее - работы).

Цена договора установлена в п. 3.1. договора в размере 26 253 458 (двадцать шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб. 00 коп. и включает в себя НДС, исчисленный по ставке, установленной п.3 ст. 164 НК РФ на дату выполнения работ (в редакции дополнительного соглашения №3 от 20.12.2018).

В цену договора включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта Оборудования, конструкций, материалов, поставляемых подрядчиком (п. 3.2 договора).

В период с 15.04.2016 по 16.02.2018 генподрядчиком оплачен аванс на общую сумму 16 171 001,57 руб. (п. 4.13 договора), что составило 61,59 % от цены договора (по платежным поручениям № 37117 от 15.04.2016 на 13 126 729,00 руб.; №9273 от 16.02.2018 на 3 044 272,57 руб.)

На основании соглашения об оплате генподрядных услуг в размере 5% от стоимости выполненных работ (п. 4.21 договора) сторонами подписаны акты оказания генподрядных услуг на общую сумму 1 300 966,63 руб. (№ 31152 от 12.11. 2019 на сумму 177 871,24 руб.; № 1983 от 07.02.2023 на сумму 1 086 705,84 руб.; № 8727 от 18.04.2023 на сумму 28 348,55 руб.; №8728 от 21.04.2023 на сумму 8 041,00 руб.), оплата которых произведена путем зачета причитающихся подрядчику платежей за выполненные работы.

По совокупности вышеуказанных сумм генподрядчиком осуществлена оплата по договору в размере 17 471 968,20 руб., что составило 66,55% от цены договора.

ООО «ВСК» свои обязательства по договору выполнило в полном объеме и надлежащим качеством, что подтверждают следующие документы: подписанные уполномоченными органами Министерства обороны РФ,:

-положительное заключение Государственной экспертизы МО РФ проектной документации и результатов инженерных изысканий без сметы на строительство №50-1-4-0034-19 от 19.09.2019;

-положительное заключение Государственной экспертизы МО РФ проверки достоверности определения сметной стоимости строительства №50-1-3-0003-21 от 28.01.2021;

-акт приемки законченного строительством объекта (форма №КС-14), утвержденный 01.07.2022;

а также подписанные между генподрядчиком и подрядчиком:

-акты индивидуальных испытаний систем автоматического пожаротушения, электромонтажных работ и оборудования, охранной сигнализации, отопления, пожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, подписанные в 2020г.;

-акты приемки оборудования после комплексного опробования электромонтажных работ, автоматической установки водяного пожаротушения, системы отопления, системы вентиляции и дымоудаления, охранной сигнализации, пожарной сигнализации, подписанные в 2022 г.;

-Итоговый акт приемки выполненных работ от 21.04.2023.

Общая стоимость выполненных подрядчиком работ по договору составила 26 019 332,39 руб. и подтверждена подписанными АО «ГУОВ» и ООО «ВСК» в двустороннем порядке Актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справками о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и иными документами бухгалтерского учета, а именно:

-КС-3 №1, КС-2 №№1-2 от 29.10.2019 на сумму 3 557 424,60 руб.;

-КС-3 №2, КС-2 №3-11, от 07.02.2023 на сумму 21 734 116,82 руб.

-КС-3 №3, КС-2 №3 от 18.04.2023, Акта №1 сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ на сумму 566 970,97 руб.;

-КС-3 №4, КС-2 №12 от 21.04.2023 на сумму 160 820,00 руб.

-счета - фактуры №№ 489/1 от 29.10.2019; 29 от 07.02.2023; 92/1 от 18.04.2023; 98 от 21.04.2023.

Изменение стоимости работ, выполненных подрядчиком, в сторону уменьшения от цены договора, произошло по причине уменьшения фактических объемов работ по устройству проездов и площадок, протяженности инженерных сетей, определенных в договоре в ориентировочном объеме (п. 1.9 Технического задания - Приложение №4 к договору).

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, /Строительный результат работ по договору в период 18-19 августа 2022г. зарегистрирован на праве собственности государства под кадастровыми номерами: 50:14:0020351:680; 50:14:0020351:681; 50:14:0020351:682; 50:14:0020351:679; 50:14:0020351:677.

При соотнесении стоимости выполненных работ, поставленного оборудования, с учетом оплаченного аванса и иных произведенных в двустороннем порядке финансовых операций, задолженность АО «ГУОВ» по окончательной оплате в пользу ООО «ВСК» по договору составила 8 547 364,19 руб. (26 019 332,39-17 471 968,20 = 8 547 364,19).

В п. 5.2 договора стороны согласовали следующие сроки завершения отдельных этапов работ: инженерные изыскания - 15.11.2015; разработка проектной, градостроительной документации - 01.12.2015; получение положительного заключения государственной экспертизы - 20.12.2015;, разработка рабочей документации -15.01.2016; выполнение строительно-монтажных работ - 27.03.2016; подписание итогового акта приемки выполненных работ - 06.04.2016.

Пунктами 2.1, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12 договора установлена обязанность генподрядчика предоставить необходимую для выполнения работ исходно-разрешительную документацию, оказывать подрядчику необходимое содействие по вопросам, непосредственно связанным с предметом договора, решение которых возможно только при участии генподрядчика,

ООО «ВСК» допущено нарушение установленных сроков работ по договору по вине АО «ГУОВ», предоставившего встречное исполнение за пределами, установленных сроков для исполнения обязательств подрядчиком. Подрядчик дважды уведомлял генподрядчика о приостановлении работ по причине непредставления исходно-разрешительной документации (письмо от 15.03.2016 исх. №427/УКС), а также неоказания содействия по своевременному выполнению ПАО «МОЭСК» работ, необходимых для подключения энергопринимающих устройств Объекта Т-41/15-103, подачи энергоносителей по постоянной схеме и выполнения пуско-наладочных работ (письмо от 19.02.2021 исх.№119/21/УКС).

 Пунктом 10 технических условий №В-18-00-900571/102/1 на технологическое присоединение Объекта Т-41/15-103 к электрическим сетям, выданных 05.04.2018, предписано ПАО «МОЭСК» выполнить строительство КВЛ и КТП. Однако указанные работы были завершены лишь в 2022г., по результатам которых между Министерством обороны РФ и ПАО «МОЭСК» подписаны акт о выполнении технических условий от 10.02.2022 и акт об осуществлении технологического присоединения от 15.02.2022.

После подачи энергоносителей по постоянной схеме на построенный объект, подрядчик выполнил предусмотренные договором комплексные испытания смонтированного оборудования, принятые генподрядчиком по актам (п. 7.1.2 договора, акты приемки оборудования после комплексного опробования от 2022г.)

Таким образом, ООО «ВСК» при исполнении договора № 1516187388342090942000000/2015/2-765 от 12.11.2015, допустило невиновное нарушение установленных сроков работ по причинам, устранение которых зависело исключительно от АО «ГУОВ».

Порядок проведения расчетов определен сторонами в разделе 4 договора, согласно которому:

-оплата выполненных Подрядчиком работ по проведению обследований, инженерных изысканий, разработке проектной документации, осуществляется Генподрядчиком после получения положительного заключения государственной /Экспертизы проектной документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа «Разработка проектной документации» (п. 4.4 договора);

-оплата выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ производится генподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания генподрядчиком оформленных подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Актов о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение №3 к договору), оригиналов счета и счета-фактуры (п. 4.6 договора);

-оплата выполненных подрядчиком работ производится генподрядчиком в порядке, установленном договором до предела, не превышающего 95% от цены договора. Оставшаяся часть цены договора выплачивается при окончательном расчете (п. 4.9 договора).

-окончательный расчет по договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Итогового акта приемки выполненных работ (п.4.10 договора).

Акт сдачи-приемки выполненных работ №1 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту подписан генподрядчиком 18.04.2023, по истечении 2х лет после выдачи положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства №50-1-3-0003-21 от 28.01.2021.

Акты выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на полный комплекс подписаны генподрядчиком в период с 07.02.2023 по 21.04.2023, по истечении более 6 месяцев после подписания приемочной комиссией и утверждения акта формы КС-14 01.07.2022, а также регистрации права собственности РФ на строительный результат выполненных работ 18-19 августа 2022.

С учетом толкования пунктов 12.12., 12.13, 12.14, 12.15 договора, подписание Итогового акта приемки выполненных работ в силу ст. 190 ГК РФ не является событием, которое должно неизбежно наступить и зависит от действий генподрядчика.

Условия договора определяются но усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Договор № 1516187388342090942000000/2015/2-765 от 12.11.2015 заключен в соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе». Правовое регулирование отношений в сфере государственного оборонного заказа состоит из норм императивного характера, ограничивающих свободу усмотрения сторон. Сам проект договора, в силу прямого указания названного Закона является элементом процедуры размещения государственного оборонного заказа, установленной законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Установленные законодательством ограничения лишили ООО «ВСК» возможности выразить собственную волю в отношении условий, невыгодных для контрагента, от которых победитель размещения заказа не мог отказаться при подписании договора № 1516187388342090942000000/2015/2-765 от 12.11.2015.

Подписание форм КС-2, КС-3 и Итогового акта приемки выполненных работ по договору в силу ст. 190 ГК РФ не является событием, которое должно неизбежно наступить и зависит от действий АО «ГУОВ».

В силу п. 17.1 договора, при нарушении установленных условий стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и договором.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе предъявить генподрядчику к уплате, а генподрядчик обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. В договоре стороны не предусмотрели ответственность генподрядчика перед подрядчиком за несвоевременную оплату выполненных работ.

На основании приведенных требований закона, договора и фактических обстоятельств дела, ООО «ВСК» считает, что момент оплаты за выполненные проектно-изыскательские работы по договору наступил по истечении 30 календарных дней после выдачи положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства №50-1-3-0003-21 от 28.01.2021 и определяет его с 28.02.2021; момент оплаты за выполненные строительно-монтажные работы наступил по истечении 30 календарных дней после утверждения Акта формы КС-14 01.07.2022 и определяет его с 01.08.2022.

Истцом произведен расчет процентов в размере 1 340 970 руб. 16 коп. 

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд с заявленными требованиями. 

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 395, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

По результатам исследования совокупности представленных в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца к ответчику, и о несостоятельности доводов возражений последнего, в связи с чем, с ответчика в пользу истца суд взыскивает задолженность в размере 8 547 364 руб. 19 коп.

Проверив представленный истцом расчет процентов, суд признает расчет методологически и арифметически верным. 

При этом, поскольку до настоящего времени денежное обязательство должником не исполнено,  в силу ст. 395 ГК РФ, п. 65 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016г. проценты подлежат уплате до момента фактического исполнения обязательства.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании 8, 10, 12, 309, 310, 395, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АО «ГУОВ» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 8 547 364 руб. 19 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 340 970 руб. 16 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 8 547 364 руб. 19 коп. в порядке ст. 395 ГК РФ с 09.02.2023 по дату фактической оплаты долга, а так же расходы по оплате госпошлины в размере 68 991 руб.

Взыскать с АО "ГУОВ"  (ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 3 451 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                    К.В. Вольская