Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-12647/2020

05 октября 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РЕЛЬЕФ" (195299, Санкт-Петербург город, проспект Гражданский, дом 131, литер А, помещение 17-Н, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД" (199106, Санкт-Петербург город, улица Наличная, дом 6, литер И, кабинет 306А, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 20.05.2019 

- от ответчика: не явился (извещен) 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "РЕЛЬЕФ" (далее – ООО "РЕЛЬЕФ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРОЗАПАД" (далее – ООО "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРОЗАПАД") о взыскании 3 739 648,93 руб. неустойки за период с 23.01.2018 по 22.01.2020 по договору подряда от 15.12.2017 № 15/12-1-2017-Д (далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "РЕЛЬЕФ" (подрядчиком) и ООО "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРОЗАПАД" (генподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого подрядчик обязуется произвести комплекс работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора, а генподрядчик обязуется их принять в установленном Договором порядке и оплатить. 

Согласно п. 1.2. Договора в соответствии с рабочей документацией генподрядчика подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по устройству железобетонного каркаса здания на объекте Деловой комплекс «Морская резиденция», расположенном по адресу: 

<

...> (объект), согласно ведомости договорной цены (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик выполняет работы, как с использованием своих материалов, таки материалов генподрядчика (давальческое сырье).

По пункту 1.3. Договора работы по Договору считаются полностью выполненными и завершенными после подписания обеими сторонами итогового акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору в целом (по форме, определенной приложением № 6 к Договору) в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по этапу, предусмотренному в приложении № 2 к Договору.

В силу п. 3.1. Договора в редакции дополнительного соглашения от 15.09.2018 № 2 к Договору общая стоимость работ, указанных в п. 1.2. Договора 71 033 078,93 руб.

В соответствии с пунктом 4.1. Договора начало производства работ по Договору – день, следующий за днем передачи по акту подрядчику фронта работ по этапу.

По п. 3 Дополнительного соглашения от 15.09.2018 № 2 к Договору срок окончания работ по Договору стороны определили 15 сентября 2018 года.

В силу п. 7.2. Договора за просрочку оплаты платежей за выполненные работы по этапу и в целом по Договору, генподрядчик уплачивает подрядчику пени в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств по оплате.

Подрядчик выполнил работы по Договору согласно актам о приемке выполненных работ от 29.12.2017 № 1 на сумму 2 293 496,86 руб., 31.01.2018 № 2 на сумму 16 123 686,80 руб., 30.03.2018 № 3 на сумму 8 310 950,31 руб., 30.04.2018 № 4 на сумму 7 967 973,78 руб., 20.05.2018 № 5 на сумму 7 303 656,45 руб., 20.05.2018 № 6 на сумму 7 343 61,47 руб., 19.06.2018 № 7 на сумму 7 534 163,70 руб., 02.07.2018 № 8 на сумму 8 858 781,60 руб., 24.08.2018 № 9 на сумму 4 933 393,76 руб., 15.09.2018 № 10 на сумму 363 334,20 руб. 

В связи с неоплатой ООО "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРОЗАПАД" долга за выполненные работы ООО "РЕЛЬЕФ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании 9 169 282,17 руб. задолженности по Договору. 

Решением от 28.11.2019 по делу № А56-90953/2019 иск удовлетворен в полном объеме.

ООО "РЕЛЬЕФ" направило ООО "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРОЗАПАД" претензию от 24.01.2020 с требованием оплаты 3 744 006,58 руб. неустойки на основании пункта 7.2 Договора.

Отказ ООО "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРОЗАПАД" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "РЕЛЬЕФ" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт выполнения работ по Договору подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.11.2019 по делу № А56-90953/2019.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Ответчик в суд отзыв на исковое заявление, доказательств оплаты неустойки не представил.

Проверив расчет неустойки, суд признает его верным.

Требования взыскании 3 739 648,93 руб. неустойки подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РЕЛЬЕФ" 3739648,93 руб. неустойки, 41698 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "РЕЛЬЕФ" из федерального бюджета 22 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 11.02.2020 № 241.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.