АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

02 октября 2019 года

Дело № А33-23715/2019

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 26 сентября 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 02 октября 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Антроповой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АлПластСервис" (ИНН 2466194436, ОГРН 1182468047629, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Енисей-лифтстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности, неустойки,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – общества с ограниченной ответственностью «СРК»,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 19.06.2019, личность удостоверена удостоверением адвоката,

в отсутствие ответчика и третьего лица,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "АлПластСервис"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Енисей-лифтстрой" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору в размере 9 346 162 руб. 40 коп., неустойки в размере 1 040 946 руб. 66 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.08.2019 возбуждено производство по делу.

Определением от 03.09.2019 суд, в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании первой инстанции.

Определением от 03.09.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – общество с ограниченной ответственностью «СРК».

Ответчик, третье лицо в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика, третьего лица.

В материалы дела от ответчика через систему «Мой Арбитр» поступили дополнительные пояснения к исковому заявлению об исключении из числа доказательств договора, которые приобщены к материалам дела, в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 12 час. 15 мин. 26 сентября 2019 года  в целях подготовки истцом уточнения исковых требований, о чем вынесено протокольное определение. Лицам, участвующим в деле, сообщено, что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания № 309 здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу 

<

...>.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием того же представителя истца, в отсутствие ответчика и третьего лица.

Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований, представил суду ходатайство об уточнении размера исковых требований, согласно которому истец просит суд взыскать с ответчика задолженность по договору подряда в размере 7 641 546 руб. 16 коп., неустойку в размере 847 008 руб. 94 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить предмет и основание заявленного требования, уменьшить или увеличить размер исковых требований.

Поскольку уменьшение размера заявленного требования не противоречит закону и не нарушает права других лиц, на основании части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принял уменьшение размера исковых требований.

Представитель истца исковые требования поддержал с учетом принятого судом уточнения исковых требований.

Суд  исследовал письменные материалы дела.

Ответчик наличие задолженности по спорному договору не оспорил, представил контррасчет исковых требований.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "АлПластСервис (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Енисей-лифтстрой" (заказчик) подписан договор № 1-18 от 25.08.2018 на выполнение строительных работ на объекте по адресу: «г. Красноярск, жилые дома в Октябрьском районе ул. Норильская 2-я очередь строительства, 1 этап строительства жилой дом №2» (далее – договор).

Согласно пункту 1.1. договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить комплекс работ по изготовлению изделий из алюминиевого профиля и металлических ограждений и монтажу на объекте, в соответствии с согласованной сторонами калькуляцией (приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и выполненные подрядчиком работы на условиях договора. Результатом работ являются работы по изготовлению и монтажу изделий из алюминиевого профиля и металлических изделий (ограждения балконов).

Необходимые для выполнения работ материалы предоставляются подрядчиком (пункт 1.2 договора).

Калькуляция (спецификация) составляется подрядчиком и согласовывается с заказчиком (пункту 1.4 договора).

В пункте 2.1 договора сторонами определены сроки выполнения работ: начало работ - дата подписания договора;  окончание работ - 31 декабря 2018 года.

Согласно пункту 3.1 договора, стоимость работ по договору составляет 17 046 162 руб. 40 коп. (семнадцать миллионов сорок шесть тысяч сто шестьдесят два рубля 40 копеек), в том числе НДС 18 % в сумме 2 600 262 руб. 06 коп. Данная стоимость подлежит уточнению исходя из фактически выполненного объема работ.

В пункте 3.3. договора установлено, что оплата выполненных работ (цены договора) осуществляется по фактически выполненным объемам работ, с момента подписания заказчиком без замечаний формы КС-2, КС-3 и исполнительной документации, снятия всех предписаний выданных заказчиком по ходу строительства.

Из пункта 4.1 договора следует, что заказчик осуществляет оплату работ, предусмотренных договором, поэтапно. Каждый этап работ соответствует объему работ, подлежащих выполнению в одном подъезде. Общее количество этапов - восемь (по количеству подъездов).

Согласно пункту 4.2 договора, платежи производятся заказчиком раздельно по каждому этапу в следующие сроки:

4.1.1.   Аванс в размере 2 000 0000 (два миллиона) рублей в течение 2 (двух) банковских дней со дня выставления счета на оплату;

4.1.2.  Ежемесячно, в срок до 20-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счет-фактуры и подписанных заказчиком без замечаний акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за предыдущий месяц.

4.1.3.   Заказчик производит оплату в соответствии с пунктом 4.1.2. договора за минусом 10 % гарантийного удержание от суммы по КС-2, КС-3 и счет-фактуры за предыдущий месяц. Заказчик резервирует указанные 10 % для обеспечения качества выполненных подрядчиком работ на срок 6 месяцев, исчисляемый с даты получения разрешения на ввод строительного объекта в эксплуатацию. Заказчик имеет право использовать сумму гарантийного удержания на устранение недостатков выполненных работ если подрядчик отказывается либо уклоняется от добровольного устранения выявленных заказчиком недостатков (дефектов) работ, произведенных подрядчиком.

В соответствии с пунктом 5.1 договора, подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, и сдать результат работ на объекте заказчику в установленный договором срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

Согласно пункту 6.1 договора, заказчик обязуется оплачивать выполнение работ подрядчиком в установленном договором порядке.

Исходя из пункта 7.3 договора, по окончанию работ или этапа работ подрядчик составляет и передает заказчику акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). При подписании заказчиком акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), предоставленных и подписанных подрядчиком, работы считаются принятыми, при этом подрядчик также предоставляет исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом и устраняет все замечания выданные заказчиком.

В пункте 9.6 договора сторонами установлено, что при   несоблюдении   заказчиком   предусмотренных договором сроков оплаты работ, заказчик уплачивает подрядчику неустойку из расчета 0,05 % от стоимости не оплаченных работ по договору за каждый день просрочки платежа.

Договор действует с момента его подписания до выполнения сторонами всех предусмотренных в нем обязательств (пункт 12.1 договора).

Пунктами 12.3-12.4 договора сторонами предусмотрено, что возникшие у сторон в результате исполнения договора споры разрешаются в досудебном порядке путем переговоров. Направление письменной претензии обязательно. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее не позднее 15 рабочих дней с даты получения. В случае не разрешения спорной ситуации путем переговоров, либо отказ одной из сторон направлять ответ на претензию спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд Красноярского края.

В подтверждение выполнения работ по договору подряда истцом представлены акты о приемке выполненных работ КС-2: № 1 от 25.11.2018 на сумму 3 550 000 руб., № 2 от 25.12.2018 на сумму 6 510 000 руб., № 2 от 25.01.2019 на сумму 6 986 162,40 руб., а справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: № 1 от 25.11.2018, № 2 от 25.12.2018, № 3 от 25.01.2019 на соответствующие суммы.

Ответчиком произведены частичные оплаты выполненных работ по договору на сумму 7 700 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 961 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000 руб., № 1069 от 17.12.2018 на сумму 1 500 000 руб., № 50 от 22.01.2019 на сумму 2 000 000 руб., № 103 от 31.01.2019 на сумму  700 000 руб., № 293 от 20.03.2019 на сумму 1 500 000 руб.

Как следует из иска, задолженность ответчика перед истцом, с учетом частичной оплаты и гарантийного удержания, составляет 7 641 546 руб. 16 коп. (требование уточнено в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с нарушением сроков оплаты, истец начислил ответчику неустойку в размере 847 008 руб. 94 коп. за период с 21.01.2019 по 11.09.2019 (требование уточнено в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензию, в которой предложил ответчику произвести оплату задолженности в размере 9 346 162,40 руб. по договору от 25.08.2018 № 1-18, неустойки в размере 1 040 946,66 руб. Претензия направлена ответчику 20.06.2019, что подтверждается почтовой квитанцией. Претензия получена ответчиком 24.06.2019, согласно почтовому уведомлению.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком принятых по договору обязательств, истец обратился в суд с требованием о взыскании 7 641 546 руб. 16 коп. задолженности по договору № 1-18 от 25.08.2018, 847 008 руб. 94 коп. за период с 21.01.2019 по 11.09.2019 (требование уточнено в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, в том числе из договоров и иных сделок.

Статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу положений статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Правоотношения сторон возникли из договора № 1-18 от 25.08.2018, являющегося по своей правовой природе договором подряда, и регламентированы нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Факт выполнения истцом работ по договору подряда № 1-18 от 25.08.2018 подтверждается представленными в материалы дела подписанными заказчиком актами о приемке выполненных работ  по форме КС-2: № 1 от 25.11.2018 на сумму 3 550 000 руб., № 2 от 25.12.2018 на сумму 6 510 000 руб., № 2 от 25.01.2019 на сумму 6 986 162,40 руб., а также справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: № 1 от 25.11.2018, № 2 от 25.12.2018, № 3 от 25.01.2019 на соответствующие суммы.

Указанные выше акты подписаны ответчиком без возражений относительно качества и объема выполненных работ. Какие-либо претензии относительно выполненных по договору работ ответчик в адрес истца не направлял. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют. 

Согласно пункту 3.1 договора, стоимость работ по договору составляет 17 046 162 руб. 40 коп. (семнадцать миллионов сорок шесть тысяч сто шестьдесят два рубля 40 копеек), в том числе НДС 18 % в сумме 2 600 262 руб. 06 коп. Данная стоимость подлежит уточнению исходя из фактически выполненного объема работ.

В пункте 3.3. договора установлено, что оплата выполненных работ (цены договора) осуществляется по фактически выполненным объемам работ, с момента подписания заказчиком без замечаний формы КС-2, КС-3 и исполнительной документации, снятия всех предписаний выданных заказчиком по ходу строительства.

Из пункта 4.1 договора следует, что заказчик осуществляет оплату работ, предусмотренных договором, поэтапно. Каждый этап работ соответствует объему работ, подлежащих выполнению в одном подъезде. Общее количество этапов - восемь (по количеству подъездов).

Согласно пункту 4.2 договора, платежи производятся заказчиком раздельно по каждому этапу в следующие сроки:

4.1.1.   Аванс в размере 2 000 0000 (два миллиона) рублей в течение 2 (двух) банковских дней со дня выставления счета на оплату;

4.1.2.  Ежемесячно, в срок до 20-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счет-фактуры и подписанных заказчиком без замечаний акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за предыдущий месяц.

4.1.3.   Заказчик производит оплату в соответствии с пунктом 4.1.2. договора за минусом 10 % гарантийного удержание от суммы по КС-2, КС-3 и счет-фактуры за предыдущий месяц. Заказчик резервирует указанные 10 % для обеспечения качества выполненных подрядчиком работ на срок 6 месяцев, исчисляемый с даты получения разрешения на ввод строительного объекта в эксплуатацию. Заказчик имеет право использовать сумму гарантийного удержания на устранение недостатков выполненных работ если подрядчик отказывается либо уклоняется от добровольного устранения выявленных заказчиком недостатков (дефектов) работ, произведенных подрядчиком.

Ответчиком произведены частичные оплаты выполненных работ по договору на сумму 7 700 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 961 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000 руб., № 1069 от 17.12.2018 на сумму 1 500 000 руб., № 50 от 22.01.2019 на сумму 2 000 000 руб., № 103 от 31.01.2019 на сумму  700 000 руб., № 293 от 20.03.2019 на сумму 1 500 000 руб.

С учетом частичных оплат и гарантийного удержания, истец числит за ответчиком задолженность в размере 7 641 546 руб. 16 коп. 

Судом рассмотрен выполненный истцом расчет задолженности, расчет признан не нарушающим прав ответчика, не противоречащим условиям договора, обстоятельствам и материалам дела. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчик наличие задолженности в указанной сумме не оспорил, доказательств оплаты задолженности ответчиком в материалы дела не представлено. 

Поскольку доказательств своевременной и в полном объеме оплаты выполненных истцом работ в материалах дела не имеется, суд  приходит к выводу, что требование истца о взыскании долга подлежит удовлетворению в заявленном размере 7 641 546 руб. 16 коп.

В связи с нарушением сроков оплаты, истец начислил ответчику неустойку в размере 847 008 руб. 94 коп. за период с 21.01.2019 по 11.09.2019 (требование уточнено в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 9.6 договора сторонами установлено, что при   несоблюдении   заказчиком   предусмотренных договором сроков оплаты работ, заказчик уплачивает подрядчику неустойку из расчета 0,05 % от стоимости не оплаченных работ по договору за каждый день просрочки платежа.

Судом установлен факт нарушения сроков оплаты по договору.

Судом рассмотрен выполненный истцом расчет неустойки и контррасчет ответчика, представленный истцом расчет неустойки проверен судом, установлено, что порядок начисления неустойки определен истцом верно, с учетом условий договора и обязательств дела. 

Размер пени определен в соответствии с достигнутым сторонами соглашением (по правилам статьи 1, пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд исходит из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе.

С учетом изложенного, исковое требование о взыскании с ответчика неустойки подлежат удовлетворению в заявленном размере 847 008 руб. 94 коп., признанном судом обоснованным. 

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

С учетом положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 №46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», принимая во внимание, что истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Енисей-лифтстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АлПластСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 8 488 555 руб. 10 коп., из них: 7 641 546 руб. 16 коп. долга, 847 008 руб. 94 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Енисей-лифтстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 65 443 руб. государственной пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.А. Антропова