АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, 

<

...>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-3883/2025

г. Владивосток

10 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена  02 апреля 2025 года. 

Полный текст решения изготовлен  10 апреля 2025 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Бурова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Ли К.,   

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ДВ"   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 404 731,59 руб., 

при участии в заседании:

стороны не явились, извещены;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ДВ"  обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА"  о взыскании 2 404 731,59 рублей неосновательного обогащения.

Истец, ответчик, надлежащим образом извещенные о месте и времени проведения предварительного судебного заседания, в суд не явились. Предварительное судебное заседание проведено в отсутствие указанных лиц в порядке статьи 136 АПК РФ.

С учётом того, что ответчик, уведомленный о возможности перехода в судебное заседание не заявил возражений относительно рассмотрения дела в его отсутствие, суд в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству.

Исковые требования мотивированы удержанием ответчиком суммы неосвоенного аванса.

Ответчик требования не оспорил, отзыв на иск не представил.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

26.04.2023 между ООО «Строй ДВ» (генподрядчик) и ООО «Технологии отделки и строительства» (ООО «ТОС») (субподрядчик) был заключен договор субподряда N 19-СДВ (далее - Договор).

Ответчик, в соответствии с п. 1.1., 5.1. Договора, обязался в срок до 23.10.2023г. выполнить собственными и (или) привлеченными силами строительно-монтажные и отделочные работы в квартирах корпуса К1 на Объекте: Многоквартирный жилой дом (корпус 1-3) со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой, расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке.

Дополнительным соглашением № 2 от 24.10.2023 г. к Договору продолжительность срока выполнения работ была увеличена до 27.01.2024 г.

Дополнительным соглашением № 3 от 22.01.2024 г. к Договору продолжительность срока выполнения работ была увеличена до 30.04.2024 г.

Дополнительным соглашением № 6 от 10.06.2024 г. к Договору продолжительность срока выполнения работ была увеличена до 30.09.2024 г.

Стоимость выполнения работ по Договору в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 Договору) составила 35 944 500,00 руб. (без НДС).

Дополнительным соглашением № 6 от 10.06.2024 г. к Договору сметная стоимость выполнения работ по Договору была уменьшена до 18 337 550,35 руб. (без НДС).

Согласно п.6.4. Договора, оплата выполненных работ производится ежемесячно в соответствии с локальным сметным расчетом, актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за минусом зачтенного аванса и гарантийного удержания в размере 5 % от общей стоимости предъявленных к приемке работ за отчетный период.

В силу п. 6.6. Договора Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в сумме и сроки, предусмотренные Графиком авансирования.

Согласно Приложению №4 к Договору «График авансирования» Генподрядчик в течение 5 дней с даты подписания Договора и предоставления Субподрядчиком счета, выплачивает Субподрядчику аванс на выполнение работ в сумме 1 000 000 руб. 00 копеек (НДС не предусмотрен), а затем через 30 календарных дней с даты первого платежа выплачивает аванс в размере 1 500 000 руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен).

Дополнительным соглашением №1 от 12.10.2023 г., Дополнительным соглашением № 4 от 25.04.2024 г., Дополнительным соглашением № 5 от 14.05.2024 г. График авансирования был дополнен авансами на 1 000 000 руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен), 500 000 руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен), 500 000 руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен).

Всего Субподрядчику было перечислено авансов на сумму 4 500 000 руб. 00 коп., что подтверждается:

-  платежным поручением №666 от 31.05.2023 г. на оплату аванса по счету № 1 от 24.05.2023 г. на сумму 1 000 000 руб. 00 коп.;

-  платежным поручением №846 от 03.07.2023 г. на оплату аванса по счету № 3 от 28.06.2023 г. на сумму 1 500 000 руб. 00 коп.;

-      платежным поручением №1480 от 13.10.2023 г. на оплату аванса по счету № 9 от 13.10.2023 г. на сумму 1 000 000 руб. 00 коп.;

-      платежным поручением №879 от 27.04.2024 г. на оплату аванса по счету №19 от 26.04.2024 г. на сумму 500 000 руб. 00 коп.;

-      платежным поручением №989 от 21.05.2024 г. на оплату аванса по счету №21 от 14.05.2024 г. на сумму 500 000 руб. 00 коп.

Согласно п. 8.1.1, 8.1.2 Договора стороны осуществляют промежуточную сдачу-приемку работ на основании в порядке, установленном п. 8.2 Договора, и окончательную приемку всех выполненных Субподрядчиком работ по Договору путем подписания Акта приемки выполненных работ по форме, согласованной сторонами в Приложении № 7 к Договору.

Пунктом 8.2 Договора предусмотрено, что в целях промежуточной приемки работ Стороны установили, что отчетным периодом выполнения работ является период с 16 числа предыдущего месяца по 15 число текущего месяца в течение всего срока действия Договора.

В соответствии с п.8.2.1 Договора, Субподрядчик ежемесячно, не позднее 13 числа месяца отчетного периода передает Генподрядчику для подписания и оплаты акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанную Генподрядчиком исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, паспорта, результаты лабораторных Испытаний (при наличии)) по выполненным в отчетном периоде работам.

Согласно п.8.2.2 Договора Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документации отчетного периода проверяет представленные акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, исполнительную документацию по выполненным в отчетном периоде работам, подписывает их либо направляет Субподрядчику мотивированное письменное уведомление об отказе в приемке предъявленных в отчетном периоде работ. Принятыми считаются работы, указанные в подписанном сторонами без замечаний и разногласий в акте приемки выполненных работ по форме КС-2.

Пункт 2.2.7. Договора устанавливает, что надлежащее исполнение Субподрядчиком принятых им обязанностей имущественного либо неимущественного характера по Договору будет обеспечиваться правом Генподрядчика осуществлять при расчетах с Субподрядчиком гарантийное удержание денежных средств в размере 5 (пяти) % от стоимости предъявленных Субподрядчиком работ, указанной в акте приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за соответствующий отчетный период нарастающим итогом в течение всего срока действия Договора, подлежащей выплате Генподрядчиком в пользу Субподрядчика.

В силу абз.8 п.6.6. Договора, зачет суммы авансовых платежей, выплаченных Субподрядчику в качестве предварительной оплаты стоимости работ по Договору, производится путем удержания из суммы выполненных и предъявленных к оплате работ. Минимальная сумма зачета определяется как произведение стоимости выполненных и предъявленных к оплате работ и отношения суммы задолженности Субподрядчика по предварительной оплате, сложившейся на момент расчетов, к оставшейся стоимости работ, подлежащей выполнению до окончания действия Договора. Зачет суммы авансовых платежей производится на дату подписания Генподрядчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. По результату зачета Сторонами подписывается акт зачета авансов.

1) Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 28.04.2023 г. по 15.08.2023 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.08.2023 г. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 15.08.2023 г. на сумму 3 300 592 руб. 10 коп.

Актом зачета авансовых платежей от 15.08.2023 г. за период с 28.04.2023 г. по 15.08.2023 г. Субподрядчику был зачтен аванс в размере 1 250 000 руб. 00 коп. (без НДС), промежуточная оплата работ (с гарантийным удержанием 5%) составила сумму 1 885 562 руб. 49 коп. (без НДС).

Платежным поручением №1155 от 30.08.2023 г. по счету №4 от 28.08.2023 г. Субподрядчику была перечислена оплата выполненных по Договору работ в размере 1 885 562 руб. 49 коп. (без НДС).

2)         Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 16.08.2023 г. по 16.10.2023 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 16.10.2023 г. на сумму2 824 770 руб. 12 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 16.10.2023 г. на сумму 2 824 770 руб. 12 коп.

Актом зачета авансовых платежей от 16.10.2023 г. за период с 16.08.2023 г. по 16.10.2023 г. Субподрядчику был зачтен аванс в размере 650 000 руб. 00 коп. (без НДС), промежуточная оплата работ (с гарантийным удержанием 5%) составила сумму 2 033 531 руб. 61 коп. (без НДС).

Платежным поручением №1559 от 20.10.2023 г. по счету №10 от 20.10.2023 г. Субподрядчику была перечислена оплата выполненных по Договору работ в размере 2 033 531 руб. 61 коп. (без НДС).

3)         Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 17.10.2023 г. по 15.11.2023 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 15.11.2023 г. на сумму890 991 руб. 12 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 15.11.2023 г. на сумму 890 991 руб. 12 коп.

Актом зачета авансовых платежей от 15.11.2023 г. за период с 17.10.2023 г. по 15.11.2023 г. Субподрядчику был зачтен аванс в размере 100 000 руб. 00 коп. (без НДС), промежуточная оплата работ (с гарантийным удержанием 5%) составила сумму 746 441 руб. 56 коп. (без НДС).

Платежным поручением №1778 от 20.11.2023 г. по счету №14 от 19.11.2023 г. Субподрядчику была перечислена оплата выполненных по Договору работ в размере 746 441 руб. 56 коп. (без НДС).

4)         Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 16.11.2023 г. по 15.12.2023 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 15.12.2023 г. на сумму523 143 руб. 14 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 4 от 15.12.2023            г. на сумму 523 143 руб. 14 коп.

Актом зачета авансовых платежей от 15.11.2023 г. за период с 16.11.2023 г. по 15.12.2023 г. Субподрядчику был зачтен аванс в размере 27 126 руб. 34 коп. (без НДС), промежуточная оплата работ (с гарантийным удержанием 5%) составила сумму 469 859 руб. 64 коп. (без НДС).

Платежным поручением №2100 от 28.12.2023 г. по счету №16 от 27.12.2023 г. Субподрядчику была перечислена оплата выполненных по Договору работ в размере 469 859 руб. 64 коп. (без НДС).

5)         Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 16.12.2023 г. по 15.03.2024 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 5 от 15.03.2024 г. на сумму413 977 руб. 18 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 15.03.2024            г. на сумму 413 977 руб. 18 коп.

Актом зачета авансовых платежей от 15.03.2024 г. за период с 16.12.2023 г. по 15.03.2024 г. Субподрядчику был зачтен аванс в размере 21 465 руб. 80 коп. (без НДС), промежуточная оплата работ (с гарантийным удержанием 5%) составила сумму 371 812 руб. 52 коп. (без НДС).

Платежным поручением №639 от 25.03.2024 г. по счету №10 от 21.03.2024 г. Субподрядчику была перечислена оплата выполненных по Договору работ в размере 371 812 руб. 52 коп. (без НДС).

6)         Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 16.03.2024 г. по 15.04.2024 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 6 от 15.04.2024 г. на сумму331 537 руб. 50 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 6 от 15.04.2024 г. на сумму 331 537 руб. 50 коп.

Актом зачета авансовых платежей от 15.04.2024 г. за период с 16.03.2024 г. по 15.04.2024 г. Субподрядчику был зачтен аванс в размере 17 191 руб. 09 коп. (без НДС), промежуточная оплата работ (с гарантийным удержанием 5%) составила сумму 297 769 руб. 53 коп. (без НДС).

Платежным поручением №807 от 18.04.2024 г. по счету №16 от 15.04.2024 г. Субподрядчику была перечислена оплата выполненных по Договору работ в размере 297 769 руб. 53 коп. (без НДС).

7)         Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 16.04.2024 г. по 31.05.2024 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 7 от 31.05.2024 г. на сумму 548 159 руб. 29 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 7 от31.05.2024 г. на сумму 548 159 руб. 29 коп.

Актом зачета авансовых платежей от 31.05.2024 г. за период с 16.04.2024 г. по 31.05.2024 г. Субподрядчику был зачтен аванс в размере 48 241 руб. 62 коп. (без НДС), промежуточная оплата работ (с гарантийным удержанием 5%) составила сумму 472 509 руб. 71 коп. (без НДС).

Платежным поручением №1068 от 31.05.2024 г. по счету №22 от 31.05.2024 г. Субподрядчику была перечислена оплата выполненных по Договору работ в размере 472 509 руб. 71 коп. (без НДС).

8)         Приемка выполненных Субподрядчиком за период с 01.06.2024 г. по 15.08.2024 г. работ подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 15.08.2024 г. на сумму - 629 567 руб. 62 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2№ 8 от 15.08.2024 г. на сумму - 629 567 руб. 62 коп. Гарантийное удержание 5% согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2 № 8 от 15.08.2024 г. составило сумму в размере - 31 478 руб. 38 коп.

Итого общая стоимость работ, выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком по актам о промежуточной приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.08.2023 г., №2 от 16.10.2023 г., №3 от 15.11.2023 г., №4 от 15.12.2023 г., №5 от 15.03.2024 г., №6 от 15.04.2024 г., №7 от 31.05.2024 г., №8 от 15.08.2024 г., составила 8 203 602 руб. 83 коп.

Общая сумма оплаты за выполненные работы, перечисленная Субподрядчику на основании актов о промежуточной приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.08.2023 г., №2 от 16.10.2023 г., №3 от 15.11.2023 г., №4 от 15.12.2023 г., №5 от 15.03.2024 г., №6 от 15.04.2024 г., №7 от 31.05.2024 г., №8 от 15.08.2024 г., составила 6 277 487 руб. 06 коп.

16.08.2024 г. исх. № 1-472/2024 Генподрядчик направил Субподрядчику (вручено нарочно представителю Субподрядчика 20.08.2024 г.) уведомление об отказе от Договора в соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ, в силу которого если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Уведомление об отказе содержало требование предоставить на рассмотрение и утверждение Генподрядчиком акта приемки работ на выполненный объем работ, исполнительную документацию на объем выполненных работ, акт сверки взаиморасчетов, отчет об использовании давальческих материалов, а также полученную в рамках Договора проектную и рабочую документацию на Объект и неиспользованные давальческие материалы.

В соответствии с п. 2.2.6 Договора отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке производится путем направления субподрядчику письменного уведомления в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты предполагаемого отказа от Договора. Договор прекратил свое действие 30.08.2024 г. по истечении 10 календарных дней со дня вручения уведомления об отказе от Договора представителю Субподрядчика 20.08.2024 г.

12.09.2024 г. между Генподрядчиком и Субподрядчиком был подписан акт приемки выполненных работ по Договору (по форме Приложение № 7 к Договору), согласно пункту 9 которого к возврату Генподрядчику причитается сумма неотработанного Субподрядчиком аванса в размере 2 573 884 руб. 24 коп.

В соответствии с заключенным между Генподрядчиком и Субподрядчиком Договором субподряда №19-СДВ/МОП от «26» апреля 2023 г. сторонами был подписан акт приемки выполненных работ от «16» сентября 2024 г. об окончательной приемке всех выполненных Субподрядчиком работ по указанному договору, в соответствии с п. 8 указанного акта к получению Субподрядчиком подлежала сумма в размере 169 152 руб. 65 коп. Таким образом, стороны подтвердили наличие у Генподрядчика по состоянию на 16.09.2024 г. задолженности перед Субподрядчиком в размере 169 152 руб. 65 коп. по Договору субподряда №19-СДВ/МОП от «26» апреля 2023 г.

18.09.2024 г. между Генподрядчиком и Субподрядчиком было заключено соглашение о зачете взаимных требований, согласно пунктам 4, 5 которого после проведения зачета задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком по Договору субподряда № 19-СДВ/МОП от «26» апреля 2023 г. была погашена, а задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по Договору уменьшилась на сумму взаимозачета 169 152 руб. 65 коп (НДС не облагается) и составила 2 404 731 руб. 59 коп.

22.10.2024 г. сторонами был подписан акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 г. по 22.10.2024 г., в соответствии с которым за Субподрядчиком числится задолженность в размере 2 404 731 руб. 59 коп.

Таким образом, подписание Сторонами акта приемки выполненных работ от 12.09.2024 г. по Договору, соглашения о зачете взаимных требований от 18.09.2024 г., акта сверки взаимных расчетов от 22.10.2024 г. подтверждает признание Субподрядчиком своего обязательства по возврату Генподрядчику суммы неотработанного аванса по Договору в размере 2 404 731 руб. 59 коп.

Согласно п.8.8. Договора, в случае если сумма авансовых платежей будет превышать стоимость фактически выполненных и принятых работ, то Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования от Генподрядчика вернуть разницу между суммой авансовых платежей (предоплатой) и стоимостью принятых в соответствии с Договором фактически выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика».

Согласно п. 15.2 Договора, претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения адресатом.

27.11.2024 г. исх. №1-580/2024 Генподрядчиком была направлена претензия, содержащая требование возврата в течение 5 (пяти) банковских дней суммы неотработанного аванса по Договору в размере 2 404 731 руб. 59 коп. с указанием банковских реквизитов Генподрядчика для перечисления указанных средств. Согласно отчету об отслеживания отправления с почтовым идентификатором, претензия была вручена адресату 16.12.2024 г.

Поскольку денежные средства в сумме 2 404 731,59 рублей, не возращены, истец соблюдая претензионный порядок обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно п. п. 1,2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Из смысла данной правовой нормы вытекает, что для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения или сбережения обществом имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер.

Пункт 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает применение правил о неосновательном обогащении к требованиям одной стороны обязательства к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Судом установлено, что договор N 19-СДВ от 26.04.2023 между сторонами расторгнут ввиду отказа заказчика от его исполнения.

Материалами дела подтверждается задолженность ответчика перед истцом в сумме 2 404 731,59 руб., которые ответчиком не возвращены.

Принимая во внимание, что обязательства сторон прекращены в связи с расторжением договора, а ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств возврата указанной суммы, суд считает обоснованным требование истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в сумме 2 404 731,59 рублей.

Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА" в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ДВ" 2404731,59 руб. неосновательного обогащения, 97142,00 руб. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

            Судья                                                                                      Буров А.В.