Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«27»  ноября   2019 г.

                                 Дело № А12-37866/2019

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  27 ноября     2019 года.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией Александровой,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Нижневолжскстройсервис» - ФИО1, доверенность от 25.10.2019; ФИО2, доверенность от 26.08.2019;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Нижневолжскстройсервис» (ИНН 

<

***>,  ОГРН  

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «АйсБи Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности и неустойки, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Нижневолжскстройсервис» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области  с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «АйсБи Групп»  о взыскании задолженности в виде неотработанного аванса по договору от 14.06.2019 № 36-19 субподряда в размере 7 300 000 рублей, неустойки за период с 21.06.2019 по 08.10.2019 в размере 1 133 000 рублей,  задолженности в виде неотработанного аванса по  договору от 14.06.2019 № 37-19 субподряда в размере 9 200 000 рублей, неустойки за период с 25.06.2019 по 08.10.2019 в размере 975 200 рублей. 

В судебном заседании  представители  истца настаивали на удовлетворении  исковых требований по доводам, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик   явку  своего представителя  в судебное заседание  не обеспечил, о времени и месте рассмотрения  дела считается извещенным надлежащим образом. 

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

Как следует из документов, представленных в материалы дела, ООО «Нижневолжскстройсервис» (генподрядчик) и ООО «АйсБи Групп» (субподрядчик) заключен договор субподряда  от 14.06.2019 № 36-19, согласно  условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный договором срок собственными силами выполнить комплекс работ по: стабилизации грунта, нижнего слоя на глубину 300 мм. - с добавлением извести 3 процентов, подтверждением расчетных характеристик, на упругий прогиб (Еупр) 100 Мпа; разравнивании стабилизированного грунта с уплотнением катком; лабораторным испытаниям стабилизированного грунта, нижнего слоя; стабилизации грунта, верхнего слоя на глубину 300 мм. - с добавлением цемента 6 процентов, подтверждением расчетных характеристик, на упругий прогиб (Еупр) 250 МПа и нивелированием отметок до проектных значений, под устройство асфальтового покрытия и финишное уплотнение; лабораторным испытаниям стабилизированного грунта, верхнего слоя; геодезическому сопровождению выполняемых работ.

Местом выполнения работ по договору является: «Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая их АЗС и торгового центра с пунктом питания,  на земельном участке 53:12:0433003:130 площадью 52151 кв.м. по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г.п. Окуловское, км. 423 скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург», право».

Согласно пункту 5.2  вышеупомянутого договора субподрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

при условии передачи генподрядчиком подготовленной площадки с вертикальной планировкой в проектных геодезических отметках, первого слоя, стабилизации - не позднее 20.06.2019;

мобилизация техники и персонала субподрядчика на объект, в течение шести календарных дней после получения аванса, предусмотренного пунктом 6.1.1 договора;

стабилизация нижнего слоя известью (300 мм.)  21.06.2019  - 28.06.2019;

лабораторные испытания готового стабилизированного слоя  28.06.2019 –10.07.2019;

стабилизация верхнего слоя цементом (300 мм.)  01.07.2019 -10.07.2019;

лабораторные испытания готового стабилизированного слоя 10.07.2019- 15.07.2019.

В соответствии  с пунктом 2.1 договора цена договора составляет 950 руб./м2, в том числе  НДС. Объем работ устанавливается на основании фактически выполненных субподрядчиком (в пределах объемов согласно проектной документации) и принятых генподрядчиком работ, на основании актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).

Согласно разделу 6 договора генподрядчик производит расчеты по настоящему договору путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, в следующем порядке: аванс в размере 1 100 000 рублей, в том числе  НДС, оплачивается в течение 2 дней с даты подписания договора сторонами, не позднее 17.06.2019. Аванс в размере 3 200 000 рублей, в том числе  НДС, оплачивается не позднее 19.06.2019, при условии мобилизации техники и персонала субподрядчика на объект. Аванс в размере 3 000 000 рублей,  в том числе НДС,  оплачивается не позднее 24.06.2019. Аванс в размере 3 000 000 рублей, том числе  НДС, оплачивается не позднее 28.06.2019. Окончательный расчет - по итогам выполнения работ в течение 20 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-2, № КС-3), а также предоставления субподрядчиком исполнительной документации, справки о выполнении ТУ и счета-фактуры по форме и в сроки, установленные действующим законодательством.

В соответствии с разделом № 3 договора субподрядчик обязуется предоставить генподрядчику заверенные копии свидетельств о допуске СРО на выполнение работ,  необходимых для исполнения настоящего договора. Выполнить своими силами работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы генподрядчику. Производить работы в полном соответствии с строительными нормами и правилами, в том числе положениями СП 48.13330.2011 Организация строительства. Своевременно и точно выполнять письменные предписания (указания) генподрядчика, относительно порядка и хода выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность субподрядчика. Немедленно письменно предупредить и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: возможных неблагоприятных для генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; отклонений от технологических и других условий и параметров, предусмотренных рабочей документацией, а также иных, не зависящих от субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок; обстоятельств, могущих повлечь за собой возникновение несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозу возникновения террористических актов, хищений. Вести исполнительную документацию в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства и РД-11-02-2006 требования к составу и порядку ведения исполнительной документации. Перед началом выполнения работ субподрядчик обязуется предоставить генподрядчику список работников своей организации, привлеченных для выполнения работ по настоящему договору, копии их удостоверений и протоколов проверки знаний по охране труда, приказы на ответственных лиц, а также по всем специальным видам работ при необходимости. Своевременно вызывать представителей генподрядчика для оформления актов на скрытые работы в соответствии с РД 11-02-2006 и в случае возникновения дополнительных работ. В течение 5 дней после окончания работ представить генподрядчику для подписания надлежащим образом оформленные акт о приеме выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, формы КС-2, КС-3. Представлять генподрядчику счет-фактуру по форме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, и возместить генподрядчику ущерб, понесенный им в результате невыполнения субподрядчиком обязательств настоящего пункта договора. Немедленно извещать генподрядчика о всяком повреждении имущества, аварии или ином событии на объекте генподрядчика. Своевременно предпринимать все возможные меры по предупреждению, локализации и ликвидации последствий таких ситуаций. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, представителей медицинской службы. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ по объекту и подписания акта выполненных работ освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, и неиспользованных материалов. Незамедлительно информировать генподрядчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, происшедших на объекте генподрядчика. Обеспечить сохранность подземных и наземных коммуникаций, проходящих в зоне проведения работ, и нести материальную ответственность за ущерб, причиненный субподрядчиком генподрядчику и третьим лицам.

Согласно пункту 13.2.2 договора субподряда от 14.06.2019 № 36-19 за срыв сроков окончания работ по вине субподрядчика субподрядчик уплачивает генподрядчику пени в размере 0,1  процента  от полной стоимости работ, выполняемых субподрядчиком по настоящему договору, за каждый календарный день задержки.

Во исполнение обязательств по договору от 14.06.2019 № 36-19 ООО «Нижневолжскстройсервис» перечислило в адрес ООО «АйсБи Групп» в качестве авансовых платежей платежным  поручением № 4991 от 17.06.2019  - 1 100 000 рублей, платежным поручением № 5117 от 19.06.2019 -  3 200 000 рублей, платежным поручением № 6217 от 23.07.2019 - 3 000 000 рублей.

Также ООО «Нижневолжскстройсервис» (генподрядчи) и ООО «АйсБи Групп» (субподрядчик) заключен договор субподряда от 14.06.2019 № 37-19, согласно  условиям которого  генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный договором срок собственными силами выполнить комплекс работ по: стабилизации грунта, нижнего слоя на глубину 300 мм. с добавлением извести 3 процентов, подтверждением расчетных характеристик, на упругий прогиб (Еупр) 100 Мпа; разравнивании стабилизированного грунта с уплотнением катком; лабораторным испытаниям стабилизированного грунта, нижнего слоя; стабилизации грунта, верхнего слоя на глубину 300 мм. - с добавлением цемента 6 процентов, подтверждением расчетных характеристик, на упругий прогиб (Еупр) 250 МПа и нивелированием отметок до проектных значений, под устройство асфальтового покрытия и финишное уплотнение; лабораторным испытаниям стабилизированного грунта, верхнего слоя; геодезическому сопровождению выполняемых работ.

Местом выполнения работ по договору от 14.06.2019 № 37-19 является: «Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая их АЗС и торгового центра с пунктом питания, на земельном участке 53:12:0433003:129 площадью 32500 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г.п. Окуловское, км. 423 скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург», лево».

Согласно пункту 5.2 договора субподрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в следующие сроки:

при условии передачи генподрядчиком подготовленной площадки, с вертикальной планировкой в проектных геодезических отметках, первого слоя, стабилизации - не позднее 24.06.2019;

стабилизация нижнего слоя известью (300 мм.)  25.06.2019  - 03.07.2019;

лабораторные испытания готового стабилизированного слоя 03.07.2019 -05.07.2019;

стабилизация верхнего слоя цементом (300 мм.)  06.07.2019 -15.07.2019;

лабораторные испытания готового стабилизированного слоя 15.07.2019-16.07.2019.

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена договора составляет 950 руб./м2, в том числе  НДС. Объем работ устанавливается на основании фактически выполненных субподрядчиком (в пределах объемов согласно проектной документации) и принятых генподрядчиком работ, на основании актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).

Согласно разделу № 6 договора генподрядчик производит расчеты по настоящему договору путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в следующем порядке: аванс в размере 3 200 000 рублей, в том числе  НДС, оплачивается не позднее 19.06.2019. Аванс в размере 3 000 000 рублей, в том числе  НДС, оплачивается не позднее 28.06.2019,  при условии мобилизации техники и персонала субподрядчика на объект. Аванс в размере 3 000 000 рублей, в том числе  НДС, оплачивается не позднее 04.07.2019. Окончательный расчет - по итогам выполнения работ в течение 20 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-2, № КС-3), а также предоставления субподрядчиком исполнительной документации, справки о выполнении ТУ и счета-фактуры по форме и в сроки, установленные действующим законодательством.

Согласно пункту 13.2.2 договора субподряда от 14.06.2019  № 37-19 за срыв сроков окончания работ по вине субподрядчика субподрядчик уплачивает генподрядчику пени в размере 0,1 процента  от полной стоимости работ, выполняемых субподрядчиком по настоящему договору, за каждый календарный день задержки.

Во исполнение договора ООО «Нижневолжскстройсервис» перечислило ООО «АйсБи Групп» платежным поручением № 5116 от 19.06.2019 -  3 200 000 рублей, платежным поручением № 5607 от 07.07.2019 -  6 000 000 рублей.

ООО «Нижневолжскстройсервис» в связи с нарушением субподрядчиком сроков выполнения работ направлено письмо от 22.08.2019 № 22-19 с просьбой до 26.08.2019 завершить работы по стабилизации нижнего слоя грунта по двум объектам по  договорам  от 14.06.2019 № 37-19, 37-19, а именно: стабилизация грунта, нижнего слоя на глубину 300 мм. с добавлением извести 3 процента,  подтверждением расчетных характеристик, на упругий прогиб (Еупр) 100 Мпа; разравнивание стабилизированного грунта с уплотнением катком; лабораторным испытаниям стабилизированного грунта, нижнего слоя, стабилизации грунта, верхнего слоя на глубину 300 мм. - с добавлением цемента 6 процентов, подтверждением расчетных характеристик, на упругий прогиб (Еупр) 250 МПа и нивелированием отметок до проектных значений, под устройство асфальтового покрытия и финишное уплотнение; с обязательным строгим соблюдением действующих нормативных документов СП 78.13330.2012, ОДМ 218.2.063-2015, также технологии производства работ и предоставить отчетные документы до 27.08.2019, либо вернуть неотработанный оплаченный аванс в сумме 16 500 000  до 27.08.2019.

Однако ответ на указанное письмо не поступил, работы не выполнены, отчетность не представлена, денежные средства в установленные       сроки не возвращены.

ООО «Нижневолжскстройсервис» посредством почтовой связи направило в адрес ООО «АйсБи Групп» 04.09.2019  претензию, которой уведомило  субподрядчика о расторжении в одностороннем порядке договоров  от 14.06.2019 № 36-19, № 37-19, с требованием в течение 30 календарных дней с момента получения настоящей претензии возвратить уплаченный по договорам аванс в  размере 16 500 000  рублей.

Указанная претензия возвращена  ООО «Нижневолжскстройсервис» с отметкой почты  об  истечении срока хранения.

Поскольку ООО «АйсБи Групп» указанные требования не удовлетворило, ООО «Нижневолжскстройсервис» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 708 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В пункте 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (пункт 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 453 Гражданского кодекс Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (пункт 2); в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (абзац второй пункта 4).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого кодекса.

Из материалов дела следует и судом установлено, что  в сроки, предусмотренные договорами от 14.06.2019 № 36-19, № 37-19,  ответчик работы не выполнил.

С учетом изложенного  суд  пришел к выводу о законности одностороннего отказа подрядчика от договоров  субподряда.

Как установлено судом,  претензия от 02.09.2019 с уведомлением о расторжении договоров  в адрес ООО «АйсБи Групп» поступило, однако получено не было, о чем свидетельствуют отметки о неудачной попытке вручения от 09.09.2019 согласно распечатке с официального сайта ФГУП «Почта России».

Поскольку ООО «АйсБи Групп»  несет ответственность за неполучение юридически значимых сообщений, суд пришел к выводу о том, что отказ от исполнения договоров субподряда от 14.06.2019 № 36-19, № 37-19 следует признать полученным  ответчиком 09.09.2019,  в связи с чем  спорные договоры считаются  расторгнутыми в одностороннем порядке с 08.10.2019.

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства встречного исполнения обязательств по договорам субподряда со стороны ответчика, с расторжением договоров у ответчика отпали правовые основания для удержания денежных средств, перечисленных истцом в виде аванса в счет исполнения договоров. Право сохранить за собой полученные платежи с этого момента прекратилось и у ответчика возникло обязательство по их возврату истцу.

Доказательств возврата суммы  неотработанного аванса в размере 16 500 000  рублей, либо доказательств выполнения работ на указанную сумму ответчиком не представлено, возражения на иск не заявлены.

При таких обстоятельствах исковые требования истца в части взыскания суммы неотработанного аванса подлежат удовлетворению в заявленной сумме 16 500 000  рублей.

Истцом также начислена и предъявлена ко взысканию с ответчика неустойка за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренная пунктом 13.2.2 спорных договоров.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с положениями статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Из материалов дела видно, что по договорам от 14.06.2019 № 36-19, № 37-19  субподрядчик нарушил сроки  выполнения  работ.

Согласно расчетам истца неустойка за просрочку исполнения субподрядчиком обязательств по договору  от 14.06.2019 № 36-19 за период с 21.06.2019  по 08.10.2019  (дата расторжения договора субподряда) составила 1 133 000 рублей,  неустойка за просрочку исполнения субподрядчиком обязательств по договору  от 14.06.2019 № 37-19 за период с 25.06.2019  по 08.10.2019  (дата расторжения договора субподряда) составила 975 200 рублей.

Проверив составленные истцом расчеты неустойки за просрочку выполнения работ, суд признает  их  верными.

В соответствии с частью 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (часть 3 указанной статьи).

Обстоятельств непреодолимой силы, которые могли бы служить основанием для освобождения подрядчика от ответственности в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства оплаты неустойки не представлено, ходатайства об уменьшении суммы санкций на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено.

Таким образом, исковые требования истца в части взыскания с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам подлежат удовлетворению в заявленном размере.

С учетом вышеизложенного, с ООО «АйсБи Групп» в пользу ООО  «Нижневолжскстройсервис»  подлежит взысканию  задолженность по договору от 14.06.2019 № 36-19 субподряда в размере 7 300 000 рублей, неустойка за период с 21.06.2019 по 08.10.2019 в размере 1 133 000 рублей,  задолженность по  договору от 14.06.2019 № 37-19 субподряда в размере 9 200 000 рублей, неустойка за период с 25.06.2019 по 08.10.2019 в размере 975 200 рублей.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АйсБи Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нижневолжскстройсервис» (ИНН 

<

***>,  ОГРН  

<

***>) задолженность по договору от 14.06.2019 № 36-19 субподряда в размере 7 300 000 рублей, неустойку за период с 21.06.2019 по 08.10.2019 в размере 1 133 000 рублей,  задолженность по  договору от 14.06.2019 № 37-19 субподряда в размере 9 200 000 рублей, неустойку за период с 25.06.2019 по 08.10.2019 в размере 975 200 рублей,  всего 18 608 200 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 116 041 рубля.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

СУДЬЯ                                                                                                                Е.В. Пономарева