Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А58-10314/2019

26 ноября 2019 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т. С. рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Хэппи ФИО1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 581 080 рублей,

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, Администрация муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

без вызова лиц, участвующих в деле,  

 

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" обратилась в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Хэппи ФИО1" о взыскании 581 080 руб. неустойки за период с 01.10.2018 по 19.07.2019 за ненадлежащее исполнение обязательств по договору от 26.07.2018 № 316/ЦФ целевого финансирования (пожертвования) (с элементами договора поставки с условием о монтаже).

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 10.10.2019 к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена Администрация муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 10.10.2019 исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощённого производства без вызова сторон в соответствии со ст.228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судом предложено истцу в срок до 31.10.2019 представить доказательства получения ответчиком копии искового заявления и приложенных к нему документов; доказательства направления (вручения) копии искового заявления третьему лицу.

Судом предложено ответчику в срок до 31.10.2019 представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов, в случае оплаты, доказательства оплаты задолженности.

Третьему лицу предложено судом в срок до 31.10.2019 представить мотивированный нормами права отзыв на исковое заявление, доказательства его направления сторонам.

Судом установлен лицам, участвующим в деле, срок для обмена дополнительными документами, содержащими объяснения по существу исковых требований и возражений в обоснование своей позиции и представления их в суд в срок до 22.11.2019.

Информация о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства опубликована на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 11.10.2019.

Определение от 10.10.2019 получено истцом 18.10.2019, что следует из сведений, размещенных на официальном сайте Почта России по веб-адресу: https://www.pochta.ru,  почтовый идентификатор 67799940101315 и поступивших в суд 23.10.2019 дополнительных доказательств во исполнение определения суда от 10.10.2019.

Определение от 10.10.2019 получено ответчиком 18.10.2019 по сведениям, размещенным на официальном сайте Почта России по веб-адресу: https://www.pochta.ru,  почтовый идентификатор 6779990101308 и поступившего в арбитражный суд 31.10.2019 отзыва на исковое заявление.

Определение от 10.10.2019 получено третьим лицом 25.10.2019 по сведениям, размещенным на официальном сайте Почта России по веб-адресу: https://www.pochta.ru,  почтовый идентификатор 67799940101292.

Третье лицо отзыв на исковое заявление не представило.

Резолютивная часть решения принята 25.11.2019. 

В арбитражный суд 26.11.2019 поступило заявление ответчика об изготовлении мотивированного решения.

В соответствии с ч.2 ст.229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ, вступившего в законную силу с 01.10.2019, по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

При рассмотрении настоящего дела судом установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

По условиям договора от 26.07.2018 №316/ЦФ целевого финансирования (пожертвования) с элементами договора поставки с условием монтажа между истцом (жертвователь), ответчиком (поставщик) и третьим лицом (получатель) жертвователь производит целевое финансирование (пожертвование) получателю путем оплаты поставки, монтажа, установки покрытия из искусственной травы и уличных тренажеров согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1), поставщик обязуется поставить спортивное оборудование надлежащего качества согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1), по адресу получателя: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в срок до 25.09.2018, выполнить работы по монтажу, установке спортивного оборудования надлежащего качества в срок до 30.09.2018 и сдать результат работ получателю по акту приема-передачи выполненных работ по монтажу и установке спортивного оборудования, являющейся приложением №3 к договору и его неотъемлемой частью, обеспечить хранение спортивного оборудования до дня передачи спортивного оборудования получателю, получатель обязуется подготовить территорию (основание) для монтажа спортивного оборудования и известить поставщика и жертвователя о готовности территории.

Общая сумма целевого финансирования согласно п.2.1 договора составляет 1 990 000 руб., в том числе НДС и складывается из цены спортивного оборудования, цены поставки и работ по монтажу оборудования.

На основании п.4.1 договора поставщик обязался в срок до 25.09.2018 поставить по адресу получателя: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, спортивное оборудование надлежащего качества согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1), в течение 3 рабочих дней со дня поставки оборудования известить (уведомить) жертвователя в письменной форме с приложением заверенной копии акта приема-передачи спортивного оборудования и акта приема-передачи выполненных работ по монтажу и установке оборудования, в день поставки оборудования в месте нахождения получателя передать оборудование получателю по акту приема-передачи спортивного оборудования (приложение №2), в срок до 30.09.2018 выполнить работы по монтажу оборудования надлежащего качества по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...> собственными силами и средствами в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами, по окончании работ по монтажу передать получателю результат работ по акту приема-передачи выполненных работ (приложение №3).

Как следует из акта приема-передачи спортивного оборудования от 11.01.2019, подписанного между ответчиком и третьим лицом, общая стоимость оборудования с учетом доставки составляет 1 449 470 руб., в том числе НДС.

На основании актов от 19.07.2019 приема-передачи выполненных работ, подписанных между ответчиком и третьим лицом, передано спортивное оборудование, приняты работы стоимостью 1 990 000 руб.

Согласно п.8.2 договора в случаях несвоевременного выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных п.4.1 договора, поставщик несет ответственность в виду уплаты жертвователю пени в размере 0,1% от общей суммы целевого финансирования по договору за каждый день просрочки.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по поставке товара, выполнения работ явилось основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии с п.7.4 договора в случае отсутствия урегулирования разногласий в претензионном порядке, также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.7.3 договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством.

Ответчик иск не признает, в отзыве на исковое заявление указал, что поскольку работы по подготовке территории (основания) были завершены Администрацией МО «Поселок Айхал» 14.07.2019, работы по монтажу спортивного оборудования должны быть завершены не позднее 19.07.2019, в связи с чем полагает, что просрочка исполнения обязательства не допущена.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (п.2 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Расчет неустойки истцом произведен на основании п.4.1 договора от 26.07.2018 №316/ЦФ целевого финансирования (пожертвования) с элементами договора поставки с условием монтажа за период с 01.10.2018 по 19.07.2019.

Как согласовано в подпунктах 4.1.1, 4.1.5 договора, поставщик обязан в срок до 25.09.2018 поставить по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, спортивное оборудование надлежащего качества согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1), в срок до 30.09.2018 выполнить работы по монтажу спортивного оборудования.

Акт приема-передачи спортивного оборудования подписан сторонами 11.01.2019.

Акты приема-передачи выполненных работ по монтажу и установке спортивного оборудования подписаны сторонами 19.07.2019.

Согласно письму Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района         РС (Я) от 11.07.2019 №2162 в адрес общества, администрация как получатель спортивного оборудования согласно договору от 26.07.2018 №316/ЦФ просил продлить срок установки до 31.07.2019 в связи с неподготовленным основанием.

В соответствии с п.5.1 вышеуказанного договора Администрация МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) как получатель была обязана в течение 30 календарных дней со дня получения от поставщика информации или документов, предусмотренных пп.4.1.18 настоящего договора, подготовить сухую территорию (основание) под монтаж спортивного оборудования в соответствии с техническими и иными требованиями.

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности по общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (п.1 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В то же время п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации из данного правила установлено исключение в отношении лиц, действующих в рамках осуществления предпринимательской деятельности. Указанные лица несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства при любых обстоятельствах, за исключением случаев, когда надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Поскольку монтаж оборудования ответчиком произведен с просрочкой по вине получателя оборудования, расчет неустойки следует произвести с 01.10.2018 по 11.07.2019:

Расчёт неустойки, возникшей с 01.10.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 990 000,00

01.10.2018

11.07.2019

284

1 990 000,00 ? 284 ? 0.1%

565 160,00 р.

Итого:

565 160,00 руб.

Сумма неустойки: 565 160,00 руб.

Доказательств, что просрочка поставки спортивного оборудования 11.01.2019 вместо установленного пп.1.1.2 договора 25.09.2018 возникло по вине других лиц либо вследствие непреодолимой силы, ответчик суду не представил.

В материалах дела отсутствуют доказательства, что истец извещался о ходе исполнения договора в соответствии с пп.4.1.9 договора. Ответчиком также не представлены доказательства неоднократных запросов в адрес третьего лица как получателя оборудования о сроках завершения работ по подготовке территории (основания).

Согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При подаче иска истцом платежным поручением от 01.10.2019 №1986 произведена уплата государственной пошлины в сумме 14 622 руб.

С учетом результатов рассмотрения дела, на основании абзаца второго ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1.                  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Хэппи ФИО1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Некоммерческой организации "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку 565 160 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины 14 221 руб.

2.                  В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

3.                  Решение подлежит немедленному исполнению.

4.                  На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд  в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

 

Судья                                                                                                           Т. С. Шамаева